5094_348884 

Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-11502/2019

г.Липецк

21 января 2020 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леликовой О.И.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

муниципального образования Усманский муниципальный район Липецкой области  Российской Федерации в лице администрации Усманского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Центрстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность № 01-38/2074 от 13.12.2019, от ответчика – ФИО2, директора, решение № 10 от 08.04.2015, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Центрстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения  суда в законную силу безвозмездно устранить следующие недостатки в  выполненных работах по капитальному ремонту здания администрации  Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации по  

муниципальному контракту № 0146300004217000089-0218379-01 от 10.07.2017, а  именно:  

- множественные дефекты в цокольной части здания вплоть до локальных  разрушений с выпадением плитки из поля облицовки по периметру фасада и  полного разрушения бокового фасада основного здания;  

- множественные разрушения покрытия фасада по комплексу изменения  декоративных и защитных свойств (цвет покрытия фасада плохо различим или  практически неразличим, растрескивание, отслаивание шпатлевочных слоев);  

- неровности и ненормативные отклонения от горизонтали и вертикали  покрытия фасадов путем замены покраски фасада на площади 1576,5 кв.м.  перхлорвиниловой краской с подготовкой поверхности (очистка поверхности,  ремонт штукатурки, огрунтовка, шпатлевка, окраска), замены облицовки цоколя из  керамической фасадной плитки толщиной 9 мм на площади 130,6 кв.м. с  устройством подготовительных работ (отбивка плитки, снятие металлической  сетки, обеспыливание, устройство основания под штукатурку из металлической  сетки, облицовка цоколя плиткой).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центрстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

 На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Липецкой области в месячный срок со дня принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.В.Канаева