АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-7614/2019

г. Уфа

24 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 17  июня 2019 года

Полный текст решения изготовлен 24 июня 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Халиковой Э.Х., рассмотрев дело по иску

ООО "ЭСН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к АО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

О  взыскании  4 635 563 руб.24 коп.

при участии:

от ответчика –  ФИО1 по доверенности № 10-19-06 от 09.01.2019 г., 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецналадка" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Акционерному обществу "Транснефть - Урал" (далее – ответчик) о взыскании долга за выполненные по контрактам №ТУР-21-46-16-1603 от 11.06.2016г., №ТУР-21-46-15-3103 от 13.11.2015г., №ТУР-21-46-16-2525 от 17.09.2016г., №ТУР-21-46-16-2526 от 17.09.2016г., №ТУР-21-46-17-2774 от 29.09.2017г. в сумме 4 414 822 руб. 15 коп., неустойки  в сумме 220 741 руб. 09 коп. за период с 13.03.2017г. по 10.12.2018г.

Заявлением, поступившим в суд 03.06.2019г., истец уточнил исковые требования в связи с оплатой суммы основного долга, просил взыскать неустойку в размере 220 741 руб. 09 коп. Уточнение  судом рассмотрено, принято в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено по уточненным исковым требованиям. Определением Арбитражного суда производство по делу в части взыскания основного долга в размере 4 414 822 руб. прекращено

Ответчик в представленном отзыве исковые требования оспорил, в судебном заседании представитель ответчика доводы отзыва поддержал, указал, что сроки оплаты с учетом условий, установленных контрактом, не нарушены.

Истцом явка представителя в судебное заседание не обеспечена, извещен надлежаще путем направления копии определения суда заказным письмом, которые получено адресатом, что подтверждается уведомлениями с отметкой о вручении. Кроме того, информация о времени и месте рассмотрения дела размещена в автоматизированной информационной системе «Картотека арбитражных дел» на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Дело рассмотрено в соответствии с ч. 3 и 5 ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещенных представителей истца.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

11 июня 2016 года между  АО «Транснефть-Урал» (заказчик) и ООО "ЭСН" (подрядчик) заключен контракт № ТУР-21-46-16-1603 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам Плана ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть-Урал» 2016 (лот 104-УСН/ТПР/3-08.2016 Система обнаружения утечек МН) 

Согласно пункта 6.5.3. Контракта, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком осуществляется Заказчиком в течение 45 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями сторон документов, поименованных в п. 6.5.3. Контракта.

Пунктом 6.5.2 контракта предусмотрено удержание Заказчиком 5% от стоимости выполненных и принятых работ в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, в том числе на гарантийный период. Согласно п. 28.4 продолжительность гарантийного срока на результат работ, выполняемых по контракту составляет 2 (два) года от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (формаКС-14).

13 ноября 2015 года между  АО «Транснефть-Урал» (заказчик) и ООО "ЭСН" (подрядчик) заключен контракт № ТУР-21-46-15-3103 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по Объекту Плана ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть-Урал» 2016 (лот Ж06/ОПП/УКС/ТПР «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах») 

Согласно пункта 4.10 Контракта, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями сторон документов, поименованных в п. 4.10. Контракта.

По  акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2) №1 от 25.11.2016 года и справку о стоимости работ №1 от 25.11.2016 г. (форма КС-3) ответчиком приняты работы на общую сумму 2 232 732,01 руб.

17 сентября 2016 года между  АО «Транснефть-Урал» (заказчик) и ООО "ЭСН" (подрядчик) заключен контракт № ТУР-21-46-16-2525 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции , программы капитального и текущего ремонта по Объекту Плана ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть-Урал» 2017 (лот №25-ТУР/ТПР/5-02.2017 «Техническое перевооружение МНА».

Согласно пункта 4.10 Контракта, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком осуществляется Заказчиком в течение 45 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями сторон документов, поименованных в п. 4.10. Контракта.

По акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 5 от 25.01.2018 года и справке о стоимости работ (форма №КС-3) №5 от 25.01.2018 г. истцом выполнены работы на общую сумму 2 444 627,09 руб. 

29 сентября 2017 года между  АО «Транснефть-Урал» (заказчик) и ООО "ЭСН" (подрядчик) заключен контракт №ТУР-21-46-17-2774 от 29.09.2017 г. на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по Объекту Плана ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть-Урал» 2017 (лот №КР-002-21-43 «Резервуар РВСП - 20000 №5 ЛПДС «Калтасы» ФИО2. Капитальный ремонт» 

Согласно пункта 6.5.3. Контракта, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком осуществляется Заказчиком в течение 45 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями сторон документов, поименованных в п. 6.5.3. Контракта.

Пунктом 6.5.6 контракта предусмотрено удержание Заказчиком 5% от стоимости выполненных и принятых работ в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, в том числе на гарантийный период. 

Согласно п. 28.4. продолжительность гарантийного срока на результат работ, выполняемых по контракту составляет 2 (два) года от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14).

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 20.11.2017 года и справке о стоимости работ № 1 от 20.11.2017 г. истцом выполнены работы на сумму 276839,80 руб. 

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах подряда.

Согласно п. 1 ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 709 Кодекса в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 Кодекса.

В соответствии с ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Исследуемые контракты №ТУР-21-46-16-1603 от 11.06.2016 г., №ТУР-21-46-15-3103 от 13.01.2015г., №ТУР-21-46-16-2525 от 17.09.2016 г., №ТУР-21-46-16-2526 от 17.09.2016 г., №ТУР-21-46-17-2774 от 29.09.2017 г. содержат все существенные условия, основания для признания их незаключенным либо ничтожным не имеются.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с условиями контрактом истец выполнил работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 1 от 27.01.2017 года и справкой о стоимости работ (форма №КС-3) №1 от 27.01.2017 г. на сумму 2257882,34 руб., актом о приемке выполненных работ (форма №КС-2) №1 от 25.11.2016 года и справкой о стоимости работ №1 от 25.11.2016 г. (форма КС-3) на сумму 2 232 732,01 руб., актом о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 5 от 25.01.2018 года и справкой о стоимости работ (форма №КС-3) №5 от 25.01.2018 г. на сумму 2 444 627,09 руб., актом о приемке выполненных работ № 1 от 20.11.2017 года и справкой о стоимости работ № 1 от 20.11.2017 г. на сумму 276839,80 руб.

Указанные акты подписаны сторонами без замечаний уполномоченными лицами. Выполненные работы ответчиком оплачены.

Эти обстоятельства не оспариваются сторонами.

Согласно п. 28.2.1 контрактов №ТУР-21-46-16-1603 от 11.06.2016 г., №ТУР-21-46-15-3103 от 13.01.2015г., №ТУР-21-46-16-2525 от 17.09.2016 г., №ТУР-21-46-16-2526 от 17.09.2016 г., п. 29.15 контракта №ТУР-21-46-17-2774 от 29.09.2017 г. если Заказчик нарушил условия оплаты на срок свыше 30 дней, Подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России на предъявления требования от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа. 

С учетом 5% ограничения по начислению суммы неустойки, сумма неустойки, по расчету истца, составляет 220 741 руб. 09 коп. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (абзац 1 статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 4.10. Контрактов № ТУР-2 1-46-16-1603, № ТУР-21-46-16-2525, № ТУР-21-46-16-2526, № ТУР-21-46-17-2774  оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:

 - Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба, Приложение 16);

- Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), счета-фактуры, при этом выполненные работы должны быть подтверждены Организацией по строительному контролю,   а   Акт   о   приемке   выполненных   работ   -    принят   (подписан)   полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, Приложение 40);

- Ведомости   переработки   давальческих   материалов   поставки   Заказчика   за отчетный месяц (Приложение 9); 

- Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35, Приложение 15);

- Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);

- Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);

- Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).

В соответствии с п. 4.10. Контракта № ТУР-21-46-15-3103 оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 30 рабочих дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:

-Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба, Приложение 16);

-Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), счета-фактуры, при этом   выполненные   работы   должны   быть   подтверждены   Организацией   по   строительному контролю,   а   Акт   о   приемке   выполненных   работ   -   принят   (подписан)   полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, Приложение 40);

-Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за отчетный месяц (Приложение 9);

-Акта   об   оприходовании   материальных   ценностей,   полученных   при   разборке   и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35, Приложение 15);

-Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);

-Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);

-Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).

 В  соответствии  с  п.  7.1.  Контрактов подрядчик   выполняет  все  Работы   и  услуги,  являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Приложением 3 «Перечень Рабочей документации», (С)Приложением  8  «Спецификация   на  поставку  Подрядчиком  оборудования,  не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв», Приложением 2 «График выполнения работ», Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», сформированных в соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Заказчика, в том числе с требованиями регламентов, устанавливающих порядок формирования приложений к контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объектам организаций системы «Транснефть» (в т.ч. перечня работ для распределения контрактной цены), устанавливающих порядок оформления дополнительных Работ, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от Рабочей документации, требований Регламентов Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

В соответствии с п. 7.12 ст. 19 контрактов в период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих Регламентов Заказчика и нормативных актов Российской Федерации ведет и контролирует своевременное и качественное оформления разрешительной и исполнительной документации. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы передается Заказчику в установленном порядке.

Согласно пункту 21.1. Контрактов Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов выполненных Работ поэтапно (ежемесячно).

Статьей 21.5 Контрактов предусмотрено, что сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (календарный месяц) осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3, Приложение 40) в соответствии с порядком, изложенным в ОР-91.200.00-КТН-047-10 «Порядок подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ, выполняемых строительными организациями на объектах ОАО «АК «Транснефть».

Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ за отчетный период подписанный Представителем Организации по строительному контролю, в том числе в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2003 года), Справку о стоимости выполненных работ и затратах Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.

Приемка работ по поставке на объект материалов и оборудования осуществляется заказчиком при наличии проведенного входного контроля заказчика, а также при наличии на поставленные материалы и оборудование соответствующих сертифицирующих документов.

Таким  образом, исходя из условий контрактов, работы могут быть приняты только при условии предоставления Подрядчиком не только форм КС-2, КС-3 , но и всей надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

Согласно п. 28.2.1 контрактов №ТУР-21-46-16-1603 от 11.06.2016 г., №ГУР-21-46-15-3103 от 13.01.2015г., №ГУР-21-46-16-2525 от 17.09.2016 г., №ТУР-21-46-16-2526 от 17.09.2016 г., п. 29.15 контракта №ТУР-21-46-17-2774 от 29.09.2017 г. если заказчик нарушил условия оплаты на срок свыше 30 дней, Подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России на предъявления требования от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа. 

По расчету истца неустойка составляет:

- по контракту №ТУР-21-46-16-1603 от 11.06.2016 г. за период с 13.03.2017г. по 10.12.2018г. составила 76412,10 руб., с учетом указанного 5% ограничения по начислению суммы неустойки сумма неустойки составляет 14571,79 руб.;

- по контракту №ТУР-21-46-15-3103 от 13.01.2015г. за период с 13.01.2017г. по 10.12.2018г. составила 42075,37 руб., с учетом указанного 5% ограничения по начислению суммы неустойки сумма неустойки составляет 7344,57 руб.;

- по контракту №ТУР-21-46-16-2525 от 17.09.2016 г. за период с 11.03.2018г. по 10.12.2018г. составила 5962,24 руб., с учетом указанного 5% ограничения по начислению суммы неустойки сумма неустойки составляет 2637,84 руб.;

- по контракту №ТУР-21-46-16-2526 от 17.09.2016 г. за период с 09.08.2018г. по 10.12.2018г. составила 186547,30 руб., с учетом указанного 5% ограничения по начислению суммы неустойки сумма неустойки составляет 183037 руб.;

- по контракту №ТУР-21-46-17-2774 от 29.09.2017 г. за период с 04.01.2018г. по 10.12.2018г. составила 36855,72 руб., с учетом указанного 5% ограничения по начислению суммы неустойки сумма неустойки составляет 13149,89 руб.

Общая сумма неустойки составляет 220 741  руб. 09 коп. 

Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он, в том числе, не совершил действий, предусмотренных договором, существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (пункт 1 статьи 406 ГК РФ).

Доказательства исполнения им обязательства по передаче исполнительной документации, принятого в соответствии с условиями контрактов и условиями действующего законодательства, истец суду не представил, в связи с чем просрочки оплаты выполненных работ судом не усматривается.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения заказчиком сроков оплаты работ, в связи с чем оснований для начисления неустойки не имеются.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина подлежит взысканию с истца непосредственно в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса, поскольку истцу предоставлена отсрочка по уплате госпошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В  удовлетворении исковых  требований  Общества с ограниченной ответственностью «Энергоспецналадка»  к Акционерному обществу  «Транснефть-Урал»  о  взыскании  неустойки в размере 220 741 руб.09 коп. отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Энергоспецналадка»  в Федеральный бюджет государственную пошлину в размере 7 415 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева