﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-9676/2021

г. Курган

15 ноября 2021 года

резолютивная часть решения объявлена 10 ноября 2021 года,

в полном объёме текст решения изготовлен 15 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Курганской области 

в составе: судьи Т.Г. Крепышевой, при ведении протокола судебного заседания в письменном виде секретарём Н.В. Томашевской, с использованием средства аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 1094501006874, ИНН 4501154295) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (ОГРН 1169658018155, ИНН 6612049003) о взыскании 5702049 рублей 60 копеек,

при участии до и после перерыва: 

от истца – Соловьева Ю.В., представитель по доверенности от 30.09.2021, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании;

от ответчика - явки нет, извещён надлежащим образом в силу положений статьи 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, почтовые уведомления №64090158167999, 64090158168002, 64090158168019 - том 4, листы дела 121-123, отчёт об отправке электронного письма, телефонограмма - том 3, листы дела 125-126, том 4, лист дела 246, сведения с официального сайта Почты России об отслеживании почтового отправления №64090158253135, отчёт о публикации судебных актов в КАД);

установил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением (с учётом принятого судом определением от 01.11.2021 уточнения) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» о взыскании суммы аванса в размере: 558826 рублей 20 копеек (по муниципальному контракту №74); 774041 рубль 40 копеек (по муниципальному контракту №72); 878293 рубля 20 копеек (по муниципальному контракту №75); 454570 рублей 20 копеек (по муниципальному контракту №73); 346332 рубля 60 копеек (по муниципальному контракту №77); 623493 рубля (по муниципальному контракту №85); 640980 рублей 60 копеек (по муниципальному контракту №76), итого 4276537 рублей 20 копеек, штрафа в размере 1425512 рублей 40 копеек, неустойку в размере 242934 рубля 44 копейки, также просит взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 51510 рублей.

Ответчик признаётся извещённым надлежащим образом, в силу положений статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (почтовые уведомления №64090158167999, 64090158168002, 64090158168019 - том 4, листы дела 121-123, отчёт об отправке электронного письма, телефонограмма - том 3, листы дела 125-126, том 4, лист дела 246, сведения с официального сайта Почты России об отслеживании почтового отправления №64090158253135) явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Суд принял все возможные меры по извещению ответчика о времени и месте судебного разбирательства по делу.

В представленном суду отзыве на исковое заявление указал, что в связи с непредвиденными обстоятельствами и в связи с обострением ситуации и угрозой распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ и обязательных требований для организаций независимо от организационно – правовой формы и форм собственности, указанных в Постановлениях Главного государственного санитарного врача РФ вынуждены были проводить дополнительные меры по организации режима труда работников и мероприятий для профилактики распространения вышеуказанного заболевания. Органами власти был введён режим повышенной готовности и самоизоляции, который работники ответчика вынуждены были соблюдать, чтобы не подвергнутся штрафным санкциям. Ответчик как подрядчик до последнего предпринимали меры по проведению подрядных работ, чтобы все объекты сдать в установленные договором сроки, ввиду введённых мер возникли непредвиденные обстоятельства, которые возникли при выполнении работ по капитальному ремонту. Считает, что данные обстоятельства являются форс-мажором. Работы проводились на всех объектах по ул. Гоголя, 76, ул. Ленина, 24, ул. Коли Мяготина, 145, ул. Гоголя, 107, ул. Пролетарская, 64, ул. Пролетарская, 66, ул. Красина, 72, согласно пункту 2.1 оплата производится поэтапно. Представителем ответчика неоднократно были были переданы акты выполненных работ. Директором Управления капитального строительства Чудаковым А.А. было заявлено оплата этапов работ производится не будет. Ответчик исполнял свои обязательства по договору (исходя из сложившейся ситуации) добросовестно, а исковые требования истца необоснованны. ООО «Партнер Плюс» были выполнены 70% работ по контрактам и переданы акты выполненных этапов работ, но заказчиком не была проведена сверка расчётов по контрактам и требования возврата аванса по контрактам незаконно, просит в удовлетворении исковых требований отказать (том 4 лис дела 177).

Представитель истца в судебном заседании на требованиях настаивал, по основаниям, изложенным в уточнённом исковом заявлении.

	Как следует из материалов дела, 05.08.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №72 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Гоголя, 76 в г. Кургане) (том 1 листы дела 95-138), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Гоголя, 76 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 2580138 рублей (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 774041 рубль 40 копеек. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Гоголя, 76 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 1, листы дела 95-138).

31.07.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №73 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Ленина, 24 в г. Кургане) (том 1 листы дела 139-185), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Ленина, 24 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 1515234 рубля (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 454570 рублей 20 копеек. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Ленина, 24 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 1, листы дела 139-185).

31.07.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №74 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Красина, 72 в г. Кургане) (том 2 листы дела 1-25), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Красина, 72 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 1862754 рублей (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 558826 рублей 20 копеек. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Красина, 72 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 2, листы дела 1-25).

05.08.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №75 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Коли Мяготина, 145 в г. Кургане) (том 2 листы дела 26-65), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Коли Мяготина, 145 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 2927644 рубля (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 878293 рублей 20 копеек. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Коли Мяготина, 145 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 2, листы дела 26-65).

31.07.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №76 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Пролетарская, 64 в г. Кургане) (том 2 листы дела 66-107), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Пролетарская, 64 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 2136602 рублей (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 640980 рублей 60 копеек. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Пролетарская, 64 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 2, листы дела 66-107).

31.07.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №77 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Пролетарская, 66 в г. Кургане) (том 2 листы дела 108-141), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Пролетарская, 66 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 1154442 рублей (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 346332 рубля 60 копеек. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Пролетарская, 66 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 2, листы дела 108-141).

05.08.2020 между МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (заказчик) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (подрядчик) подписан муниципальный контракт №85 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Гоголя, 103 в г. Кургане) (том 3 листы дела 1-40), по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в обусловленный контрактом срок работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Гоголя, 103 в г. Кургане) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2) и требованиями действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП, СНиП, иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ по представленным подрядчиком актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и оплатить в порядке и сроках установленных в контракте.

	Цена контракта является твёрдой, определённой на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 2078310 рублей (пункт 1.4 контракта).

	Согласно пункту 2.1 контракта оплата результата выполненной работы производится поэтапно на расчётный счёт подрядчика, указанный в контракте, после выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3.

	В соответствии с пунктом 2.2 контракта заказчик производит выплату аванса подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 1.4 контракта, что составляет 623493 рублей. Оплата аванса производится в течение 15 дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа заказчик удерживает из суммы, предъявленной подрядчиком к оплате за выполненные работы по актам, КС-3, сумму аванса равную 30% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения.

	Пунктом 3.1.1 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (жилой дом по ул. Гоголя, 103 в г. Кургане), в срок, предусмотренные контрактом. Приступить к исполнению договорных обязательств – с даты заключения контракта.

	Завершить выполнение всего комплекса работ и сдать заказчику надлежащий результат таких работ по актам о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акту о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, общему журналу работ, специальному журналу работ (при наличии) акту освидетельствования скрытых работ, исполнительным схемам выполненных работ в срок не позднее 21.09.2020 (том 3, листы дела 1-40).

	Во исполнение пунктов 2.2 указанных контрактов истец перечислил ответчику авансы, о чём свидетельствуют платёжные поручения: 

- по муниципальному контракту №72 – платёжные поручения №551 от 19.08.2020 на сумму 743297 рублей 36 копеек, №632 от 04.09.2020 на сумму 29970 рублей, №552 от 19.08.2020 на сумму 774 рубля 04 копейки (том 1 листы дела 75-77);

- по муниципальному контракту №73 – платёжные поручения №553 от 14.08.2020 на сумму 454115 рублей 63 копейки, №534 от 14.08.2020 на сумму 454 рубля 57 копеек (том 1 листы дела 78-79);

- по муниципальному контракту №74 – платёжные поручения №535 от 14.08.2020 на сумму 558267 рублей 37 копеек, №536 от 14.08.2020 на сумму 558 рублей 83 копейки (том 1 листы дела 81-82);

- по муниципальному контракту №75 – платёжные поручения №555 от 19.08.2020 на сумму 877414 рублей 91 копейка, №556 от 19.08.2020 на сумму 878 рублей 29 копеек (том 1 листы дела 84-85);

- по муниципальному контракту №76 – платёжные поручения №537 от 14.08.2020 на сумму 640339 рублей 62 копейки, №538 от 14.08.2020 на сумму 640 рублей 98 копеек (том 1 листы дела 87-88);

- по муниципальному контракту №77 – платёжные поручения №539 от 14.08.2020 на сумму 345986 рублей 27 копеек, №540 от 14.08.2020 на сумму 346 рублей 33 копеек (том 1 листы дела 90-91);

- по муниципальному контракту №85 – платёжные поручения №553 от 19.08.2020 на сумму 622869 рублей 51 копейка, №554 от 19.08.2020 на сумму 623 рубля 49 копеек (том 1 листы дела 93-94).

В связи с неисполнением ответчиком обязательств в срок, истец обратился к ответчику с претензиями от 17.05.221 №714, от 11.12.2020 №2162/2, от 03.12.2020 №2098/2, от 11.12.2020 №2161/1, от 11.12.2020 №2164/2, от 03.12.2020 №2101/2, от 03.12.2020 №2105/2, от 11.12.2020 №2159/2,  с требованием о возврате перечисленных авансов и оплате пеней, штрафа (том 1 листы дела 32-36, 38, 40-41, 48-49, 51-52, 54, 55, 56-57, 59), а также на основании пунктов 8.4 контрактов, направил ответчику уведомления (решения) об одностороннем отказе от исполнения контрактов (том 1 листы дела 39, 43-44, 46-47, 60, том 3 листы дела 128-142).

О направлении уведомлений (решений) об одностороннем отказе от исполнения контрактов, свидетельствуют решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области №РНП45-26/2021 от 29.01.2021, №РНП45-100/2020 от 29.12.2020, №РНП45-30/2021 от 29.01.2021, №РНП45-29/2021 от 29.01.2021, №РНП45-28/2021 от 29.01.2021, №РНП45-27/2021 от 29.01.2021, №РНП45-25/2021 от 29.01.2021 (том 3 листы дела 61-91).

Решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов опубликованы в единой информационной системе закупок, о чём свидетельствуют скриншоты (том 3 листы дела 143-149).

Ответчиком претензии истца оставлены без ответа.

Поскольку ответчик в добровольном порядке аванс не возвратил, пени и штраф не уплатил, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 настоящего Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков предусмотрено пунктом 8.4 спорных договоров, а также пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

30.10.2020 от ответчика в адрес истца поступило письмо №36 от 30.10.2019, согласно которому ответчик уведомляет истца о завершении этапа работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по ул. Гоголя, 103, ул. Ленина, 24, ул. Пролетарская, 64, ул. Пролетарская, 66, ул. Гоголя, 76 и передачи актов выполненных работ и сопутствующих документов (том 4 лист дела 189).

В ответ истец направил ответчику письмо №1925 от 05.11.2020, в котором указал, что документация на работы по ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Гоголя, 103, не приложена; в актах выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пролетарская, 64 включены объёмы работ, превышающие фактически выполненные на объекте – установка лесов, штукатурка откосов; в актах выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пролетарская, 66 включены объёмы работ, превышающие фактически выполненные на объекте – штукатурка откосов; в актах выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Гоголя, 76 включены объёмы работ, превышающие фактически выполненные на объекте – установка лесов, отбивка штукатурки (том 4 лист дела 188).

Также в материалы дела представлено письмо №2196 от 14.12.2020 (на №56 от 07.12.2020) в котором истце сообщает, что в ответ на уведомление о направлении в адрес истца документации по выполнению части работ по муниципальным контрактам №74, №75, №76, №77, №85, что по указанным контрактам (пункт 3.1.1) предусмотрена приёмка всего объёма выполненных работ, а не поэтапное выполнение, на основании указанного истец отказался от подписания представленных актов выполненных работ (том 4 лист дела 190).

В материалы дела также имеются акты об отсутствии действий подтверждающих факт выполнения работ со стороны подрядчика, предусмотренных муниципальными контрактами от 21.09.2020, от 19.11.2020 (том 4 листы дела 199-204).

При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что спорные контракты расторгнуты на основании пункта 8.4 договора, пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации путём направления истцом уведомлений (решений) об одностороннем отказе от исполнения контрактов (том 1 листы дела 39, 43-44, 46-47, 60, том 3 листы дела 128-142).

О направлении уведомлений (решений) об одностороннем отказе от исполнения контрактов свидетельствуют решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области №РНП45-26/2021 от 29.01.2021, №РНП45-100/2020 от 29.12.2020, №РНП45-30/2021 от 29.01.2021, №РНП45-29/2021 от 29.01.2021, №РНП45-28/2021 от 29.01.2021, №РНП45-27/2021 от 29.01.2021, №РНП45-25/2021 от 29.01.2021 (том 3 листы дела 61-91).

Решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов опубликовано в единой информационной системе закупок, о чём свидетельствуют скриншоты (том 3 листы дела 143-149).

Поскольку ответчиком не представлено доказательств передачи результата работ до 21.09.2020 (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к тому, что отказ от контрактов заявлен истцом правомерно.

В пункте 1 информационного письма от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных в ст. 1109 ГК РФ.

Исходя из пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о взыскании неосновательного обогащения подлежат доказыванию три факта: наличие обогащения на стороне одного лица (обогатившегося); происхождение этого обогащения за счет другого лица (потерпевшего); отсутствие достаточного, установленного законом или договором, основания обогащения. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12, основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт оплаты истцом в пользу ответчика подтвержден представленными в материалы дела платежными поручениями и ответчиком не оспорен (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

При этом бремя доказывания наличия какого-либо правового основания для получения спорных денежных средств возлагается в данном случае на ответчика, как на лицо, заинтересованное в сохранении данных денежных средств, перечисленных истцом, за собой.

Указанный подход согласуется с правовой позицией, отраженной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018.

Ответчиком не представлено документов, подтверждающих наличие оснований для получения от истца денежных средств в размере 4276537 рублей 20 копеек, не представлено реальности исполнения договорных отношений, как не представлено доказательств возвращения спорной суммы истцу в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом доводы ответчика, приведённые в отзыве на исковое заявление, в том числе о частичном исполнении контрактов судом приняты быть не могут, поскольку контрактами не предусмотрено поэтапное выполнение работ, в обязанность подрядчика входит завершить выполнение всего комплекса работ и сдать надлежащий результат таких работ по актам унифицированной формы в срок до 21.09.2020 (пункт 3.1.1 контрактов).

Поскольку ответчиком не представлены доказательства выполнения работ, учитывая, что договорные отношения между сторонами прекращены, суд пришел к выводу о том, что перечисленные истцом денежные средства (аванс) в размере 4276537 рублей 20 копеек являются для ответчика неосновательным обогащением и подлежат взысканию в пользу истца на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истцом также заявлено требование о взыскании пеней по спорным контрактам в сумме 242934 рублей 44 копеек.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пунктам 3.3.2 контрактов в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактам, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактами в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональному объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 3.3.3 контрактов).

Согласно расчёту, произведённому истцом: 

- размер пеней по контракту №74 за период с 22.09.2021 по 19.12.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 23486 рублей 22 копейки;

- размер пеней по контракту №72 за период с 22.09.2021 по 24.01.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 45689 рублей 94 копейки;

  - размер пеней по контракту №75 за период с 22.09.2021 по 24.01.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 51843 рубля 70 копеек;

- размер пеней по контракту №73 за период с 22.09.2021 по 24.01.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 26832 рубля 27 копеек;

- размер пеней по контракту №77 за период с 22.09.2021 по 24.01.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 20443 рубля 24 копейки;

- размер пеней по контракту №85 за период с 22.09.2021 по 24.01.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 36803 рубля 41 копейка;

- размер пеней по контракту №76 за период с 22.09.2021 по 24.01.2021, исходя из ставки 4,25%, составил 37835 рублей 66 копеек;

Также истцом заявлено требование о взыскании штрафов на основании пунктов 3.3.5 контрактов в общей сумме 1425512 рублей 40 копеек.

Пунктом 3.3.5 контрактов предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в настоящими правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и устанавливается в следующем порядке: а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Учитывая, что ответчиком контракты не исполнены требование о взыскании штрафа следует признать обоснованным.

Согласно расчёту, произведённому истцом: 

- размер штрафа по контракту №74, исходя из цены, составил 186275 рублей 40 копеек;

- размер штрафа по контракту №72, исходя из цены, составил 258013 рублей 80 копеек;

- размер штрафа по контракту №75, исходя из цены, составил 292764 рубля 40 копеек;

- размер штрафа по контракту №73, исходя из цены, составил 151523 рубля 40 копеек;

- размер штрафа по контракту №77, исходя из цены, составил 115444 рубля 20 копеек;

- размер штрафа по контракту №85, исходя из цены, составил 207831 рубль.

- размер штрафа по контракту №76, исходя из цены, составил 213660 рублей 20 копеек.

Расчёт пеней и штрафов судом проверен, является арифметически верным, ответчиком не оспорен.

Возможность начисления штрафа за неисполнение обязательств предусмотрена нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 3.3.5 контрактов.

Таким образом, фактическое неисполнение ответчиком обязательств по контрактам, установленное судом, свидетельствует как о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока выполнения работ), так и о нарушении условий контракта в целом – работы не были выполнены.

Следовательно, в настоящем случае суд приходит к выводу о возможности взыскания с ответчика как пени (за просрочку исполнения обязательств, пункты 3.3.3 контрактов), так и штрафа (неисполнение ответчиком работ, пункты 3.3.5 контрактов).

Взыскание в подобных случаях штрафа соответствует правовой позиции, содержащейся в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 09.03.2017 № 302-ЭС16-14360, от 20.12.2018 № 310-ЭС18-13489, а также разъяснениям, изложенным в пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).

Таким образом, требование истца о взыскании пеней в общей сумме 242934 рублей 44 копеек и штрафа в общем размере 1425512 рублей 40 копеек подлежит удовлетворению.

Учитывая, что при обращении в арбитражный суд истцом оплачена государственная пошлина в размере 69982 рубля платёжными поручениями №538 от 02.06.2021 (51510 рублей) (том 1 лист дела 12) №854 от 05.08.2021 (18472 рубля) (том 3 лист дела 123), в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 333.21, 333.22, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку истец уменьшил размер исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 52725 рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины, 17257 рублей государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального бюджета, как излишне уплаченная.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР ПЛЮС» (ОГРН 1169658018155, ИНН 6612049003) в пользу МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 1094501006874, ИНН 4501154295) основной долг 4276537 рублей 20 копеек, неустойку  242934 рубля 44 копейки, штраф в размере 1425512 рублей 40 копеек, расходы по оплате государственной пошлины  52725 рублей, всего 5997709 рублей 04 копейки.

Возвратить МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА КУРГАНА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 1094501006874, ИНН 4501154295) из федерального бюджета 17257 рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме). 

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

Т.Г. Крепышева