АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар Дело № А32-32257/2022

27.12.2022

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А. Баганиной, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО СК «Технологии инновационного строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 350075, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, ИМ. СЕЛЕЗНЕВА УЛ., Д. 4/3, ОФ. 15/2) к

ООО «СВС СТРОЙ ИНВЕСТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 354008, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ ГОРОД, ВИНОГРАДНАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н) 

<

...>)

о взыскании 120 000 рублей неустойки, а также 4 600 рублей расходов по уплате госпошлины, установил:

ООО СК «Технологии инновационного строительства» обратилось в суд с иском к   ООО «СВС СТРОЙ ИНВЕСТ» о взыскании 120 000 рублей неустойки, а также 4 600 рублей расходов по уплате госпошлины.

Ответчик извещен, иск   оспорил, представил отзыв. Заявил ходатайство   о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о допросе свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» при принятии искового заявления (заявления) к производству суд решает вопрос о том, относится ли дело к категориям дел, указанным ч.ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ.

Основания рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, а также перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, установлены ст. 227 АПК РФ. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ (в редакции, действовавшей на момент вынесения судебного акта) в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц 500 000 руб., для индивидуальных предпринимателей 250 000 руб. Если по формальным признакам дело относится  категориям дел, названным в ч.ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, то оно должно быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, о чем указывается в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству (ч. 2 ст. 228 АПК РФ). Согласие сторон на рассмотрение данного дела в таком порядке не требуется.

Таким образом, не требуется согласия сторон для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, если оно относится к перечню дел, указанному в ч.ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ.

Частью 5 ст. 227 АПК РФ (в редакции, действовавшей на момент вынесения судебного акта) установлено , что суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; 4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

В обоснование заявления ответчик   указал на необходимость допроса в качестве свидетелей сотрудника ответчика ФИО5, сотрудников истца - ФИО2, ФИО3, ФИО4

Поскольку имеющихся в деле доказательств достаточно для принятия решения, ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, о допросе свидетелей  удовлетворению не подлежит,  оснований для перехода к рассмотрению дела в общем порядке не имеется.

Резолютивной частью решения от  05.09.2022  в иске отказано.

Как видно из материалов дела,  между ООО СК «ТИС» ( Генподрядчик) и ООО «СВС СТРОЙ ИНВЕСТ» ( Подрядчик) заключен договор подряда от 22.04.2022 г. № 22-04-2022-ШК-СВС (далее Договор), по условиям которого Подрядчик обязался осуществить комплекс монолитных работ, согласно Приложению №1, на Объекте: «Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) Корректировка» (далее по тексту «Объект»), в соответствии с Договором.

В соответствии с пунктом 7.15. Берет на себя обязательства по обеспечению охраны труда в соответствии с Формами № 10, 12 к Договору. В соответствии с пунктом 7.16. Берет на себя обязательства по предоставлению перечня документов, указанных в Форме № 11 к Договору. В соответствии с пунктом 7.17. Несет ответственность за нарушение требований по организации безопасного производства работ и пребывания на всем Фронте работ. В соответствии с пунктом 7.18. Обеспечить на весь период производства работ присутствие инженерно-технического работника (ИТР) Подрядчика на Объекте. В соответствии с пунктом 7.19. Подрядчик обязуется строго соблюдать организацию стройплощадки в соответствии с утверждённым проектом организации строительства (ПОС) в том числе мест складирования, движения транспорта, размещения бытовых сооружений и прочего. В соответствии с пунктом 7.20. Заказчик имеет право:

-  проводить проверки обеспечения безопасного производства Работ на территории -проводить проверки обеспечения безопасного производства Работ на территории Заказчика;

-  отстранять от Работы персонал Подрядчика не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения Работы повышенной опасности, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушающий требования безопасности при производстве Работ.

-   требовать от Подрядчика предоставления дополнительной учетной документации, предварительно за 3 (три) дня передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее предоставления. Подрядчик обязан предоставить дополнительно требуемую Заказчиком учетную документацию.

Формой № 10 к Договору установлена ответственность подрядчика за нарушение требований по организации безопасного производства работ и пребывания на строительной площадке, а также перечень нарушений.

1.          Нахождение работника на строительной площадке без специальной одежды (Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, жилет сигнальный 2 класса защиты; в зимнее время - костюм для защиты от пониженных температур); специальной обуви (Ботинки кожаные с жестким подноском; в зимнее время - ботинки кожаные утепленные с жестким подноском); средств индивидуальной защиты, в том числе каски строительной, защитных очков или защитного щитка при работе с УШМ и другим вращающимся режущим электроинструментом; средств защиты органов дыхания (респиратора) – в местах запыления или загрязнения воздуха. В летний период категорически запрещается нахождение работников на строительной площадке, в том числе руководителей и ИТР, в «пляжной» одежде и обуви – шорты, открытая обувь (сандалии, шлепанцы и т.п.).

2.          Отсутствие своевременного прохождения инструктажей по охране труда: 2.1. вводного инструктажа у уполномоченного представителя Генподрядчика; 2.2. вводного инструктажа в своей организации; 2.3. инструктажа на рабочем месте (повторный не реже 1 раза в 3 месяца); 2.4. Отсутствие прохождения рабочими стажировки после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте - от 3 до 18 смен, оформленного соответствующим распоряжением и зафиксированного в журнале; 2.5.  Отсутствие допуска к самостоятельной работе рабочего после прохождения стажировки, оформленного соответствующим распоряжением и зафиксированного в журнале.

3. Осуществление работ без применения средств защиты от падения с высоты (сертифицированные удерживающие и страховочные системы) на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1.8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не огражденных защитными ограждениями; на лестницах, лесах и подмостях на высоте 1.8 м и более; в местах, где существуют риски падения с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами; работы, осуществляемые при помощи канатного доступа (промышленный альпинизм).

4. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1.8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не ограждены защитными ограждениями; а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

5.   При осуществлении работ не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

6.          Отсутствие документов по охране труда, изложенных в Акте-допуске и в Предписаниях специалиста по охране труда; и/или не предоставление указанных документов на проверку должностным лицам Генподрядчика; в том числе: -  отсутствие Наряда-допуска при производстве работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов;- отсутствие удостоверений или протоколов по ежегодной проверке знаний персонала по охране труда;- отсутствие приказов о назначении лиц, ответственных за обеспечение требований охраны труда на объекте строительства; за проведение инструктажей по охране труда; за выдачу Нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов; - ППР и/или технологических карт на выполняемые работы с подписями в ознакомлении; - и т.п.

7.     При осуществлении работ в местах, где существуют риски падения с высоты (на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1.8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не огражденных защитными ограждениями; на лестницах, лесах и подмостях на высоте 1.8 м и более; с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами; работы, осуществляемые при помощи канатного доступа (промышленный альпинизм)) отсутствуют документы по охране труда при работе на высоте: 7.1. Удостоверения по аттестации сотрудников на 1-ую, 2-ую и 3-ю группы по охране труда при работе на высоте; 7.2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасность работ на высоте; 7.3.   Приказ о назначении лица, выдающего Наряд-допуск на работы на высоте; лиц -ответственного руководителя работ и ответственного исполнителя работ на высоте, имеющих соответствующую группу; 7.4. Приказ о допуске работников в составе бригады к работе на высоте, прошедших обучение и имеющих группу допуска; 7.5. Приказ о порядке производства работ по Наряду-допуску; 7.6. Наряд-допуск на производство работ на высоте; 7.7. План производства работ на высоте; 7.8. План спасения пострадавшего при работе на высоте.

8.     Присутствие на строительной площадке работников Субподрядчика, не указанных в утвержденном и предоставленном Генподрядчику Списке работников, допущенных к работе на строительной площадке; не прохождение работниками да начала работ вводного инструктажа по охране труда у Генподрядчика. 8.1. Производство работ в отсутствие ответственного лица из числа ИТР Подрядчика, назначенного соответствующим приказом.

9.     Не производится систематическая (ежедневная) уборка рабочих мест от остатков материалов, отходов и прочего строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ; а также несоблюдение правил санитарии (мусор, бытовые отходы) в бытовых помещениях и на прилегающей к ним территории. 9.1.  Выброс мусора с этажей в окна и проемы здания.

10.    Нарушение требований безопасности при хранении и применении баллонов: 10.1.  При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов; 10.2. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. 10.3.  Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение. 10.4.   При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел. 10.5. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м. 10.6. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление полностью снято. 10.7.   По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц; клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

11.    Нарушение правил пожарной безопасности: 11.1.  Не предоставлен Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте работниками Субподрядчика; ответственное лицо должно иметь удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума; 11.2. Курение вне специально отведенных мест; 11.3.  Использование открытого огня (кроме видов работ, в которых это предусмотрено ППР или технологической картой); 11.4.  Отсутствие первичных средств пожаротушения в местах производства работ и в бытовых помещениях; 11.5. Отсутствие своевременно проведенных инструктажей по пожарной безопасности (не реже 1 раза в 6 месяцев); 11.6.   Складирование материалов или своевременно не убранного строительного мусора на проходах – создание препятствий для эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации (рабочие места и проходы к ним необходимо убирать после каждой рабочей смены); 11.7.  Оставление без присмотра и на открытых площадках под прямыми солнечными лучами, горюче-смазочных материалов, газовых баллонов, легко воспламеняемых материалов и строительного мусора; 11.8. Непринятие мер по предотвращению вылета искр, горящих частиц материала и окалины при проведении сварочных и огневых работ за пределы рабочего места; 11.9. Использование самодельных или не отвечающих требованиям безопасности нагревательных приборов; а также использование нагревательных приборов не по их прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации (Например: газосварочной горелкой кипятят смолу в ведре, а электроплитку для приготовления пищи используют для обогрева помещения); 11.10. Осуществление сварочных и огневых работ без специального огнезащитного костюма. 11.11.  При проведении огневых работ отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности при проведении огневых работ. Отсутствие соответствующей аттестации у ответственного лица и персонала, проводящего сварочные и огневые работы.

12.     Нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей: 12.1.  Отсутствие приказа о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок. 12.2.  Отсутствие соответствующей группы допуска по электробезопасности у ответственного лица и рабочего персонала (в соответствии с должностью или профессией и видами выполняемых работ). 12.3.  Несанкционированные подключения (без согласования с Генподрядчиком) к электросети или временной электропроводке. 12.4.  Подключения при помощи скруток, подсоединения проводов без вилки к розетке; провод имеет повреждения изоляции; сечение провода не соответствует подсоединяемой нагрузке. 12.5.  Доп ускается нахождение проводов временной электропроводки на полу и на земле в местах прохода людей, в лужах, на земле в сырую дождливую погоду. 12.6.  Использование электроинструмента под дождем. 12.7.  Отсутствие заземления на электроустановках, где это предусмотрено правилами или руководством по эксплуатации.

13.     Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента. 13.1. Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 13.2. Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания. 13.3. Средства подмащивания — леса, не обладающие собственной расчетной устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса) или в организационно-технологической документации на производство работ. Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений. 13.4. Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств. 13.5. В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации. Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами. 13.6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,8 м и более — ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента — не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения — не более 0,5 м. 13.7. Средства   подмащивания,  применяемые   при  штукатурных  или  малярных  работах,  в  местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров. 13.8. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м — после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации, и оформления актом. 13.9. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила. 13.10. При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств подмащивания, места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не более 5´5 мм. 13.11. При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо выполнять следующие требования: уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации конкретного типа средств подмащивания;- передвижение средств подмащивания при ветре скоростью более 10 м/с не допускается;- перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей;- двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открывания. 13.12. Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %. Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамичную нагрузку, превышающую нормативную на 10 %. Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ. 13.13. Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях, должны быть снабжены специальными захватами-крюками, обеспечивающими их прочное закрепление за конструкцию. Устанавливать и закреплять их на монтируемые конструкции следует до подъема последних. 13.14. Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение и обратно не допускается. 13.15. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в строительные конструкции здания. 13.16. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м следует применять предохранительную систему, прикрепленную к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной конструкции. 13.17. Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять. 13.18. Не допускается выполнять работы на переносных лестницах и стремянках: - около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами;- с использованием ручных машин и порохового инструмента;- газо- и электросварочные;- натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей. Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами. 13.19. Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении следующих требований: -  при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; - ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания;-  при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания устойчивые подмости, использовать средства защиты от падения с высоты; -  надзор за эксплуатацией ручных машин осуществляется лицом, назначенным специальным приказом. 13.20.   При работе с пневмомашиной следует допускать к работе персонал прошедший соответствующий инструктаж с использованием руководства по эксплуатации завода-изготовителя и соответствующей инструкции по охране труда. 13.21. Работающие с пневматическими машинами ударного или вращательного действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони. 13.22. При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехлами.

14.     Нарушение санитарно-гигиенических требований, в том числе справление естественных надобностей вне туалета.

15.      Нарушение требований безопасности при эксплуатации подъемных сооружений. 15.1.  Отсутствие приказа о назначении специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию подъемных сооружений. 15.2.   Отсутствие приказа о допуске стропальщиков к обслуживанию подъемных сооружений на строительном объекте. 15.3.   Отсутствие приказа о назначении лица, ответственного за безопасность при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ. 15.4.   Отсутствие приказа о назначении специалистов, ответственных за содержание подъемных сооружений ы работоспособном состоянии и за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений – для организаций – владельцев подъемных сооружений. 15.5.   Отсутствие приказа о производстве работ подъемными сооружениями вблизи ЛЭП - – для организаций – владельцев подъемных сооружений. 15.6.   Осуществление работ по строповке грузов работниками, не имеющими удостоверений стропальщиков или не допущенных к работе соответствующим приказом. 15.7.   Подача или выгрузка грузов в окна и проемы здания без выносных грузоприемных площадок. 15.8.   Подъем сыпучих или мелких штучных грузов вне специальной инвентарной тары; загрузка тары выше борта. 15.9.   Подъем краном одновременно двух и более поддонов с материалом. 15.10. Перемещение людей при помощи подъемных сооружений, предназначенных для подъема грузов. 15.11. Перемещение людей, не имеющих допуска, в фасадной люльке и других подъемных сооружениях. 16.      Производство работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов работниками субподрядной организации в отсутствие на объекте лица, ответственного за обеспечение требований охраны труда из числа ИТР. 17.        Отсутствие квалификационных удостоверений, дающих право на осуществление определенных видов работ:  машинист крана башенного;   машинист крана автомобильного; стропальщик;  монтажник систем кондиционирования и вентиляции;  промышленный альпинист; кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов; электрогазосварщик; монтажник стальных и железо-бетонных конструкций; машинист экскаватора; машинист экскаватора-погрузчика; машинист крана-манимулятора;  облицовщик фасадов;  каменщик;  бетонщик;  арматурщик;  электромонтажник;  монтажник лифтового оборудования;  монтажник строительных машин и механизмов (кранов башенных);  монтажник слаботочных систем; обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором обязанностей по соблюдению требований по организации безопасного производства работ и пребывания на строительной площадке; требований по предоставлению документации по охране труда, изложенных в Акте-допуске (Приложение 3) и Перечне (Приложение 10), Генподрядчик в бесспорном порядке имеет право пересмотреть стоимость выполненных работ в сторону уменьшения открытой цены договора на основании Актов, выписанных специалистом по охране труда либо иным должностным лицом Генподрядчика, в размере 30 000 рублей (НДС не облагается) за каждое выявленное нарушение, согласно нижеизложенному Перечню.

Ответчику начислен штраф, установленный Формой № 10 Договора подряда в размере   120 000 рублей. В обоснование факта нарушения Ответчиком условий договора подряда истцом в одностороннем порядке составлен Акт проверки соблюдения условий договора подряда от  15.06.2022г. на объекте     «Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) Корректировка».  Акт подписали     специалист по охране труда ФИО2; начальник участка ФИО3; производитель работ   ФИО4 о нижеследующем: В ходе проверки на Объекте Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СВС Строй Инвест», допустил нарушения условий договора подряда № 22-04-2022-ШК-СВС от 22 апреля 2022 г.

-  п.9. Формы 10 - Не производится систематическая (ежедневная) уборка рабочих мест от остатков материалов, отходов и прочего строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ; а также несоблюдение правил санитарии (мусор, бытовые отходы) в бытовых помещениях и на прилегающей к ним территории.

-  п.З. Формы 10 - Осуществление работ без применения средств защиты от падения с высоты (сертифицированные удерживающие и страховочные системы) на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1.8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не огражденных защитными ограждениями; на лестницах, лесах и подмостях на высоте 1.8 м и более; в местах, где существуют риски падения с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами; работы, осуществляемые при помощи канатного доступа (промышленный альпинизм). (2 работника)

-  п. 13. Формы 10 - Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента.

На основании п. 3, п. 9, п. 13 Формы №10, пункта 24.1.8. договора подряда № 22-04-2022-ШК-СВС от 22.04.2021, Заказчик (Генподрядчик) по своему усмотрению имеет право в бесспорном порядке пересмотреть стоимость выполненных работ в сторону уменьшения договорной цены в размере 30 000 рублей за каждое нарушение либо взыскать с Подрядчика указанную сумму в виде штрафа в судебном порядке. Сумма штрафа согласно акту составила 120 000 руб.

К акту имеется приложение: четыре фотографии. На акте учинена надпись  «Представитель подрядчика от подписи отказался».

Истец  направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате суммы штрафа. Ответ на претензию получен не был, что послужило основанием обращения с иском в суд.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик в отзыве на иск пояснил, что в доказательство наличия совокупности этих обстоятельств Истец приводит лишь Акт проверки соблюдения условий договора подряда в части соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности и наложении штрафных санкций от 15.05.2022 г. (далее – Акт) и фотоматериалы. При этом Акт не подписан представителями Ответчика; более того, о дате и времени его составления Ответчик не был предварительно уведомлен, не имел возможности направить своего представителя и участвовать в его составлении. Вопреки утверждениям Истца, ФИО1 не присутствовал при составлении Акта и не мог участвовать в его составлении и подписании. Фотоматериалы также не могут подтверждать наличие оснований для применения мер ответственности, поскольку: по ним не представляется возможным идентифицировать дату, время, когда сделаны фото; невозможно идентифицировать, что люди, изображенные на них, являются работниками Ответчика; не имеется привязки к адресу объекта  исходя из фото, факт вменяемых нарушений условий договора не усматривается. согласно условиям договора (п. 7.7), строительный мусор должен ежедневно собраться в контейнеры, между тем, исходя из представленных фотографий не представляется возможным определить и установить, что обязанность по сбору мусора в контейнеры не исполнялась, в нарушение условий договора, более 1 дня. Представленные Истцом доказательства также не подтверждают наличия вины Ответчика, а также наличие и объем причиненного вреда или убытков.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд признал исковые требования  не подлежащими удовлетворению на основании следующего.

 По правилам ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил в пункте 60 постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу ст. 65 АПК РФ   истец обязан доказать, что ответчик является лицом,   нарушившим   обязательство. 

По общему правилу, основанием для удовлетворения требования о привлечении к ответственности о взыскании неустойки является совокупность условий: факт нарушения обязательства именно ответчиком, наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими последствиями. Отсутствие доказательств наличия хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет недоказанность всего состава гражданско-правового института убытков и отказ в удовлетворении требований. 

Представленный односторонний акт проверки от 15.06.2022 признан судом недопустимым доказательством, поскольку составлен истцом в одностороннем порядке. Фотографии не отражают место и дату составления, относимость к рассматриваемым обстоятельствам.

Согласно  сформулированному в судебно-арбитражной практике подходу, свидетельские показания  в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются тем допустимым доказательством, которое суд может принять в качестве подтверждения  действия, совершенного другим лицом.    Показания  свидетелей  со стороны истца – ФИО2 (специалист по охране труда), ФИО3 (начальник участка), ФИО4 (производитель работ)  не   отвечает признаку  допустимости по основаниям ст.68 АПК РФ, поскольку они являются заинтересованными лицами.  

В силу положений ст.ст. 9, 65 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Довод истца о том, что представитель ответчика сопровождал комиссию в ходе проверки оспаривается ответчиком. Акт не подписан представителями Ответчика; более того, о дате и времени его составления Ответчик не был предварительно уведомлен, не имел возможности направить своего представителя и участвовать в его составлении. Вопреки утверждениям Истца, ФИО1 не присутствовал при составлении Акта и не мог участвовать в его составлении и подписании. Фотоматериалы также не могут подтверждать наличие оснований для применения мер ответственности, поскольку: по ним не представляется возможным идентифицировать дату, время, когда сделаны фото; невозможно идентифицировать, что люди, изображенные на них, являются работниками Ответчика; не имеется привязки к адресу объекта  исходя из фото, факт вменяемых нарушений условий договора не усматривается. согласно условиям договора (п. 7.7), строительный мусор должен ежедневно собраться в контейнеры, между тем, исходя из представленных фотографий не представляется возможным определить и установить, что обязанность по сбору мусора в контейнеры не исполнялась, в нарушение условий договора, более 1 дня.

В силу пункта 7.23 договора, если Заказчик обнаружит, что Работы выполняются с недостатками, либо с отклонениями от Договора, он вправе потребовать от Подрядчика их устранения (п. 3 ст. 715 ГК РФ). Для этого Заказчик в направляет Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока устранения.

Согласно п.8.4 договора для осуществления контроля строительства и общего руководства объектом Заказчик привлекает Генподрядчика Объекта - ООО СК "ЛидерГрупп" (ИНН 

<

***>). Сотрудники Генподрядчика в рамках своих должностных полномочий и на основании доверенности от Заказчика осуществляют от лица Заказчика контроль за ходом строительства, качества выполняемых Подрядчиком работ; соблюдения Подрядчиком в ходе производства работ норм и правил.

Поскольку представленный акт подрядчиком не подписан, условия договора о фиксации недостатков с привлечением сотрудников генподрядчика Объекта - ООО СК "ЛидерГрупп"  не выполнены, односторонний акт истца не является допустимым доказательством, наличие причинно-следственной связи истец не доказал. Исковое требование о взыскании штрафа удовлетворению не подлежит.

Согласно ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Поскольку в иске отказано, расходы истца возмещению не подлежат

Руководствуясь  статьями    65, 110,    226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайств ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о допросе свидетелей ФИО5, ФИО2, ФИО3, ФИО4

В иске отказать.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,   вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. 

Судья                                                                                                                      С. А. Баганина