АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, 

<

...>; тел/ факс: 

<

***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Д ело № А57-35502/2024 16 июня 2025 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вант», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саратов, в пользу государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, неустойку за просрочку исполнения обязательств за период с 01.08.2023 по 05.02.2024 по контракту № 4712307 от 03.05.2023 в размере 207 686 руб. 43 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вант», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 384 руб.  

Встречное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вант», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саратов, неустойку за просрочку исполнения обязательств за период с 16.02.2024 по 30.09.2024 по контракту № 4712307 от 03.05.2023 в размере 260 364 руб. 37 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 018 руб.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований. 

В результате зачета окончательно взыскать с государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вант», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саратов, неустойку за просрочку исполнения обязательств по контракту № 4712307 от 03.05.2023 в размере 52 677 руб. 94 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 018 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1