АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

17 января 2022 года

Дело № А33-3132/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10 января 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 17 января 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Путинцевой Е.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Сузун» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью НПП «НефтеМодульКомплект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности №609 от 01.11.2019,  

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности №30/06-21 от 15.06.2021, ФИО3, представителя по доверенности №09/02-21 от 26.02.2021.

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО4, 

установил:

акционерное общество «Сузун» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью НПП «НефтеМодульКомплект» (далее – ответчик) о взыскании 8 125 582 руб. неустойки за нарушение срока поставки.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 15.02.2021 возбуждено производство по делу.

Требования истца основаны на взаимоотношениях сторон из договора поставки  материально-технических ресурсов № 7510317/0691Д от 08.11.2017 и связаны с  нарушением  ответчиком срока поставки  товара  по  указанному  договору. За просрочку поставки  товара  истцом начислена  неустойка  за период с  01.04.2018 по 04.02.2019 за  232  дня  просрочки, за  исключением 78 дней просрочки истца по согласованию конструкторской  документации,  из   расчета  30%  от  цены  товара,  что  составило 8 125 582  руб. 

В судебном заседании 29.12.2021 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся  перерыв до 13 час. 30 мин. 10 января 2022 года.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Решением закупочной комиссии ПАО «НК «Роснефть»  в области  материально-технических ресурсов  об  утверждении  результатов  отбора, оценки  заявок  на  участие  в  закупке  и  выборе победителя  закупки № ЗК(МРТ)-185-17-12 от  10.10.2017  ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  признано  победителем закупки  и решено заключить   договор  по  поставке  Блока  дозирования  метанола  по  потребности  АО «Сузун» с проведением  ШМР, ПНР  на следующих  условиях:  срок поставки товара -  март  2018 г.

08.11.2017  АО «Сузун» (покупатель) и ООО НПП «НефтеМодульКомплект» (поставщик) заключен договор № 7510317/0691Д  поставки материально-технических ресурсов, в соответствии с  пунктом  1.1 которого  поставщик  обязуется передать  в собственность покупателя товар  по номенклатуре, качеству,  в количестве, по цене и срокам  поставки согласно  условиям настоящего договора и приложений М, Н, а покупатель  принять  и  оплатить товар.

Цена и  стоимость  товара определяются приложением М (спецификациями) к  настоящему  договору (пункт 2.1). 

Основной период  поставки – временной промежуток, в  течение  которого должен быть  поставлен товар, согласованный сторонами в приложении М (спецификации) в  разделе «График поставки. Основные периоды поставки». Цена товара, определенная в приложении  М (спецификация) в твердой сумме, действует при  условии поставки товара в Основной период  поставки.

Пунктом 3.5 договора предусмотрено,  что  поставщик обязуется в сроки,  предусмотренные настоящим  договором  приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия  товара в  пункт назначения, передать  покупателю все необходимые документы, относящиеся к товару, отсутствие   которых  не позволяет  осуществлять  приемку и/или  монтаж  и/или эксплуатацию   и/или дальнейшую  передачу  товара  третьим  лицам и/или  иные  действия в отношении товара,  и перечень которых  установлен в п.7.1  договора,  а  также  в соответствующих  приложениях  к договору.  

Кроме  того,  поставщик  направляет  оригиналы и  заверенные  копии  паспортов  в  двух экземплярах  в  офис г.Красноярск,  с пометкой «В УМТО». 

 В случае  выявления  отсутствия  указанных  документов,  покупатель  вправе  не осуществлять  приемку  товара и , поместив товар  на  ответственное хранение,  потребовать предоставить такие  документы в течение  4 дней с  даты получения поставщиком соответствующего  уведомления покупателя. 

В случае,  если  документы  не  будут  предоставлены  в указанный срок,  покупатель  имеет  право  в соответствии  со  статьей 464 ГК РФ отказаться  от  товара. 

Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке  некомплектного товара и обязательства поставщика по поставке товара считаются неисполненными. В случае помещения товара на ответственное хранение в связи с отсутствием  указанных  документов,  право  собственности на  товар  не  переходит к покупателю в момент,  предусмотренный договором или   соответствующим приложением М (спецификацией). В  этом случае право собственности на  товар  перейдет к покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных договором и/или соответствующим  приложением М либо с  даты приемки  товара,  если  покупатель воспользуется правом осуществить приемку товара до  получения указанных  документов.

В целях фиксации факта исполнения обязательства по  предоставлению  документов, документы должны быть предоставлены по адресу грузополучателя/получателя товара вместе с актом приема-передачи документов, подписанным уполномоченным представителем поставщика. Копии документов и акта приема-передачи документов  должны  быть направлены покупателю  посредством  электронной почты/ факсимильной связи  по реквизитам, указанным в разделе 20 настоящего договора. Акт  приема-передачи  документов, указанный в настоящем пункте, должен соответствовать требованиям,  приведенным  в  п.7.3. настоящего договора. 

Согласно пункту 4.1 базис поставки товара, график и  сроки  поставки, а  также  иные  условия  поставки  оговариваются по каждой партии товара  отдельно и отражаются в приложении  М (спецификации). 

В пункте 4.1.1. стороны предусмотрели, что срок поставки товара является существенным условием настоящего договора, поскольку только при соблюдении данного срока  покупатель/заказчик  сможет осуществить доставку поставленного товара до  месторождения  с  учетом  возможностей сезонного заказа: автомобильным  транспортом (зимний  завоз) либо  речным  транспортом (летний  завоз).

В приложении М согласован базис поставки – пункт назначения DDP,  ст.назначения  DDP  ст.Красноярск с  20.03 по  30.09  или  ст.Коротчаево с 30.09 по 20.03. Датой поставки является дата  штампа станции назначения,  проставленной в оригинале ж/д накладной (при  поставке ж/д транспортом)  или дата  отметки грузополучателя товарно-транспортной накладной (при  поставке автомобильным  транспортом).

Согласно пункту 4.2.3 договора базис  поставки – пункт  назначения: датой поставки является дата, проставленная в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения. Обязанность поставщика по поставке товара считается исполненной с момента  проставления  отметки в  оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения,  свидетельствующая  о прибытии товара  в  пункт назначения. 

В разделе 5 договора согласованы условия приемки товара, согласно пункту 5.1 которого приемка товара по качеству, количеству и комплектности производится покупателем  в  одностороннем  порядке в течение  5 календарных  дней с  даты поставки на  основании данных, указанных в документах, перечень которых  установлен  в п.7.1 договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных,  авианакладных и  иных  товарных накладных или  актах  приема-передачи, оформляемых при передаче товара в месте нахождения склада покупателя (грузополучателя/получателя) товара.  Грузополучатель/получатель товара, указанных в соответствующем  приложении М (спецификации) к договору, является полномочным  представителем покупателя при осуществлении приемки и  проверки товара на соответствие условиям  настоящего договора и  приложениям  М и Н к нему. 

В абзаце 2  пункта  5.3  договора указано, что в  случае несоответствия товара условиям  договора  и  приложений М и Н к нему о  качестве  и/или о  комплектности  и/или о  сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных  недостатках  товара,  указанным в п. 5.2 настоящего договора,  покупатель имеет  право отказаться от приемки  такого  товара и  поместить его на   ответственное  хранение   до  момента  устранения   недостатков  и/или  замены и/или доукомплектования и/или сборки товара. В этом случае обязательства поставщика считаются  неисполненными, товар считается  не поставленным и  поставщик несет ответственность за просрочку поставки товара в соответствии с п.8.1 настоящего  договора. 

В соответствии  с  пунктом  7.1  договора   поставщик  обязан  одновременно с  товаром направить покупателю, предварительно согласованные с покупателем  документы,  предусмотренные  в пункте  2.13  Приложения Н,  в  том  числе: 

1. Разрешительная документация: 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям промышленной безопасности (соответствующих технических регламентов - национальных, либо Таможенного союза) - сертификат соответствия или декларация о соответствии, документацией, указанной в технических требованиях 1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01.

2. Сертификат ГОСТ Р (в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, или подлежала ей до вступления в силу соответствующего технического регламента - при условии, что сертификат ГОСТ Р выдан также до вступления в силу соответствующего технического регламента, и при этом не окончен срок переходного периода, установленный техническим регламентом).

3. Разрешение на применение, выданное Ростехнадзором (для продукции, изготовленной до 01.01.2014г.).

4. Заключение экспертизы промышленной безопасности (если соответствующим техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте).

Сертификаты пожарной безопасности примененных материалов.

5. Сертификат ISO 9001:2008 (или ISO 9001:2015 или ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

1. Схема автоматизации по ГОСТ 21.408-2013 с описанием.

2. Схема электрическая принципиальная.

3. Чертежи общего вида и схемы принципиальные на шкаф ЛСУ.

4. План расположения внешних коммутационных устройств (клеммных коробок, шкафа).

5. План размещения, привязки и размеры кабельных вводов, кабельных проходов.

6. Схемы (таблицы) соединений и подключений в клеммных кабельных коробках, шкафу с указанием номеров клеммных соединений.

7. Кабельные журналы.

8. Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок с указанием назначения кабелей (24 В, 220 В интерфейсные, аналоговые (4...20 мА)) сетей электроснабжения, автоматизации (развёрнутым способом по ГОСТ 21.408-2013 с описанием), сигнализации, связи, видеонаблюдения.

9. Карта регистров цифрового протокола. Данный тип документа включает следующие данные:

•  описание сигнала (например, давление);

•  адрес протокола регистра (например, Modbus RTU адрес ЗХХХХХ)

•  формат данных (например. 0.1 - давление, 0-1 - давление выше нормы, с обязательной расшифровкой в примечании уровней сигнала);

•  единица измерения (например, МПа для давления или прочерк для логики 0-1 -давление выше нормы);

•  тип данных (например, WORD, Double WORD, Float и т.д.);

•  примечание (обязательно указываются уровни для логических сигналов 0-1 и т.д., т.е. 1- давление выше нормы).

10. Техническое описание, пояснительная записка.

11.  Схемы технологические с описанием (гидравлическая).

12.  Габаритный, сборочный, монтажный чертежи, чертеж общего вида.

6. Планы размещения внутри помещений (отсеков) оборудования всех систем, кабельных проводок, трубопроводов, воздуховодов.

7.  Спецификации оборудования и материалов по всем системам, а также ведомость спецификаций.

Конструкторская документация  должна быть оформлена в виде технического проекта и содержать обязательные, но не ограничиваясь, следующие разделы АС, ТХ, АТХ, ЭС и т.д.

1.  Схема опирания здания на фундаменты (количество точек опирания, их привязка);

2.  Предоставить значения предельно допустимых деформаций (осадка, подъем, крен, прогиб, провис, относительная разность осадок и др.)

3.   Конструкторская документация:

Конструкторская документация должна быть оформлена в виде технического проекта и содержать обязательные, но не ограничиваясь, следующие разделы АС, ТХ, АТХ, ЭС и т.д. (точный состав технического проекта и сроки выдачи согласовать с Покупателем) с предоставлением следующих документов:

- Чертеж общего вида;

-  Схемы нагрузок на фундаменты (схема опирания емкостного оборудования на фундаменты (количество точек опирания, их привязка); габариты опорных частей емкостного оборудования; схема расположения отверстий под болты и их размер; величина нагрузок (вертикальных и горизонтальных) от емкостного оборудования, передающихся на фундамент);

- Документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости (ведомость спецификаций);

- Документ, содержащий объем работ на досборку и монтаж.

- Схема автоматизации по ГОСТ 21.408-2013 в развернутом виде с описанием;

- Схема электрическая принципиальная;

- Планы размещения внутри укрытия или на площадке оборудования всех систем, кабельных проводок;

- Чертежи общего вида и схемы принципиальные на шкафы силовые, шкафы автоматики и щиты управления;

- План расположения внешних коммутационных устройств (клеммных коробок, шкафов, ящиков);

-План  размещения,  привязки  и  размеры  кабельных вводов,  кабельных проходок;

- Схемы  (таблицы)  соединений  и  подключений  в  клеммных кабельных коробках, шкафах, ящиках с указанием номеров клеммных соединений;

- Кабельные журналы;

- Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок с указанием назначения  кабелей  (=24В,  -220В,  искробезопасные,  интерфейсные, аналоговые (4...20мА)):

- электроснабжения;

Поставщик предоставляет реестр разделов КД (в соответствии с ЕСКД), а также график выдачи разрабатываемых разделов в течение 10 дней с момента подписания Договора.

4. Эксплуатационная документация:

Паспорт, прилагаемый к оборудованию, должен быть издан типографским способом. Формат паспорта - 210x297 мм. Обложка паспорта - жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на плотной бумаге.

Паспорт,  прилагаемый  к  оборудованию,  должен  содержать следующие данные:

- заводской номер и год изготовления;

- сведения о заводе - изготовителе;

- наименование и обозначение (номер чертежа) аппарата;

- характеристика оборудования и комплектующих изделий;

- назначенный и расчетный сроки службы;

- материал основных элементов;

- масса;

- сведения об испытаниях;

- сведения о допущенных согласованных отклонениях от документации;

- перечень прилагаемой документации;

- свидетельство о качестве изготовления и монтажа, приемки и вводе в эксплуатацию с подписями должностных лиц; сведения о ремонтах, освидетельствовании и диагностировании, демонтаже и утилизации;

- шумовые характеристики оборудования согласно ГОСТ 12.1.003-2014 Требования к паспорту:

Паспорт, прилагаемый к оборудованию, должен быть издан типографским способом. Формат паспорта - 210x297 мм. Обложка паспорта - жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на плотной бумаге.

Паспорт,  прилагаемый   к  оборудованию,  должен  содержать  следующие данные:

Заводской номер и год изготовления;

Сведения о заводе - изготовителе;

Наименование и обозначение (номер чертежа) аппарата;

Характеристика оборудования и комплектующих изделий;

Назначенный и расчетный сроки службы;

Материал основных элементов;

Масса пустого аппарата;

Сведения об испытаниях;

Сведения о допущенных согласованных отклонениях от документации;

Перечень прилагаемой документации;

Свидетельство о качестве изготовления  и монтажу эксплуатацию с подписями должностных лиц;

Сведения о ремонтах, освидетельствовании и диагностировании, демонтаже и утилизации. Требования к руководству по эксплуатации:

Руководство по эксплуатации должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.610 и включать следующие разделы:

-  Описание и работа;

-  Использование по назначению;

-  Монтаж

-  Техническое обслуживание;

-  Ремонт;

-  Транспортирование и хранение;

-  Утилизация;

-  Техническое освидетельствование;

-  Руководство по эксплуатации должно быть согласовано с Заказчиком.

Дополнительные требования:

1. Документация также должна быть предоставлена в электронном виде в формате Adobe Acrobat (*.pdf).

2. Завод-изготовитель прикладывает в составе технической документации на поставляемый МТР перечень импортных комплектующих (материалов и оборудования) с указанием страны происхождения по каждой импортной позиции.

3.  Импортное оборудование, инструмент должны иметь техническую документацию   производителя, в том числе и на русском языке согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

4. Срок предоставления конструкторской  и разрешительной документации завода-изготовителя с даты объявления победителя (в календарных днях, не  более 10).

5. До начала производства оборудования предусмотреть направление конструкторской документации на согласование Покупателю:

Схему нагрузок на фундаменты (схема опирания емкостного оборудования на  фундаменты (количество точек опирания, их привязка); габариты опорных частей емкостного оборудования; схема расположения отверстий под болты и их размер; величина нагрузок (вертикальных и горизонтальных) от емкостного оборудования, передающихся на фундамент);

Чертеж общего вида;

Габаритные чертеж оборудования;

Электромонтажный чертеж;

Документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости (ведомость спецификаций).

В сопроводительной документации производитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способы утилизации оборудования после утраты им потребительских свойств, включая упаковку, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Изготовление оборудования начинать только после согласования конструкторской документации с Заказчиком и Проектировщиком.

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

В случае поставки Товара на базисе - склад Поставщика указанные выше документы передаются Покупателю/Грузополучателю одновременно с передачей Товара.

Поставщик согласовывает полный комплект Конструкторской документации с Покупателем до начала изготовления оборудования, в том числе перечень ЗИП на период ШМР, ПНР и на 2 года эксплуатации.

Срок предоставления  конструкторской и  разрешительной  документации  завода-изготовителя с  даты  объявления  победителя (в календарных  днях, не более 10). 

Согласно пункту 7.2  договора  в целях  информирования покупателя о  статусе выполнения  обязательств по настоящему  договору и подтверждения выполнения  обязательств по  поставке  товара   поставщик  обязуется предоставить следующие документы в указанные  сроки:   при  поставке  на  базисе  пункт назначения:

- все  документы, предоставляемые при  поставке на  базисе станция  отправления (в сроки,  указанные  в предыдущем  абзаце -  в  течение   трех  рабочих дней с  даты  отгрузки товара);

-  кроме того, при поставке автомобильным транспортом копию товаротранспортной накладной в течение 2  рабочих дней с  даты  отгрузки товара.  Копии  счетов-фактур   направляются на  электронный адрес info@vankoroil.ru . 

Поставщик обязан направить с  товаром документы,  предварительно  согласованные с покупателем. 

Пунктом 7.4 договора предусмотрено, что в случае предоставления документов, указанных в п.п. 7.1 и 7.2 настоящего договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О  предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, покупатель извещает поставщика соответствующим уведомлением, направленным  по  факсу. 

Согласно пункту  7.9  договора  в случае  если  это  предусмотрено  приложением  М, поставщик обязуется предоставить покупателю для согласования проектно-конструкторскую документацию на товар, разработанную на основании технических требований  покупателя.

Документация должна быть предоставлена поставщиком в оригиналах,  подписанных уполномоченным представителем поставщика на почтовый адрес  покупателя,  указанный в разделе 20  договора. Копии  всех документов должны направляться  на  электронный адрес  покупателя,  указанный в приложении М. 

Приложением М и Н определяются: перечень  документации,  сроки предоставления  документации, сроки согласования документации со стороны покупателя, а также  электронный адрес покупателя.

Право согласования проектно-конструкторской документации на товар  принадлежит  исключительно  покупателю (ни  грузополучатель, ни заказчик, ни  иные  третьи лица не являются лицами, уполномоченными согласовывать проектно-конструкторскую документацию  на  товар).

Покупатель обязуется согласовать представленную проектно-конструкторскую документацию на товар  или  направить  требование о корректировке  в срок,  указанный в приложении  М и Н, путем направления по  факсу с обязательным   направлением  оригинала согласования/требования о корректировке, подписанного уполномоченным лицом покупателя  не  позднее 3  рабочих дней  с  даты  направления  по  факсу. 

В случае  получения  требования  о  корректировке,  поставщик обязуется в срок не  более 5 рабочих дней внести соответствующие изменения и  повторно представить  документацию для согласования. 

В случае просрочки покупателем согласования проектно-конструкторской  документации на  товар,  срок  исполнения обязательств поставщика по  поставке товара продлевается соразмерно  периоду просрочки, и  поставщик не  несет ответственности  за просрочку поставки  в пределах  такого  продления. 

Пунктом 8.1.1. договора установлено, что в случае нарушения  сроков поставки  товара, предусмотренных в  настоящем  договоре и  приложении  М (спецификации) к  нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного товара сопроводительным документам, поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,3% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не  более чем 30% от стоимости непоставленного в срок товара. При этом пеня  рассчитывается  за период  с даты истечения срока поставки до даты исполнения поставщиком обязательств по  поставке. 

В пункте 8.1.4 договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков предоставления  проектно-конструкторской документации, установленных Приложением  М,  поставщик  покупателю  пеню  в  размере 1000 руб. в  день за каждый  день просрочки, но не  более 5% от стоимости товара, на который не была предоставлена проектно-конструкторская  документация.

Согласно пункту 11.1 договора все споры, разногласия или требования,  возникающие  из настоящего договора  или  в  связи  с ним, в  том  числе,  касающиеся  его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению  в Арбитражном суде Красноярского края. Соблюдения претензионного порядка разрешения споров не  требуется. 

В приложении  М  к  договору согласован  срок поставки -  март  2018  года.  Периоды   поставки,  указанные  в  графике поставки ,  исчисляются с  первого  числа  календарного месяца и до даты окончания периода поставки, указанной в соответствующей  главе (включительно). Т.е. последним  днем периода  поставки является  дата,  указанная в соответствующей графе графика поставки, а первым  днем периода поставки является первое число календарного  месяца,  в котором  заканчивается период  поставки.

Стоимость  товара, указанная в приложении М, составляет  28 585 274 руб. 76  коп. 

Технические условия. Весь товар должен изготавливаться и  поставляться в соответствии с требованиями опросных листов и  технических требований покупателя,  а  также  требованиями  существующих  ГОСТ и ТУ. Объем и  перечень предоставляемой и  согласуемой конструкторской  документации  должен  полностью  соответствовать «Требованиям к конструкторской документации, приемке и транспортировке  оборудования» № 2102-33-110000-ТКД. Техническая  документация  поставщика должна  иметь: полный  реестр документации,  информацию  о  состоянии разработки и  выпуска  документации ( с указанием  сроков   представления  очередных  версий  документов),   компоновочные чертежи  оборудования,  паспорта,  сертификаты и разрешения  на применение   оборудования и  изделий.  Поставщик в  течение  14 дней после  подписания  договора  направляет исходные  данные  для проектирования: планы  с расположением  входов и выходов трубопроводов, мест вводов инженерных сетей, силовых и контрольных  кабелей, схемы  опирания  оборудования и  трубопроводов на  фундаменты (количество  точек опирания,  их  привязка),  вид  крепления к фундаментам (анкерными  болтами  или  закладными деталями), задание на подключение к внешним сетям с основными  параметрами для трубных  соединений,   основные размеры и  фасады  зданий,   площадки  входа  на  постамент (количество точек опирания и их привязка), тип крепления  оборудования площадок входа к постаменту (анкерными  болтами или сварное к  накладным  деталями  или ростверку), для  болтового  крепления  - диаметр  отверстий под  болты в основании блока, схема расположения отверстий, требуемая длина выступающей части болтов, нагрузок (вертикальных и горизонтальных), крутящие моменты, передающихся  на фундамент  в  точках  крепления, указать  вид учтенных нагрузок (вес при гидроиспытаниях, собственный вес,  гололед,  снег  и т.д.), отметки  верха постамента и  опор  под  оборудование, высоту основания блока, входной площадки от опорных поверхностей до чистого пола блока. Проектная документация,  представляемая поставщиком: Компоновочные чертежи с размерами,  включая: Основные  размеры,  план  фундамента  и  данные  по нагрузками (статическими и   динамическими),  вес  оборудования, отгрузочный вес,  центр  тяжести,   допустимые  силы  и моменты  для  штуцеров, основные  параметры  для  трубных  соединений,   распределительные  коробки  для электрооборудования и КИП, необходимое расстояние. Схемы КИП и  соединительных коробок. Схемы прокладки кабелей КИП. Детальные чертежи  подключения оборудования схемы управления/соединительных коробок. Кабельный журнал  соединительных  кабелей.

Исполнительная  документация направляется вместе с оборудованием: Паспорта на  основное оборудование, Руководство по  монтажу, эксплуатации и техническому  обслуживанию и  ремонту.  Рекомендуемые  запасные части и специальный инструмент с ценами. Чертежи  поперечного сечения и полный перечень деталей основного оборудования. Утвержденные исполнительные  чертежи по  компонентам. План  проверок и  испытаний. Акты контроля сварных швов  и  гидравлических испытаний. Данные эксплуатационных испытаний ТУ на материалы (акты  испытаний материала,  заводские акты  испытаний и т.д.). Упаковочные листы с указанием номера  договора, номера ТТН, номера  машины или  вагона.

Разрешительная документация предоставляемая поставщиком: Разрешение  федеральной  службы по  экологическому, технологическому  и атомному  надзору (нотариально заверенная копия), Сертификат соответствия системы менеджмента качества по ИСО9001:2008 (копия). Российский сертификат соответствия  на соответствие  требованиям  технического регламента о безопасности машин и оборудования (копия). Сертификат прохождения поставляемого оборудования (копия).

Объем и перечень конструкторской документации должен полностью соответствовать требованиям исходной заказной документации (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01), ЕСКД (ГОСТ 2.102-2013) и «Требованиям к конструкторской документации, приемке и транспортировке  оборудования  № 2102-33-110000-ТКД».

В течение 10 дней с момента подписания договора предоставить  в адрес  покупателя и проектного института реестр разделов конструкторской документации,  а  также  график выдачи  разрабатываемых разделов документации. В течение  30-40 календарных дней  после подписания договора, поставщиком предоставляется конструкторская  документация  в полном  объеме. Поставщик самостоятельно  осуществляет разработку  документации и  согласование конструкторской  документации  с проектным  институтом.  Название  проектного института и  контактное лицо  проектного института  по  договору сообщается покупателем  по запросу поставщика. Документация  передается поставщиком  на согласование  в проектный  институт  с сопроводительным  письмом,  копия которого  в  обязательном  порядке  высылается покупателю. В случае  внутриблочного  монтажа и сборки основного оборудования  силами  подрядной организации поставщик  обязуется  предоставить ведомость объемов  работ, необходимых для   доведения  основного   оборудования до  состояния полной заводской  готовности в проектный  институт  не позднее 7 календарных дней после согласования КД с покупателем. В случае  несвоевременной передачи ведомостей объемов  работ  в проектный  институт  поставщик собственными  силами и  за  свой счет  проводит работы по  внутриблочному  монтажу и  подключению  основного оборудования  до  состояния  полной  заводской  готовности.  После получения согласования конструкторской  документации  в проектном  институте  поставщик предоставляет покупателю на утверждение пакет документации,  согласованный с проектным  институтом. Покупатель  выдает  положительное заключение (утверждает документацию) или  указывает необходимые изменения и/или  дополнения  по   документации  в течение  десяти   рабочих дней после предоставления  документации,  официально направляет  ответ  поставщику. Требования к оформлению,  количеству  экземпляров,  срокам передаваемой  покупателю документации (разрешительная,  конструкторская, эксплуатационная).

АО «РН-Снабжение» обратилось  к ООО НПП «НМК»  с письмом  №АМ-85244  от  23.11.2017,  в котором  указано  ответственное лицо за  заключение  договора со стороны АО «РН-Снабжение» по итогам признания ООО НПП «НМК»  победителем  закупки.

ООО  НПП «НефтеМодульКомплект»  обратилось к  АО «Сузун»  с письмом № 1051 от 12.12.2017  о направлении   комплекта  документации на согласование.  В приложении  к письму указаны: схема  расположения  оборудования, габаритные  размеры и  цветовое решение  установки  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№ 1045, схема гидравлическая принципиальная установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№ 1045, спецификация комплектации технологической части установки  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№ 1045, строительное задание  для проектирования фундамента под установку  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№ 1045,  НМК1045.00.00.000 КЖ Кабельный журнал, НМК1045.00.00.000 Э6 Схема электрическая  общая, спецификация  оборудования № 1045,  план расположения  электрооборудования  и  кабельных  проводок № 1045,  НМК1045.14.00 Описание  системы управления, НМК1045.00.00.000 АТХ.

Письмом № 1098 от 28.12.2017 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» просило  АО «Сузун» ускорить процесс согласования с целью соблюдения сроков поставки со  стороны поставщика.

ООО «РН-Ванкор» письмом от 18.01.2018 № РНВ-1575 обратилось к ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в ответ на письма №1051, №1098 и сообщило, что  конструкторская  документация на установку дозирования подачи метанола для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка  подготовки газа  с компрессорной станцией для ПНГ» (175061/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01) рассмотрена специалистами ООО «РН-Ванкор» с замечаниями. В  письме предложено  устранить замечания  до 25.01.2018. 

Письмом  № 28  от 18.01.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» обратилось  к АО «Сузун» с просьбой считать высланный комплект РКД с письмом  № 1051  от 12.12.2017  недействительным, а  также в ускоренном  режиме  официально согласовать  приложенные документы. К письму № 28 от 18.01.2018 приложены следующие  документы: схема  расположения  оборудования, габаритные размеры и цветовое решение  установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№ 1045,  схема гидравлическая принципиальная установки  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№1045, спецификация комплектации технологической части установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№ 1045  , строительное задание для проектирования фундамента под установку  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№1045, НМК1045.00.00.000 КЖ Кабельный журнал, НМК1045.00.00.000 Э6 Схема электрическая  общая,  спецификация  оборудования № 1045,  план расположения  электрооборудования  и  кабельных  проводок № 1045,  НМК1045.14.00 Описание  системы управления, НМК1045.00.00.000 АТХ.

Письмом  № 31-00676 от 19.01.2018 ООО «НК «Роснефть» -НТЦ» направило  в адрес ООО «РН-Ванкор» и в адрес  ООО НПП «НМК» протокол рассмотрения КД  на УДХ  с  замечаниями. 

В  письме № 69  от  02.02.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» направило  в адрес  АО «Сузун» отредактированный комплект РКД с ответами на замечания. В приложении  к письму указаны: 

1.   Протокол рассмотрения КД на УДХ.х1зх с комментариями поставщика;

2.   Таблица замечаний ВН к КД от 18.01.2018.х1зх с комментариями поставщика;

3.   Общий вид установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

4.   Схема    гидравлическая    принципиальная    установки    дозированной    подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

5.   Спецификация комплектации технологической части на установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

6.   Строительное задание для проектирования фундамента под установку дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

7.   План расположения. Строительные конструкции установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

8.   НМК1045.00.00.000 КЖ2 Кабельный журнал силовая часть;

9.   НМК1045.00.02.000 Э6 Схема электрическая общая силовая часть;

10. НМК1045.00.00.000 КЖЗ Кабельный журнал КИП;

11. НМК1045.00.03.000 Э6 Схема электрическая общая КИП;

12. НМК1045.00.00.000 КЖ1 Кабельный журнал ОПС;

13. НМК1045,00.01.000 Э6 Схема электрическая общая ОПС;

14. Расчет АКБ для ОС;

15. Расчет АКБ для ПС;   

16. Спецификация оборудования №1045;

17. План расположения электрооборудования и кабельных проводок № 1045;

18. НМК1045.14.00 Описание системы управления;

19.  НМК1045.00.00.000 АТХ

20. НМК1045.00.00.000 Э4 Схема линейная; 

21. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф контрольный;

22. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф силовой;

23. Спецификация шкафов.             

ООО «РН-Ванкор» письмом № РНВ-5921 от 13.02.2018 сообщило ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в ответ на  письмо  № 69, что конструкторская документация на установку дозирования подачи метанола для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка подготовки газа с компрессорной станцией для ПНГ» (175061/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01) рассмотрена специалистами ООО «РН-Ванкор» с  замечаниями. В письме содержится просьба предоставить откорректированную  документацию  в полном  объеме в срок  до 19.02.2018.

Письмом  № 31-02822 от 19.02.2018 ООО «НК «Роснефть» -НТЦ» направило в адрес ООО «РН-Ванкор» и в адрес  ООО НПП «НМК» протокол рассмотрения КД  на УДХ  с  замечаниями. 

Письмом  № 121 от 16.02.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  обратилось  к ЗАО «Ванкорнефть» с просьбой согласовать марку агрегатов электро-насосных, состав приборов КИПиА, принципиальную гидравлическую  схему,  а  также  тип  использования  аппаратурного отсека,  марку контроллера  управления SMH 4G. К письму приложены: схема  расположения  оборудования, габаритные  размеры и  цветовое решение  установки  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№1045, схема гидравлическая принципиальная установки  дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№1045, спецификация комплектации технологической части установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№1045, спецификация  оборудования № 1045. 

 В ответном письме № 31-03421 от 28.02.2018 ООО «НК «Роснефть» -НТЦ» направило в адрес ООО «РН-Ванкор» и в адрес ООО НПП «НМК» протокол рассмотрения КД  на УДХ  с  замечаниями. 

В ответ на  письмо РНВ-5921 от 13.02.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  обратилось к АО «Сузун» с отредактированным комплектом РКД с ответами на  замечания (исх. № 177 от 05.03.2018),  в приложении  указаны:

1.   Таблица замечаний ВНкКД от 12.02.18.х1зх с ответами поставщика;

2.   Приложение Ш1 от 09.02.18 с ответами поставщика;

3.   Общий вид установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

4.   Схема    гидравлическая    принципиальная    установки    дозированной    подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

5.   Спецификация комплектации технологической части на установки дозированной подачи химреагентов ХЦХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

6.   Строительное задание для проектирования фундамента под установку дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

7.   План расположения. Строительные конструкции установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

8.   Габаритный чертеж УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

9.   Каркас укрытия УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

10. План расположения систем отопления и вентиляции;

11. План расположения. Строительные конструкции установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1;

12. Техническое описание;

13. НМК1045.00.00.000 КЖ2 Кабельный журнал силовая часть;     

14. НМК1045.00.02.000 Э6 Схема электрическая общая силовая

15. НМК1045.00.00.000 КЖЗ Кабельный журнал КИП;

16. НМК1045.00.03.000 Э6 Схема электрическая общая КИП;

17. НМК1045.00.00.000 КЖ1 Кабельный журнал ОПС;

18. НМК1045.00.01 .000 Э6 Схема электрическая общая ОПС;

19. Расчет АКБ для ОС;

20. Расчет АКБ для ПС;

21. Спецификация оборудования №1045;

22. План расположения электрооборудования и кабельных проводок № 1045;

23. НМК1045.14.00 Описание системы управления;

24.  НМК1045.00.00.000 АТХ;   .

25. НМК1045.00,00.000 Э4 Схема линейная;

26. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф контрольный;

27. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф силовой;

28. Спецификация шкафов.

ООО «РН-Ванкор» письмом от 19.03.2018 № РНВ-10642 сообщило ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в ответ на письмо № 177  от 05.03.2018,  конструкторская  документация рассмотрена специалистами  ООО «РН-Ванкор» с  замечаниями. Срок  на устранение  замечаний  - до 23.03.2018. 

В ответном письме № 249 от 26.03.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  направило АО «Сузун»  отредактированный РКД с ответами на замечания, в приложении  указаны: 

1.   Пояснительная записка;

2.   Схема гидравлическая принципиальная;

3.   Ведомость спецификаций;

4.   НМК1045.00.00.000АГХ;

5.   НМК1045.14.00

6.   План расположения электрооборудования и кабельных проводок;

7.   НМК1045.00.00.000 КЖЗ Кабельный журнал КИП;

8.   НМК1045.00.03.000 Э6 Схема электрическая общая КИП;

9.   Строительное задание;

10. План здания;

11. Каркас;

12. Обшивка;

13. Прочностной расчет;

14. Теплотех. расчет;

15. Сертификат на утеплитель;

16. Общий вид;

17. Спецификация комплектации технологической части;

18. Спецификация оборудования №1045;

19. Спецификация электромонтажа №1045.

20. Таблица замечаний ВН к КД от 19.03.18.xisx с ответами поставщика;

21. Ответы на замечания ФИО5 docx;

22. Расчет АКБ для ОС;

23. Расчет АКБ для ПС;

24. НМК 1045.00.00.000 Э4 Схема линейная;

25. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф контрольный;

26. НМК1045Л4.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф силовой;

В  письме № 31-06078 от 07.04.2018 ООО «НК «Роснефть» -НТЦ» направило  в адрес   ООО «РН-Ванкор» и в адрес  ООО НПП «НМК» протокол рассмотрения КД  на УДХ  с  замечаниями (в  ответ на  письмо  № 249 от 26.03.2018). 

04.04.2018  ООО «РН-Ванкор»  письмом № РНВ-13241  в  ответ на  обращение за  исх. № 249  от 26.03.2018   сообщило,  что  конструкторская  документация  рассмотрена   специалистами  ООО «РН-Ванкор» с замечаниями. В письме содержится просьба  представить  откорректированную документацию  в срок  до  10.04.2018. 

ООО НПП «НефтеМодульКомплект» письмом № 305 от 16.04.2018 направило  в адрес АО «Сузун» в ответ на письмо № 31-06078 от 07.04.2018 отредактированный комплект РКД с  ответами на  замечания. В приложении  указаны: 

1.   Пояснительная записка;

2.   Схема гидравлическая принципиальная;

3.   Ведомость спецификаций;

4.   НМК1045.00.00.000 АТХ;

5.   НМК 1045.14.00;

6.   План расположения электрооборудования и кабельных проводок;

7.   НМК 1045.00.00.000 КЖЗ Кабельный журнал КИП

8.   НМК1045.00.03.000 Э6 Схема электрическая общая КИП;

9.   Строительное задание;

10. План здания;

11. Каркас;

12. Спецификация комплектации ЗИП на установку; 

13. Прочностной расчет;

14. Теплотех. расчет;

15. Сертификат на сэндвич-панель;

16. Общий вид;

17. Спецификация комплектации технологической части;

18. Спецификация оборудования №1045;

19. Спецификация автоматизации;

20. Спецификация электромонтажа;

21. Чертежи отдела АС от ООО «НК «Роснефть»- НТЦ»

22. Ведомость электромонтажных работ;

23. Ответы на замечания ФИО5 dосх;

24. Протокол рассмотрения КД на УДХ с комментариями Поставщика;

25. Таблица замечаний ВН К КД от 03.04.2018 с комментариями поставщика;

26. Расчет АКБ для ОС;

27. Расчет АКБ для ПС;

28. НМК1045.00.00.000 ЮК1 Кабельный журнал ОПС;

29. НМК1045.00.01.000 Э6 Схема электрическая общая ОПС;

30. НМК1045.00.00.000 КЖ2 Кабельный журнал силовая часть;

31. НМК1045.00.02.000 Э6 Схема электрическая общая силовая часть;

32. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф контрольный;

33. НМК1045.14.00.001 Э4 Схема монтажная Шкаф силовой;

34. НМК1045Д4.00.000 ЭО;

35. Техническая документация на агрегаты электронасосные;

36. Ведомость приложений на установку УДХ.

ООО «РН-Ванкор» письмом № РНВ-17198 от 27.04.2018 сообщило ООО НПП «НефтеМодульКомплект» о рассмотрении конструкторской документации  специалистами  ООО «РН-Ванкор»  с  замечаниями. Предложено  устранить   замечания  в срок  до 08.05.2018.

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»   письмом № 31-08006 от 04.05.2018  направило  в   адрес  ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  протокол  с  замечаниями.  

Письмом № 353  от 08.05.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  в  ответ на   обращение за исх. № 31-08006 от 05.05.2018 просило АО «Сузун» организовать селектор 10.05.2018 для обсуждения возникших замечаний с целью ускорения процесса  согласования РКД.

ООО НПП «НефтеМодульКомплект» письмом № 372  от 15.05.2018  в  ответ на   обращение исх.№ 31-08006 от 04.05.2018 направило в адрес АО «Сузун»  отредактированный  комплект  РКД с  ответами  на  замечания.  К письму приложены: 

1.   Протокол рассмотрения КД на УДХ с ответами поставщика от 15.05.2018;

2.   Таблица замечаний ВН к КД от 27.04.2018 с ответами поставщика от 15.05.2018;

3.   1045.00.00.000 ВД Ведомость рабочих чертежей;

4.   1045.00.00.000 ВС Ведомость спецификаций;

5.   1045.00.00.000 ВР Ведомость электромонтажных работ;

6.   Сертификат на сэндвич-панель;

7.   1045.00.00.000 АС.ГЧ Строительные конструкции;

8.   1045.00.00,000 АС.МЧ Строительное задание;

9.   17506140537Д-01-732300-АС-Ч-03 Чертежи отдела АС от ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»; 

10.1045.00.00.000 АС.ВД Ведомость рабочих чертежей АС;

11. 1045.00.00.000 КМ.РР1 Прочностной расчет;

12.1045.02.00.000 КМ.СБ Каркас;

13.1045.00.00.000 КМ.ВД Ведомость рабочих чертежей КМ;

14.1045.00.00.000 ОВ.ПЗ Теплотехнический расчет. Пояснительная записка;

15.1045.00.00.000 ОВ.РР1 Теплоехнический расчет;               

16.1045.00.00.000 ОВ.С7 Отопление, вентиляция;                

17. 1045.00.00.000 ОВ.ВД Ведомость рабочих чертежей ОВ;

18. 1045.00.00.000 ТХ.ВО Общий вид; 

19. 1045.00.00.000 ТХ.Г3 Схема гидравлическая принципиальная; 

20. 1045.00.00.000 ТХ.ПЗ Пояснительная записка;

21. 1045.00.00.000 ТХ.СП1Спецификация комплектации ЗИП;

22.1045.00.00.000 ТХ.СП2 Спецификация комплектации;

23.1045.00.00.000 ТХ.ВД Ведомость рабочих чертежей ТХ;

24.1045.00.02.000 ЭС.Э6 Схема электрическая общая силовая часть;

25.1045.00.00.000 ЭС.КЖ2 Кабельный журнал силовая часть;

26.1045.10.00.000 ЭС.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок

№1045 силовая часть; 

27.1045.00.00.000 ЭС.СП1 Спецификация оборудования №1045 силовая часть; 28.1045.00.00.000 ЭС.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 силовая

часть; 

29. 1045.00.00.000 ЭС.Э0 Схема однолинейная шкафа силового; 

30.1045.00.00.000 ЭС.Э4 Схема монтажная силового шкафа; 

31.1045.00.00.000 ЭС.СП3 Спецификация шкафа силового; 

32.1045.00.00.000 ЭС.ВД Ведомость рабочих чертежей ЭС; 

33.1045.00.00.000 АК.АТХ Схема функциональная;

34. 1045.00.00.000 АК.ПЗ Пояснительная записка систем автоматизации (структурная схема лсу, карта modbus описание ПАЗ, описание алгортмов и уставок) 

35.1045.00.00.000 АК.СП1 Спецификация шкафа автоматизации; 

36. 1045.00.00.000 АК.Э4 Схема монтажная контрольного шкафа; 

37. 1045.00.03.000 АК.Э6 Схема электрическая общая часть КИП;

38.1045.00.00.000 АК.КЖ3 Кабельный журнал часть КИП; 

39.1045.10.00.000 АК.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок

№1045 часть КИП; 

40.1045.00.00.000 АК.СП2 Спецификация оборудования №1045 часть КИП; 41.1045.00.00.000 АК.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 часть КИП;

42.  1045.00.00.000 АК.ВД Ведомость рабочих чертежей АК;

43.  1045.00.01.000 ОПС.Э6 Схема электрическая общая часть ОПС; 

44.1045.00.00.000 ОПС.КЖ1 Кабельный журнал часть ОПС;

45.1045.10.00.000 ОПС.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок №1045 часть ОПС; 

46. 1045.00.00.000 ОПС.СП1Спецификация оборудования №1045 часть ОПС; 

47. 1045.00.00.000 ОПС.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 часть

ОПС; 

48. 1045.00.00.000 ОПС.РР1 Расчет АКБ для ПС; 

49. 1045.00.00.000 ОПС.РР2 Расчет АКБ для ОС; 

50. 1045.00.00.000 ОПС.ВД Ведомость рабочих чертежей ОПС.

ООО «РН-Ванкор» письмом № РНВ-21264 от 25.05.2018 сообщило  ООО НПП «НефтеМодульКомпплект» о рассмотрении конструкторской  документации  специалистами ООО «РН-Ванкор»  с  замечаниями,  указано на  устранение  замечаний в срок  до 01.06.2018. 

В  ответ на письмо  № 372 от 15.05.2018  ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» письмом  № 31-09733 от 28.05.2018 направило в адрес ООО НПП «НМК» протокол рассмотрения КД на УДХ  с  замечаниями. 

В  ответ на  письмо № РНВ-21264 от 25.05.2018 о рассмотрении  КД  направило  в адрес АО «Сузун» отредактированный комплект РКД с ответами на замечания,  с  приложением: протокола рассмотрения КД и ВОР от 25.05.2018.

ООО «НК «РОСНЕФТЬ –Научно-технический центр» письмом от  28.05.2018 № 31-09733 обратилось к ООО «РН-Ванкор», к ООО НПП «НМК» направило результаты  рассмотрения конструкторской документации на оборудование - установка  дозированной подачи  метанола. 

01.06.2018  за  исх. № 423 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» направило  в адрес  АО «Сузун» отредактированный комплект РКД  с  ответами  на  замечания. В приложении  указаны: 

1.   Протокол рассмотрения КД на УДХ с ответами поставщика от 01.06.2018;

2.   Таблица замечаний ВН к КД от 25.05.2018 с ответами поставщика от 01.06.2018;

3.   1045.00.00.000 ВД Ведомость рабочих чертежей;

4.   1045.00.00.000 ВС Ведомость спецификаций;

5.   1045.00.00.000 ВР Ведомость объемов работ;

6.   Сертификат на сэндвич-панель;

7.   Сертификат на плиту минераловатную;

8.   1045.00.00.000 АС.ГЧ Строительные конструкции;

9.   1045.00.00.000 АС.МЧ Строительное задание;

10.17506140537Д-01-732300-АС-Ч-03 Чертежи отдела АС от ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»; 

11. 1045.00.00.000 АС.ВД Ведомость рабочих чертежей АС; 

12. 1045.00.00.000 КМ.РР1 Прочностной расчет; 

13. 1045.02.00.000 КМ.СБ Каркас;

14.1045.00.00.000 КМ.ВД Ведомость рабочих чертежей КМ;

15.1045.00.00.000 ОВ.ПЗ Теплотехнический расчет. Пояснительная записка;

16.1045.00.00.000 ОВ.С7 Отопление, вентиляция;

17.1045.00.00.000 ОВ.ВД Ведомость рабочих чертежей ОВ;

18.1045.00.00.000 ТХ.ВО Общий вид;

19.1045.00.00.000 ТХ.Г3 Схема гидравлическая принципиальная;

20.1045.00.00.000 ТХ.ПЗ Пояснительная записка;

21.1045.00.00.000 ТХ.СП1 Спецификация комплектации ЗИП;

22.1045,00.00.000 ТХ.СП2 Спецификация комплектации;

23.1045,00.00.000 ТХ.ВД Ведомость рабочих чертежей ТХ;

24.1045.00.02.000 ЭС.Э6 Схема электрическая общая силовая часть;

25.1045.00.00.000 ЭС.КЖ2 Кабельный журнал силовая часть;

26.1045.10.00.000 ЭС.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок

№1045 силовая часть;

27. 1045.00.00.000 ЭС.СП1 Спецификация оборудования №1045 силовая часть; 

28. 1045.00.00.000 ЭС.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 силовая

часть; 

29. 1045.00.00.000 ЭС.Э0 Схема однолинейная шкафа силового; 

30. 1045.00.00.000 ЭС.Э4 Схема монтажная силового шкафа;

31. 1045.00.00.000 ЭС.СП3 Спецификация шкафа силового;

32. 1045.00.00.000 ЭС.ВД Ведомость рабочих чертежей ЭС; 

33. 1045.00.00.000 АК.АТХ Схема функциональная;

34. 1045.00.00.000 АК.П3 Пояснительная записка систем автоматизации (структурная схема лсу, карта Modbus описание ПАЗ, описание алгоритмов и установок) 

35.1045.00.00.000 АК.СП1 Спецификация шкафа автоматизации; 

36.1045.00.00.000 АК.Э4 Схема монтажная контрольного шкафа; 

37.1045.00,03.000 АК.Э6 Схема электрическая общая часть КИП; 

38.1045.00.00.000 АК.КЖ3 Кабельный журнал часть КИП; 

39.1045.10.00.000 АК.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок

№1045 часть КИП; 

40.1045.00.00.000 АК.СП2 Спецификация оборудования №1045 часть КИП; 41.1045.00.00.000 АК.СП3 Спещфикация электромонтажа оборудования №1045 часть КИП; 

42.1045.00.00.000 АК.ВД Ведомость рабочих чертежей АК; 

43. 1045.00.01.000 ОПС.Э6 Схема электрическая общая часть ОПС; 

44.1045.00.00.000 ОПС.КЖ1 Кабельный журнал часть ОПС; 

45.1045.10.00.000 ОПС.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных  проводок №1045 часть ОПС; 

46.1045.00.00.000 ОПС.СП1 Спецификация оборудования №1045 часть ОПС; 47.1045.00.00.000 ОПС.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 часть

ОПС;

48.1045.00.00.000 ОПС.РР1 Расчет АКБ для ПС; 

49.1045.00.00.000 ОПС.РР2 Расчет АКБ для ОС; 

50. 1045.00.00.000 ОПС.ВД Ведомость рабочих чертежей ОПС.

13.06.2018  ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» за  исх. №31-10833  в  ответ на письмо  № 423  от  01.06.2018  направило  протокол рассмотрения КД на УДХ  с  замечаниями.

АО «Сузун»  обратилось  к ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  с  письмом № СМ-3762 от 19.06.2018 в ответ на письмо № 423 от 01.06.2018 и сообщило, что  конструкторская  документация и ведомость объемов работ на установку дозирования подачи метанола для  объекта «Обустройство Сузунского месторождения. Установка  подготовки  газа с  компрессорной станцией для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01)  рассмотрены и  согласованы (31-10833 от 13.06.2018). В письме  содержится просьба в срок  до  26.06.2018  предоставить  в адрес  ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» и  в адрес АО «Сузун»  полный комплект  актуальной конструкторской  документации и ведомость объемов  работ, оформленный в соответствии с  ЕСКД, 2102-33-110000-ТКД. Кроме  того, в письме указано о направлении  в срок  до 10.07.2018  на  рассмотрение и согласование   проектов  эксплуатационной  документации (РЭ и  паспорт). 

В  ответ на  письмо № СМ-3762  от  19.06.2018  о  согласовании  КД  и  ВОР  на установку  дозированной подачи  химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1  зав.№1045 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  направило (исх.№ 475  от  21.06.2018)  в   адрес  АО «Сузун»:

1. 1045.00.00.000 ВД Ведомость рабочих чертежей; 

2.1045.00.00.000 ВС Ведомость спецификаций; 

3.1045.00.00.000 ВР Ведомость объемов работ; 

4. Сертификат на сэндвич-панель; 

5. Сертификат на плиту минераловатную; 

6. 1045.00.00.000 АС.ГЧ Строительные конструкции; 

7. 1045.00.00.000 АС.МЧ Строительное задание;

8.    17506140537Д-01-732300-АС-Ч-03 Чертежи отдела АС от ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;

9.    1045.00.00.000 АС.ВД Ведомость рабочих чертежей АС;

10.  1045.00.00.000 КМ.РР1 Прочностной расчет;

11.  1045.02.00.000 КМ.СБ Каркас;

12.  1045.00.00.000 КМ.ВД Ведомость рабочих чертежей КМ;

13.  1045.00.00.000 ОВ.ПЗ Теплотехнический расчет. Пояснительная записка;

14.  1045.00.00.000 ОВ.С7 Отопление, вентиляция;

15.  1045.00.00.000 ОВ.ВД Ведомость рабочих чертежей ОВ;

16.  1045.00.00.000 ТХ.ВО Общий вид;

17.  1045.00.00.000 ТХ.ГЗ Схема гидравлическая принципиальная;

18.  1045.00.00.000 ТХ.ПЗ Пояснительная записка;

19.  1045.00.00.000 ТХ.СП1 Спецификация комплектации ЗИП;

20.  1045.00.00.000 ТХ.СП2 Спецификация комплектации;

21.  1045.00.00.000 ТХ.ВД Ведомость рабочих чертежей ТХ;

22.  1045.00.02.000 ЭС.Э6 Схема электрическая общая силовая часть;

23.  1045.00.00.000 ЭС.КЖ2 Кабельный журнал силовая часть;

24.  1045.10.00.000 ЭС.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок № 1045 силовая часть;

25.  1045.00.00.000 ЭС.СП1 Спецификация оборудования №1045 силовая часть;

26.  1045.00.00.000 ЭС.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 силовая часть;

27. 1045.00.00.000 ЭС.Э0 Схема однолинейная шкафа силового; 

28. 1045.00.00.000 ЭС.Э4 Схема монтажная силового шкафа;

29. 1045.00.00.000 ЭС.СП3 Спецификация шкафа силового;

30. 1045.00.00.000 ЭС.ВД Ведомость рабочих чертежей ЭС; 

31. 1045.00.00.000 АК.АТХ Схема функциональная;

32. 1045.00.00.000 АК.П3 Пояснительная записка систем автоматизации (структурная схема лсу, карта Modbus описание ПАЗ, описание алгоритмов и установок)

33. 1045.00.00.000 АК.СП1 Спецификация шкафа автоматизации;

34. 1045.00.00.000 АК.Э4 Схема монтажная контрольного шкафа;

35. 1045.00.03.000 АК.Э6 Схема электрическая общая часть КИП; 

36. 1045.00.00.000 АК.КЖ3 Кабельный журнал часть КИП;

37. 1045.10.00.000 АК.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок №1045 часть КИП;

38. 1045.00.00.000 АК.СП2 Спецификация оборудования №1045 часть КИП;

39. 1045.00.00.000 АК.СП3 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 часть КИП;

40. 1045.00.00.000 АК.ВД Ведомость рабочих чертежей АК;

41. 1045.00.01.000 ОПС.Э6 Схема электрическая общая часть ОПС;

42. 1045.00.00.000 ОПС.КЖ1 Кабельный журнал часть ОПС;

43. 1045.10.00.000 ОПС.Э7 План расположения электрооборудования и кабельных проводок №1045 часть ОПС;

44. 1045.00.00.000 ОПС.СП1 Спецификация оборудования №1045 часть ОПС;

45. 1045.00.00.000 ОПС.СП2 Спецификация электромонтажа оборудования №1045 часть ОПС;

46.1045.00.00.000 ОПС.РР1 Расчет АКБ для ПС; 

47.1045.00.00.000 ОПС.РР2 Расчет АКБ для ОС; 

48. 1045.00.00.000 ОПС.ВД Ведомость рабочих чертежей ОПС.

Письмом  № 524 от 09.07.2018  ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  в  ответ на  письмо № СМ-3762 от 19.06.2018 о  согласовании  КД  и ВОР на установку  дозированной подачи  химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав.№1045 направило  в адрес  АО «Сузун»   на  рассмотрение  и  согласование  проекты  эксплуатационной  документации (паспорт  и руководство)  по  эксплуатации  на установку дозированной  подачи  химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1.

18.07.2018 АО «Сузун» письмом  № СМ-4298 в  ответ  на   обращение  от  09.07.2018  № 524 сообщило обществу НПП «НефтеМодульКомплект», что эксплуатационная  документация (паспорт,  руководство  по  эксплуатации) на установку дозирования подачи метанола  для объекта «Обустройство Сузунского месторождения. Установка  подготовки газа с компрессорной станцией для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01), рассмотрена  АО «Сузун»  с  замечаниями. В письме содержится просьба устранить замечания  не  позднее  24.07.2018. 

Письмом  № 596  от 01.08.2018  ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в  ответ  на письмо № СМ-4298 от 18.07.2018 направило в АО «Сузун» на рассмотрение и  согласование  откорректированные  проекты  эксплуатационной документации (паспорт и  руководство) , а  также  ответы  на  замечания. 

АО «Сузун»  обратилось  к ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  с  письмом  от 09.08.2018 № СМ-4703 в ответ на письмо № 596 от 01.08.2018, указав, что   эксплуатационная  документация  рассмотрена с замечаниями, предложно устранить замечания до 16.08.2018.

ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в  ответ на  письмо  № СМ-4703  от  09.08.2018  за исх. № 630 от 14.08.2018 направило в адрес АО «Сузун» на рассмотрение и согласование  откорректированные проекты эксплуатационной документации (паспорт и руководство), ведомость эксплуатационных   документов,  а  также  ответы  на  замечания. 

ООО «РН-Ванкор» обратилось к ООО НПП «НефтеМодульКомплект» с письмом от  21.08.2018  № РНВ-32783, в котором в ответ на письмо  № 630  от 14.08.2018  сообщило, что  эксплуатационная  документация (паспорт, руководство по эксплуатации, ведомость ЭД) на   установку дозирования подачи метанола  для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка  подготовки газа  с  компрессорной  станцией  для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01), рассмотрена  ООО «РН-Ванкор»  с  замечаниями. В письме   содержится просьба  устранить замечания  в срок  до 28.08.2018.

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» направило в адрес ООО НПП «НефтеМодульКомплект» письмо  № 13-17483 от 18.09.2018 с  просьбой представить  данные  по  техническим решениям, разработанным в конструкторской  документации по  1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01 «Технические требования на проектирование, изготовление,  поставку и  запуск  в  эксплуатацию  установки  дозированной подачи  метанола» и  обеспечивающих требованиях пожарной  безопасности  в части категории здания по  пожарной  опасности – А;  искробезопасности. Запрашиваемые  материалы  предложено  представить  до  21.09.2018. 

23.10.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  письмом  № 816  в  ответ на  обращение  № РНВ-32783 от 21.08.2018 направило в адрес АО «Сузун» на рассмотрение и согласование   откорректированные проекты эксплуатационной документации (паспорт и руководство),  ведомость  эксплуатационных   документов,  ответы  на  замечания.

13.11.2018 АО «Сузун»  обратилось  к ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  с письмом № СМ-6781 в ответ на исх. № 816,  в котором  сообщило,  что  эксплуатационная  документация  на установку дозирования подачи метанола  для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка  подготовки газа  с  компрессорной  станцией  для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01), рассмотрена ООО «РН-Ванкор» с  замечаниями.  В письме  предложено  устранить замечания  до 20.11.2018.

За  исх. № 1120  от 24.12.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в  ответ на  письмо  № СМ-6781 от 13.11.2018 направило в АО «Сузун» на рассмотрение и согласование  откорректированные проекты эксплуатационной документации (паспорт и руководство),  ведомость  эксплуатационных документов, ответы  на  замечания. 

Письмом  № 162-12 от 28.12.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  сообщило АО «Сузун», что  28.12.2018  планирует  произвести  отгрузку  в адрес  АО «Сузун»   следующего   оборудования: по  договору  № 7510317/0691Д от 08.11.2017,  приложение  М   на поставку Установки дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 в количестве  1  шт. с  заводским  номером  1045. 

Согласно  транспортной  накладной от  29.12.2018 № 121 грузоотправителем ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в адрес   грузополучателя  -  обособленное подразделение  в г. Новый Уренгой ООО «ОПТТРЕЙД»  отгружена Установка  дозированной подачи  химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 ОЛ1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01.  В  графе 7. «Сдача груза»  проставлены подписи  с  расшифровкой «ФИО6»,  «С.В.Поляков»  без  указания  даты,  подпись  заверена печатью  ООО «ОПТТРЕЙД».  В графе  17  имеется указание на  составление  акта  общей формы. 

В материалы  дела представлен  Акт общей формы СУЗ-ВН ОПТ 1913 от 06.01.2019,  составленный   в присутствии  мастера ФИО6, водителя ФИО7,  согласно  которому  по  ТТН № 121 от  29.12.2018  в  отношении  груза: Установка  дозированной подачи  установлено  повреждение  упаковочной пленки  в виде  разрывов. В месте   выхода фланцев,  повреждение защитной прокладки и  отрыв заклепок. 

В  товарно-транспортной накладной  № 121  от 29.12.2018  в графе «Груз  получил  грузополучатель»  проставлена подпись мастера ФИО6  без  указания   даты.   В  транспортном  разделе  накладной также содержится подпись  мастера  ФИО6  в принятии груза. Подписи  заверены  печатью  ООО «ОПТТРЕЙД». В   транспортном  разделе  указан  автомобиль  МАН г/н 

<

***>.

В материалы  дела представлена  товарная  накладная № 133  от  29.12.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» поставило  в  адрес   грузополучателя ООО «ОПТТРЕЙД» установку дозированной подачи химреактивов  по  договору  № 7510317/0691Д  от 08.11.2017 поставки  материально-технических ресурсов  на сумму  27 085 274 руб. 76 коп. В графе «Груз  принял»  проставлена подпись  представителя АО «СУЗУН» ФИО8, дата 05.02.2019.  Накладная  заверена печатью  АО «СУЗУН». 

Согласно путевому  листу № 910 от  03.01.2019 автомобиль  MAN г/н 

<

***> выехал  из  гаража  (г.Октябрьский) 03.01.2019  в  06-30 час., адрес  пункта  разгрузки – Новый Уренгой, возвратился в  гараж – 09.01.2019 в 18-00 час.  В путевом  листе указано на перевозку установки  1045, содержится  запись  о  принятии  ТТН  09.01.2018 (подпись, расшифровка  - неразборчива). 

Письмом № СМ-28 от 10.01.2019 АО «Сузун» обратилось к ООО НПП «НефтеМодульКомплект» в  ответ на  письмо  № 1120,  указав,  что эксплуатационная  документация  на установку дозирования подачи метанола  для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка  подготовки газа  с  компрессорной  станцией  для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01), рассмотрена  АО «Сузун»  с  замечаниями.  Срок устранения  замечаний  - до  17.01.2019.

АО «Сузун» обратилось  к ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  с письмом  № СМ-157 от  17.01.2019 в  ответ на  обращение   исх. № 17-09-01 от 09.01.2019,  в котором  указало, что  при принятии  поступившей  эксплуатационной  документации и  паспортов выявлен ряд замечаний, а  именно:

1. Согласно п. 3.3 паспорта на установку необходимо предоставить ведомость эксплуатационных документов.

2. Необходимо предоставить эксплуатационные документы на составные части изделия, поименованные в п. 3.1 паспорта на установку.

3. Согласно п. 3.5 вышеуказанного договора поставки поставщик должен предоставить оригинал и две заверенные копии паспорта на установку, а также паспортов на запорную арматуру, изделия КИП и т.д.

4.  Согласно п.7.1 договора паспорт должен быть предоставлен в следующем формате: «Паспорт, прилагаемый к оборудованию должен быть издан типографским способом. Формат паспорта - 210x297 мм. Обложка паспорта - жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на плотной бумаге».

5. Согласно п. 7.1 договора подпункт «Дополнительные требования» документация должна быть предоставлена в электронном виде: «Документация также должна быть предоставлена в электронном виде в формате Аdobe Acrobat (*.pdf).

В письме указано, что АО «Сузун» не может принять к учету и оплатить, счет-фактуру №119 от 29.12.2018 до представления всех недостающих документов и паспортов.

ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  письмом  № 86  от 18.01.2019  направило  в адрес АО «Сузун» в ответ на обращение № СМ-28  откорректированные проекты эксплуатационной документации (паспорт  и  руководство),  ведомость эксплуатационных  документов, а  также  ответы  на   замечания.  В письме  сообщается,  что  гидравлический  расчет  трубопровода  будет направлен  в срок не позднее 25.01.2019. 

23.01.2019 ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  направило  АО «Сузун» с сопроводительным письмом № 103  ведомость  эксплуатационных  документов,  паспорт  на установку дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1,  руководство  по эксплуатации  на  установку дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1, НМК1045.00.00.000 ГР – Гидравлический расчет,  протокол рассмотрения ЭД.

Письмом  № 109  от  24.01.2019 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» направило  в адрес  АО «Сузун»  финальные  проекты эксплуатационной документации (паспорт и руководство),  ведомость эксплуатационных документов,  ответы на  замечания,  а  также гидравлический  расчет  на установку дозированной подачи химреагентов УДХ-160/6-0/0-2-ХЛ1 зав. № 1045.

АО «Сузун»  письмом  СМ-317  от  25.01.2019   в  ответ  на  обращения   № 86  от  18.01.2019, № 103  от  23.01.2019,  № 109  от  24.01.2019  сообщило, что эксплуатационная  документация (паспорт, руководство по эксплуатации, расчет  гидравлический,  ведомость  эксплуатационных документов)  полученная письмом № 109 от  24.01.2019  на установку дозирования подачи метанола для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка  подготовки газа  с компрессорной станцией для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01)  рассмотрена  и  согласована. 

В материалы  дела представлено  поручение  экспедитору 13 2606 0322 с  отметкой о  вручении  05.02.2019. 

05.02.2019 между АО «Ванкорнефть» (покупатель) и ООО НПП «НефтеМодульКомплект» (поставщик)  подписан  Акт  приема-передачи  исполнительной документации по договору № 7510317/0691Д от 08.11.2017, согласно которому поставщик передал, а покупатель принял паспорта и исполнительную документацию на  оборудование  согласно ТТ № 121  в  количестве 1 папки.  

12.02.2019 АО «Сузун» обратилось к ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  с письмом  № СМ-531 с предложением заключить дополнительное соглашение  о  переносе  сроков выполнения  работ на актуальные: ШМР с  01.05.2021 по  30.05.2021, ПНР с  01.12.2021 по  30.12.2021. 

АО «СУЗУН»  направило  в адрес  ООО НПП «НефтеМодульКомплект» претензию  от 12.08.2020 № СМ-2661  об оплате неустойки  в сумме  8 152 582  руб.  за  нарушение  сроков поставки по  договору  № 7510317/0691Д  от 08.11.2017.

В  ответ на  претензию, ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  направило  в адрес АО «СУЗУН»  письмо   исх.№ 2084 от 28.08.2020,  в котором  указало на длительное согласование  и  ожидание  ответов со  стороны АО «Сузун» всей установки в целом,  срок  общего  простоя  оказался  более 6 месяцев (с 12.12.2017  по 19.06.2018 – 189 дней). Продление  срока  на   поставку товара с  19.06.2018 + (189 дней)  по  25.12.2018.  установка  была  отгружена  29.12.2018,  принята  покупателем   по  акту № СУЗ-ВН-Опт 1913  от 06.01.2019. В письме содержится расчет неустойки за  период  просрочки с  25.12.2018 по 06.01.2019 (12 дней)  исходя  из  двойной ставки рефинансирования.

Ответчик  исковые  требования  не  признал,  заявил о применении  судом  статьи  333 Гражданского  кодекса Российской Федерации.

Согласно расчету  ответчика  неустойка подлежит начислению  за период  с 25.12.2018  по 06.01.2019 и  составит  138 023  руб. 59  коп.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Предметом иска по настоящему делу являются требования о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки товара за период с 01.04.2018 по 04.02.2019 с  исключением  78 дней просрочки  согласования конструкторской  документации  из расчета  0,3%  за каждый  день  просрочки  с  учетом  ограниченного  размера  ответственности  за просрочку поставки  в  размере  30%  от  цены  товара,  равной 27 085 274 руб. 76 коп. 

Согласно  материалам дела между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) заключен договор поставки материально-технических ресурсов от 08.11.2017 № 7510317/069Д (далее – договор), по условиям которого поставщик обязался поставить товар по номенклатуре, качеству,  в количестве, по цене и срокам  поставки согласно  условиям настоящего договора и приложений М, Н, а покупатель  принять  и  оплатить товар.

В приложении М  к  договору согласован  срок поставки  - март  2018 года.

Данный срок является исходным для определения имущественных санкций за просрочку поставки. 

В случае просрочки поставки товара,  предусмотренных  в  настоящем  договоре  и приложении  М (спецификации) к нему,  в  том  числе   в случае  несоответствия количества поставленного товара сопроводительным  документам,  поставщик уплачивает  покупателю пеню в  размере  0,3%  от  стоимости непоставленного  в   срок  товара  за каждый  день  просрочки, но не  более 30% от стоимости непоставленного  в срок  товара (пункт  8.1.1).

В соответствии с пунктом 3.5 договора поставщик обязуется в сроки,  предусмотренные настоящим  договором  приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия товара в пункт назначения, передать покупателю все необходимые документы, относящиеся к товару, отсутствие   которых  не позволяет  осуществлять  приемку и/или  монтаж  и/или эксплуатацию   и/или дальнейшую  передачу  товара  третьим  лицам и/или  иные  действия в отношении товара,  и перечень которых  установлен в п.7.1  договора,  а  также  в соответствующих  приложениях  к договору.  

Согласно пункту 4.1 базис поставки товара, график и  сроки  поставки, а  также  иные  условия  поставки  оговариваются по каждой партии товара  отдельно и отражаются в приложении  М (спецификации). 

В пункте 4.1.1. стороны предусмотрели, что срок поставки товара является существенным условием настоящего договора, поскольку только при соблюдении данного срока  покупатель/заказчик  сможет осуществить доставку поставленного товара до  месторождения  с  учетом  возможностей сезонного заказа: автомобильным  транспортом (зимний  завоз) либо  речным  транспортом (летний  завоз).

В приложении М согласован базис поставки – пункт назначения DDP,  ст.назначения  DDP  ст.Красноярск с  20.03 по  30.09  или  ст.Коротчаево с 30.09 по 20.03. Датой поставки является дата  штампа станции назначения,  проставленной в оригинале ж/д накладной (при  поставке ж/д транспортом)  или дата  отметки грузополучателя товарно-транспортной накладной (при  поставке автомобильным  транспортом).

Согласно пункту 4.2.3 договора базис  поставки – пункт  назначения: датой поставки является дата, проставленная в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения. Обязанность поставщика по поставке товара считается исполненной с момента  проставления  отметки в  оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения,  свидетельствующая  о прибытии товара  в  пункт назначения.

Согласно пункту 7.2  договора  в целях  информирования покупателя о  статусе выполнения  обязательств по настоящему  договору и подтверждения выполнения  обязательств по  поставке  товара   поставщик  обязуется предоставить следующие документы в указанные  сроки:   при  поставке  на  базисе  пункт назначения:

- все  документы, предоставляемые при  поставке на  базисе станция  отправления (в сроки,  указанные  в предыдущем  абзаце -  в  течение   трех  рабочих дней с  даты  отгрузки товара);

-  кроме того, при поставке автомобильным транспортом копию товаротранспортной накладной в течение 2  рабочих дней с  даты  отгрузки товара.  Копии  счетов-фактур   направляются на  электронный адрес info@vankoroil.ru . 

Поставщик обязан направить с  товаром документы,  предварительно  согласованные с покупателем. 

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков поставки товара, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 названного Кодекса). Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. В пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7) разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. 

Судом  установлено, что по условиям договора обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным не позднее даты прибытия  товара в пункт  назначения  и  передачи  покупателю  всех необходимых документов,  относящихся к  товару. 

В материалы дела представлена товарно-транспортная накладная № 121  от 29.12.2018,  в которой в графе «Груз  получил  грузополучатель»  проставлена подпись мастера ФИО6  без  указания   даты.   В  транспортном  разделе  накладной также содержится подпись  мастера  ФИО6  в принятии груза. Подписи  заверены  печатью  ООО «ОПТТРЕЙД». В   транспортном  разделе  указан  автомобиль  МАН г/н 

<

***>.

В материалы  дела представлена  товарная  накладная № 133  от  29.12.2018 ООО НПП «НефтеМодульКомплект» поставило  в  адрес   грузополучателя ООО «ОПТТРЕЙД» установку дозированной подачи химреактивов  по  договору  № 7510317/0691Д  от 08.11.2017 поставки  материально-технических ресурсов  на сумму  27 085 274 руб. 76 коп. В графе «Груз  принял»  проставлена подпись  представителя АО «СУЗУН» ФИО8, дата 05.02.2019.  Накладная  заверена печатью  АО «СУЗУН». 

Согласно путевому  листу № 910 от  03.01.2019 автомобиль  MAN г/н 

<

***> выехал  из  гаража  (г.Октябрьский) 03.01.2019  в  06-30 час., адрес  пункта  разгрузки – Новый Уренгой, возвратился в  гараж – 09.01.2019 в 18-00 час.  В путевом  листе указано на перевозку установки  1045, содержится  запись  о  принятии  ТТН  09.01.2018 (подпись, расшифровка  - неразборчива). 

АО «Сузун»  письмами № СМ-28 от 10.01.2019, № СМ-157 от  17.01.2019обратилось  к  ответчику о  предоставлении  эксплуатационной  документации  и  об  устранении замечаний к  документации.

ООО НПП «НефтеМодульКомплект»  письмами  № 86  от 18.01.2019, № 103  от 23.01.2019, № 109   от  24.01.2019 направило  в адрес   истца соответствующие  документы   с корректировками  после   устранения  замечаний. 

АО «Сузун»  письмом  СМ-317  от  25.01.2019   в  ответ  на  обращения   № 86  от  18.01.2019, № 103  от  23.01.2019,  № 109  от  24.01.2019  сообщило, что эксплуатационная  документация (паспорт, руководство по эксплуатации, расчет  гидравлический,  ведомость  эксплуатационных документов)  полученная письмом № 109 от  24.01.2019  на установку дозирования подачи метанола для объекта «Обустройство Сузунского  месторождения. Установка  подготовки газа  с компрессорной станцией для ПНГ» (1750614/0537Д-01-732307-ТХ-ТТ-01)  рассмотрена  и  согласована. 

05.02.2019 между АО «Ванкорнефть» (покупатель) и ООО НПП «НефтеМодульКомплект» (поставщик)  подписан  Акт  приема-передачи  исполнительной документации по договору № 7510317/0691Д от 08.11.2017, согласно которому поставщик передал, а покупатель принял паспорта и исполнительную документацию на  оборудование  согласно ТТ № 121  в  количестве 1 папки.  

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании оценки представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 67, 68, 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном главой 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства на предмет их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности по отдельности и взаимной связи в их совокупности, суд, установив, что обязательство по поставке товара  с  учетом  условия договора о  передаче покупателю  одновременно  с  товаром   документации на  товар,  исполнено  поставщиком  05.02.2019, приходит  к  выводу о  правомерности  требований  истца  о  взыскании  с  ответчика  неустойки  за просрочку поставки  товара  за период, заявленный  истцом,  с  учетом  ограниченного договором  предельного размера нестойки в сумме  8 125 582  руб.   за  заявленный  истцом  период.

Рассмотрев  заявление  ответчика об уменьшении  размера  неустойки и  применении  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации с  учетом   разъяснений  Постановления № 7, учитывая обстоятельства настоящего дела (начисленная истцом неустойка 8 125 582  руб.  составляет   более  четверти  стоимости  товара,  подлежащего  поставке), отсутствие доказательств наступления у истца негативных последствий несвоевременной поставки товара, суд  приходит  к выводу о явной несоразмерности заявленной АО «Сузун» суммы неустойки последствиям нарушения обязательств, в связи с чем,  полагает  возможным  снизить размер  неустойки  до 3 000 000 руб. 

Довод  ответчика  о  том,  что  датой  исполнения  обязательств  ответчика по поставке товара  следует  считать,  дату,  указанную  в  товарно-транспортной  накладной,  противоречит  условиям  договора  о  выполнении обязательств поставщиком  с  учетом  одновременной передачи  товара   и  эксплуатационной  документации на  товар.

Утверждение ответчика о том, что истцом допущено нарушение сроков   согласования конструкторской документации, опровергается представленной в материалы дела перепиской сторон, приведенной выше, из  которой следует,  что  ответчик фактически  соглашался с предъявленными  замечаниями  к конструкторской  документации и  устранял  их. 

В соответствии  со статьей  110  Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации   расходы по  уплате  государственной пошлины  подлежат отнесению на  ответчика. 

Платежным  поручением  № 232  от 23.12.2020 АО «Сузун» уплачена государственная пошлина  в сумме  63 628  руб. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить  частично.

Взыскать  с общества с  ограниченной ответственностью НПП «НефтеМодульКомплект» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Сузун» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  3 000 000 руб. – неустойки,  а  также  63 628 руб. – расходов по  уплате  государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части иска  отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.И. Путинцева