АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2350/2022

г. Чебоксары

19 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 12.07.2022.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Филиппова Б.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Токаревым А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

автономного учреждения Чувашской Республики "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428000, Чувашская Республика, г.о. город Чебоксары, 

<

...> зд. 12 Б, пом. 14,

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера",   ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428009, 

<

...>,

об обязании устранить недостатки,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 429950, 

<

...>),

- Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 429951, 

<

...>),

- общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428009, 

<

...>),

при участии:

от истца ФИО1 по доверенности от 29.07.2021,

установил:

Автономное учреждение Чувашской Республики "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" об обязании в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты вступления в силу решения суда, устранить недостатки объекта – строительство сетей внешнего водоснабжения для Тепличного комплекса "Новочебоксарский" площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики:

- выполнить изоляцию стенок камеры К1 праймером Технониколь № 1 - 1 слой, битумной мастикой Технониколь № 21 - 2 слоя снаружи, изнутри - составом "Hydro Protekt С2",

- загерметизировать вертикальные стыки стен нетвердеющей вулканизирующей тиоколовой мастикой,

- загерметизировать, заделать битумом и прядью места прохода трубопроводов и электрических кабелей в местах ввода в повысительную насосную станцию;

- выполнить рекультивацию земли на объекте;

- заменить розетки, установить розетки в соответствии с требованиями проектной документации на объект;

- установить ручной грузоподъемный механизм;

- установить опознавательные знаки в соответствии с требованиями проектной документации на объект;

- выполнить работы по демонтажу и замене крыльчатки рабочего колеса насосного агрегата № 2 марки Lowara LNEE 50/250/150/P25VCS4-id201092;

- выполнить работы по замене торцевого керамического уплотнения марки МЛ-12 1 = 28мм, рабочего вала насосного агрегата;

- заменить датчик давления NMS-1700 DANFOSS 16bar 4-20тА.

Определением от 21.04.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска", Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики и общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комплекс "Новочебоксарский".

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уточнении предмета иска и просил обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" устранить недостатки объекта – строительство сетей внешнего водоснабжения для Тепличного комплекса "Новочебоксарский" площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики:

- выполнить изоляцию стенок камеры К1 праймером Технониколь № 1 - 1 слой, битумной мастикой Технониколь № 21 - 2 слоя снаружи, изнутри - составом "Hydro Protekt С2",

- загерметизировать вертикальные стыки стен нетвердеющей вулканизирующей тиоколовой мастикой,

- загерметизировать, заделать битумом и прядью места прохода трубопроводов и электрических кабелей в местах ввода в повысительную насосную станцию;

- выполнить рекультивацию земли на объекте;

- заменить розетки насосной станции, установить розетки со степенью защиты IP54;

- установить ручной подъемный транспортный механизм в насосной станции;

- установить опознавательные знаки в местах поворота трассы водопровода в количестве 16 шт.;

- выполнить работы по демонтажу и замене крыльчатки рабочего колеса насосного агрегата № 2 марки Lowara LNEE 50/250/150/P25VCS4-id201092;

- выполнить работы по замене торцевого керамического уплотнения марки МЛ-12 1 = 28мм, рабочего вала насосного агрегата;

- заменить датчик давления NMS-1700 DANFOSS 16bar 4-20тА.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение предмета иска судом принято.

Ответчик и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. Ответчик отзыв на исковое заявление не представил. Третьи лица в поступивших ранее ходатайствах просили рассмотреть дело в отсутствие их представителей. 

Третье лицом - ООО "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" в письменных пояснениях указало на следующие обстоятельства. 11.09.2019 при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта "Строительство сетей внешнего водоснабжения для подключения тепличного комплекса "Новочебоксарский" рабочей комиссией были зафиксированы работы, которые ответчик не выполнил в нарушение условий контракта, а также дефекты в работах ненадлежащего качества. Оформленными актами были установлены сроки для устранения ответчиком выявленных недостатков, которые до настоящего времени не исполнены. 23.10.2019 объект "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. 1 этап" введен в эксплуатацию. Однако невыполнение ответчиком работ, указанных в заявлении истца, негативно влияет на функционирование тепличного комплекса "Новочебоксарский", т.к. не позволяет эксплуатировать оборудование системы водоснабжения в запроектированных объемах и несет риски прекращения водоснабжения при возникновении аварийной ситуации, и, как следствие, к гибели растений и потере урожая овощной продукции.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

Выслушав представителя истца и изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 24.07.2020 по делу № А79-14373/2019, от 19.02.2021 по делу № А79-14438/2019 установлены следующие обстоятельства.

05.07.2018 между ООО "СК "Стройсфера" (подрядчик) и Автономным учреждением Чувашской Республики "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" Минэкономразвития Чувашии (заказчик) заключен контракт №1015500000418000001/12, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по строительству сетей внешнего водоснабжения для подключения Тепличного комплекса "Новочебоксарский" (объект), в соответствии с утвержденной проектной документацией, техническим заданием (приложение №7), а заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта подрядчик обязуется выполнить надлежащим образом все работы по строительству объекта в объеме в соответствии с Проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, и утвержденном в соответствующем порядке, технической документацией, условиям настоящего контракта и всех приложений к нему и сдать заказчику выполненные в установленном порядке работы по объекту в сроки, установленные пунктом 6.1 контракта и в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложением №1 к контракту).

Стоимость работ по контракту составляет 9054894 руб. 02 коп. (пункт 4.1 контракта).

Во исполнение обязательств в рамках контракта истец выполнил работы по акту на изменения, согласованному, как заказчиком и подрядчиком, так и КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя ЧР на сумму  436 722 руб., в материалы дела представил документы формы КС-2 от 20.08.2019 № 7, КС-3 от 20.08.2019 № 6.

Уведомлением от 02.12.2019 №373 ООО "СК "Стройсфера" сообщило Автономному учреждению Чувашской Республики "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" Минэкономразвития Чувашии об отказе от исполнения контракта №1015500000418000001/12 от 05.07.2018.

Вышеуказанные обстоятельства в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении настоящего дела не подлежат доказыванию. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 19.02.2021 по делу № А79-14438/2019 автономному учреждению Чувашской Республики "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики отказано в иске к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" о признании незаконным решения от 02.12.2019 №373 об одностороннем отказе от исполнения контракта №1015500000418000001/12 от 05.07.2018 по строительству сетей внешнего водоснабжения для подключения тепличного комплекса "Новочебоксарский". Суд принимая решение посчитал отказ подрядчика от исполнения контракта от 05.07.2018 №10155000000418000001/12 на основании пункта 17.6 контракта правомерным.

По данному делу истец просит обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" устранить недостатки объекта – строительство сетей внешнего водоснабжения для Тепличного комплекса "Новочебоксарский" площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

Как следует из материалов дела, согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ от 10.09.2018 № 1, от 08.10.2018 № 2, от 20.11.2018  № 3, от 20.11.2018 № 4, от 27.12.2018 № 5, от 15.05.2019 № 6 ответчиком по контракту от  05.07.2018 №1015500000418000001/12 выполнены работы на общую сумму 8661991 руб. 82 коп.

Согласно выданному Администрацией Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 23.10.2019 № 21-21516303-10-2019, объект - "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. 1 этап" введен в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве; заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (статьи 722, 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В части 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Пунктом 11.1 контракта предусмотрено, что гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии качества работ 5 (пять) лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания соответствующего акта по форме КС-2 на монтаж оборудования и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе акта приемочной комиссии законченного строительством объекта. В случае расторжения контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные актами выполненных работ, сохраняются (пункт 11.2 контракта).

Согласно составленному представителями лиц, участвующих деле, акту осмотра камеры К1 и насосной станции на объекте Строительство сетей внешнего водоснабжения для подключения Тепличного комплекса "Новочебоксарский" от 12.04.2019, в ходе осмотра выявлены следующие замечания: наличие воды в Камере К1 глубиной 15-20 см, застой воды вокруг Камеры К1 и насосной станции, не убраны порубленные остатки и строительный мусор вокруг Камеры К1 и насосной станции, насосная станция подключена не по проекту, а по временной схеме, насосная станция не испытана в напорном режиме, не представлена исполнительная документация на пуско-наладочные работы на насосную станцию, не произведена рекультивация земли на месте траншеи на участке от камеры К1 до насосной станции, течь в резервном циркуляционном насосе №101880790 LOWARA kW.3*400V.50Hz в насосной станции Гидро-Блок МЧ 3 LNEE 50-250/150P25VCS4+id-201092. Рекультивация земель будет выполнена до 15.05.2019. Течь в резервном циркуляционном насосе будет ликвидирована в установленные сроки сервисного обслуживания.

Указанные истцом недостатки выполненных ответчиком работ также отражены в составленных представителями лиц, участвующих в деле, 13.05.2019, 11.09.2019 ведомостях и актах дефектов, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта "Строительство сетей внешнего водоснабжения для подключения тепличного комплекса "Новочебоксарский".

В акте обследования технического состояния незавершенного строительством объекта "Строительство сетей внешнего водоснабжения для подключения тепличного комплекса "Новочебоксарский", составленного представителями лиц, участвующих в деле 23.04.2021, отражены следующие недостатки: камера врезки К1 - в камеру поступают грунтовые воды, не выполнена планировка; насосная станция – в насосную станцию через кабельный ввод поступают грунтовые воды, розетки и эл. конвектор (один отсутствует), смонтированные в камере, не IP 54, не соответствуют проектным решениям, отсутствует подъемно транспортный механизм; трасса водопровода – в местах поворота трассы не установлены знаки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что работы по контракту от  05.07.2018 №1015500000418000001/12 выполнены ответчиком с нарушениями установленных требований.

Ответчик факт наличия недостатков в выполненных работах не оспорил, доказательств устранения недостатков не представил. Ходатайство о назначении по делу экспертизы не заявил.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или если несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (пункт 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

С учетом установленных по делу обстоятельств требование истца подлежит удовлетворению, на общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" следует возложить обязанность по устранению указанных истцом недостатков строительных работ, выполнение которых предусмотрено контрактом. 

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

С учетом обстоятельств дела суд признает заявленный истцом срок - 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу, достаточным и разумным для исполнения требования истца. Доказательств неразумности указанного срока ответчиком суду представлено не было.

Государственную пошлину суд в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты вступления в силу решения суда, устранить недостатки объекта – строительство сетей внешнего водоснабжения для Тепличного комплекса "Новочебоксарский" площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики:

- выполнить изоляцию стенок камеры К1 праймером Технониколь № 1 - 1 слой, битумной мастикой Технониколь № 21 - 2 слоя снаружи, изнутри - составом "Hydro Protekt С2",

- загерметизировать вертикальные стыки стен нетвердеющей вулканизирующей тиоколовой мастикой,

- загерметизировать, заделать битумом и прядью места прохода трубопроводов и электрических кабелей в местах ввода в повысительную насосную станцию;

- выполнить рекультивацию земли на объекте;

- заменить розетки насосной станции, установить розетки со степенью защиты IP54;

- установить ручной подъемный транспортный механизм в насосной станции;

- установить опознавательные знаки в местах поворота трассы водопровода в количестве 16 шт.;

- выполнить работы по демонтажу и замене крыльчатки рабочего колеса насосного агрегата № 2 марки Lowara LNEE 50/250/150/P25VCS4-id201092;

- выполнить работы по замене торцевого керамического уплотнения марки МЛ-12 1 = 28мм, рабочего вала насосного агрегата;

- заменить датчик давления NMS-1700 DANFOSS 16bar 4-20тА.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" в федеральный бюджет 6 000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

Б.Н. Филиппов