АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Смоленск  24.04.2023 Дело № А62-9876/2022  

 Резолютивная часть решения оглашена 17.04.2023 

Полный текст решения изготовлен 24.04.2023 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Еремеевой В.И., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новиковой М.В., рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1  

к Акционерному обществу «Газпром Газораспределение Смоленск» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 259 481 рублей,  

по встречному исковому заявлению 

Акционерного общества «Газпром Газораспределение Смоленск» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), конкурсный управляющий ФИО1  

о взыскании задолженности за выполненные работы по договору № 10 от 09.07.2020 в  размере 259 480,98 рублей,  

при участии:  

от ООО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ»: ФИО2, представитель по  доверенности (паспорт),  

от АО «Газпром Газораспределение Смоленск»: ФИО3, представитель по  доверенности (паспорт),  

У С Т А Н О В И Л:

в обоснование иска о взыскании неосновательного обогащения в размере 259481  рублей ООО «ИЦ «Электролуч» указало на следующее.  

Арбитражным судом Смоленской области вынесено решение по делу № А626583/2021 от 01.04.2022 о признании должника - ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР  «ЭЛЕКТРОЛУЧ» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства.  

Конкурсным управляющим ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ»  утвержден ФИО1 - член ПАУ ЦФО.  

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ» выявлено, что за АО «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК» числится задолженность перед ООО  «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в размере 259 481 рубль.  

13.07.2020 г. перечислены денежные средства в сумме 129 740 руб. рублей 50 коп.,  что подтверждается выпиской по счету Истца № 40706810859000004739, открытого в  ПАО «СБЕРБАНК» (стр. 3 выписки);  

19.10.2020 г. перечислены денежные средства в сумме 129 740 руб. рублей 50 коп.,  что подтверждается выпиской по счету Истца № 40706810859000004739, открытого в  ПАО «СБЕРБАНК» (стр. 7 выписки).  

Всего общая сумма перечисленных денежных средств составляет 259481 рубль.  

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК» не исполнило встречные  обязательства перед ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ», в результате чего  без оснований, установленных законом или договором, приобрело денежные средства.  

АО «Газпром газораспределение Смоленск» обратилось со встречным исковым  заявлением о взыскании неоплаченных денежных средств по Договору № 10 от 09.07.2020  о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к  сети газораспределения.  

Как следует из материалов дела, 09.07.2020 между АО «Газпром газораспределение  Смоленск» в лице АО «Газпром газораспределение Смоленск» филиал в г. Вязьме  (Исполнитель) и ООО «ИЦ «Электролуч» (Заявитель) заключен договор № 10 о  подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к  сети газораспределения.  

В соответствии с п. 1.1 Договора исполнитель исполнитель принимает на себя  обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального  строительства «Наружный газопровод- ввод среднего давления для газоснабжения  производственных зданий ООО «МЦ «Электролуч»» по адресу: 

<

...>» (далее - объект капитального строительства) к сети  газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином  законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа)  газоиспользующего оборудования.  

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта  капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в  пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

<

...> кадастровый номер 67:03:0010126:127 в соответствии  с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению  (технологическому присоединению).  

Согласно п. 1.3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению  (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа  составляет 1,5 года со дня заключения настоящего договора – до 09.01.2022.  

В соответствии с п. 2.3 Договора Заявитель обязан выполнить установленные в  договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего  оборудования к подключению.  

В соответствии с п. 2.3.1, 2.3.5, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.7 Договора Заявитель обязан: 

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального  строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ  принадлежащего ему земельного участка;  

обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю  земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до  газоиспользующего оборудования;  

уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения  мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя,  предусмотренных техническими условиями;  

внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки,  которые установлены настоящим договором;  

подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем. 

Внесение платы за технологическое присоединение в соответствии с п. 3.2  Договора осуществляется Истцом согласно п. 91 Правил подключения (технологического  присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №  1314, в следующем порядке:  

а) 25 процентов платы, что составляет 129 740 рублей 50 коп., в т.ч. НДС20%, 21623,42 руб. за технологическое присоединение вносится в течение 11 дней со дня  заключения договора;  

б) 25 процентов платы, что составляет 129 740 рублей 50 коп., в т.ч. НДС20%, 21623,42 руб. в течение 3 месяцев со дня заключения договора, но не позднее дня  фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального  строительства к сети газораспределения;  

в) 35 процентов платы, что составляет 181 636 рублей 69 копеек, в т.ч. НДС - 20%,  30272,78 руб. в течение 1 года со дня заключения договора, но не позднее дня  фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального  строительства к сети газораспределения;  

г) 15 процентов платы, что составляет 77 844 рубля 29 копеек в т.ч. НДС - 20%, 12  974,05 руб. за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня  подписания Акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения  ответственности и акта о подключении.  

Фактически работы по Договору выполнены АО «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК» 20.10.2021, что подтверждается актом приемки  законченного строительством объекта газораспределительной системы.  

В соответствии с п. 3.2 ООО «ИЦ «Электролуч» было уплачено только 50% платы  в размере 259481 рубль платежными поручениями № 699 от 13.07.2020 и № 952 от  19.10.2020.  

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) все имеющиеся в материалах дела  доказательства, суд исходит из следующего.  

Согласно подпунктам 1 и 7 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также действий граждан и  юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в  силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские  права и обязанности. Гражданские права и обязанности возникают, в том числе  вследствие неосновательного обогащения.  

На основании статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными  правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего  Кодекса.  

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения  необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие  правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств,  предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.  

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того,  явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя  имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.  

Исходя из анализа вышеназванных норм права, а также разъяснений  Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о  неосновательном обогащении» следует, что неосновательное обогащение должно  соответствовать трем обязательным признакам: должно иметь место приобретение или  сбережение имущества; данное приобретение должно быть произведено за счет другого  лица и приобретение не основано ни на законе, ни на сделке (договоре), т.е. происходить  неосновательно.  

В соответствии с нормами гражданского законодательства обязательственные  правоотношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность,  основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых  материальных объектов и недопустимости неосновательного обогащения.  

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения  необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие  правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств,  предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.  

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их  действий предполагаются (ст. 10 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

На основании части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее - АПК РФ) доказательствами по делу являются полученные  в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке  сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или  отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих  в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения  дела.  

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, содержащейся в  постановлении от 29.01.2013 N 11524/12, в случае, если из представленных доказательств  усматривается, что основаниями платежа являлись конкретные правоотношения, то бремя  доказывания того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не  являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно, либо в  излишней сумме, в силу указанных норм возлагается на истца.  

В отсутствие указанных доказательств, представленное в материалы дела  платежное поручение не может являться очевидным подтверждением неосновательного  обогащения должника, поскольку доказывают только перечисление спорных денежных  средств со счета истца за конкретно оказанные услуги.  

В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законом.  

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель  обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или  осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

На основании положений статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные  ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

В соответствии с пунктом 100 Правил, утвержденных Постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314), и  п. 2.3 Договора Заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении  условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к  подключению.  

Установленный договором срок подключения обязателен для соблюдения обеими  сторонами, поскольку пункт 97 Правил ставит соблюдение сроков технологического  присоединения со стороны исполнителя в зависимость от выполнения технических  условий со стороны заявителя.  

В соответствии со статьей 328 ГК РФ обязательства исполнителя по  осуществлению технологического присоединения являются встречными по отношению к  обязанности заявителя выполнить технические условия.  

Технологическое присоединение - это последовательный и поэтапный процесс,  который может быть окончен исполнителем только после надлежащего исполнения  встречных обязательств самим заявителем.  

В соответствии с пунктом 100 Правил № 1314, п. 2.3 Договора ООО «Инженерный  центр «Электролуч» обязано выполнить установленные в договоре о подключении  условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к  подключению, условия п. 2.3.1, п. 2.3.5, п. 2.3.9, 2.3.10 и 2.3.7 Договора ООО  «Инженерный центр «Электролуч» не выполнены, обратного не установлено.  

Завершающим мероприятием по подключению, которое выполняется ООО  «Инженерный центр «Электролуч», является фактическое подключение и пуск газа на  объект капитального строительства.  

АО «Газпром газораспределение Смоленск» выполнило фактическое подключение,  осуществило врезку в газопровод ГРО и подвело газ до границы земельного участка ООО  «Инженерный центр «Электролуч», установило на границе участка заглушку, срок  фактического подключения произведен согласно пп. «в» п. 3.2 Договора 13.10.2022, что  подтверждается наряд-допуском № 274.  

Пункт «г» п. 3.2 Договора подлежит оплате в виду полного выполнения работ со  стороны АО «Газпром газораспределение Смоленск». Ввиду отсутствия исполнительной  документации со стороны ООО «Инженерный центр «Электролуч», акты, указанные в  пункте «г», не могут быть выданы и подписаны, так как АО «Газпром газораспределение  Смоленск» не владеет информацией о строительстве сети газопровода в границах  земельного участка ООО «Инженерный центр «Электролуч».  

ООО «Инженерный центр «Электролуч» указанные сведения не представило.  

Плата за подключение объекта капитального строительства определяется  постановлением Департамента Смоленской области по энергетики, энергоэффективности,  тарифной политики, рассчитывается на основании ставок, указанных в Приложении № 1  «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов Общества, связанных с  подключением (технологическим присоединением) газораспределительной сети на 2020  год».  

АО «Газпром газораспределение Смоленск», исполнив договор в полном объеме,  направило пакет документов Заявителю и выставило счет, на основании которого он  должен внести оставшиеся 50% платы за технологическое присоединение в течении 11  дней со дня подписания Акта о подключении:  

1. Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора № 10 от  09.07.2020;  

2. Счет, на основании которого Заявитель обязан внести оставшуюся плату за  технологическое присоединение;  

3. Акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2020 г. - Декабрь 2021 г.;  4. Акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 г. - Декабрь 2019 г.;  

5. Копия Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной  системы.  

Документы, направленные заказным письмом 11 июля 2022 г., получены  Заявителем 18.07.2022, что подтверждается почтовым уведомлением от 18.07.2022, со  стороны Заявителя не подписаны и не направлены Исполнителю, услуга не оплачена.  

Осуществление пуска газа не представляется возможным ввиду не исполнения  обязательств по строительству газовых сетей в границах земельного участка Заявителя,  отсутствие готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к  подключению и пуску газа.  

В соответствии с п. 3.2 Договора Истцом было уплачено только 50% платы в  размере 259481 руб.  

Подпункты «а» и «б» п. 3.2 Договора Ответчиком исполнены, подпункты «в» и «г»  п. 3.2 Договора - не исполнены.  

Задолженность ООО «Инженерный центр «Электролуч» по Договору составляет  259 481 руб.  

В целях досудебного урегулирования АО «Газпром газораспределение Смоленск»  направило в адрес ООО «Инженерный центр «Электролуч» возражение на претензию  ООО «Инженерный центр «Электролуч» № 24-4-8/400 от 11.07.2022 с предложением  добровольно оплатить задолженность в сумме 259 480 рубль 98 коп.  

Доводы ООО «Инженерный центр «Электролуч» о том, что акт приемки  законченного строительством объекта газораспределительной системы от 20.10.2021  подписан АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК» в одностороннем  порядке, доказательств принятия ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОЛУЧ» работ  не представлено, не доказан факт возникновения обязанности по оплате, не состоятельны,  не соответствуют обстоятельствам дела.  

ООО «Инженерный центр «Электролуч» не исполнило в полном объеме своих  обязательств по оплате по договору от 09.07.2020 № 10 о подключении (технологическом  присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.  

Основанием перевода ООО «Инженерный центр «Электролуч» денежных средств  является исполнение обязанности по оплате услуг по подключению (технологическому  присоединению) по договору от 09.07.2020 № 10, о чем свидетельствуют представленные  АО «Газпром газораспределение Смоленск» документы.  

Претензии по объему и качеству услуг по подключению (технологическому  присоединению) ООО «Инженерный центр «Электролуч» не заявлялись, доводы АО  «Газпром газораспределение Смоленск» не опровергнуты.  

Таким образом, отсутствие правового основания приобретения АО «Газпром  газораспределение Смоленск» денежных средств в размере 259 480,98 рублей не доказано,  оснований для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения у  суда не имеется.  

Требование о взыскании задолженности с ООО «Инженерный центр «Электролуч»  за выполненные работы по договору № 10 от 09.07.2020 в размере 259 480,98 рублей  обосновано.  

В соответствии с нормами ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ  от 26.10.2002 обязательства, возникшие после даты принятия арбитражным судом к  производству заявления о банкротстве, являются текущими и не подлежат включению в  реестр требований кредиторов.  

Заявление о признании ООО «ИЦ «Электролуч» несостоятельным (банкротом)  принято определением Арбитражного суда Смоленской области от 06.08.2021 по делу №  А62-6583/2021.  

Обязательства по оплате согласно пп. в), г) п. 3.2 договора от 09.07.2020 № 10  возникли у ООО «ИЦ «Электролуч» после даты принятия арбитражным судом к  производству заявления о банкротстве с учетом акта приемки законченного  строительством объекта газораспределительной системы от 20.10.2021, наряда-допуска   № 274, являются для должника текущими.  

Требования к должнику о взыскании задолженности по текущим платежам  подлежат рассмотрению судами вне рамок дела о банкротстве.  

Довод ООО «Инженерный центр «Электролуч» о том, что обязательства по  Договору № 10 от 09.07.2020 возникли до даты возбуждения дела о несостоятельности  (банкротстве) не соответствует обстоятельствам дела, не обоснован.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной  ответственностью «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) (конкурсный управляющий ФИО1) отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) (конкурсный управляющий  ФИО1) в пользу Акционерного общества «Газпром  Газораспределение Смоленск» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) задолженность  за выполненные работы по договору № 10 от 09.07.2020 в размере 259 480,98 рублей, а  также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8190 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) (конкурсный управляющий  ФИО1) в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 8190 руб.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение  месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный  апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в  законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г.  Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная  жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья В.И. Еремеева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 19.05.2022 3:04:00

Кому выдана Еремеева Вера Игоревна