АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, 

<

...>

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-252156/25-107-1865

05 февраля 2026 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2026 года. Полный текст решения изготовлен 05 февраля 2026 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Р.Р. Наумяновым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-252156/25-107-1865 по иску ООО "СП ВИС- МОС" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО "ГАЗПРОМ МОРСКИЕ ПРОЕКТЫ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании задолженности по договору № ГМП-26/24 от 02.02.2024 в размере 1 725 550,63 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 31.01.2025, паспорт, диплом, представителей ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СП ВИС-МОС" обратилось в суд к ООО "ГАЗПРОМ МОРСКИЕ ПРОЕКТЫ" о взыскании задолженности по договору № ГМП-26/24 от 02.02.2024 в размере 1 725 550,63 р.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие ответчика в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО «СП ВИС-МОС» (Подрядчик, Общество) и ООО «Газпром морские проекты» (Заказчик) заключен Договор № ГМП-26/24 от 02.02.2024 г. (далее по тексту B Договор), в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить разработку документации по пересечению береговой черты по варианту «Бестраншейный закрытый способ DirectPipe)» по

проекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Этап 1. Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового месторождения» соответствии с требованиями Технического задания на разработку документации по пересечению береговой черты по варианту «Бестраншейный закрытый способ (Direct Pipe)» по проекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» Этап 1. Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового месторождения» (далее - «Задание», Приложение № 1 к Договору). Заказчик обязуется принять работы и оплатить их на условиях, предусмотренных Договором.

В силу п. 1.4. Договора работы выполняются в рамках договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 14-1.2-0136 от 21.07.2014, заключенного между ООО «Газпром морские проекты» (ранее - ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект») и ПАО «Газпром» (далее - «Генеральный заказчик») в лице ООО «Газпром инвест» (далее - Договор генерального подряда).

17.04.2024 г. - ООО «Газпром морские проекты» от ООО «СП ВИС-МОС» был получен результат выполненных работ документация по пересечению береговой черты по варианту «Бестраншейный закрытый способ (Direct Pipe) по проекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское море» Этап 1. Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового месторождения». (Вх. № 2621 от 17.04.2024 г.)

Согласно п. 5.2. Договора, по выполнении работ в срок, установленный Календарным планом работ, в том числе по отдельным этапам Договора, Подрядчик представляет Заказчику результат выполненных работ - документацию для рассмотрения (согласования). Срок рассмотрения (согласования) документации Заказчиком составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней.

На дату получения ООО «Газпром морские проекты» Письма Общества от 09.07.2024 г. № 1525, срок рассмотрения (согласования) результата выполненных работ-документации истек. Какие-либо замечания Заказчика в адрес Подрядчика не представлено.

09.07.2024 г. в рамках исполнения взятых на себя обязательств по Договору, ООО «СП ВИС-МОС» Письмом от 09.07.2024 № 1525 направило в адрес ООО «Газпром морские проекты» акт сдачи-приемки работ № 1 от 01.07.2024 г., подготовленный по форме приложения № 6 к Договору.

06.08.2024 г. – ООО «СП ВИС-МОС» получено письмо ООО «Газпром морские проекты» исх. № М/5306 от 06.08.2024 «Возврат актов без подписания», в котором Заказчик отказался подписать акт сдачи-приемки работ № 1 от 01.07.2024 г. и в качестве обоснования отказа указывал на необходимость согласования ТЭС службами ООО «Газпром Инвест».

23.08.2024 г. — не согласившись с основанием отказа в подписании документов, ООО «СП ВИС-МОС» Письмом от 23.08.2024 г. № 1876 повторно направило в адрес Заказчика акт сдачиприемки работ № 1 от 01.07.2024 г. с приложением документации, что подтверждается почтовой квитанцией от 29.08.2024 г. с описью вложения по форме ф.107 (трек номер 43200898129080). Согласно официальным данным Почта России письмо получено ООО «Газпром морские проекты» 05.09.2024 г.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно положениям ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В силу п.5.5. Договора, Заказчик в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ (Приложение № 6) обязан принять

работы и передать Подрядчику подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки работ или передать Подрядчику мотивированный отказ от приёмки выполненных работ с перечнем недостатков выполненных работ и сроками их устранения.

В силу п.2.2.1 Договора Заказчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

Исходя из фактических обстоятельств дела, срок для принятия работ Заказчиком либо направления мотивированного отказа не позднее 15 октября 2024 г.

Вместе с тем, по состоянию на 15.10.2024 г. ООО «Газпром морские проекты» не направлено в адрес ООО «СП ВИС-МОС» подписанного акта сдачи-приемки работ № 1 от 01.07.2024 г либо мотивированного отказа от приёмки выполненных работ с перечнем недостатков выполненных работ и сроками их устранения не представило.

Соответственно, выполненные ООО «СП ВИС-МОС» в рамках исполнения Договора № ГМП-26/24 от 02.02.2024 г. работы приняты ООО «Газпром морские проекты» полностью и подлежат оплате.

В соответствии с п. 4.1 Договора и Актом сдачи-приемки работ № 1 от 01.07.2024 г. стоимость выполненных и принятых ООО «Газпром морские проекты» работ составляет 1 725 550 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.63 коп., в том числе НДС (20%) 287 591,77 руб.

Оплата принятых Заказчиком работ (этапов работ) производится на расчетный счет Подрядчика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику денежных средств по Договору генерального подряда» (п. 4.3 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1) 15.10.2024 г. — Письмом исх. № 2226 от

15.10.2024 г. Истец повторно направил требование ООО «Газпром морские проекты» об оплате выполненных работ, а также подписать Акт сдачи-приемки работ № 1 от 01.07.2024 г. (трек номер 43200801031202). Согласно официальным данным Почта России письмо получено ООО «Газпром морские проекты» 21.10.2024 г.

Вместе с тем, ответа на письма ООО «СП ВИС-МОС» не получены, денежные средства за выполненные работы не оплачены.

Таким образом, размер задолженности ООО «Газпром морские проекты» перед ООО «СП ВИС-МОС» по Договору № ГМП-26/24 от 02.02.2024 г. составляет 1 725 550 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.63 коп.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Судом установлено, что Истец свои обязательства по выполнению работ по договору полностью исполнил, Ответчик свои обязательства по оплате за выполненные работы не исполнил, на дату рассмотрения дела долг в размере 1 725 550,63 руб. Ответчиком не оплачен, в связи с чем, в силу положений статей 309, 310, 720 ГК РФ, требование Истца о взыскании указанной суммы долга с Ответчика подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине подлежат распределению между сторонами по правилам ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ГАЗПРОМ МОРСКИЕ ПРОЕКТЫ" в пользу ООО "СП ВИС-

МОС" сумму задолженности по договору № ГМП-26/24 от 02.02.2024 в размере 1 725

550,63 р., государственную пошлину в размере 85 000 р. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в

течении месяца со дня принятия.

СУДЬЯ М.В. Ларин