АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-6919/2023

г. Астрахань

06 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 06 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Разум-Наследие» (414014, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «АБ Групп» (344064, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 105 104 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  с 30.05.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытков в размере 5 349 981 руб.,

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКИ 1» (344011, 

<

...>, офис 1Г, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 20 586 564 руб. 50 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  с 30.05.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытков в размере 17 263 592 руб.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Разум Астрахань» (414024, 

<

...>, помещ. 1, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

 

при участии до и после перерыва:

от общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Разум-Наследие»: ФИО2, представитель по доверенности от 14.05.2023, диплом ВСА 0661233 от 08.07.2010, паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью «АБ Групп»: не явился, извещен;

от общества с ограниченной ответственностью «ЭНКИ 1»: не явился, извещен;

от общества с ограниченной ответственностью «Разум Астрахань»: ФИО2, представитель по доверенности от 17.01.2024, диплом ВСА 0661233 от 08.07.2010, паспорт; 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Разум-Наследие» (далее – ООО СЗ «Разум-Наследие», истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АБ Групп» (далее – ООО «АБ Групп», ответчик) взыскании неосновательного обогащения в размере 1 105 104 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  с 30.05.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытков в размере 5 349 981 руб., к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКИ 1» (далее – ООО «ЭНКИ 1») о взыскании неосновательного обогащения в размере 20 586 564 руб. 50 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  с 30.05.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытков в размере 17 263 592 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «НКТ» (далее – ООО «НКТ», третье лицо). 

Представители ответчиков в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте его проведения, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Информация о назначении судебного заседания размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 29.11.2023.

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание  проводится в отсутствие представителей ответчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель третьего лица пояснил, что ООО «НКТ» переименовано в ООО «Разум Астрахань».

В судебном заседании, открытом 18.01.2024 в 10 час. 00 мин., в порядке статье 163 АПК РФ судом объявлен перерыв до 23.01.2024 до 14 час. 15 мин.  

Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 19.01.2024.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии того же представителя истца и третьего лица, в отсутствие представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований в части периода взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, просит взыскать с ООО «АБ Групп» в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  с 06.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства, с ООО «ЭНКИ 1» в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения  с 15.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства.

Судом принято уточнение требований в части периода взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами

Представитель ООО СЗ «Разум-Наследие» и ООО «Разум Астрахань» в судебном заседании поддержал правовую позицию, изложенную в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме. 

Выслушав представителя ООО СЗ «Разум-Наследие» и ООО «Разум Астрахань», исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 30.05.2022 между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «АБ Групп» (Подрядчик) заключен договор подряда №1Ф (далее – договор от 30.05.2022 №1Ф), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с требованиями СНиП, Проектной документацией, Техническим заданием, сметой (приложение №1 к договору), в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору)  выполнить на Объекте: «Жилой комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона в Советском районе г. Астрахани. II этап строительства. Жилой многоэтажный дом с нежилым первым этажом (далее по тексту - Объект) работы.

Согласно пункту 1.2 договора от 30.05.2022 №1Ф работы по настоящему договору выполняются из материалов заказчика.

Пунктом 2.1. договора от 30.05.2022 №1Ф установлено, что общая стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 5 164 050,00 (пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьдесят рублей 00 коп.) рублей без НДС, стоимость работ по утеплителю и направляющим определяется по фактически  выполненным объемам. Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, налоги и сборы взимаемы? официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения , удорожания работ в зимние время , резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время) и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

В силу пункта 3.1 договора от 30.05.2022 №1Ф работы по настоящему договору (включая отдельные этапы) производятся в соответствии с графиком работ (Приложение №2 к Договору) в следующие сроки:

Начало работ: «01» июня 2022 г.;

Окончание работ: «01» августа 2022 г.;

Приемка-передача выполненных работ производится Сторонами путем подписания сторонами акта о приемки выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3. (пункт 9.1 договора от 30.05.2022 №1Ф).

Согласно пункту 10.1 договора от 30.05.2022 №1Ф оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком только на основании оригиналов подписанных Сторона ли Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2 и КС-3 соответственно) и оригиналов выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по согласованию сторон иным, не запрещенным действующим законодательством, способом.

Оплата   стоимости  работ, предусмотренной п.   2.1.   настоящего   договора осуществляется   в   следующем порядке

- Предоплата в размере 1 032 810 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в день подписания настоящего договора;

- оплата в размере 516 405 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в течение 20 календарных дней с момента подписания настоящего договора;

- остаток в размере 3 614 835 руб. выплачивается согласно выставленным подрядчиком формам КС-2 и КС-3.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента выполнения в совокупности следующих условий:

- предоставления подрядчиком документов, предусмотренных п. 9.2 настоящего договора;

- исправления или устранения Подрядчиком выявленных при приемке выполненных работ замечаний ил л дефектов в установленный настоящим договором срок;

- подписании Заказчиком акта и справки по формам КС-2 и КС-3 в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего договора.           

- выставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и передачи его Заказчику.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком с учетом удержания ранее выплаченного аванса. Удержание аванса осуществляется Заказчиком пропорционально выполненным работам и с учетом положения пункта 10.5. настоящего договора.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных платежей и с учетом положений п. 10.5. настоящего договора, не позднее;45 (сорока пяти) рабочих дней после полного их выполнения, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами акта и справки по форме КС-2, КС-3 соответственно, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 16.12 договора от 30.05.2022 №1Ф срок действия договора с момента его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

20 июня 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «АБ Групп» (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к договору от 30.05.2022 №1Ф о нижеследующем:

Пункт 2.1. «Стоимость работа изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость, выполняемых «Исполнителем» по настоящему Договору работ составляет 1 032 810 из расчета, в т.ч.:

п/п

Наименование работ

Ед.

ЮМ.

Количество

Цена

Сумма

1

Монтаж планки и облицовочного материала: клинкерная панель,

м2

275,00

2000,00

550000,00

2

Монтаж облицовочного материала: кассета из АКП, карнизы из АКП.

м2

321,874

1500,00

482810,00

Указанная в настоящем пункте стоимость указанных в настоящем договоре, включая: зарплату взимаемые официальными властями РФ, накладные лимитированные затраты (включая затраты на временные резерв средств на непредвиденные расходы, охрану затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 1 032 810 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 21.08.2022 №1 на сумму 732 115 руб., от 28.09.2022 №2 на сумму 300 696 руб.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «АБ Групп» денежные средства в общем размере 1 032 810 руб., что подтверждается платежным поручением от 02.06.2022 №4233.

11 апреля 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «АБ Групп» (Подрядчик) заключен договор подряда №3Ф (далее – договор от 11.04.2022 №3Ф), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с требованиями СНиП, Проектной документацией, Техническим заданием, сметой (приложение №1 к договору), в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору)  выполнить на Объекте: «Жилой комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона в Советском районе г. Астрахани. III этап строительства. Жилой многоэтажный дом с нежилым первым этажом (далее по тексту - Объект) работы.

Согласно пункту 1.2 договора от 11.04.2022 №3Ф работы по настоящему договору выполняются из материалов заказчика.

Пунктом 2.1. договора от 11.04.2022 №3Ф установлено, что общая стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 27 111 370 рублей без НДС. Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, налоги и сборы взимаемы? официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения, удорожания работ в зимние время , резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время) и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

В силу пункта 3.1 договора от 11.04.2022 №3Ф работы по настоящему договору (включая отдельные этапы) производятся в соответствии с графиком работ (Приложение №2 к Договору) в следующие сроки:

Начало работ: «15» апреля 2022 г.;

Окончание работ: «15» декабря 2022 г.;

Приемка-передача выполненных работ производится Сторонами путем подписания сторонами акта о приемки выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3. (пункт 9.1 договора от 11.04.2022 №3Ф).

Согласно пункту 10.1 договора от 11.04.2022 №3Ф оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком только на основании оригиналов подписанных Сторона ли Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2 и КС-3 соответственно) и оригиналов выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по согласованию сторон иным, не запрещенным действующим законодательством, способом.

Оплата   стоимости  работ, предусмотренной п.   2.1.   настоящего   договора осуществляется   в   следующем порядке

- Предоплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в день подписания настоящего договора;

- оплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика после фактического нахождения строительных люлек, а также персонала отвечающего всем требованиям настоящего договора на объекте заказчика;

- оплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика после истечения 30 календарных дней фактического нахождения строительных люлек, а также персонала отвечающего всем требованиям настоящего договора на объекте заказчика;

- остаток в размере 18 977 959 руб. выплачивается согласно выставленным подрядчиком формам КС-2 и КС-3.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента выполнения в совокупности следующих условий:

- предоставления подрядчиком документов, предусмотренных п. 9.2 настоящего договора;

- исправления или устранения Подрядчиком выявленных при приемке выполненных работ замечаний ил л дефектов в установленный настоящим договором срок;

- подписании Заказчиком акта и справки по формам КС-2 и КС-3 в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего договора.           

- выставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и передачи его Заказчику.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком с учетом удержания ранее выплаченного аванса. Удержание аванса осуществляется Заказчиком пропорционально выполненным работам и с учетом положения пункта 10.5. настоящего договора.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных платежей и с учетом положений п. 10.5. настоящего договора, не позднее;45 (сорока пяти) рабочих дней после полного их выполнения, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами акта и справки по форме КС-2, КС-3 соответственно, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 16.12 договора от 11.04.2022 №3Ф срок действия договора с момента его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

20 июня 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «АБ Групп» (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к договору от 11.04.2022 №3Ф о нижеследующем:

Пункт 2.1. «Стоимость работа изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость, выполняемых «Исполнителем» по настоящему Договору работ составляет 3 411 137 из расчета, в т.ч.:

N°

п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

1

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж кассет из АКП

м2

2823,00

500,00

1411500,00

2

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж карниза из АКП

м2

180,20

|   500,00

90100,00

3

Рззметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж клинкерной плитки

м2

2990,60

500,00

1495300,00

4

Монтаж утеплителя в один слой общей толщиной 100мм.

м2

690,395

!   600,00

414237,00

 

Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию маши в и механизмов, налоги и сборы взимаемые официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения, удорожания работ: в зимние время, резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 3 112 115 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 28.07.2022 №1 на сумму 1 965 015 руб., от 21.08.2022 №2 на сумму 504 700 руб., от 21.10.2022 №3 на сумму 452 900 руб., от 12.12.2022 №4 на сумму 189 500 руб.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «АБ Групп» денежные средства в общем размере 3 411 137 руб., что подтверждается платежным поручением от 13.04.2022 №3803 на сумму 2 711 137 руб., от 15.05.2022 №4039 на сумму 700 000 руб..

Поскольку ООО «АБ Групп» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 11.04.2022 №3Ф  возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 299 022 руб.

16 мая 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «АБ Групп» (Подрядчик) заключен договор подряда №4Ф (далее – договор от 16.05.2022 №4Ф), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с требованиями СНиП, Проектной документацией, Техническим заданием, сметой (приложение №1 к договору), в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору)  выполнить на Объекте: «Жилой комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона в Советском районе г. Астрахани. IV этап строительства. Жилой многоэтажный дом с нежилым первым этажом (далее по тексту - Объект) работы.

Согласно пункту 1.2 договора от 16.05.2022 №4Ф работы по настоящему договору выполняются из материалов заказчика.

Пунктом 2.1. договора от 16.05.2022 №4Ф установлено, что общая стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 27 111 370 рублей без НДС. Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, налоги и сборы взимаемы? официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения, удорожания работ в зимние время , резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время) и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

Приемка-передача выполненных работ производится Сторонами путем подписания сторонами акта о приемки выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3. (пункт 8.1 договора от 16.05.2022 №4Ф).

Согласно пункту 10.1 договора от 16.05.2022 №4Ф оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком только на основании оригиналов подписанных Сторона ли Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2 и КС-3 соответственно) и оригиналов выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по согласованию сторон иным, не запрещенным действующим законодательством, способом.

Оплата   стоимости  работ, предусмотренной п.   2.1.   настоящего   договора осуществляется   в   следующем порядке

- Предоплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в день подписания настоящего договора;

- оплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика после фактического нахождения строительных люлек, а также персонала отвечающего всем требованиям настоящего договора на объекте заказчика;

- оплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика после истечения 30 календарных дней фактического нахождения строительных люлек, а также персонала отвечающего всем требованиям настоящего договора на объекте заказчика;

- остаток в размере 18 977 959 руб. выплачивается согласно выставленным подрядчиком формам КС-2 и КС-3.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента выполнения в совокупности следующих условий:

- предоставления подрядчиком документов, предусмотренных п. 9.2 настоящего договора;

- исправления или устранения Подрядчиком выявленных при приемке выполненных работ замечаний ил л дефектов в установленный настоящим договором срок;

- подписании Заказчиком акта и справки по формам КС-2 и КС-3 в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего договора.           

- выставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и передачи его Заказчику.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком с учетом удержания ранее выплаченного аванса. Удержание аванса осуществляется Заказчиком пропорционально выполненным работам и с учетом положения пункта 10.5. настоящего договора.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных платежей и с учетом положений п. 10.5. настоящего договора, не позднее;45 (сорока пяти) рабочих дней после полного их выполнения, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами акта и справки по форме КС-2, КС-3 соответственно, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 16.12 договора от 16.05.2022 №4Ф срок действия договора с момента его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

20 июня 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «АБ Групп» (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к договору от 16.05.2022 №4Ф о нижеследующем:

Пункт 2.1. «Стоимость работа изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость, выполняемых «Исполнителем» по настоящему Договору работ составляет 2 011 137 из расчета, в т.ч.:

 

N°

п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

1

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж кассет из АКП

м2

2823,00

500,00

1411500,00

2

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж карниза из АКП

м2

180,20

500,00

90100,00

3

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж клинкерной плитки

м2

1020,60

500,00

510300,00

Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию маши в и механизмов, налоги и сборы взимаемые официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения, удорожания работ: в зимние время, резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «АБ Групп» денежные средства в общем размере 2 011 137 руб., что подтверждается платежным поручением от 25.05.2022 №4152.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 1 205 055 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 20.08.2022 №1 на сумму 828 880 руб., от 21.10.2022 №2 на сумму 180 525 руб., от 12.12.2022 №3 на сумму 195 650 руб.

Поскольку ООО «АБ Групп» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 16.05.2022 №4Ф возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 806 082 руб.

14 июня 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «ЭНКИ 1» (Подрядчик) заключен договор подряда №1Ф (далее – договор от 14.06.2022 №1Ф), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с требованиями СНиП, Проектной документацией, Техническим заданием, сметой (приложение №1 к договору), в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору)  выполнить на Объекте: «Жилой комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона в Советском районе г. Астрахани. II этап строительства. Жилой многоэтажный дом с нежилым первым этажом (далее по тексту - Объект) работы.

Согласно пункту 1.2 договора от 14.06.2022 №1Ф работы по настоящему договору выполняются из материалов заказчика.

Пунктом 2.1. договора от 14.06.2022 №1Ф установлено, что общая стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 4 262 800 рублей без НДС, стоимость работ по утеплителю и направляющим определяется по фактически  выполненным объемам. Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, налоги и сборы взимаемы? официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения , удорожания работ в зимние время , резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время) и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

В силу пункта 3.1 договора от 14.06.2022 №1Ф работы по настоящему договору (включая отдельные этапы) производятся в соответствии с графиком работ (Приложение №2 к Договору) в следующие сроки:

Начало работ: «14» июня 2022 г.;

Окончание работ: «01» августа 2022 г.;

Приемка-передача выполненных работ производится Сторонами путем подписания сторонами акта о приемки выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3. (пункт 9.1 договора от 14.06.2022 №1Ф).

Согласно пункту 10.1 договора от 14.06.2022 №1Ф оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком только на основании оригиналов подписанных Сторона ли Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2 и КС-3 соответственно) и оригиналов выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по согласованию сторон иным, не запрещенным действующим законодательством, способом.

Оплата   стоимости  работ, предусмотренной п.   2.1.   настоящего   договора осуществляется   в   следующем порядке

- Предоплата в размере 516 405 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в день подписания настоящего договора;

- остаток в размере 3 688 835 руб. выплачивается согласно выставленным подрядчиком формам КС-2 и КС-3.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента выполнения в совокупности следующих условий:

- предоставления подрядчиком документов, предусмотренных п. 9.2 настоящего договора;

- исправления или устранения Подрядчиком выявленных при приемке выполненных работ замечаний ил л дефектов в установленный настоящим договором срок;

- подписании Заказчиком акта и справки по формам КС-2 и КС-3 в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего договора.           

- выставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и передачи его Заказчику.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком с учетом удержания ранее выплаченного аванса. Удержание аванса осуществляется Заказчиком пропорционально выполненным работам и с учетом положения пункта 10.5. настоящего договора.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных платежей и с учетом положений п. 10.5. настоящего договора, не позднее;45 (сорока пяти) рабочих дней после полного их выполнения, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами акта и справки по форме КС-2, КС-3 соответственно, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 16.12 договора от 14.06.2022 №1Ф срок действия договора с момента его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

13 сентября 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «ЭНКИ 1»  (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к договору от 14.06.2022 №1Ф о нижеследующем:

Пункт 2.1. «Стоимость работа изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость, выполняемых «Исполнителем» по настоящему Договору работ составляет 16 617 044 руб. 50 коп. из расчета, в т.ч.:

 

№ п/п

Наименование работ

 

Ед. изм.

Кол-во

 

Цена

Сумма

1

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж панелей из АПК

 

м2

168,22

 

500,00

84 110,00

2

Монтаж направляющих профилей несущего каркаса под монтаж паелей из АПК

 

м2

612,48

 

800,00

489 984,00

3

Монтаж кассет из АПК

 

м2

2 679,23

 

1 500,00

4 018 839,00

4

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса для монтажа карниза из АПК

 

м2

91,19

 

500,00

45 595,00

5

Монтаж направляющих профилей несущего каркаса для монтажа карниза из АПК

 

м2

91,19

 

800,00

72 952,00

6

Монтаж доборных элементов (карниз из АПК)

 

м2

198,32

 

1 500,00 \

297 480,00

7

Монтаж откосов и сливов из алюминиевой композитной панели и пожарной отсечки:

 

 

 

7.1.

- монтаж пожарной отсечки из оцинк. стали

 

м2

482,10

 

500,00

241 050,00

7.2.

- монтаж откосов и сливов из АКП

 

м2

1 171,94

•

1 800,00

2 109 492,00

8

Монтаж доборных элементов го алюминиевой композитной панели (перепады из АПК)

 

м2

315,06

 

1 800,00

567 108,00

9

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса для монтажа клинкерной плитки

 

м2

69,49

 

500,00

34 745,00

10

Монтаж направляющих профилей несущего каркаса для монтажа клинкерной плитки

 

м2

772,45

 

800,00

617 960,00

И

Монтаж крепежных планок для клинкерной шп

тки

м2

1 861,75

 

600,00

1 117050,00

12

Монтаж клинкерной плитки

 

м2

2 353,3*

 

1 400,00

3 294 704,00

13

Монтаж утеплителя в один слой общей толщин 100мм, в т.ч.:

>й

м2

135,30

 

600,00

81 180,00

14

Устройство несущего каркаса для монтажа парапетов

 

м2

251,60

 

800,00

201 280,00

15

Изготовление парапетных элементов

 

м2

251,60

 

250,00

62 900,00

16

Монтаж парапетных элементов

 

м2

251,60

 

1200,00 ;

301 920,00

17

Бурение отверстий под трассы кондиционеров:

 

 

 

 

- диаметром 52 мм

 

шт

80,00

 

200,00   |

16 000,00

 

- диаметром 24 мм

 

шт

120,00

 

200,00

24 000,00

18

Монтаж конденсатопровода и трубы для трассы фреонопровода

-

п.м.

288,00

 

250,00

72 000,00

 

19

Монтаж кронштейнов под декорат. Экран (корзина)

 

м2

67,00

 

400,00

26 800.00

20

Сборка и установка защитного декоративного экрана (корзины)

 

М2

420,00

 

1000,00

420 000,00

21

Раскрой и фрезеровка кассет из АКП

 

М2

3 445,72

 

250,00

861 430,00

22

Сборка кассет и элементов

 

М2

3 445,72

 

150,00

516 858,00

23

Раскрой и фрезеровка кассет из АКП (откосы, отливы)

 

М2

1 192,70

 

250,00

298 175,00

24

Сборка кассет и элементов (откосы, отливы)

 

М2

1 192 ,70

 

150,00

178905,00

25

Изготовление фасонных элементов из оцинкованной стали

 

М2

1170,11

 

250,00

292 527,50

26

Перемонтаж кронштейнов по декорат экран (корзина)

 

М2

272,00

 

400,00

108800,00

27

Перемонтаж утеплителя в один слой общей толщиной 100 мм

 

М2

272,00

 

600,00

163200,00

 

Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию маши в и механизмов, налоги и сборы взимаемые официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения, удорожания работ: в зимние время, резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 8 380 104 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 21.08.2022 №1 на сумму 899 431 руб., от 28.09.2022 №2 на сумму 6 436 463 руб., от 20.12.2022 №3 на сумму 1 044 210 руб.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «ЭНКИ 1» денежные средства в общем размере 3 730 947 руб., что подтверждается платежным поручением от 22.06.2022 №4456 на сумму 3 000 000 руб., от 29.12.2022 №6183 на сумму 730 947 руб.

14 июня 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «ЭНКИ 1» (Подрядчик) заключен договор подряда №3Ф (далее – договор от 14.06.2022 №3Ф), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с требованиями СНиП, Проектной документацией, Техническим заданием, сметой (приложение №1 к договору), в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору)  выполнить на Объекте: «Жилой комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона в Советском районе г. Астрахани. III этап строительства. Жилой многоэтажный дом с нежилым первым этажом (далее по тексту - Объект) работы.

Согласно пункту 1.2 договора от 14.06.2022 №3Ф работы по настоящему договору выполняются из материалов заказчика.

Пунктом 2.1. договора от 14.06.2022 №3Ф установлено, что общая стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 24 120 770 рублей без НДС, стоимость работ по утеплителю и направляющим определяется по фактически  выполненным объемам. Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, налоги и сборы взимаемых официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения , удорожания работ в зимние время , резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время) и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

В силу пункта 3.1 договора от 14.06.2022 №3Ф работы по настоящему договору (включая отдельные этапы) производятся в соответствии с графиком работ (Приложение №2 к Договору) в следующие сроки:

Начало работ: «14» июня 2022 г.;

Окончание работ: «15» декабря 2022 г.;

Приемка-передача выполненных работ производится Сторонами путем подписания сторонами акта о приемки выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3. (пункт 9.1 договора от 14.06.2022 №3Ф).

Согласно пункту 10.1 договора от 14.06.2022 №3Ф оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком только на основании оригиналов подписанных Сторона ли Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2 и КС-3 соответственно) и оригиналов выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по согласованию сторон иным, не запрещенным действующим законодательством, способом.

Оплата   стоимости  работ, предусмотренной п.   2.1.   настоящего   договора осуществляется   в   следующем порядке

- Предоплата в размере 4 722 274 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в день подписания настоящего договора;

- остаток в размере 19 398 496 руб. выплачивается согласно выставленным подрядчиком формам КС-2 и КС-3.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента выполнения в совокупности следующих условий:

- предоставления подрядчиком документов, предусмотренных п. 9.2 настоящего договора;

- исправления или устранения Подрядчиком выявленных при приемке выполненных работ замечаний ил л дефектов в установленный настоящим договором срок;

- подписании Заказчиком акта и справки по формам КС-2 и КС-3 в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего договора.           

- выставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и передачи его Заказчику.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком с учетом удержания ранее выплаченного аванса. Удержание аванса осуществляется Заказчиком пропорционально выполненным работам и с учетом положения пункта 10.5. настоящего договора.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных платежей и с учетом положений п. 10.5. настоящего договора, не позднее;45 (сорока пяти) рабочих дней после полного их выполнения, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами акта и справки по форме КС-2, КС-3 соответственно, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 16.12 договора от 14.06.2022 №3Ф срок действия договора с момента его полписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

13 сентября 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «ЭНКИ 1»  (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к договору от 14.06.2022 №1Ф о нижеследующем:

Пункт 2.1. «Стоимость работа изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость, выполняемых «Исполнителем» по настоящему Договору работ составляет 16 617 044 руб. 50 коп. из расчета, в т.ч.:

 

№ п/п

Наименование работ

 

Ед. изм.

Кол-во

 

Цена

Сумма

1

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса под монтаж панелей из АПК

 

м2

168,22

 

500,00

84 110,00

2

Монтаж направляющих профилей несущего каркаса под монтаж паелей из АПК

 

м2

612,48

 

800,00

489 984,00

3

Монтаж кассет из АПК

 

м2

2679,23

 

1 500,00

4 018 839,00

4

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса для монтажа карниза из АПК

 

м2

91,19

 

500,00

45 595,00

5

Монтаж направляющих профилей несущего каркаса для монтажа карниза из АПК

 

м2

91,19

 

800,00

72 952,00

6

Монтаж доборных элементов (карниз из АПК)

 

м2

198,32

 

1 500,00 \

297 480,00

7

Монтаж откосов и сливов из алюминиевой композитной панели и пожарной отсечки:

 

 

 

7.1.

- монтаж пожарной отсечки из оцинк. стали

 

м2

482,10

 

500,00

241 050,00

7.2.

- монтаж откосов и сливов из АКП

 

м2

1171,94

 

1 800,00

2 109 492,00

8

Монтаж доборных элементов го алюминиевой композитной панели (перепады из АПК)

 

м2

315,06

 

1 800,00

567 108,00

9

Разметка и установка кронштейнов несущего каркаса для монтажа клинкерной плитки

 

м2

69,49

 

500,00

34 745,00

10

Монтаж направляющих профилей несущего каркаса для монтажа клинкерной плитки

 

м2

772,45

 

800,00

617 960,00

И

Монтаж крепежных планок для клинкерной шп

тки

м2

1 861,75

 

600,00

1 117050,00

12

Монтаж клинкерной плитки

 

м2

2 353,3

 

1 400,00

3 294 704,00

13

Монтаж утеплителя в один слой общей толщин 100мм, в т.ч.:

 

м2

135,30

 

600,00

81 180,00

14

Устройство несущего каркаса для монтажа парапетов

 

м2

251,60

 

800,00

201 280,00

15

Изготовление парапетных элементов

 

м2

251,60

 

250,00

62 900,00

16

Монтаж парапетных элементов

 

м2

251,60

 

1200,00

301 920,00

17

Бурение отверстий под трассы кондиционеров:

 

 

 

 

- диаметром 52 мм

 

шт

80,00

 

200,00   

16 000,00

 

- диаметром 24 мм

 

шт

120,00

 

200,00

24 000,00

18

Монтаж конденсатопровода и трубы для трассы фреонопровода

-

п.м.

288,00

 

250,00

72 000,00

 

19

Монтаж кронштейнов под декорат. Экран (корзина)

 

м2

67,00

 

400,00

26 800.00

20

Сборка и установка защитного декоративного экрана (корзины)

 

М2

420,00

 

1000,00

420 000,00

21

Раскрой и фрезеровка кассет из АКП

 

М2

3 445,72

 

250,00

861 430,00

22

Сборка кассет и элементов

 

М2

3 445,72

 

150,00

516 858,00

23

Раскрой и фрезеровка кассет из АКП (откосы, отливы)

 

М2

1 192,70

 

250,00

298 175,00

24

Сборка кассет и элементов (откосы, отливы)

 

М2

1192,70

 

150,00

178905,00

25

Изготовление фасонных элементов из оцинкованной стали

 

М2

1170,11

 

250,00

292 527,50

26

Перемонтаж кронштейнов по декорат экран (корзина)

 

М2

272,00

 

400,00

108800,00

27

Перемонтаж утеплителя в один слой общей толщиной 100 мм

 

М2

272,00

 

600,00

163200,00

 

Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию маши в и механизмов, налоги и сборы взимаемые официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения, удорожания работ: в зимние время, резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «ЭНКИ 1» денежные средства в общем размере 16 870 017 руб. 50 коп., что подтверждается платежным поручением от 22.08.2022 №44932, от 25.08.2022 №4946, от 02.09.2022 №5029, от 07.09.2022№ 5088, от 07.09.2022 №5089, от 14.09.2022 №5183, от 02.11.2022 №5610 от 02.11.2022 №5611, от 30.11.2022 №5813, от 19.12.2022 №6020, от 27.12.2022 №6114, от 29.12.2022 №6183.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 8 675 051 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ 28.07.2022 №1 на сумму 4 070 085 руб., от 21.08.2022 №2 на сумму 1 654 661 руб., от 21.10.2022 №3 на сумму 1 544 275 руб., от 18.11.2022 №4 на сумму 416 580 руб., от 12.12.2022 №5 на сумму 568 800 руб., от 12.12.2022 №6 на сумму 224 460 руб., от 20.12.2022 №7 на сумму 196 190 руб.

Поскольку ООО «ЭНКИ 1» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 14.06.2022 №3Ф возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 8 194 966 руб. 50 коп.

16 июня 2022 года между ООО СЗ «Разум-Наследие» (Заказчик) и ООО «ЭНКИ 1» (Подрядчик) заключен договор подряда №4Ф (далее – договор от 16.06.2022 №4Ф), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с требованиями СНиП, Проектной документацией, Техническим заданием, сметой (приложение №1 к договору), в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору)  выполнить на Объекте: «Жилой комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона в Советском районе г. Астрахани. III этап строительства. Жилой многоэтажный дом с нежилым первым этажом (далее по тексту - Объект) работы.

Согласно пункту 1.2 договора от 16.06.2022 №4Ф работы по настоящему договору выполняются из материалов заказчика.

Пунктом 2.1. договора от 16.06.2022 №4Ф установлено, что общая стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 25 520 970 рублей без НДС, стоимость работ по утеплителю и направляющим определяется по фактически  выполненным объемам. Указанная в настоящем пункте стоимость включает все необходимые затраты, для производства работ, указанных в настоящем договоре, включая: зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, налоги и сборы взимаемы? официальными властями РФ, накладные расходы и плановые накопления подрядной организации, лимитированные затраты (включая затраты на временные здания и сооружения , удорожания работ в зимние время , резерв средств на непредвиденные расходы, охрану материалов, конструкций и техники в дневное время) и прочие затраты. В указанную стоимость входит стоимость всех технологических процессов, необходимых для полного и качественного производства работ в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

В силу пункта 3.1 договора от 16.06.2022 №4Ф работы по настоящему договору (включая отдельные этапы) производятся в соответствии с графиком работ (Приложение №2 к Договору) в следующие сроки:

Начало работ: «16» июня 2022 г.;

Окончание работ: «16» февраля 2023 г.;

Приемка-передача выполненных работ производится Сторонами путем подписания сторонами акта о приемки выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3. (пункт 9.1 договора от 16.06.2022 №4Ф).

Согласно пункту 10.1 договора от 16.06.2022 №4Ф оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком только на основании оригиналов подписанных Сторона ли Актов сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2 и КС-3 соответственно) и оригиналов выставленных Подрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по согласованию сторон иным, не запрещенным действующим законодательством, способом.

Оплата   стоимости  работ, предусмотренной п.   2.1.   настоящего   договора осуществляется   в   следующем порядке

- Предоплата в размере 700 000 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в день подписания настоящего договора;

- оплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика после фактического нахождения строительных люлек, а также персонала отвечающего всем требованиям настоящего договора на объекте заказчика;

- оплата в размере 2 711 137 руб. перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика после истечения 30 календарных дней фактического нахождения строительных люлек, а также персонала отвечающего всем требованиям настоящего договора на объекте заказчика;

- остаток в размере 19 398 696 руб. выплачивается согласно выставленным подрядчиком формам КС-2 и КС-3.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента выполнения в совокупности следующих условий:

- предоставления подрядчиком документов, предусмотренных п. 9.2 настоящего договора;

- исправления или устранения Подрядчиком выявленных при приемке выполненных работ замечаний ил л дефектов в установленный настоящим договором срок;

- подписании Заказчиком акта и справки по формам КС-2 и КС-3 в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего договора.           

- выставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и передачи его Заказчику.

Оплата выполненных за отчетный период работ производится Заказчиком с учетом удержания ранее выплаченного аванса. Удержание аванса осуществляется Заказчиком пропорционально выполненным работам и с учетом положения пункта 10.5. настоящего договора.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных платежей и с учетом положений п. 10.5. настоящего договора, не позднее;45 (сорока пяти) рабочих дней после полного их выполнения, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами акта и справки по форме КС-2, КС-3 соответственно, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 16.12 договора от 16.06.2022 №4Ф срок действия договора с момента его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 4 857 594 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 21.08.2022 №1 на сумму 2 577 599 руб., от 21.10.2022 №2 на сумму 1 338 425 руб., от 12.12.2022 №3 на сумму 745 380 руб., от 20.12.2022 №4 на сумму 196 190 руб. 

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «ЭНКИ 1» денежные средства в общем размере 17 249 192 руб., что подтверждается платежным поручением от 06.07.2022 №4565 на сумму 5 422 274 руб., от 28.07.2022 №4780 на сумму 1 500 000 руб., от 11.08.2022 №4902 на сумму 1 200 000 руб., от 02.09.2022 №4975 на сумму 2 577 599 руб., от 06.10.2022 №5366 на сумму 2 690 000 руб., от 06.10.2022 №5367 на сумму 2 000 000 руб., от 30.11.2022 №5859 на сумму 1 063 265 руб., от 19.12.2022 №024 на сумму 658 721 руб., от 28.12.2022 №6147 на сумму 137 333 руб., 

Поскольку ООО «ЭНКИ 1» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 16.06.2022 №4Ф возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 12 391 598 руб.

Кроме того, истцом с целью проверки качества выполненных Подрядчиками и принятыми Заказчиком работ по договору была привлечена экспертная организация, о чем Подрядчики уведомлен письмами от 09.02.2023 исх. № 22/23, исх.№23/23.

Истцом в материалы дела представлено заключения специалиста № 06/01-23 (строительно-техническое исследование качества выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного дома по ул. Б. Хмельницкого, д. 23, корп. 1 г. Астрахани) (далее - Заключение), согласно которому на объектах «дом Айвазовский»,«дом Менделеев» и «дом Чайковский» выявлены множественные недостаткивыполнения ООО «АБ Групп» и ООО «ЭНКИ 1» работ, результат работ несоответствует техническим решениям принятых в рабочих чертежах и представляетопасность для жизни и здоровья людей, стоимость качественно выполненных ООО«АБ Групп» работ на объектах «дом Айвазовский», «дом Менделеев» и «домЧайковский» составляет 0 руб. 00 коп., стоимость качественно выполненных ООО«ЭНКИ 1» работ на объектах «дом Айвазовский», «дом Менделеев» и «домЧайковский» составляет 0 руб. 00 коп.

В связи с чем истец считает, что ненадлежащее исполнение условий вышеуказанных договора ответчиком ООО «АБ Групп» привело к убыткам истца на сумму 5 349 981 руб. 57 коп., ненадлежащее исполнение условий договора ответчиком ООО «ЭНКИ 1» привело к убыткам истца на сумму 17 263 592 руб.

В целях досудебного урегулирования спора ООО СЗ «Разум-Наследие» были направлены в адрес ООО «АБ Групп» и ООО «ЭНКИ 1» претензии от 11.05.2023, от 23.06.2023 соответственно. Ответа на претензии не поступило.

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно пункту 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства, вытекающие из договора, должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статей 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Передача результата работ оформляется актом либо иным документом, удостоверяющим приемку (статья 720 ГК РФ). Таким образом, заявитель должен доказать фактическое выполнение работ на предъявленную к взысканию сумму, то есть объем работ и их стоимость, принятие результата работ Должником

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со статьей 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также любые действия в обход закона с противоправной целью и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, именуемое злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ).

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за  исключением случаев, предусмотренных  статьей  1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные главой 60 Кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.  

Из диспозиции нормы статьи 1102 ГК РФ следует, что в предмет доказывания по иску о взыскании стоимости неосновательного обогащения (неосновательного сбережения) входят следующие обстоятельства: факт приобретения или сбережения ответчиком имущества истца, отсутствие правовых оснований такого приобретения или сбережения,  и размер взыскиваемой суммы.

В пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «О практике рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», разъяснено, что правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочно исполненного.

При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения обогатившегося, самого потерпевшего или третьих лиц, либо произошло помимо их воли.

Как следует из материалов дела, истец во исполнение условий договора от 11.04.2022 №3Ф, заключенного с ООО «АБ Групп», последний выполнил работы на сумму 3 112 115 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 28.07.2022 №1 на сумму 1 965 015 руб., от 21.08.2022 №2 на сумму 504 700 руб., от 21.10.2022 №3 на сумму 452 900 руб., от 12.12.2022 №4 на сумму 189 500 руб.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «АБ Групп» денежные средства в общем размере 3 411 137 руб., что подтверждается платежным поручением от 13.04.2022 №3803 на сумму 2 711 137 руб., от 15.05.2022 №4039 на сумму 700 000 руб..

Поскольку ООО «АБ Групп» не исполнило по  договору от 11.04.2022 №3Ф обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 11.04.2022 №3Ф  возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 299 022 руб.

Во исполнение условий договора от 16.05.2022 №4Ф ООО «АБ Групп» выполнило истцу работы на сумму 1 205 055 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 20.08.2022 №1 на сумму 828 880 руб., от 21.10.2022 №2 на сумму 180 525 руб., от 12.12.2022 №3 на сумму 195 650 руб.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «АБ Групп» денежные средства в общем размере 2 011 137 руб., что подтверждается платежным поручением от 25.05.2022 №4152.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на сумму 1 205 055 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 20.08.2022 №1 на сумму 828 880 руб., от 21.10.2022 №2 на сумму 180 525 руб., от 12.12.2022 №3 на сумму 195 650 руб.

Поскольку ООО «АБ Групп» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 16.05.2022 №4Ф возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 806 082 руб.

Во исполнение условий договора от 14.06.2022 №3Ф ООО «ЭНКИ 1» выполнило работы на сумму 8 675 051 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ 28.07.2022 №1 на сумму 4 070 085 руб., от 21.08.2022 №2 на сумму 1 654 661 руб., от 21.10.2022 №3 на сумму 1 544 275 руб., от 18.11.2022 №4 на сумму 416 580 руб., от 12.12.2022 №5 на сумму 568 800 руб., от 12.12.2022 №6 на сумму 224 460 руб., от 20.12.2022 №7 на сумму 196 190 руб.

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «ЭНКИ 1» денежные средства в общем размере 16 870 017 руб. 50 коп., что подтверждается платежным поручением от 22.08.2022 №44932, от 25.08.2022 №4946, от 02.09.2022 №5029, от 07.09.2022№ 5088, от 07.09.2022 №5089, от 14.09.2022 №5183, от 02.11.2022 №5610 от 02.11.2022 №5611, от 30.11.2022 №5813, от 19.12.2022 №6020, от 27.12.2022 №6114, от 29.12.2022 №6183.

Поскольку ООО «ЭНКИ 1» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 14.06.2022 №3Ф возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 8 194 966 руб. 50 коп.

Во исполнение условий договора от 16.06.2022 №4Ф ООО «ЭНКИ 1»  выполнило работы на сумму 4 857 594 руб., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами о приемке выполненных работ от 21.08.2022 №1 на сумму 2 577 599 руб., от 21.10.2022 №2 на сумму 1 338 425 руб., от 12.12.2022 №3 на сумму 745 380 руб., от 20.12.2022 №4 на сумму 196 190 руб. 

ООО СЗ «Разум-Наследие» перечислило ООО «ЭНКИ 1» денежные средства в общем размере 17 249 192 руб., что подтверждается платежным поручением от 06.07.2022 №4565 на сумму 5 422 274 руб., от 28.07.2022 №4780 на сумму 1 500 000 руб., от 11.08.2022 №4902 на сумму 1 200 000 руб., от 02.09.2022 №4975 на сумму 2 577 599 руб., от 06.10.2022 №5366 на сумму 2 690 000 руб., от 06.10.2022 №5367 на сумму 2 000 000 руб., от 30.11.2022 №5859 на сумму 1 063 265 руб., от 19.12.2022 №024 на сумму 658 721 руб., от 28.12.2022 №6147 на сумму 137 333 руб., 

Поскольку ООО «ЭНКИ 1» не исполнило по  договору обязательства в полном объеме, на стороне ответчика - ООО «АБ Групп» по договору от 16.06.2022 №4Ф возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 12 391 598 руб.

Согласно расчету истца размер неосновательного обогащения на стороне ответчика ООО «АБ Групп» составляет 1 105 104 руб., размер неосновательного обогащения на стороне ответчика ООО «ЭНКИ 1» составляет 20 586 564 руб. 50 коп.

Суд, проверив указанный расчет истца, признает его верным.

На основании пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11).

Контррасчет в подтверждение фактов исполнения ответчиком встречной обязанности по выполнению работ или возврата суммы предварительной оплаты по договору со ссылками на первичные документы вопреки требованиям процессуального закона не представлен.

Доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств, отсутствия долга, а равно его наличия в ином (меньшем) размере, чем заявлено истцом, ответчиком не представлено.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования в части взыскания с ООО «АБ Групп» неосновательного обогащения в размере          1 105 104 руб., в части взыскания ООО «ЭНКИ 1» неосновательного обогащения в размере 20 586 564 руб. 50 коп. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика ООО «АБ Групп» процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неоплаченного неосновательного обогащения с 06.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытки в размере 5 349 981 руб., с ответчика ООО «ЭНКИ 1» процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неоплаченного неосновательного обогащения с 15.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума ВС РФ №7 по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

С учетом изложенного суд считает требование о взыскании с с ответчика ООО «АБ Групп» процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неоплаченного неосновательного обогащения с 06.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытки в размере 5 349 981 руб., с ответчика ООО «ЭНКИ 1» процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неоплаченного неосновательного обогащения с 15.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков.

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ).

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Возмещение убытков - это мера гражданско-правовой ответственности, поэтому ее применение возможно лишь при наличии условий ответственности, предусмотренных законом. Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт причинения вреда, противоправность поведения виновного лица, причинно-следственную связь между первым и вторым элементом и размер убытков. Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков.

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 25 от 23.06.2015 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Пунктом 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ №7) разъяснено, что по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что ООО СЗ «Разум-Наследие» с целью проверки качества выполненных Подрядчиками и принятых Заказчиком работ по вышеуказанным договорам привлечена экспертная организация, о чем Подрядчики уведомлены письмами от 09.02.2023 исх. № 22/23, исх.№23/23.

В подтверждения факта некачественно выполненных Подрядчиками работ, которые Заказчиком приняты и оплачены, представлено заключение специалиста № 06/01-23 согласно которому на объектах «дом Айвазовский», «дом Менделеев» и «дом Чайковский» выявлены множественные недостатки выполнения ООО «АБ Групп» и ООО «ЭНКИ 1» работ, результат работ не соответствует техническим решениям принятых в рабочих чертежах и представляет опасность для жизни и здоровья людей, стоимость качественно выполненных ООО «АБ Групп» работ на объектах «дом Айвазовский», «дом Менделеев» и «дом Чайковский» составляет 0 руб. 00 коп., стоимость качественно выполненных ООО«ЭНКИ 1» работ на объектах «дом Айвазовский», «дом Менделеев» и «домЧайковский» составляет 0 руб. 00 коп.

Поскольку все принятые Заказчиком от Подрядчиков работы не имеют потребительской ценности ввиду некачественного их выполнения, истец в качестве убытков заявил денежные средства, которыми оплачены данные работы.

Согласно расчету истца размер убытков, причиненных истцу ответчиком ООО «АБ Групп», составляет 5 349 981 руб. 57 коп., размер убытков, причиненных истцу ответчиком ООО «ЭНКИ 1» составляет 17 263 592 руб.

Суд, проверив указанный расчет истца, признает его верным.

Доказательств обратного ответчиками не представлено.

При этом суд неоднократно определениями суда от 30.10.2023, от 28.11.2023 предлагал ответчикам заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью определения причин возникновения и размера убытков.

Однако ответчики таким правом не востпользовались.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования в части взыскания с ООО «АБ Групп» убытков в размере 5 349 981 руб., в части взыскания ООО «ЭНКИ 1» убытков в размере 17 263 592 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истцу при обращении в суд с настоящим исковым заявлением уплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АБ Групп» в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Разум-Наследие»  неосновательное обогащение в размере 1 105 104 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неоплаченного неосновательного обогащения с 06.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытки в размере 5 349 981 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 100 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭНКИ 1» в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Разум-Наследие»  неосновательное обогащение в размере 20 586 564 руб. 50 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неоплаченного неосновательного обогащения с 15.06.2023 до даты фактического исполнения обязательства, убытки в размере 17 263 592 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 170 900 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

 

Судья

А.Э. Измайлова