АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дата принятия решения – 28 сентября 2022 года 

Дата объявления резолютивной части – 21 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Малыгиной Г.Р., 

при составлении протокола судебного заседания и ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Малышевой Д.И.,        

рассмотрев в открытом судебном заседании 21.09.2022 дело № А65-19227/2022

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Экострой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Декор" (ОГРН 

<

***>,                                         ИНН 

<

***>) 

о взыскании 5 016 161,65 руб.,

с участием в заседании:

от истца – представитель ФИО1 по доверенности № 66/22 от 27.06.2022,

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

15.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Экострой" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Декор" (далее – ответчик) о взыскании 5 016 161,65 руб. неустойки по договору подряда № 10/20 от 05.10.2020 к договору генподряда № 4600052687 от 24.07.2020.  

Определением от 22.07.2022 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу, проведение предварительного судебного заседания назначено на 24.08.2022. 

Определением от 24.08.2022 дело назначено к судебному разбирательству на 21.09.2022. 

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание, назначенное на 21.09.2022, не обеспечил, о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом извещен в порядке частей 1, 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Представитель истцовой стороны в судебном заседании 21.09.2022 исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Дело в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ рассмотрено в отсутствие ответчика. 

Оценив доказательства и доводы, приведенные истцовой стороной в обоснование своих требований, суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего. 

Взаимоотношения сторон обусловлены заключенным между ними договором подряда                                    № 10/20 от 05.10.2020 к договору генподряда № 4600052687 от 24.07.2020 (далее – договор). 

Настоящие исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по выполнению работ в установленные договором сроки. К взысканию заявлена неустойка в размере 5 016 161,65 руб., рассчитанная в соответствии с пунктом 6.2.2. договора. Расчет приложен к иску. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1                                    статьи 329 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 6.2.2. договора подрядчик уплачивает генподрядчику, при условии получения проектно-сметной документации, за нарушение сроков выполнения этапов работ, предусмотренных графиком работ – пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости этапа, а если стоимость этапа не определена – пени в размере 0,05% от приблизительной общей стоимости работ, но не более 10% от приблизительной общей стоимости работ.     

Начало работ – 05.10.2020, окончание – 30.06.2021 (пункт 1.2.).  

Виды работ, по объектные и/или поэтапные выполняются в сроки, согласно календарного плана работ (Приложение № 3 к договору) (пункт 1.2.). 

Согласно позиции истцовой стороны сроки выполнения работ по этапам нарушены.

Так, этап работ «Демонтаж. Системы ВК» подлежали выполнению с 17.08.2020 до 07.09.2020 (21 день). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 26.10.2020. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 15.03.2022 за период с 01.04.2021 по 31.05.2021 на сумму                   71 490 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 322 362 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Демонтаж. Системы ВК» составил 69 952,55 руб., рассчитанный за период с 27.10.2020 по 31.05.2021 (322 362,00 х 217 х 0,1%). 

Этап работ «Демонтаж. Системы отопления» подлежали выполнению с 17.08.2020 до 07.09.2020 (21 день). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 26.10.2020. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 25.01.2021 за период с 11.01.2021 по 25.01.2021 на сумму                   126 912 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 177 866 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Демонтаж. Системы отопления» составил 22 606,01 руб., рассчитанный за период с 27.10.2020 по 31.05.2021. 

Этап работ «Общестроительные работы АР1» подлежали выполнению с 14.09.2020 по 07.01.2021 (116 день). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 28.01.2021. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 28.02.2021 за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на сумму                   1 792 604  руб., от 31.03.2021 за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 на сумму 3 771 395 руб., от 15.03.2022 за период с 01.04.2021 по 31.05.2021 на сумму 2 486 195 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 19 439 141,00 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Общестроительные работы АР1»  составил 1 996 039,68 руб., рассчитанный за период с 29.01.2021 по 31.05.2021. 

Этап работ «Водопровод и канализация» подлежали выполнению с 07.09.2020 по 07.11.2020 (62 дня). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 05.12.2020. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 15.03.2022 за период с 01.04.2021 по 31.05.2021 на сумму          499 873 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 8 589 858 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Водопровод и канализация»  составил 1 520 404,87 руб., рассчитанный за период с 06.12.2020 по 31.05.2021. 

Этап работ «Общестроительные работы КЖ-1» подлежали выполнению с 07.09.2020 по 07.11.2020 (62 дня). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 05.12.2020. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 31.03.2021 за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 на сумму          190 200 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 2 331 867 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Общестроительные работы КЖ-1» составил 401 138,26 руб., рассчитанный за период с 06.12.2020 по 31.05.2021. 

Этап работ «Отопление, Теплоснабжение» подлежали выполнению с 07.09.2020 по 01.10.2020 (25 дней). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 30.10.2020. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 28.02.2021 за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на сумму 447 773 руб. и на сумму 676 412 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 4 358 022 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Отопление, Теплоснабжение» составил 824 837,34 руб., рассчитанный за период с 31.10.2020 по 31.05.2021. 

Этап работ «Демонтаж. Общестроительные работы АР1» подлежали выполнению с 17.08.2020 до 07.09.2020 (21 день). Учитывая дату заключения договора (05.10.2020) названные работы надлежало выполнить не позднее 26.10.2020. Работы приняты частично согласно актам по форме №№ КС-2, КС-3 от 25.01.2021 за период с 11.01.2021 по 25.01.2021 на сумму 614 533 руб., от 31.03.2021 за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 на сумму 228 590 руб., от 15.03.2022 за период с 01.04.2021 по 31.05.2021 на сумму 171 731 руб. Этап полностью не завершен, полная его стоимость составляла 1 256 028 руб. 

Размер неустойки за нарушение сроков по этапу работ «Демонтаж. Общестроительные работы АР1»  составил 181 182,94 руб., рассчитанный за период с 27.10.2020 по 31.05.2021. 

Общий размер неустойки составляет 5 016 161,65 руб. 

В силу частей 1, 3 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Ненадлежащее исполнение обязательств подтверждается материалами дела, и ответчиком не оспорено. Доказательства обратным истцовой стороны, отзыв на исковое заявление, ответчиком не представлены. 

Истцовая сторона обоснованно начислила штрафные санкции.

Расчет судом признан арифметически верным, соответствующим условиям договора.  

Ответчиком расчет не оспорен, контррасчет не представлен, о несоразмерности, об уменьшении размера, заявленных к взысканию штрафных санкций, не заявлено. 

Иск подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в порядке части 1                                                                статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 АПК РФ, Арбитражный суд Республики Татарстан,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Декор"                                          (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Экострой" (ОГРН 

<

***>,                               ИНН 

<

***>) неустойку в размере 5 016 161 руб. 65 коп. и расходы по уплате государственную пошлину в размере 48 081 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

Судья                                                                                                   Г.Р. Малыгина