Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

06 апреля 2023 года                                                                          Дело № А56-9213/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: ООО "Спика-Строй"

ответчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 

о взыскании 

Ответчик представил отзыв на иск, в котором ссылается на 1) обоснованность приостановки работ со своей стороны; 2) продолжение работ подрядчиком (истцом).

Суд пришел к следующим выводам.

Истец просит взыскать с ответчика остаток задолженности за выполненные истцом работы, возникший вследствие удержания ответчиком части оплаты в счет начисленной им неустойки за просрочку выполнения работ.

Истец не согласен с удержанием, указывая, что с его стороны не было просрочки, поскольку ответчик трижды выдавал предписания о приостановке работ, причем в итоге признал отсутствие нарушений со стороны подрядчика. 

Суд полагает возражения ответчика противоречивыми и необоснованными, поскольку ответчик одновременно признает факт выдачи предписаний о приостановке работ, считает, что истец обязан был работы приостановить, но при этом начислил неустойку за нарушение срока выполнения работ, который увеличился в результате приостановки истцом работ на оснований предписаний ответчика.

При таких обстоятельствах у ответчика не имелось оснований для начисления неустойки, он должен оплатить подрядчику работы в полном объеме.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "Спика-Строй" (ИНН: 

<

***>) сумму задолженности по основному долгу в размере 323 179,64 руб., пени в размере 2 427,38 руб., рассчитанные за период с 28 сентября 2022 г. по 03 октября 2022 г. от суммы 1 968 874,55 руб., пени в размере 7 836,00 руб., рассчитанные за период с 28 сентября по 23 января 2023 г. от суммы 323 179,64 руб., пени, рассчитанные за период с 24 января 2023 года по день фактического исполнения обязательства от суммы 323 179,64 руб., всего 333 443,02 руб., а также 9 669,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья                                                                                                   Виноградова Л.В.