АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-123449/23-110-1005

г. Москва

01 ноября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 01 ноября 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "ЛИФТЕК - МГРУПП" (143007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ОДИНЦОВО ГОРОД, МОЛОДЕЖНАЯ 

<

...>, ОГРН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР  УПРАВЛЕНИЯ" (105082, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ БАСМАННЫЙ, БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ УЛ., Д. 18/20, СТР. 15, ПОМЕЩ.  10/2, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 1 934 802,74 руб.,  

при участии: от истца –ФИО2 по дов. от 24.08.2022 , от ответчика-Красикова А.Н. по дов. от 12.12.2022, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТЕК - МГРУПП" обратилось  с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ" о  взыскании 1 934 802,74 руб. задолженности по договору № 219/21 от 01.09.2021.  

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные  доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Лифтек-МГрупп» (далее -  Истец) и ООО «ВЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ» (далее – Ответчик) был заключен договор №  219/21 от 01.09.2021г. по выполнению комплекса работ по обслуживанию лифтов и  систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (далее по тексту – ЛДСС) (далее  - Договор).  

Ответчик имеет задолженность перед Истцом по Договору в размере 1 934  802,74 руб.  

 № п/п 

Номер и дата  заключения  

договора 

период 

задолженности  (выполнения  

работ) 

общая стоимость  выполненных  

работ в период  задолженности,  

рублей, 

оплата  

выполненных  работ в  период  

задолженност и, рублей  

сумма задолженности, рублей 

1 

 № 219/21 от  01.09.2021г.  

01.09.2022г.- 31.03.2023г.  

2 079 269,00  

144 466,26 

1 934 802,74  

итого 

1 934 802,74  

Надлежащее выполнение Истцом комплекса работ по Договору на сумму  

заявленного долга подтверждается:  

- Актами о приёмке выполненных работ, подписанные сторонами Договора без  замечаний: № 772 от 30.049.2022г. – 296 829,33 руб., № 859 от 31.10.2022г. – 298 013,77  руб., № 946 от 30.11.2022г. – 296 965,94 руб., № 1044 от 31.12.2022г. – 298 013,77 руб.;  

- Актами о приёмке выполненных работ, подписанный Подрядчиком в  одностороннем порядке: № 62 от 31.01.2023г. – 295 004,93 руб., № 148 от 28.02.2023г. –  296 427,49 руб., № 246 от 31.03.2023г. – 298 013,77 руб.  

Акты о приёмке выполненных работ № 62 от 31.01.2023г. и № 148 от  28.02.2023г. направлены в адрес Ответчика почтовым отправлением 28.02.2023г. (РПО  14300380023549), который получен 15.03.2023г. Ответчиком, согласно данным  Отслеживания отправлений – Почта России  

Акт о приёмке выполненных работ № 246 от 31.03.2023г. направлен в адрес  Ответчика почтовым отправлением 29.03.2023г. (РПО 14300381024651), который  получен 05.04.2023г. Ответчиком, согласно данным Отслеживания отправлений –  Почта России  

В соответствии с п. 4.2 Договора, в случае, если Заказчик до 15-го числа месяца,  следующего за расчетным, не представил Подрядчику подписанный со своей стороны  Акт о приемке выполненных работ и не предъявил в письменном виде обоснованных  претензий к факту и качеству их выполнения, комплекс работ по настоящему Договору  считается выполненным и принятым Заказчиком в полном объеме, и подлежит оплате  на основании одностороннего акта Подрядчика.  

Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ, Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Согласно п. 4. ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его  заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из  сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой  стороной.  

Претензий по качеству выполненных работ, их объему, нарушению срока  выполнения работ Истец от Ответчика не получал.  

Указанные обстоятельства подтверждают выполнение Истцом со своей стороны  обязательств по Договору надлежащим образом и в полном объеме.  

Условиями Договора определен порядок оплаты выполненных работ, который  Ответчиком нарушен.  

Согласно п. 3.4. Договора, оплата ежемесячной стоимости комплекса работ по  настоящему Договору производится Заказчиком до 15 числа месяца, следующего за  расчетным на основании Счета на оплату, составленного Подрядчиком по форме,  указанной в Приложении № 2 к настоящему Договора.  

Согласно п.1 ст. 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику  обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что  работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.  

Согласно п.1 ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в  сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны выполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение  его условий не допускаются.  

Согласно Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1 к  Договору), с 01 сентября 2021г. на техническое и аварийное обслуживание было  передано 103 лифта.  

В адрес Истца от Ответчика поступило Уведомление Исх. № 240 от 28.02.2022г.  об исключении лифтов из Договора на техническое и аварийное обслуживания  согласно списку.  

На основании Уведомления, стороны Договора заключили Дополнительное  соглашение № 1 от 28.02.2022г., согласно которому, на техническом и аварийном  обслуживании осталось 60 лифтов.  

Согласно Расчету задолженности, исковым заявлением период задолженности  определен 01.09.2022г.-31.03.2023г., т.е. в период действия Дополнительное  соглашение № 1 от 28.02.2022г.  

В подтверждение надлежащего выполнения Истцом комплекса работ по  Договору на сумму заявленного долга, в материалы дела представлены Акты о  приёмке выполненных работ, составленные из расчета 60 лифтов: мкр. Клязьма- Старбеево – 51 лифт, кв-л Клязьма – 9 лифтов.  

Между тем, общая стоимость выполненных работ за время действия договора  (01.09.2021г.-31.03.2023г.) – 6 778 085,78 рублей, подтвержденная актами выполненных  работ.  

Общая сумма оплаты выполненных работ, поступивших от Ответчика на счет  Истца по настоящее время – 4 843 283,04 рублей, подтвержденная платежными  поручениями.  

Сумма долга в размере 1 934 802,74 рублей отражена в претензии № 66 от  13.04.2023г., которая Ответчиком получена 26.04.2023г. (РПО 14300382009152).  

 Ранее (26.09.2022г.) Истец обращался с исковым заявлением в Арбитражный  суд города Москвы (Дело № А40-207403/2022-68-1427) о взыскании с Ответчика  суммы долга 1 408 154,28 рублей, образовавшейся в период 01.03.2021г.-31.07.2022г.,  по договору № 219/21 от 01.09.2021г.  

Во время судебного производства дела № А40-207403/2022-68-1427  (26.08.2022г-14.02.2023г.) от Ответчика поступила на расчетный счет Истца сумма 1  513 411,10 рублей, согласно следующим платежным поручениям: № 484 от 13.09.2022,   № 507 от 28.09.2022г., № 549 от 01.11.2022г., № 590 от 08.12.2022г., № 7 от  19.01.2023г., № 47 от 07.02.2023г.  

Руководствуясь ст. 319 Гражданского кодекса Российской Федерации,  поступившие от Ответчика денежные средства в период 26.08.2022г-14.02.2023г.,  Истцом были отнесены к погашению задолженности рассматриваемой в деле № А40207403/2022-68-1427, в связи с чем, Истцом было подано заявление об отказе от  исковых требований по делу № А40-207403/2022-68-1427.  

 Арбитражным судом города Москвы были приняты денежные средства,  поступившие от Ответчика в период 26.08.2022г-14.02.2023г., в качестве погашения  заявленного долга, принято от Истца заявление об отказе от исковых требований, и  вынесено Определение о прекращении производства по делу № А40-207403/2022-681427.  

При составлении искового заявления, рассматриваемого в настоящем деле,  руководствуясь ст. 319 Гражданского кодекса Российской Федерации, денежные  средства, поступившие от Ответчика согласно платежному поручению № 157 от  17.03.2023г., Истцом приняты в качестве погашения задолженности в части за август  2022г. и в части (144 466,26 рублей) за сентябрь 2022г.  

С самого начала действия договора, Ответчиком нарушается срок оплаты  выполненных работ, а начиная с марта 2022г., платежи не соответствуют сумме  выполненных работ, следовательно, задолженность имеет продолжительный  накопительный характер, переходящий из периода в последующий период  

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР  УПРАВЛЕНИЯ" (ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ЛИФТЕК - МГРУПП" (ОГРН: 

<

***>) 1 934 802 руб. 74  коп. задолженности, 32 348 руб. в возмещение расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: А.В. Мищенко