АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 28 октября 2020 года Дело № А49-8091/2019  

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н.Холькиной,  руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства г. Пензы» удовлетворить частично,  расходы по оплате государственной пошлины и за проведение судебной  экспертизы отнести на ответчика.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер»,  в месячный срок с момента вступления в законную силу настоящего решения  арбитражного суда, устранить недостатки, установленные в гарантийный срок  в рамках исполнения муниципального контракта от 13.06.2017 №  0355300047917000013.2017.215057 на выполнение полного комплекса работ  по объекту: «Строительство школы в мкр. Шуист, г. Пенза» (под ключ), а  именно: обеспечить работоспособность системы вентиляции в пищеблоке,  тренажерном зале, кабинете психолога.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй- Партнер» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства г. Пензы» штраф в сумме 250 000 руб. 00 коп.  

В случае неисполнения в месячный срок с момента вступления в силу  настоящего решения суда, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Строй-Партнер» в пользу муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства г. Пензы» компенсацию  в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения  настоящего решения до дня его фактического исполнения.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй- Партнер» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  14 000 руб. 00 коп.  

Бухгалтерии Арбитражного суда Пензенской области перечислить с  депозитного счета Арбитражного суда Пензенской области автономной  некоммерческой организации «Приволжский экспертно-консультационный  центр» (440039, 

<

...>) денежные средства в сумме 80 000  рублей.  

Решение Арбитражного суда Пензенской области может быть  обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Пензенской области.  

 Судья М.Н. Холькина