Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-13464/2018

08 ноября 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 08 ноября 2018 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Намятовой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Югорская строительная корпорация»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>. Д. 36Б, офис 1006) к Окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) о взыскании 4 301 180 рублей 64 копеек,

с участием представителей сторон:

от истца – не явились,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 16.04.2018,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Югорская строительная корпорация» (далее – истец, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище» (далее – ответчик, заказчик) о взыскании 4 000 410 рублей 08 копеек задолженности по договору от 18.10.2016 № 8000/С/ХМ/ХР, 300 770 рублей 56 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 4 301 180 рублей 64 копеек.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение договорных обязательств ответчиком. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2018 судебное заседание по делу назначено на 30.10.2018 в 12 часов 00 минут (л.д. 113, 114).

Истец, извещённый о времени и месте судебного заседания, не явился (л.д. 111, 112). 

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителя истца.

В ходе судебного заседания представитель ответчика исковые требования не признал по доводам отзыва на иск. В отзыве на исковое заявление ответчик сообщил, что задолженность погашена путем зачета встречных требований (л.д. 118-121).

В судебном заседании объявлен перерыв до 15 часов 00 минут 06.11.2018. После окончания перерыва судебное заседание объявлено продолженным с участием представителя ответчика.

Суд, заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, иск заявлен со ссылкой на договор от 18.10.2016 № 8000/С/ХМ/ХР (далее – договор, л.д. 23-51) и ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя обязательств по договору в части оплаты выполненных работ.

В соответствии с пунктом 2.1 договора подрядчик по поручению заказчика обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами работы по строительству объекта: «Жилая группа в квартале Центральный на пересечении улиц Чапаева и 60 лет Октября г. Нижневартовск. Жилой дом № 5, подземный паркинг № 5А-1 этап строительства».

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 3 договора.

Цена договора, порядок оплаты определены сторонами в разделе 4 договора.

Срок действия договора установлен сторонами в разделе 20 договора.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Учитывая, что между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям указанного договора, договор является заключённым. По своей правовой природе к указанному договору применяются нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условия заключённого договора.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 746 названного Кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Как следует из содержания пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Таким образом, основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (часть 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания в условиях состязательного процесса охватывает все виды действий, которые необходимо предпринять стороне для подтверждения истинности его утверждений и опровержения заявлений противоположной стороны.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В материалы дела представлены подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, свидетельствующие о выполнении истцом принятых на себя обязательств по договору, на оплату выставлены счета-фактуры (л.д. 52-88).

По данным истца остаток задолженности по оплате выполненных работ составляет 4 000 410 рублей 08 копеек.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что задолженность по оплате выполненных работ в сумме 4 000 410 рублей 08 копеек погашена путем зачета встречных однородных требований в рамках соглашения о порядке и сроках оплаты услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению от 29.03.2017 № 3648/1-0 (л.д. 125-130).

В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

При этом волеизъявление стороны должно быть ясно выражено и закреплено в форме, соответствующей требованиям, предъявляемым к сделке (статьи 153 - 156, 158 и 160 Гражданского кодекса Российской Федерации). Зачет по умолчанию гражданским законодательством не допускается. Зачет встречного однородного требования представляет собой действия контрагентов, направленные на погашение взаимной задолженности. Подобные действия в силу статьи 153 Кодекса надлежит квалифицировать в качестве самостоятельной сделки, влекущей прекращение обязанностей.

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обязательства сторон прекращаются взаимозачетом только в том случае, если сторона, которой было направлено заявление о зачёте, получила соответствующее заявление (пункт 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований»).

Соответственно, датой зачёта является дата получения заявления.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, уведомление о зачёте, направленное письмом от 26.06.2017 исх. № 11853 в адрес истца, получено адресатом 10.07.2017 (л.д. 129). Факт направления уведомления  о зачете  взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ от 30.05.2017 подтверждено письмом  от 05.07.2017 исх. № 17-573 (л.д. 129- 131). 

С настоящим иском истец обратился в суд через систему «Мой арбитр». Документы поступили в суд 29.08.2018, что подтверждается информацией о документе, то есть после получения адресатом заявления о зачёте.

Письмом от 05.07.2017 исх. № 17-573 истец выразил несогласие с проведением зачета. Указал, что соглашение о порядке и сроках оплаты услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению от 29.03.2017 не является основанием для возникновения обязательств у истца, поскольку является незаключенным. Сообщил, что направил исковое заявление в суд к Окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище» о признании соглашения о порядке и сроках оплаты услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению от 29.03.2017 № 3648/1-0 незаключенным. Делу присвоен номер А75-8115/2017.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.09.2017 по делу № А75-8115/2017 в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Югорская строительная корпорация» о признании недействительным соглашения о порядке и сроках оплаты услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению от 29.03.2017 № 3648/1-0 отказано. 

Письмом от 29.03.2017 исх. № 17-463 истец гарантировал ответчику оплату затрат по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению объектов (л.д. 124).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что между сторонами достигнуто соглашение о погашении встречных требований по конкретным обязательствам. Согласно вышеуказанному уведомлению о зачете взаимных требований задолженность ответчика по оплате работ в сумме 4 000 410 рублей 08 копеек зачтена в счет исполнения истцом обязательств перед ответчиком по возмещению коммунальных услуг в рамках названного договора на указанную сумму.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о прекращении обязательства ответчика перед истцом путем произведенного взаимозачета на сумму 4 000 410 рублей 08 копеек, в связи с чем, отказывает в удовлетворении требования истца о взыскании задолженности за выполненные работы. Доводы истца признаются судом необоснованными, опровергнутыми, возражения ответчика доказанными.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 300 770 рублей 56 копеек за период с 15.08.2017 по 31.07.2018 согласно расчету, приведенному в исковом заявлении (л.д. 7-12).

Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются мерой гражданско-правовой ответственности, которая наступает вследствие ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства.

Учитывая дату произведенного взаимозачета, период взыскания процентов, суд не усматривает правовых оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с отсутствием просрочки в оплате.

Таким образом, исковые требования в данной части также не подлежат удовлетворению.

Определением арбитражного суда от 06.09.2018 было удовлетворено ходатайство истца об отсрочке уплаты государственной пошлины на срок до окончания рассмотрения дела.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся судом на истца, подлежат взысканию в федеральный бюджет.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Югорская строительная корпорация» отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югорская строительная корпорация» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 44 506 рублей.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                А.Р. Намятова