20/2017-54511(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5683/2017

г. Петропавловск-Камчатский

12 декабря 2017 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Краевой  

инжиниринговый центр» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) 

к Отделу по управлению муниципальным имуществом  

администрации Вилючинского городского округа  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о внесении изменений в муниципальный контракт от 12.05.2015 № 03-15ОК на  выполнение проектно-изыскательских работ;  

при участии: от истца: не явились; 

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от   06.06.2017 (сроком по 31.12.2017),  

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27, 28, 101, 110, 167–171, 176  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

иск удовлетворить. 

Изменить муниципальный контракт от 12.05.2015 № 03-15ОК на  выполнение проектно-изыскательских работ, заключенный между Управлением  имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа и  обществом с ограниченной ответственностью «Краевой инжиниринговый центр»:  

- в пункте 6.1 муниципального контракта слова «Окончание работ  (исполнения обязательств): 30.11.2015» заменить словами «Окончание работ  (исполнения обязательств): 01.10.2018»;  

- в пункте 2.14 Приложения № 1 к муниципальному контракту слова «…не  позднее 10.09.2015» заменить словами «…не позднее 01.08.2018»;  

- в пункте 4 Приложения № 2 к муниципальному контракту (в редакции  дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2015) слова «…не позднее 31.05.2016»  заменить словами «…не позднее 01.10.2018»;  

- в пункте 5 приложения № 2 к муниципальному контракту (в редакции  дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2015) слова «…не позднее 31.05.2016»  заменить словами «…не позднее 01.10.2018».  

Взыскать с Отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации Вилючинского городского округа в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Краевой инжиниринговый центр» расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.И. Решетько