1057/2023-202123(2) 

 Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-8895/2023

г. Хабаровск

13 октября 2023 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 10 октября 2023 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания И.А. Лунау,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «Энергоактив» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680018, 

<

...>)  

к администрации Кульдурского городского поселения Облученского  муниципального района Еврейской автономной области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 679132, 

<

...>)  

о взыскании 150 000 руб., 

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1 представитель по доверенности от 18.09.2023  (диплом УВ № 630329, рег. № 3232 от 22.07.1996),  

от ответчика – не явился, 

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Энергоактив» (далее – истец, ООО «УК «Энергоактив») обратилось в  арбитражный суд с иском к администрации Кульдурского городского  поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной  области (далее – ответчик, Администрация МО «Кульдурское городское  

поселение») о взыскании задолженности по муниципальному контракту № 200- АТС/2021 от 13.08.2021 на выполнение актуализации схемы теплоснабжения в  размере 150 000 руб.  

Определением суда от 15.06.2023 исковое заявление принято, возбуждено  производство по делу № А73-8895/2023.  

Определением от 21.09.2023 судебное разбирательство отложено на  10.10.2023 в 11 часов 30 минут.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте  судебного разбирательства по правилам статей 121, 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том  числе путём опубликования сведений на официальном сайте Арбитражного  суда Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», в судебное заседание не явился, явку своего представителя не  обеспечил.  

Ответчиком в установленный судом срок отзыв на иск не представлен. 

В порядке частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном  заседании в отсутствие не явившегося ответчика по имеющимся в материалах  дела доказательствам.  

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые  требования в полном объеме, в обоснование привел доводы, изложенные в  исковом заявлении.  

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд  установил следующие обстоятельства.  

Между Администрацией МО «Кульдурское городское поселение»  (Заказчик) и ООО «УК «Энергоактив» (Подрядчик) заключен муниципальный  контракт № 200-АТС/2021 от 13.08.2021 на выполнение работ по актуализации  схемы телоснабжения (далее – контракт).  

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Заказчик поручает, а Подрядчик  обязуется выполнить работы по актуализации ранее утвержденных схем  теплоснабжения Кульдурского городского поселения (далее – работы), по цене  и в сроки, установленные в контракте, а Заказчик обязуется своевременно  принять и оплатить данные работы.  

Работы выполняются Подрядчиком на основании данных,  представленных Заказчиком (пункт 1.2 контракта).  

Согласно пункту 1.3 контракта по окончанию выполнения работ  Подрядчик предоставляет Заказчику Проект схемы теплоснабжения объекта,  указанного в п. 1.1 настоящего контракта, содержащий в себе  актуализированные данные, в количестве 2 экземпляров с приложением диска с  электронной версией данной схемы теплоснабжения.  

Общая сумма контракта включает в себя все расходы Подрядчика на  выполнение работ и составляет 150 000 рублей. НДС не облагается в связи с  применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (пункт 2.1  контракта).  

В соответствии с пунктом 2.3 контракта оплата выполненных работ  производится Заказчиком в рублях путем безналичного перечисления  денежных средств на расчетный счет подрядчика в срок до 15.07.2022 на  основании счета, выставленного Подрядчиком и подписанного Заказчиком акта  о приемке выполненных работ. Счет на оплату работ и акт о приемке  выполненных работ направляются Заказчику посредством факсимильной связи,  либо в сканированном виде на электронную почту Заказчика и посредством  услуг почтовой связи (заказным письмом с уведомлением) по реквизитам,  указанным в разделе 10 контракта.  

Выполнение подрядчиком работ по настоящему контракту  осуществляется в срок до 30.06.2022. Все работы могут быть выполнены  Подрядчиком досрочно (пункт 4.1 контракта).  

Согласно пункту 4.3 контракта передача и приемка выполненных работ  производится сторонами по акту выполненных работ, направленного  Подрядчиком в адрес Заказчика. Направление Подрядчиком акта выполненных  работ в адрес Заказчика производится посредством факсимильной связи и  электронной почты с обязательным направлением оригинала данного акта  посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением) либо  нарочно, при этом стороны согласовали, что согласованный с обеих сторон акт  выполненных работ, направленный посредством факсимильной связи или  электронной почты, считается оформленным надлежащим образом и имеет  юридическую силу.  

Срок согласования и подписания Заказчиком акта выполненных работ с  последующим его направлением в адрес Подрядчика составляет 10 рабочих  дней с момента его получения. В случае уклонения и немотивированного  отказа Заказчика от принятия работ и подписания акта выполненных работ в  течение 10 дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных  работ, данный акт выполненных работ считается согласованным и  подписанным, а работы принятыми Заказчиком без замечаний (пункт 4.4  контракта).  

Как следует из материалов дела, предусмотренные контрактом работы  подрядчиком (истцом по делу) выполнены, результат работ передан заказчику,  принят без замечаний, что подтверждается подписанным сторонами актом №  005/УК приемки выполненных работ от 30.06.2022.  

В установленный контрактом срок Администрация МО «Кульдурское  городское поселение» обязательство по оплате выполненных работ не  исполнила, в связи с чем, образовалась задолженность в размере 150 000 руб.  

Письмом от 12.01.2023 исх. № 1, направленным в адрес заказчика  13.01.2023 (почтовый идентификатор 68001871029606), ООО «УК  «Энергоактив» просило произвести оплату выполненных по контракту работ в  размере 150 000 руб. в течение 10-ти дней с момента получения настоящего  уведомления.  

Претензия истца осталась без ответа и удовлетворения, задолженность в  добровольном порядке ответчиком не погашена, что послужило основанием  для обращения ООО «УК «Энергоактив» в Арбитражный суд Хабаровского  края с настоящим исковым заявлением в соответствии с условием пункта 8.4  контракта о подсудности споров.  

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71  АПК РФ, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим  основаниям.  

Правоотношения сторон по муниципальному контракту № 200-АТС/2021  от 13.08.2021 регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями  гражданского законодательства об исполнении обязательств надлежащим  образом.  

Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы  (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных  нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального  контракта на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее –  государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется  выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и  ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера  работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять  выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи  763 ГК РФ).  

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных  и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по  

заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить  изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 ГК РФ к обязанностям подрядчика  относится выполнение работы в соответствии с заданием и иными исходными  данными на проектирование и договором; согласование готовой технической  документации с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с  компетентными государственными органами и органами местного  самоуправления; передача заказчику готовой технической документации и  результатов изыскательских работ.  

Статьей 762 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда на  выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не  предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену  полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после  завершения отдельных этапов работ.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения  споров по договору строительного подряда»).  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком  и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими  сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается  отметка об этом и акт подписывается другой стороной.  

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за  исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).  

Истцом представлены в материалы дела надлежащие доказательства  выполнения работ по муниципальному контракту № 24-АТС/2021 от 10.09.2021  и передачи результата работ ответчику.  

Факт приемки Заказчиком выполненных работ по муниципальному  контракту № 200-АТС/2021 от 13.08.2021 подтверждается актом приемки  выполненных работ № 005/УК от 30.06.2022.  

Задолженность Администрации МО «Кульдурское городское поселение»  перед ООО «УК «Энергоактив» по оплате выполненных работ по контракту  составляет 150 000 руб.  

Доказательств оплаты долга в указанном размере ответчик не представил,  возражения на иск не заявил, обстоятельства, изложенные в иске, не оспорил и  не опроверг.  

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются  признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие  с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,  обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

При таких обстоятельствах, исковое требование ООО «УК «Энергоактив»  о взыскании с Администрации МО «Кульдурское городское поселение»  задолженности по муниципальному контракту № 200-АТС/2021 от 13.08.2021  на выполнение актуализации схемы теплоснабжения в размере 150 000 руб.  подлежит удовлетворению.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на  ответчика в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, учитывая, что истцом  уплачена государственная пошлина в размере 5 500 руб. (платежное поручение   № 26 от 06.04.2023).  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации Кульдурского городского поселения  Облученского муниципального района Еврейской автономной области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «Энергоактив» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по муниципальному  контракту от 31.08.2021 № 200 – АТС/2021 в размере 150 000 руб., а также  расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 500 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если  оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья С.М. Курносова