Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Краснодар Дело № А32-10036/2023 22.08.2023г. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Чурикова В.С., рассмотрев в  упрощенном порядке дело по исковому заявлению НКО «Фонд капитального ремонта  МКД» г. Краснодар (ИНН: 2311981102) к ООО «ТСК Форт», г. Тюмень (ИНН:  7203432030) о взыскании неустойки по договору № РТС223А210033 от 22.03.2021 в  размере 193 662,12 руб.  

установил:

НКО «Фонд капитального ремонта МКД» г. Краснодар (ИНН: 2311981102)  обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «ТСК Форт», г. Тюмень  (ИНН: 7203432030) о взыскании неустойки по договору № РТС223А210033 от 22.03.2021  в размере 193 662,12 руб.  

Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев дело в порядке упрощенного  производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, 17 июля 2023г. принял решение путем подписания резолютивной  части решения, согласно которой удовлетворены исковые требования истца.  

Определением Арбитражного суда от 21.08.2023 суд рассмотрел вопрос об  исправлении ошибки (опечатки) в судебном акте.  

15.08.2023 в материалы дела поступила апелляционная жалоба. 

Таким образом, Арбитражный суд Краснодарского края приходит к выводу, что в  целях проверки законности и обоснованности судебного акта принятого по делу № А3210036/2023, необходимо изготовить мотивированное решение по настоящему делу.  

Лица, участвующие в деле, о возбуждении производства по настоящему делу и рассмотрении его в порядке упрощенного производства уведомлены в соответствии с  требованиями статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, пункта 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными  судами дел в порядке упрощенного производства».  

Суд не усматривает оснований, которые бы воспрепятствовали, исходя из  характера спора, рассмотреть его в порядке упрощенного производства по правилам главы  29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При этом суд исходит из того, что рассмотрения дела в порядке упрощенного  производства препятствий для реализации ответчиком гарантированных Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации процессуальных прав не создает.  

Как следует из материалов дела, между некоммерческой унитарной организацией  «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее -  Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная  компания «Форт»» ИНН 

<

***> (далее - Подрядчик) заключен договор №  РТС223А210033 от 22.03.2021 (далее - Договор) на оказание услуг (или) выполнение  работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной  документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов в Новокубанский район.  

В соответствии с п. 4.1 Договора Подрядчик обязуется оказать услуги/выполнить  работы по настоящего Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам)  здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам  (системам) здания в соответствии с Графиком выполнения работ. Никакие задержки и  нарушения в выполнении работ/оказании услуг не могут служить основанием для  требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев,  специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренные п. 223  Положение, утв. ПП РФ № 615, нормами действующего законодательства РФ.  

Согласно п. 4.2 Договора срок оказания услуг/ выполнения работ по .Договору до  180 календарных дней со дня открытия объекта и определяется Графиком производства  работ, из которых: обследование, проектирование, проверка достоверности определения  сметной стоимости - 90 календарных дней; проведение строительно-монтажных работ - 90  календарных дней.  

Срок окончания работ по 1 этапу (ПИР) с учетом дополнительного соглашения23.06.2021.  

Срок окончания работ по 2 этапу (СМР) с учетом дополнительного соглашения27.11.2021.  

Однако, в установленный договором срок работы по капитальному ремонту общего  имущества многоквартирных домов Подрядчиком не выполнены.  

По 1 этапу (ПИР): Работы по разработке проектно-сметной документации и  получению положительного заключения проверки на достоверность определения сметной  стоимости по адресу: 

<

...> выполнены 08.07.2021 и  приняты Заказчиком согласно комиссионным актам от 22.07.2021.  

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению  положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости  по адресу: 

<

...> выполнены 09.07.2021 и приняты  Заказчиком согласно комиссионным актам от 22.07.2021.  

Работы по разработке проектно-сметной документации и получению  положительного заключения проверки на достоверность определения сметной стоимости  по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> выполнены 27.08.2021 и приняты Заказчиком  согласно комиссионным актам от 27.08.2021.  

По 2 этапу (СМР): Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной  системы электроснабжения в многоквартирных домах по адресам: 

<

...>; 

<

...> выполнены  17.11.2021 и приняты Заказчиком согласно комиссионным актам от 20.12.2021.  

Работы по капитальному ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов по  адресам: 

<

...>  

<

...> выполнены 08.12.2021 и приняты Заказчиком  согласно комиссионным актам от 22.03.2022, 25.03.2022, 19.04.2022, соответственно.  

Работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов по адресам:  

<

...>  выполнены 12.01.2022 и приняты Заказчиком согласно комиссионным актам от  25.03.2022, 06.04.2022.  

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по  договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и  договором.  

По расчету истца, сумма неустойки за просрочку исполнения обязательства  составляет 193 662, 12 руб.  

В целях досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика  направлена претензия с требованием погасить существующую задолженность, однако  

претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что послужило основанием  для обращения истца в суд с настоящими требованиями.  

Суд, принимая решение по делу, руководствовался следующим.  

Уклонение ответчика от исполнения требований изложенных в претензии,  послужило основанием для обращения в суд.  

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик в отзыве на иск  пояснил, что заявленная истцом неустойка явно завышена, в этой связи заявил  ходатайство о применении положений статьи 333 ГК РФ.  

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,  суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению на основании  следующего.  

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Кодекс) и постановлением  Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения  подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок  товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой  организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».  

В соответствии со ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

По правилам ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный  сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть  предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного,  так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно п. 4.2 Договора срок оказания услуг/ выполнения работ по .Договору до  180 календарных дней со дня открытия объекта и определяется Графиком производства  работ, из которых: обследование, проектирование, проверка достоверности определения  сметной стоимости - 90 календарных дней; проведение строительно-монтажных работ - 90  календарных дней.  

Срок окончания работ по 1 этапу (ПИР) с учетом дополнительного соглашения23.06.2021.  

Срок окончания работ по 2 этапу (СМР) с учетом дополнительного соглашения27.11.2021.  

Однако, в установленный договором срок работы по капитальному ремонту общего  имущества многоквартирных домов Подрядчиком не выполнены.  

Вместе с тем работы, предусмотренные Договорами работы выполнены  Подрядчиком с нарушением установленных Договорами сроков выполнения работ, что  подтверждается актами приемки выполненных работ.  

Однако, судом установлено следующее. 

Согласно, п. 16.1. Договора стороны освобождаются от ответственности за  частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору. Если оно  являлось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных  и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и подтверждены  документами компетентных органов.  

Как указывает ответчик, общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная компания «Форт» не выполнило в установленный договором срок по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Новокубанском  районе в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде осадков, что  подтверждается ответами на запрос от 09.03.2022 г. (исх. № 257) из Краснодарского ЦГМС.  

С учетом дней с неблагоприятными погодными условиями в виде осадков срок  окончания работ по 2 этапу (СМР) по Договору подряда № РТС223А210033 от 22.03.2021  года- 14.12.2021 года.  

22.03.2022 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная.  компания «Форт» было направлено в адрес Некоммерческой унитарной организации  «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  предложение о продлении срока действия Договора подряда № РТС223А210033 от  22.03.2021 года в связи с неблагоприятными условиями в период с 01.10.2021 г. по  12.01.2022 г.  

Таким образом, основания для взыскания неустойки по 2 этапу (СМР) по Договору  подряда № РТС223А210033 от 22.03.2021 года на выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Краснодарский край,  Новокубанский район, Новокубанск г., ФИО1 ул., 13 д.; Краснодарский край,  Новокубанский район, Новокубанск г., Цветочный пер., 5 д.; Краснодарский край,  Новокубанский район, Новокубанск г., Красноармейская ул., 3 д. отсутствуют.  

В статье 309 ГК РФ закреплено, что обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом, другими законами или  иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Судом установлено и сторонами не оспаривается, что в установленный договором  срок обязательства по договору в обусловленные сроки подрядчиком не выполнены.  

Как следует из положений статьи 12 Гражданского ГК РФ, неустойка является  одним из способов защиты нарушенного права. В соответствии с положениями пункта 1  статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе  неустойкой, предусмотренной законом или договором. Согласно статье 330 ГК РФ  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Поскольку факт просрочки выполнения работ по договору подтверждается  представленными в материалы дела доказательствами, постольку основания для  начисления неустойки у истца имелись.  

В соответствии с п. 11.3 Договора, за невыполнение или ненадлежащее исполнение  Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объектах в соответствии с  Графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в случае  задержки Подрядчиком срока исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  Договором (начала и/или завершения работ по Объекту(-ам) в соответствии с Графиком  выполнения Работ (начальный и конечный сроки выполнения Работ) Подрядчик обязан  уплатить Заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на  день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации от стоимости работ, сроки по которому нарушены, которая начисляется за  каждый день просрочки исполнения - обязательства, предусмотренного настоящим  Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором  срока исполнения Обязательства, включая срок исполнения.  

Суд, проверив произведенный истцом расчет задолженности, признал его  арифметически и методологически неверным.  

Судом самостоятельно произведен расчет неустойки, с учетом исключения периода,  согласно которому сумма неустойки составляет 152 179,92 руб.  

Однако, ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции заявлено  ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ, а также  произведен контррасчет неустойки. Суд соглашается с произведенным расчетом  ответчика.  

Нормами статьи 333 Гражданского кодекса установлено, что если подлежащая  уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе  уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии  заявления должника о таком уменьшении.  

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда  Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причинённого в результате конкретного правонарушения.  

По существу, речь идет о реализации требования статьи 17 (часть 3) Конституции  Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и  гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 69 Постановлении Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, установленная законом или  договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства,  может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса).  

С учётом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский  кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет  адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Критериями для установления  несоразмерности подлежащего уплате штрафа последствиям нарушения обязательства в  каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки,  значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных  нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие  обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учётом  конкретных обстоятельств дела.  

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и  противоречит ее компенсационной функции (Постановление Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 № 5467/14).  

Согласно пункту 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее –  постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16) в случаях, когда будет доказано, что  сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от  диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим  правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий  допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей  права полностью или частично либо применяет иные меры, предусмотренные законом  (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса).  

Предоставление возможности двум сторонам договора извлекать в отношении друг  друга неосновательное обогащение не является правом охраняемым законом и  подлежащим защите в соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме  того, указанное не влечет соблюдение равенства прав и баланса интересов, поскольку  

предоставляет возможность либо одной, либо другой стороне, либо двум сторонам в  разной степени обогащаться за счет друг друга, что противоречит принципам  гражданского права.  

Пунктом 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 14.03.2014 № 16 разъяснено, что при рассмотрении споров о защите от  несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия в  совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела.  

Так, в частности, суд определяет фактическое соотношение переговорных  возможностей сторон и выясняет, было ли присоединение к предложенным условиям  вынужденным, а также учитывает уровень профессионализма сторон в соответствующей  сфере, конкуренцию на соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны  реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с третьими  лицами на иных условиях и т.д.  

Исходя из пунктов 9, 10 постановления № 16, поскольку согласно пункту 4 статьи 1  Гражданского кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего  недобросовестного поведения, суд, установив, что имеет место слабая сторона договора,  вправе применить положения статьи 10 Гражданского кодекса о недопустимости  применения несправедливых договорных условий.  

При таких обстоятельствах, учитывая, что размер 1/130 действующей на день  уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от стоимости работ, сроки по которому нарушены является высоким, доказательств  наличия непосредственных убытков истца в заявленной сумме не представлено, суд  приходит к выводу о наличии оснований для снижения неустойки до 1/300.  

Из содержания пункта 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996   № 6/8 следует, что при решении вопроса об уменьшении неустойки (статья 333  Гражданского кодекса) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть  уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий  судом могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого  отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма  договора и т.п.).  

При этом, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации в Информационном письме от 14.07.1997 № 17, в качестве критериев для  установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств  указывают чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы  неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства,  длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.  

Исходя из позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в  Определении от 21.12.2000 № 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер  неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения  обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые  направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки  то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции  Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и  гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Именно поэтому в статье 333 Гражданского кодекса речь идет не о праве суда, а, по  существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой  ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба,  причиненного в результате конкретного правонарушения.  

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333  

Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при обращении в суд с  требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или  соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору  соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330  Гражданского кодекса).  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 поименованного постановления,  при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика  на основании статьи 333 Гражданского кодекса судам следует исходить из того, что  неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства  позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами.  

Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного  поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника,  чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота  правомерно (например, по кредитным договорам).  

В каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с  учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.  

Одновременно при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из  своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса).  

Кроме того, снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному  освобождению должника от ответственности за просрочку исполнения обязательства, так  как она представляет собой меру ответственности за нарушение исполнения обязательств,  носит воспитательный и карательный характер для одной стороны и одновременно,  компенсационный, то есть является средством возмещения потерь, вызванных  нарушением обязательств, для другой стороны, и не может являться способом обогащения  одной из сторон.  

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается  выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соразмерна  нарушенным интересам.  

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности  неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер  убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки . Кредитор для опровержения такого заявления  вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям  нарушения обязательства.  

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан  доказывать возникновение у него убытков, но вправе представлять доказательства того,  какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора,  действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например,  указать на изменение средних показателей по рынку.  

В этой связи суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, размер неустойки,  существенное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных  нарушением обязательств, отсутствие доказательств наступления негативных последствий  для истца в связи с ненадлежащем исполнением ответчиком обязательств, пришел к  выводу о явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушенного  ответчиком обязательства, и в этой связи считает необходимым снизить неустойку по  договору до 48 688,35 руб. из расчета 1/300 от суммы просроченного обязательства за  каждый день просрочки.  

Суд отмечает, что с учетом обстоятельств настоящего дела дальнейшее снижение  размера неустойки противоречит принципам гражданского законодательства, в  соответствии с которыми каждое обязательство должно исполняться надлежащим  образом, а в случае неисполнения обязательства соответствующая сторона должна нести  установленную законом или договором ответственность. Ответчик не представил  доказательств несоразмерности неустойки, присужденной судом. Таким образом, размер  определенной судом к взысканию неустойки соразмерен нарушенному обязательству и не  превышает размер возможных убытков, вызванных нарушением обязательства.  

Таким образом, приведенные и другие собранные по делу доказательства,  обосновывающие наличие или отсутствие имеющих значение для дела обстоятельств,  исследованные и оцененные арбитражным судом в своей совокупности в соответствии со  статьей 71 АПК РФ, принимая во внимание конкретные и фактические обстоятельства  дела, достаточны для вывода об удовлетворении заявленных требований частично.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят  судебный акт, взыскиваются судом со стороны.  

В силу пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации» при распределении между сторонами  судебных издержек снижение размера неустойки судом во внимание не принимается.  

Если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи  333 Гражданского кодекса на основании заявления ответчика, расходы истца по  государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и  подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы  взысканию без учета ее снижения.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 41, 110, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ – удовлетворить. 

Взыскать с ООО «ТСК Форт», г. Тюмень (ИНН: 

<

***>) в пользу НКО «Фонд  капитального ремонта МКД» г. Краснодар (ИНН: 

<

***>) неустойку в размере  48 688,35 руб., государственную пошлину в размере 5 351 руб.  

В остальной части требований – отказать. 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного  производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в  законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана  апелляционная жалоба.  

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение  вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной  жалобы.  

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в  порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в  случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия  решения в полном объеме.  

Судья В.С. Чуриков