АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-258814/18-14-1968

г. Москва

02 ноября 2023 года

Резолютивная часть объявлена 16 октября 2023 г. Дата изготовления решения в полном объеме 02 ноября 2023 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  ФИО1, без использования средств аудиозаписи  

рассмотрел дело по исковому заявлению ФКУ "ДЕЗЗ" МИНЗДРАВА РОССИИ  (ОГРН 

<

***>)  

к ответчику ООО "ГК ХОССЕР" (ОГРН 

<

***>)  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора: Временного управляющего ООО "ГК ХОССЕР"  ФИО2 (ИНН 

<

***>, адрес: 191028, Санкт-Петербург, а/я 59)  

об обязании ООО "ГК ХОССЕР" исполнить в разумные сроки обязанность по  возврату ранее переданной исполнительной документации по объекту,  указанную в приложении 3 к акту приемки-передачи объекта от 30.05.2018г.  

в судебное заседание не явились: от истца, от ответчика, от третьего лица – извещены; 

УСТАНОВИЛ:

ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России обратилось в Арбитражный суд  города Москвы с исковым заявлением к ООО «ГК Хоссер» об обязании ООО  "ГК ХОССЕР" исполнить в разумные сроки обязанность по возврату ранее  переданной исполнительной документации по объекту, указанную в приложении  3 к акту приемки-передачи объекта от 30.05.2018 г. (с учетом уточнения  заявленных требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ).  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 мая 2019 г. по делу   № А40-258814/18-14-1968 привлечен временный управляющий ООО "ГК  

ХОССЕР" Бакаминов Д. Э. (ИНН 100122816590, адрес: 191028, Санкт- Петербург, а/я 59) к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2019 г. по  делу № А40-258814/18-14-1968 производство по делу № А40-258814/18-14-1968  приостановлено до рассмотрения по существу и вступления в законную силу  судебного акта по делу № А40- 120935/17-3-1179.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2020 г. по  делу № А40-258814/18-14-1968 производство по делу № А40-258814/18-14-1968  было возобновлено.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2020 г. по  делу № А40-258814/18-14-1968 производство по делу № А40-258814/18-14-1968  приостановлено до рассмотрения по существу и вступления в законную силу  судебного акта по делу № А40- 112174/17-105-864.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 августа 2023 г. по  делу № А40-258814/18-14-1968 производство по делу № А40-258814/18-14-1968  было возобновлено.  

Истец, ответчик и третье лицо, извещённые надлежащим образом в порядке  ст. 123 АПК РФ, своих представителей в заседание суда первой инстанции не  направили.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд  приходит к следующему.  

Как установлено судом и следует из материалов дела, по результатам  запроса предложений на основании итогового протокола от 09.03.2017 № ЗП2- 01/17 (идентификационный код закупки171770911581577090100100010014120414) между ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава  России (далее - Заказчик) и ООО «ГК Хоссер» (далее - Генподрядчик) заключен  государственный контракт от 23.03.2017 № W0947-01/17 (далее - Контракт) по  завершению комплекса работ (далее - Работы) по строительству и вводу в  эксплуатацию объекта: Федеральный центр цереброваскулярной патологии и  инсульта государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  профессионального образования «Российский национальный исследовательский  медицинский университет имени Ч.И. Пирогова» Министерства  здравоохранения Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>.  

Согласно актам сдачи-приемки по Контракту Генподрядчик выполнил весь  объем Работ и Комитетом государственного строительного надзора города  Москвы от 29.05.2018 № 77-171000-008385-2018 выдано разрешение на ввод  Объекта в эксплуатацию.  

Согласно п. 1.1.11. Контракта исполнительная документация -  документация, содержащая текстовые и графические материалы, отражающие  фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение  объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства  по мере завершения определенных в проектной документации работ и  выполненная в соответствии с требованиями РД 11-02-2006. Состав  исполнительной документации уточняется сторонами до их передачи Заказчику.  

Руководствуясь п. 4.4.12. Контракта, Генподрядчик обязан передать  Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и  

составе, необходимом для получения заключения о соответствии и разрешения  на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством  Российской Федерации;  

Также в соответствии с пп. «б» п. 13.8. Контракта Генподрядчик  одновременно с уведомлением о готовности законченного строительством  Объекта к передаче Заказчику обязан передать Заказчику документы,  необходимые для приемки Объекта в количестве и объеме, предусмотренном  условиями Контракта, в том числе, исполнительную документацию на  выполненные Работы в составе и объеме, необходимом в соответствии с  законодательством Российской Федерации для получения заключения о  соответствии Объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  

В целях исполнения условий Контракта сторонами осуществлена передача  Объекта по акту от 30.05.2018.  

Согласно приложению 3 к Акту в целях надлежащего оформления  исполнительной документации она была передана Генподрядчику. Срок  исполнения обязательства по оформлению исполнительной документации не  был определен. В этой связи действуют разумные сроки.  

В соответствии со ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не  предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие  определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства  определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в  течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его  исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена  законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из  обычаев либо существа обязательства.  

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

С момента направления искового заявления в адрес Генподрядчика была  направлена претензия от 07.08.2018 за исх. № 12/3-1372 по факту невозврата  ранее переданной Ответчику исполнительной документации. С учетом разумных  сроков возврата исполнительной документации данная обязанность должна быть  исполнена до 14.08.2018. До настоящего времени требование Заказчика не  исполнено.  

Таким образом, Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования  спора и требования п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ.  

Согласно правовым позициям, изложенным в постановлениях Президиума  ВАС РФ от 07.03.2000 № 3486/99 по делу № А32-10074/98-28/262, от 14.08.2001   № 9162/00 по делу № А54- 210/00-С8-С4, суд может удовлетворить иск о  понуждении к исполнению обязанности в натуре только в случае, если им  определен порядок, механизм, сроки исполнения обязательства в натуре,  выяснена возможность реального исполнения принятых им решений исходя из  положений Федерального закона от 22.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном  производстве в Российской Федерации и возможности реальной защиты  оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном  случае такого способа защиты права.  

Следует обратить внимание на тот факт, что в отзыве Ответчик ссылается  на письмо от 28.09.2018 исх. № 1240/ГКХ, которое было направлено Ответчиком  в адрес Истца. По утверждению Ответчика Истцом не предоставлен ответ на  соответствующее письмо, что не соответствует действительности, поскольку  ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России были подготовлены ответы на вышеуказанное  письмо Ответчика, что подтверждается копиями писем ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава  России от 01.11.2018 № 12/8-1885, от 15.11.2018 № 12/8-1970, полученных  представителем Ответчика - Веретенниковой О.П. 01.11.2018 и 16.11.2018, о чем  свидетельствует соответствующие отметки в письмах.  

Кроме того, ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России также направлялось в адрес  ООО «ГК Хоссер» письмо от 15.11.2018 № 12/8-1969 о предоставлении плана  мероприятий по устранению замечаний, организации исполнения и передаче  дооформленной документации до 10.12.2018 г., с приложением перечня  замечаний, однако, соответствующие меры ООО «ГК Хоссер» приняты не были,  в связи с чем, в исковое заявление в том числе включено требование по возврату  технической документации на лифт (по разделу 9 ГОСТ Р 53780-2010) паспорт  лифта (стр. 74 заявления (ходатайства) об уточнении исковых требований ФКУ  «ДЕЗЗ» Минздрава России от 25.03.2019 № 12/3-487).  

Письмом от 03.04.2018 № 486/ГКХ (прилагается) ООО «ГК Хоссер»  гарантирует в срок до 10.04.2018 предоставить полный комплект  исполнительной документации по системам тепло - и холодоснабжения  вентиляционных машин Объекта, что также свидетельствует о подтверждении  ООО «ГК Хоссер» факта наличия у него указанной исполнительной  документации. Однако, в указанный срок исполнительная документация по  системам тепло - и холодоснабжения вентиляционных машин Объекта не была  представлена, в связи с чем, ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России в адрес ООО «ГК  Хоссер» было направлено письмо от 11.04.2018 № 12/1-617 «О срыве сроков  передачи ИД по гарантийным письмам».  

Следует учесть, что гарантийными письмами от 23.04.2018 № 621/ГКХ, от  26.04.2018 № 670/ГКХ, от 27.04.2018 № 684/ГКХ, от 04.05.2018 № 710/ГКХ, от  11.05.2018 № 724/ГКХ, от 17.05.2018 № 754/ГКХ ООО «ГК Хоссер»  гарантировало ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава России предоставление исполнительной  документации, а письмом от 28.04.2018 № 694/ГКХ ООО «ГК Хоссер»  направило график предоставления исполнительной документации, что также  свидетельствует о подтверждении ООО «ГК Хоссер» факта наличия у него  указанной исполнительной документации.  

Целью осуществления правосудия является принятие законного и  исполнимого судебного акта, которым будет устранена правовая  неопределенность в спорных правоотношениях.  

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что  принцип правовой определенности предполагает стабильность правового  регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений (постановления  от 26.06.2020 N 30-П, от 05.02.2007 N 2-П); судебные акты должны быть  исполнимы реально и безусловно.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 22 и 23 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О  применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее -  

постановление Пленума N 7), при предъявлении кредитором иска об исполнении  должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств  дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным; по  смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от  должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого  исполнения объективно невозможно.  

По смыслу этих разъяснений возлагаемое по суду на ответчика исполнение  обязательства в натуре должна быть объективно и субъективно исполнимым.  

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в  материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, оценив  доказательства, приложенные к иску, суд полагает возможным удовлетворить  заявленное требование в полном объеме.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине подлежат  отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.  

В соответствии со ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший судебный  акт, вправе по заявлению лица, участвующего в деле, по собственной  инициативе исправить допущенные в нем описки, опечатки и арифметические  ошибки без изменения его содержания.  

Судом, при изготовлении резолютивной части решения от 16.10.2023 была  допущена опечатка в слове «цереброваскулярной», а именно допущено  задвоение букв, в связи с чем, данная опечатка подлежит исправлению.  

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК  РФ, суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ГК ХОССЕР" (ОГРН 

<

***>) исполнить в разумные  

сроки обязанность по возврату ранее переданной исполнительной документации  

по объекту: Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Российский национальный  

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»  

Министерства здравоохранения Российский Федерации, расположенного по  

адресу: 

<

...>, указанную в приложении 3 к  

акту приемки-передачи объекта от 30.05.2018г., а именно: Наименование документов 

Размещение оборудования Optima MR 450 w GEM 1, 5 Т. Отопление.  

Вентиляция и кондиционирование (пом. Б-2 023); Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); 

Акты испытаний и приемки:  

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы: 

Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); 

Ведомость смонтированного оборудования Акты испытаний и  

приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования  Акт приемки оборудования после комплексного опробования  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы Исполнительные схемы систем кондиционирования; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы кондиционирования; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования 

Акты испытаний и приемки:  

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Размещение оборудования Discovery PET/MR Everest 750 w. Отопление.  

Вентиляция и кондиционирование (пом. Б-1 115). Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: 

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения;  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия; 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы: Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация): 

Ведомость смонтированного оборудования Акты испытаний и  

приемки 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы Исполнительные схемы систем кондиционирования; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы кондиционирования; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования Акты испытаний и приемки 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Размещение оборудования Optima MR 750 w GEM 3, 0 Т. Отопление.  

Вентиляция и кондиционирование (пом. Б-1. 079). Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения; 

Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  Акт индивидуального испытания оборудования;  

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Исполнительные схемы;  

Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Ведомость смонтированного оборудования Акты испытаний и приемки; 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно- эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы; Исполнительные схемы систем кондиционирования; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы кондиционирования; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки; 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Отопление блоков А и Б. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: 

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения;  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Теплоснабжение. ФИО4 Переход. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания: Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: 

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения;  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Теплоснабжение блоков А и Б (Теплоснабжение приточных установок) ;  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж системы отопления; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: 

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения;  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверении и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Отопление блока В и перехода. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: 

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения;  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Обогрев полов и дорожек бассейнов. Блок Б, В; Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления полов и дорожек; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления:  Грунтовка трубопроводов отопления:  

Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: 

Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения;  Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  

Акт индивидуального испытания оборудования; 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;  

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Отопление. Отопление блока Г. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж системы отопления; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и  

крепление к конструкциям здания; Грунтовка трубопроводов отопления; Покраска трубопроводов отопления; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Акты испытаний и приемки: Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения; 

Акт промывки трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;  Акт индивидуального испытания оборудования;  

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия; Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения; Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Вентиляция блоков А, Б. Исполнительные схемы: Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); 

Ведомость смонтированного оборудования:  Акты испытаний и приемки:  

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Кондиционирование блоков А и Б . Исполнительные схемы: 

Исполнительные схемы систем кондиционирования;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы кондиционирования; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования:  Акты испытаний и приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Холодоснабжение блоков А и Б Исполнительные схемы: Исполнительные схемы систем холодоснабжения; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы холодоснабжения; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

холодоснабжения; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов систем холодоснабжения; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы холодоснабжения; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Вентиляция и кондиционирование воздуха блока В и перехода. Исполнительные схемы: Исполнительные схемы систем вентиляции; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); 

Ведомость смонтированного оборудования:  Акты испытаний и приемки:  

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы; 

Исполнительные схемы систем кондиционирования;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы кондиционировали; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы кондиционирования; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно- эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Холодоснабжение блока В. Исполнительные схемы: Исполнительные схемы систем холодоснабжения; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы холодоснабжения; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

холодоснабжения; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы холодоснабжения; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы холодоснабжения; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки; 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Вентиляция и кондиционирование воздуха. Вентиляция б; ка Г.  Исполнительные схемы;  

Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Исполнительные схемы: Исполнительные схемы систем кондиционирования; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов  

системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж установок  

кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

трубопроводов системы кондиционирования; 

Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку и окраску труб  

системы кондиционирования; 

Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы,  

герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Водоснабжение блоков А-Б. Исполнительные схемы: Исполнительные чертежи систем холодного и горячего водоснабжения; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и  

крепление к конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов холодного и горячего водоснабжения,  

канализации через стены и перекрытия; Антикоррозионная обработка трубопроводов; Окраска трубопроводов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов;  Акты приемки и испытаний:  

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность  

трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; 

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов холодного и  

горячего водоснабжение (с заключением и проведением анализов лабораторией);  Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели  

и т.д.); Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения; Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Бытовая канализация блоков А и Б.  Исполнительные схемы:  Исполнительные чертежи систем канализации;  

Исполнительная схема устройства траншей под трубопроводы канализации  

ниже отм. 0.000; 

Исполнительная схема устройства основания под под трубопроводы  

канализации ниже отм.0.000; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Устройство ответственного основания под трубопроводы канализации  

ниже отм. 0.000; 

Устройство искусственного основания под трубопроводы канализации  

ниже отм. 0.000; 

Прокладка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000;  Обратная засыпка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000;  

Монтаж трубопроводов системы канализации крепление к конструкциям  

здания; 

Устройство прохода трубопроводов канализации через стены и перекрытия;  Акты приемки и испытаний:  

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); Акт освидетельствования сетей инженерно-техническою обеспечения: 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Внутренний водосток блоков А и Б.  Исполнительные схемы:  

Исполнительные чертежи систем ливневой канализации;  

Исполнительная схема устройства траншей под трубопроводы ливневой  

канализации ниже отм.0.000; 

Исполнительная схема устройства основания под под трубопроводы  

ливневой канализации ниже отм. 0.000; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Устройство естественного основания под трубопроводы ливневой  

канализации ниже отм. 0.000; 

Устройство искусственного основания под трубопроводы ливневой  

канализации ниже отм. 0.000; Прокладка трубопроводов ливневой канализации ниже отм. 0.000; 

Обратная засыпка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000;  

Монтаж трубопроводов системы ливневой канализации крепление к  

конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов ливневой канализации через стены и  

перекрытия; Акты приемки и испытаний: 

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  

Внутренний водосток блока А. Внутренний водосток с отм. +25, 200 до  

отм. +45, 250 Исполнительные схемы: 

Исполнительные чертежи систем ливневой канализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Монтаж трубопроводов системы ливневой канализации крепление к  

конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов ливневой канализации через стены и  

перекрытия; Акты приемки и испытаний: 

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  

Внутренний водосток блока Б на отм. 0. 300 в осях 19-25.  Исполнительные схемы:  

Исполнительные чертежи систем ливневой канализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Монтаж трубопроводов системы ливневой канализации крепление к  

конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов ливневой канализации через стены и  

перекрытия; Акты приемки и испытаний: 

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Производственная канализация блоков А и Б.  Исполнительные схемы:  Исполнительные чертежи систем производственной канализации;  

Исполнительная схема устройства траншей под трубопроводы  

производственной канализации ниже отм. 0.000; 

Исполнительная схема устройства основания под под трубопроводы  

производственной канализации ниже отм. 0.000; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Устройство естественного основания под трубопроводы производственной  

канализации ниже отм. 0.000; 

Устройство искусственного основания под трубопроводы  

производственной канализации ниже отм. 0.000; 

Прокладка трубопроводов производственной канализации ниже отм. 0.000;  Обратная засыпка трубопроводов производственной канализации ниже отм.  

0.000; 

Монтаж трубопроводов системы производственной канализации крепление  

к конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов производственной канализации через  

стены и перекрытия; Монтаж очистных установок; Акты приемки и испытаний: 

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); 

Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на  

водоотдачу; 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Водоснабжение и канализация блока В.  Исполнительные схемы:  Исполнительные чертежи систем холодного и горячего водоснабжения;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и  

крепление к конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов холодного и горячего водоснабжения,  

канализации через стены и перекрытия; Антикоррозийная обработка трубопроводов; Окраска трубопроводов; Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов; Акты приемки и испытаний: 

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность  

трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; 

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов холодного и  

горячего водоснабжения (с заключением и проведением анализов лабораторией);  Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели  

и т.д.); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Исполнительные схемы:  Исполнительные чертежи систем канализации;  

Исполнительная схема устройства траншей под трубопроводы канализации  

Исполнительная схема устройства основания под под трубопроводы  

канализации ниже отм.0.000; . 

Акты освидетельствования скрытых работ:  

Устройство естественного основания под трубопроводы канализации ниже  

отм. 0.000; 

Устройство искусственного основания под трубопроводы канализации  

ниже отм. 0.000; 

Прокладка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000;  Обратная засыпка трубопроводов канализации ниже отм. 0 000;  

Монтаж трубопроводов системы канализации крепление к конструкциям  

здания; 

Устройство прохода трубопроводов канализации через стены и перекрытия;  Акты приемки и испытаний:  

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Водоснабжение и канализация блока Г.  Исполнительные схемы:  

Исполнительные чертежи систем холодного и горячего водоснабжения;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и  

крепление к конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов холодного и горячего водоснабжения,  

канализации через стены и перекрытия; 

Антикоррозионная обработка трубопроводов;  Окраска трубопроводов;  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов; Акты приемки и испытаний: 

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность  

трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; 

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов холодного и  

горячего водоснабжения (с заключением и проведением анализов лабораторией);  Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели  

и т.д.); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического о обеспечения;  Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Исполнительные схемы:  Исполнительные чертежи систем канализации;  

Исполнительная схема устройства траншей под трубопроводы канализации  

Исполнительная схема устройства основания под под трубопроводы  

канализации ниже отм. 0.000; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Устройство естественного основания под трубопроводы канализации ниже  

отм. 0.000; 

Устройство искусственного основания под трубопроводы канализации  

ниже отм. 0.000; Прокладка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000; Обратная засыпка трубопроводов канализации ниже отм. 0.000: 

Монтаж трубопроводов системы канализации крепление к конструкциям  

здания; 

Устройство прохода трубопроводов канализации через стены и перекрытия;  Акты приемки и испытаний:  

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  Водоснабжение и канализация Дренаж системы кондиционирования.  Исполнительные схемы:  Исполнительные чертежи системы дренажа кондиционирования;  

Исполнительная схема устройства траншей под трубопроводы системы  

дренажа кондиционирования ниже отм. 0.000; 

Исполнительная схема устройства основания под под трубопроводы  

системы дренажа кондиционирования ниже отм. 0.000; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Устройство естественного основания под трубопроводы системы дренажа  

кондиционирования ниже отм. 0.000; 

Устройство искусственного основания под трубопроводы системы дренажа  

кондиционирования ниже отм. 0.000; 

Прокладка трубопроводов системы дренажа кондиционирования ниже отм.  

0.000; 

Обратная пасынка трубопроводов системы дренажа кондиционирования  

ниже отм. 0.000; 

Монтаж трубопроводов системы дренажа кондиционирования крепление к  

конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов системы дренажа кондиционирования  

через стены и перекрытия; Акты приемки и испытаний: 

Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков  

(канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1  

СП 73.13330.2012); 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  

Силовое электрооборудование блоков А-Б. (-3, -2, -1 этажи).  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Силовое электрооборудование блоков А-Б. 1-3-й этажи. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б. 4-6-й этажи.  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. 

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б (7 этаж).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции.  

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б (8 этаж).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б (9 этаж).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б (10 этаж).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания У30.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б (12 этаж).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол изменений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно- эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А-Б (кровля).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Силовое электрооборудование лаборатории GMP Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А - Б. Главные электрощитовые.  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой; 

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Силовое электрооборудование блоков А и Б. Технологическое заземление и  

молниезащита. 

Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Силовое электрооборудование блока В. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Силовое электрооборудование блока Г. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. Акт технической готовности электромонтажных работ. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Электрическое освещение блоков А и Б (подземные этажи). Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  

Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Электроосвещение блоков А и Б. -3, -2, -1 этажи. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Электроосвещение блоков А-Б (надземные этажи).  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Электроосвещение блоков А и Б. Выше отм. ±0, 000. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов;  

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания У30.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Электрическое освещение Блока В. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Электрическое освещение ФИО5 Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания У30.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Электротехнический раздел. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; 

Ведомость смонтированного электрооборудования;  Ведомость изменений и отступлений от проекта;  

Протокол измерений сопротивления изоляции. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». 

Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Структурированная кабельная система. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей кабельной системы.  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания;  

Акт освидетельствования скрытых работ на обезжиривание арматуры,  

соединений и труб; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; 

Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность;  

Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением  

падения давления за время испытания; Акт на обезжиривание труб, арматуры и соединений; Опись технической документации; Свидетельство о монтаже трубных проводок; 

Заключение по результатам проверки качества сварных швов;  

Список сварщиков, дефектоскопистов и сборщиков резьбовых соединений;  Протокол измерения сопротивления изоляции;  

Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений  

или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а;  

Документация по ВОЛС. Паспорт регенерационного участка;  

Документация по 1ЮЛС. Паспорт на смонтированную соединительную  

муфту; 

Документация по ВОЛС. Протокол измерения параметров  

смонтированного оптического кабеля; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  

Акт приостановки (консервации) монтажных работ по системам  

автоматизации; Ведомость смонтированного оборудования. Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Активное сетевое оборудование информационной системы. Активное  

сетевое оборудование. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей кабельной системы. 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; Опись технической документации; Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Система медицинского мониторирования. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей системы медицинского мониторирования; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации:  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Система управления контроля доступом и охранной сигнализации. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей системы управления контроля доступом и  

охранной сигнализации. Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки: 

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж:  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Система управления контроля доступом и охранной сигнализации.  

Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей системы управления контроля доступом и  

охранной сигнализации; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Системы связи. Система палатной сигнализации. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей связи и системы палатной сигнализации  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж:  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  

Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Система электрочасофикации. 

Система коллективного приёма телевидения (СКТВ).  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей связи и системы палатной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Архитектурно-строительная акустика конференц-зала, залов совещаний и  

консилиумов. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей акустики конференц зала;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок;  

Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки к эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Аудио, видео и световое оборудование конференц-залов. ФИО4  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей аудио, видео; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; Опись технической документации; Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Аудио, видео оборудование аудиторий и операционных. ФИО6  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей аудио, видео; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки к эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Система видеоконференцсвязи. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей аудио, видео; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Система радиофикации. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж систем радиофикации; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Автоматизация вентиляционных систем Блоков А, Б.  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входною контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Автоматизация вентиляционных систем. ФИО4 Кабельный журнал. 

Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Автоматизации вентиляционных систем. ФИО5 Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Система диспетчеризации электроводонагревателей.  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Система диспетчеризации воздушных тепловых завес.  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации:  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  

Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  

Ведомость смонтированного оборудования. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Диспетчеризация электроснабжения и электроосвещения Блоки А и Б  

(Надземная часть). Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации. Опись технической документации; Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Диспетчеризация электроснабжения и электроосвещения. Блоки А и Б  

(Подземная часть). Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Диспетчеризация электроснабжения и электроосвещения. ФИО4  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Диспетчеризация электроснабжения и электроосвещения. ФИО5  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; Опись технической документации; Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Лечебное газоснабжение. 

Журнал сварочных работ (Составляют только для трубопроводов I и II  

категории и трубопроводов Ру св. К) МПа (100 кгс/см2); 

Журнал учета и проверки качества контрольных стыков (Составляют  

только для трубопроводов I и II категории и трубопроводов Ру св. 10 МПа (100  

кгс/см2); Исполнительные схемы: 

Исполнительные чертежи прокладки трубопроводов;  

Акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки и  

испытаний: 

Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству  

монтажных работ; Акт испытания трубопроводов; Акт испытания сосудов и аппаратов; 

Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже оборудования и  

трубопроводов); 

Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования;  

Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения,  

сертификаты пожарной безопасности на оборудование, строительные  

материалы, изделия и конструкции. 

Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков.  

Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний  

противопожарный водопровод. Технологическая часть. Исполнительные схемы: 

Исполнительные чертежи систем противопожарного водопровода:  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Монтаж трубопроводов системы противопожарного водопровода и  

крепление к конструкциям здания; 

Устройство прохода трубопроводов противопожарного водопровода через  

стены и перекрытия; Антикоррозионная обработка трубопроводов; Окраска трубопроводов. Монтаж пожарных шкафов в комплекте; Акты приемки и испытаний: Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность; Акт испытания арматуры; Акт о выявленных дефектах оборудования АУП; 

Акт испытания оборудования (насосов, компрессоров) вхолостую или под  

нагрузкой; 

Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на  

водоотдачу; Акт испытания гидропневматической емкости; Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУП;  Акт о проведении индивидуальных испытаний АУП;  

Акт об окончании пусконаладочных работ; Акт проведения комплексного опробования АУП; Акт приемки установки в эксплуатацию. Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;  

Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний  

противопожарный водопровод (раздел автоматики); Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации противопожарного  

водопровода; Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки: 

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; Опись технической документации; Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  

Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Автоматическая установка газового и порошкового пожаротушения. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации газового и порошкового  

пожаротушения; 

Исполнительный чертеж размещения оборудования газового и  

порошкового пожаротушения; 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию; Ведомость смонтированного оборудования. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Автоматическое пожаротушение. Технологическая часть.  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации автоматического  

пожаротушения; 

Исполнительный чертеж размещения оборудования автоматического  

пожаротушения. 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Автоматическое пожаротушение (Раздел автоматики).  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации автоматического  

пожаротушения; 

Исполнительный чертеж размещения оборудования автоматического  

пожаротушения. Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки: 

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж:  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Противодымная вентиляция. Технологическая часть. (Блок В).  Исполнительные схемы:  

Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Ведомость смонтированного оборудования: Акты испытаний и приемки: 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;   Акт приемки оборудования после комплексного опробования.  

Паспорта систем вентиляции; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Противодымная вентиляция. Технологическая часть. Блок А и Б.  Исполнительные схемы:  

Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Ведомость смонтированного оборудования. Акты испытаний и приемки. 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;  Акт приемки оборудования после комплексного опробования.  

Паспорта систем вентиляции; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Противодымная вентиляция. Технологическая часть. (Блок Г).  

Исполнительные схемы:  

Исполнительные схемы систем вентиляции на каждую систему;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и  

клапанов систем вентиляции; 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода (гильзы,  

герметизация); 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов,  

вентиляционных установок; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции  

воздуховодов; 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты  

воздуховодов; 

Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и  

перегородки (гильзы, герметизация); Ведомость смонтированного оборудования. Акты испытаний и приемки. Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования; 

Акт приемки оборудования после комплексного опробования.  Паспорта систем вентиляции;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; Система оповещения о пожаре. Корпус А, Б. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ; 

Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  Акт об окончании монтажных работ;  

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции  

по эксплуатации оборудования; Оповещение о пожаре блока В. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;  Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования; Оповещение о пожаре блока Г. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ:  Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования; 

Оповещение о пожаре блока Г. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж; Акт обследования здания; Акт готовности далий и сооружений к производству монтажных работ; 

Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  Акт об окончании монтажных работ;  

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;  

Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика.  

Блок А, Б. (Противопожарная автоматика). Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: 

Акты входного контроля;  

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;  Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования; 

Автоматическая пожарная сигнализация. Блок А, Б. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;  Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования:  

Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика  

блока В. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;  Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования; 

Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика  

блока Г. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  

канализация; в земле); Акты испытаний и ведомости: Акты входного контроля; 

Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;  Акт обследования здания;  

Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;  Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;  

Акт об окончании монтажных работ; 

Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;  

Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями  

на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации  

во взрывоопасных зонах); Акт об окончании пусконаладочных работ; 

Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки  

пожарной сигнализации; 

Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;  

Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Техническая документация предприятий  

изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования; Вертикальный транспорт блоков А и Б. 

Акты приемки и испытаний строительных конструкций:  

Протокол проверки функционирования лифта (составляет  

специализированная организация, смонтировавшая лифт);  

Протокол исследований (испытаний) и измерений при полном техническом  

освидетельствовании лифта (от аккредитованной испытательной лаборатории; 

Протокол проверки технической документации на лифт (от  

аккредитованной испытательной лаборатории); 

Акт полного технического освидетельствования лифта (от аккредитованной  

испытательной лаборатории); 

ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации декларации о соответствии лифта требованиям  

технического регламента «О безопасности лифта" (составляет  

специализированная организация, смонтировавшая лифт);  

Декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента  

(зарегистрированная органом по сертификации); 

Акт приемки лифта в эксплуатацию (форма ПУБЭЛ);  

Техническая документация на лифт (по разделу 9 ГОСТ Р 53780-2010)  

паспорт лифта; 

Строительство вертолетной площадки ФЦЦПиИ ГОУ ВПОРГМУ  

Росздрава Информационно-диспетчерский пункт. Электроснабжение. 

Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей электроснабжения. Акты освидетельствования скрытых работ: 

Прокладка сетей электроснабжения под штукатуркой;  Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения;  

Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; Ведомость смонтированного электрооборудования; Ведомость изменений и отступлений от проекта; Протокол измерений сопротивления изоляции. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». 

Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Строительство вертолетной площадки ФЦЦПиИ ГОУ ВПОРГМУ  

Росздрава Информационно-диспетчерский пункт. Линии связи. Кабельный журнал. 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; 

Акт освидетельствования скрытых работ на обезжиривание арматуры,  

соединений и труб; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; 

Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность;  

Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением  

падения давления за время испытания; 

Акт на обезжиривание труб, арматуры и соединений;  Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; 

Заключение по результатам проверки качества сварных швов;  

Список сварщиков, дефектоскопистов и сборщиков резьбовых соединений;  Протокол измерения сопротивления изоляции;  

Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений  

или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а; 

Документация по ВОЛС. Паспорт регенерационного участка;  

Документация по ВОЛС. Паспорт на смонтированную соединительную  

муфту; 

Документация по ВОЛС. Протокол измерения параметров  

смонтированного оптического кабеля; 

Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;  Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  

Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  

Акт приостановки (консервации) монтажных работ по системам  

автоматизации; Ведомость смонтированного оборудования. Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков; 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Строительство вертолетной площадки ФЦЦПиИ ГОУ ВПОРГМУ  

Росздрава Радионавигационное и метеорологическое оборудование.  

Электроснабжение. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой; 

Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; Ведомость смонтированного электрооборудования; Ведомость изменений и отступлений от проекта; Протокол измерений сопротивления изоляции. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». 

Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Строительство вертолетной площадки ФЦЦПиИ ГОУ ВПОРГМУ  

Росздрава Радионавигационное и метеорологическое оборудование. Линии  

связи. Кабельный журнал. 

Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; 

Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;  Протокол входного контроля оптического кабеля;  

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания;  

Акт освидетельствования скрытых работ на обезжиривание арматуры,  

соединений и труб; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; 

Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность;  

Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением  

падения давления за время испытания; Акт на обезжиривание труб, арматуры и соединений; 

Опись технической документации;  

Свидетельство о монтаже трубных проводок; 

Заключение по результатам проверки качества сварных швов;  

Список сварщиков, дефектоскопистов и сборщиков резьбовых соединений;  Протокол измерения сопротивления изоляции;  

Протокол прогрева кабелей на барабанах; 

Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений  

или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а; 

Документация по ВОЛС. Паспорт регенерационного участка;  

Документация по ВОЛС. Паспорт на смонтированную соединительную  

муфту; 

Документация по ВОЛС. Протокол измерения параметров  

смонтированного оптического кабеля; Разрешение на монтаж технических средств автоматизации; 

Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации;  Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;  

Акт приостановки (консервации) монтажных работ по системам  

автоматизации; Ведомость смонтированного оборудования. 

Удостоверении и протоколы аттестации сварщиков;  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации; 

Строительство вертолетной площадки ФЦЦПиИ ГОУ ВПОРГМУ  

Росздрава Система светосигнального оборудования. Электроснабжение.  

Конструктивные и объемно-планировочные решения. Исполнительные схемы: Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. Акты освидетельствования скрытых работ: 

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов: 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; Ведомость смонтированного электрооборудования; Ведомость изменений и отступлений от проекта; Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Система светосигнального оборудования. Электроснабжение.  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки освежительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов: 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; Ведомость смонтированного электрооборудования; Ведомость изменений и отступлений от проекта; Протокол измерений сопротивления изоляции. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль». 

Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  Акт технической готовности электромонтажных работ.  

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Серверная и кроссовые. Инженерное оборудование серверной и кроссовых.  Кабельный журнал.  

Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж расстановки оборудования.  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу оборудования;  Акт окончания работ по монтажу оборудования;  

Ведомость смонтированного оборудования. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инженерное оборудование помещений ИБП и видеоархива. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж расстановки оборудования.  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу оборудования;  Акт окончания работ по монтажу оборудования;  

Ведомость смонтированного оборудования.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; 

Дизельная электростанция. Электротехническая часть.  Исполнительные схемы:  

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. Акты освидетельствования скрытых работ: 

Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой;  Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  

электроосвещения; Акты испытаний и ведомости: 

Акт готовности строительной части к производству электромонтажных  

работ; 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность  

монтажа установленных автоматов; 

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего  

освещения; 

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

электромонтажных работ; Ведомость смонтированного электрооборудования; Ведомость изменений и отступлений от проекта; Протокол измерений сопротивления изоляции. 

Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».  Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.  

Акт технической готовности электромонтажных работ.  Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.  

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Дизельная электростанция. Фундамент Журнал бетонных работ; Исполнительная геодезическая документация: 

Исполнительная схема разбивки основных осей фундамента;  

Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий  

и сооружений: 

Исполнительная схема котлована с подсчетом объемов грунта;  

Исполнительная схема устройства естественного основания под  

фундаменты; Исполнительная схема фундаментов; Исполнительная схема анкерных болтов; 

Акты приемки и испытаний строительных конструкций:  Акт освидетельствования ответственных конструкций (фундаментов);  

Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под фундаменты; 

Протоколы испытаний бетона (приложить копию аттестации лаборатории);  Протоколы испытания качества послойного уплотнения грунта при  

обратной засыпке; Акты освидетельствования скрытых работ: 

Устройство естественного основания под фундаменты;  

Устройство песчанной подготовки под фундаменты;  

Устройство бетонной подготовки под фундаменты;  Армирование монолитных фундаментов, установка анкерных болтов;  

Монтаж опалубки монолитных фундаментов; Бетонирование монолитных фундаментов; 

Вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов;  Горизонтальная гидроизоляция фундаментов;  

Обратная засыпка пазух фундаментов (с послойным уплотнением).  

Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия  

и конструкции. 

Дизельная электростанция. Выхлопная система и фундамент под трубу  

газоудаления. Журнал бетонных работ; Исполнительная геодезическая документация: Исполнительная схема разбивки основных осей фундамента; 

Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий  

и сооружений: Исполнительная схема котлована с подсчетом объемов грунта; 

Исполнительная схема устройства естественного основания под  

фундаменты; Исполнительная схема фундаментов; Исполнительная схема анкерных болтов; 

Акты приемки и испытаний строительных конструкций:  Акт освидетельствования ответственных конструкций (фундаментов);  

Акт осмотра отрытых рвов и котлованов под фундаменты;  

Протоколы испытаний бетона (приложить копию аттестации лаборатории);  Протоколы испытания качества послойного уплотнения грунта при  

обратной засыпке; 

Акты освидетельствования скрытых работ:  Устройство естественного основания под фундаменты.  

Устройство песчанной подготовки под фундаменты;  Устройство бетонной подготовки под фундаменты;  

Армирование монолитных фундаментов, установка анкерных болтов;  Монтаж опалубки монолитных фундаментов;  

Бетонирование монолитных фундаментов; 

Вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов.  Горизонтальная гидроизоляция фундаментов;  

Обратная засыпка пазух фундаментов (с послойным уплотнением).  

Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия  

и конструкции. 

Размещение оборудования Optima MR 750 w GEM 3, ОТ (+10 этаж).  

Усиление перекрытия. Журнал бетонных работ; 

Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий  

и сооружений (форма ГОСТ Р 51872-2002): 

Исполнительная схема плиты перекрытия; 

Акты приемки и испытаний строительных конструкций:  

Акт освидетельствования ответственных конструкций (усиление  

перекрытия); 

Протоколы испытаний бетона (приложить копию аттестации лаборатории);  Акты освидетельствования скрытых работ:  

Армирование плиты перекрытия; Монтаж опалубки плиты перекрытия; Бетонирование плиты перекрытия; Армирование лестничных маршей и площадок; 

Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения  

на строительные материалы, изделия и конструкции; Охранно-защитная дератизационная система. Кабельный журнал. Исполнительные схемы: 

Исполнительный чертеж сетей автоматизации вентиляционных систем;  Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:  

Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу  

систем автоматизации; 

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем  

автоматизации; Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж; Протокол входного контроля оптического кабеля; 

Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и  

кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания; Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации; Протокол измерения сопротивления изоляции; Протокол прогрева кабелей на барабанах; Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации; Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию; Ведомость смонтированного оборудования. 

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и  

оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты  

пожарной безопасности; Инструкции по эксплуатации. 

Взыскать с ООО "ГК ХОССЕР" (ОГРН 

<

***>) в пользу ФКУ  

"ДЕЗЗ" МИНЗДРАВА РОССИИ (ОГРН 

<

***>) 6 000руб. –  

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  

(изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в  

течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд  

Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший  

решение. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  

ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным  

судом. 

Судья: О.В. Лихачева