Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А20-7027/2024

г. Нальчик

24 февраля 2025 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Ю.Ж. Шокумова, при ведении протокола помощником судьи ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «РК-Стройгрупп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нальчик,  

к государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нальчик,  

о продлении срока завершения работ по государственному контракту 

третье лицо Министерство строительства и жилищного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Нальчик,  

при участии в судебном заседании от истца ФИО2 по доверенности от 05.12.2024 от УКСа ФИО3 по доверенности от 05.02.2025 

в отсутствии третьего лица, уведомленного должным образом о времени и месте судебного заседания  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в пункт 3.2 статьи 3 государственного контракта № 23 от  

24.04.2023 между государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» и обществом с  

ограниченной ответственностью «РК-Стройгрупп», изложив его в следующей  

редакции «3.2. Работы по Контракту должны быть завершены до 20.06.2025 года».  

2. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный  

суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течении месяца.  

Судья Ю.Ж. Шокумов