Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, 

<

...>

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-3558/2025

«10»

июля

2025 года 

«07»   июля  2025 года     оглашена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Калининградской области в составе:

Судьи Гурьевой И. Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Грозной К.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

ИП ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Россети Янтарь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании исполнить в натуре обязательства, возникающие из договора  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; о взыскании судебной неустойки, судебных расходов;

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности,

от АО «Россети Янтарь»: ФИО3 по доверенности;

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель, ИП ФИО1, истец) обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к акционерному обществу «Россети Янтарь»  (далее – АО «Россети Янтарь», ответчик) об обязании в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору технологического присоединения №10667/09/22 от 23.09.2022г. в отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

...> кадастровый номер земельного участка 39:18:010021:532; о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения №10667/09/22 от 23.09.2022г. за период с 24.09.2023 по 07.07.2025 в размере 47 829,02 рублей, неустойки из расчета 0,25% от суммы 29 298,02 рублей за каждый день просрочки, начиная с 08.07.2025 и по день фактического исполнения обязательств; в случае неисполнения судебного акта по настоящему делу взыскать с АО «Россети Янтарь» судебную неустойку в размере 6 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения.

         В судебном заседании  представитель ИП ФИО1, ссылаясь на имеющиеся в деле доказательства, исковые требования поддержал, указал на длительное невыполнение  обязательств по договору.

Ответчик исковые требования не признал, указал на невозможность окончания работ в заявленный короткий срок и на трудности, возникшие в связи с занятостью подрядных организаций.

Исследовав и оценив доказательства, содержащиеся в материалах дела в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, 23.09.2022 г. между АО «Россети Янтарь», как сетевой организацией, и ИП ФИО1, как заявителем, был заключен договор №10667/09/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоквартирного дома по адресу: 

<

...> кадастровый номер земельного участка 39:18:010021:532. 

Неотъемлемой частью договора являются технические условия (далее – ТУ) ТУ Z-10667/22, в которых стороны согласовали объем необходимых к выполнению мероприятий.

Согласно условиям договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет двенадцать  месяцев со дня заключения договора, т.е. АО «Россети Янтарь» должно было исполнить принятые обязательства в срок до 23.09.2023 года включительно.

Ссылаясь на длительное неисполнение АО «Россети Янтарь» обязательств по договору,  предприниматель обратился в суд настоящим исковым заявлением.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

В силу статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» ГК РФ, однако эти нормы содержатся и в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

В частности, спорные правоотношения регулируются положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» и Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В силу ч.1 ст. 26 закона № 35-ФЗ, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно п. 6 Правил № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. 

Заключение договора является обязательным для сетевой организации, поскольку данный вид договора на основании абз. 3 ч.1 ст. 26 закона № 35-ФЗ имеет статус публичного. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации если сторона, для которой в соответствии с Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

Из содержания указанных норм права следует, что при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора возникает право на обращение с исковыми требованиями о понуждении к заключению договора.

Пунктом 18 Правил № 861 определено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

Договор сторонами не расторгнут, не изменен, является действующим. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению на дату судебного разбирательства истек значительное время назад. 

Материалами дела подтверждается, что обязательства заявителя по спорному договору исполнены полностью. 

В то время как общество не доказало исполнения своих обязательств по договору.

Не представлено ответчиком и доказательств объективной невозможности исполнить обязательства по договору с 2022 г., ссылки на предпринимаемые меры оцениваются судом критически в силу длительности прошедшего периода.

Поскольку судом установлена обоснованность требований предпринимателя, требование  об обязании  исполнить в натуре обязательства, возникающие из договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подлежит удовлетворению.

Оценивая исковые требования, суд исходит из того, что при решении вопроса о применении способа защиты в виде принуждения к исполнению обязанности в натуре суд обязан определить порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, выяснить возможность реального исполнения принятых им решений на основании положений Федерального закона от 22.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве в Российской Федерации» и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.03.2000 № 3486/99, от 14.08.2001 № 9162/00). 

По смыслу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статей 16 и 182 АПК РФ судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

В части 1 статьи 174 АПК РФ установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Учитывая доводы сторон, суд считает необходимым предоставить для исполнения обязательств срок в 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Кодекса).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 28, 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016  № 7 «О применении некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Таким образом, действующее гражданское законодательство позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 31 Постановления № 7, суд судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Между тем, судебная неустойка не носит компенсационного характера за допущенное неисполнение судебного акта, а по своей правовой природе является дополнительным способом понуждения к исполнению судебного акта.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу закона только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела. 

С учетом обстоятельств спора и взаимоотношений сторон, суд полагает, что фактическим правоотношениям сторон  соответствует и является соразмерной мерой стимулирования ответчика по исполнению решения судебная неустойка в размере 3 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с даты окончания предоставленной для исполнения обязательства.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за период с 24.09.2023 по 07.07.2025 в размере 47 829,02 рублей, неустойки из расчета 0,25% от суммы 29 298,02 рублей за каждый день просрочки, начиная с 08.07.2025 и по день фактического исполнения обязательствВ соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

         Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абзацем 3 подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0, 4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0, 25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Указанное положение продублировано в п. 17 договора.

Вопреки позиции АО, предельного размера неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией не имеется.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016  №  7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее  - постановление Пленума № 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. 

Расчет истца ответчиком не оспорен, заявлено ходатайство о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Рассмотрев ходатайство ответчика, исходя из конкретных обстоятельств дела, характера существующих между сторонами правоотношений, нормативно установленного размера неустойки, продолжительности просрочки по соответствующим обязательствам, соотношения размера неустойки с величиной стоимости несвоевременно исполненного обязательства, пришел к выводу о необходимости удовлетворения требования по взысканию неустойки в заявленном размере. 

Согласно п. 65 постановления Пленума № 7, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

В связи с недобросовестным исполнением ответчиком обязательств, суд признает подлежащими удовлетворению требования по взысканию пени на день фактического исполнения обязательства, начиная с 08.07.2025.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины  также подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

                                                 Р  Е  Ш  И  Л  :

         Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать акционерное общество «Россети Янтарь» в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору технологического присоединения №10667/09/22 от 23.09.2022г. в отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

...> кадастровый номер земельного участка 39:18:010021:532. 

Взыскать с акционерного общества «Россети Янтарь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения №10667/09/22 от 23.09.2022г. за период с 24.09.2023 по 07.07.2025 в размере 47 829,02 рублей, неустойку из расчета 0,25% от суммы 29 298,02 рублей за каждый день просрочки, начиная с 08.07.2025 и по день фактического исполнения обязательств. 

В случае неисполнения решения суда по делу № А21-3558/2025 взыскать с акционерного общества «Россети Янтарь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 3000 рублей за каждый день, начиная со следующего дня с момента истечения установленного для исполнения судебного решения месячного срока по день исполнения обязательств полном в объёме. 

Взыскать с акционерного общества «Россети Янтарь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 25 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий одного месяца  со дня его принятия.

                     Судья                                                   И.Л. Гурьева