Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-544/2020

29 октября 2020 года

город Горно-Алтайск

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 29 октября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Новиковой О.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Параевой М.Т., рассмотрел в судебном заседании  материалы дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Чойское дорожное ремонтно-строительное управление" (ОГРН 1150411002015, ИНН 0411172905, ул. Социалистическая, д. 28, с. Чоя, р-н. Чойский, Республика  Алтай) к Казенному учреждению Республики Алтай "Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования "Горно-Алтайавтодор" (ОГРН 1020400736883, ИНН 0400000069, пр-кт. Коммунистический, д. 182, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о взыскании  1852441 руб.,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 (доверенность, диплом в деле) – посредством веб-конференции;                                                

от ответчика – ФИО3, ФИО4, (доверенности в деле),                                               

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Чойское дорожное ремонтно-строительное управление" (далее-  истец, общество, ООО «Чойское ДРСУ») обратилось в суд с иском к Казенному учреждению Республики Алтай "Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования "Горно-Алтайавтодор" (далее- ответчик,  учреждение, КУ РА «Горно-Алтайавтодор»)    о взыскании задолженности  за выполненные  работы по государственному  контракту  от 30 мая 2018 года в размере 1852441 руб.

В  обоснование заявленных требований  истец указал, что  25.03.2020   направил ответчику  претензию   об оплате   выполненных  в 2019 году   работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Чойского района Республики Алтай  в размере   1852441 руб., а также Акт  о приемке   выполненных работ   за отчетный период   с 01.01.2019 по  31.12.2019, справку о стоимости выполненных работ за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019, Акт оценки уровня содержания   автомобильных   дорог Чойского   района и счет на оплату. 

Отказ ответчика от оплаты фактически выполненных за 2019 год работ послужил  основанием для  обращения в суд  с рассматриваемым иском. 

В отзыве на иск ответчик требований не признал и указал, что  истец  выполнил  и сдал работы за период с  01.01.2019 по  31.12.2019  на общую сумму  31496750 руб.,  которые  оплачены в полном объеме. 

Объем   работ на  спорную сумму-  1852441 руб.   был уменьшен  подрядчиком при  приемке работ в связи с выявленными   дефектами в их выполнении   на основании составляемых ежемесячно промежуточных и итоговых  ведомостях.

Наличие дефектов на момент приемки подтверждается подписанными   сторонами промежуточными и  итоговыми ведомостями уровня содержания   автомобильных   дорог Чойского района.

В судебном заседании   стороны   поддержали  доводы, изложенные   в  исковом заявлении   и в отзыве   на иск.

Для получения   от истца дополнительных пояснений, суд   откладывал судебное разбирательство. 

Определив юридически значимые для рассмотрения  дела обстоятельства, суд  обязал истца представить пояснения  с указанием конкретных видов и  объемов работ на спорную сумму - 1852441 руб., при этом  указать время их выполнения   и причину, по которой работы  были сданы  путем направления  Акта о приемке выполненных   работ только  в марте 2020 года, при этом по факту спорные работы  выполнялись с  января 2019 года по декабрь 2019 года и ответчику   не сдавались   согласно порядку сдачи работ, предусмотренному контрактом. 

В дополнительных пояснениях истец  обозначил стоимость работ с  указанием   периода их выполнения: 

-  январь   2019 года - 58509 руб. 

- февраль 2019 года- 20493 руб. 

-  март 2019- 39166 руб.

-  апрель- 20808 руб.

-май 2019-  164796 руб.

-июнь 2019- 547850 руб.

-июль 2019- 213029 руб.

-август 2019- 163103 руб.

-сентябрь 2019- 478868 руб.

-октябрь 2019- 65513 руб.

Ноябрь 2019- 48404 руб.

Декабрь   2019- 31902 руб. 

Итого- 1852441 руб.  

Не признавая исковые требования, ответчик настаивал, что работы на указанную сумму были выполнены некачественно, что подтверждается Актами оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь  2019.

Согласно  доводам ответчика стоимость  работ, выполненных  качественно  на дату их   приемки,  составила  31496750 руб. Работы на указанную сумму  оплачены. 

Выслушав представителей сторон, исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного   процессуального кодекса Российской Федерации  материалы дела,   суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Из обстоятельств дела следует, что 30 мая 2018 года между КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» (заказчик) и ООО «Чойское ДРСУ» (подрядчик) заключен государственный контракт № ф.2018.232834 (далее – контракт), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по содержанию автомобильных дорог Чойского района (далее – объект) в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3 к контракту, по созданию условий для бесперебойного и безопасного функционирования объекта и обеспечению сохранности имущественного комплекса, а заказчик обязался оплатить работы на условиях раздела 3 контракта.

Пунктом 1.2 контракта установлено, что состав объекта (отдельные конструктивные элементы, отдельные участки, отдельные искусственные дорожные сооружения в составе автомобильных дорог, автомобильная дорога в целом или сеть автомобильных дорог), его описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры указаны в Приложениях №№ 1, 2, 3 к контракту. 

Заказчик передает, а подрядчик принимает объект на содержание по Акту передачи объекта содержания, форма которого приведена в Приложении № 13 к контракту. Отсутствие на момент начала срока выполнения работ по содержанию объекта подписанного сторонами Акта передачи объекта содержания не снимает с подрядчика обязанность по исполнению контракта.

В пункте 4.3 контракта согласованы сроки выполнения работ: начало – с 01.01.2019, окончание – по 31.12.2023.

Стоимость контракта с учетом объема предоставленных лимитов за счет средств бюджета Республики Алтай составила 173381831 руб. (пункт 3.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 26.11.2019 № 2).

В Приложении № 1/1 к контракту согласован Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Чойском районе, в Приложении № 2/1 – Перечень мостовых сооружений, входящих в состав автомобильных дорог в Чойском районе.

Техническое задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Чойского района указано в Приложении № 3 к контракту.

Раздел 5.1 контракта регламентирует обязанности подрядчика, в том числе:    5.1.1 принять от заказчика объект на содержание по Акту передачи объекта содержания по форме, указанной в Приложении № 13 к контракту, а также документацию, указанную в пункте 5.3.1 контракта.

Пункт 5.3.1 контракта содержит обязанность заказчика передать подрядчику объект на содержание по Акту передачи объекта содержания (форма приведена в Приложении № 13 к контракту), а также передать копии имеющихся у заказчика материалов (документов). Указанная документация должна быть передана заказчиком подрядчику в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта.

          Проанализировав   условия  государственного контракта  от 30 мая 2018 года № ф.2018.232834, суд приходит к выводу, что между сторонами возникли правоотношения, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации ( далее - ГК РФ). 

Пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ)  установлено, что по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан   уплатить подрядчику  обусловленную  цену после  окончательной   сдачи   результатов работы при условии, что  работа выполнена   надлежащим образом    и в согласованный срок,  либо с согласия  заказчика досрочно.

Условиями контракта оплата выполненных   работ  осуществляется   учреждением    путем перечисления   денежных средств  на расчетный счет  подрядчика в течение  15-ти рабочих дней со дня подписания предъявленных подрядчиком фактически выполненных   работ на основании  документов, перечисленных   в п 6.2 контракта.     

Согласно  пункту 6.2 контракта подрядчик  предоставляет  заказчику с  20   по 30 (28.02)  число  отчетного месяца следующие документы:

-акт о  приемке   выполненных работ КС-2

-справку  о стоимости  выполненных работ  и затрат  КС-3 с приложениям   счетов- фактур (счета),

-акт оценки  уровня  содержания  автомобильных дорог,

-итоговую  ведомость оценки   уровня   содержания   автомобильных   дорог,

- промежуточную ведомость оценки   уровня содержания   автомобильных дорог в соответствии с  приказом  Минтранса  РФ от 08 июня   2012  № 163 Об  утверждении Порядка  проведения оценки  уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» на  основании Постановления  Правительства  Республики Алтай   от 19.02.2013 года № 32 «Об утверждении  Порядка  содержания   и ремонта автомобильных   дорог общего пользования регионального   или  межмуниципального   значения».

В случае отсутствия  дефектов содержания по отдельным  автодорогам/ мостам промежуточные и   итоговые ведомости  на них не составляются.

  Материалами дела подтверждается и истцом признается, что в связи с допущенными  при выполнении работ  нарушениями  требований, указанных в  техническом задании ( приложении № 3)  к контракту, стоимость выполненных работ  на основании   промежуточных и итоговых ведомостях  была уменьшена на основании выявленных дефектов, отраженных в  промежуточных и итоговых ведомостях, на общую сумму 1852441 руб.  

Так, в январе 2019 года   стоимость  работ  была уменьшена  на  58509 руб., в  феврале 2019 года стоимость  работ  была уменьшена  на 20493 руб., в марте 2019  на 39166 руб.,    в апреле на  20808 руб.,  в мае 2019 на  164796 руб., в июне 2019 на 547850 руб.,  в июле 2019 на 213029 руб.,  в августе 2019 на 163103 руб.,  в сентябре 2019 на 478868 руб., в  октябре 2019 на 65513 руб.,  в ноябре 2019 на 48404 руб. и в декабре   2019 на 31902 руб. Итого- 1852441 руб.

Указанные   обстоятельства подтверждаются   представленными в материалы дела доказательствами: Актами  оценки уровня содержания  сети автомобильных дорог за каждый месяц отчетного периода, начиная с января 2019 по  декабрь 2019 года.

В итоге, стоимость некачественно выполненных работ по состоянию на  дату окончания отчетного периода, определенного контрактом- 30 ( 28.02)   число  отчетного месяца ( пункт  6.1 контракта),  составила 1852441 руб.  

    Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за январь 2019 года комиссией в составе представителей КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», МО «Чойский район» и ООО «Чойское ДРСУ» установлено:

1) Всего обследовано: 128,820 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 4 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 124,820 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 2,4 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 1,86 %;

- Принято к выполнению: 98,14 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 24.01.2019 № 1 (отчетный период с 01.01.2019 по 24.01.2019) на сумму 2707065 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за февраль 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,820 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 1 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 127,820 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 0,25 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 0,6 %;

- Принято к выполнению: 99,4 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 19.02.2019 № 2 (отчетный период с 24.01.2019 по 19.02.2019) на сумму 2745081 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за март 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,820 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 6 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 122,820 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 2,15 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 1,67 %;

- Принято к выполнению: 98,33 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 20.03.2019 № 3 (отчетный период с 19.02.2019 по 20.03.2019) на сумму 2718483 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за апрель 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,820 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 5 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 123,820 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 0,95 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 0,74 %;

- Принято к выполнению: 99,26 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 22.04.2019 № 4 (отчетный период с 20.03.2019 по 22.04.2019) на сумму 2744766 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за май 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,820 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 25 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 103,820 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 6,500 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 5 %;

- Принято к выполнению: 95 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 29.05.2019 № 5 (отчетный период с 22.04.2019 по 29.05.2019) на сумму 2663042 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за июнь 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,820 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 47,413 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 81,407 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 19,5 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 15 %;

- Принято к выполнению: 85 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 02.07.2019 № 6 (отчетный период с 30.05.2019 по 30.06.2019) на сумму 2677722 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за июль 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 121,407 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 25 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 96,407 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 8,8 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 7,2 %;

- Принято к выполнению: 92,8 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 31.07.2019 № 7 (отчетный период с 01.07.2019 по 31.07.2019) на сумму 2370726 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за август 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 121,407 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 28 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 93,407 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 6,65 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 5 %;

- Принято к выполнению: 95 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 27.08.2019 № 8 (отчетный период с 01.08.2019 по 27.08.2019) на сумму 2432259 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за сентябрь 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,82 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 45 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 83,82 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 19,7 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 15,3 %;

- Принято к выполнению: 84,7 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2019 № 9 (отчетный период с 28.08.2019 по 24.09.2019) на сумму 2286706 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за октябрь 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,82 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 9 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 96,32 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 2,7 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 2,1 %;

- Принято к выполнению: 97,9 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 28.10.2019 № 10 (отчетный период с 24.09.2019 по 28.10.2019) на сумму 2700061 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за ноябрь 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,82 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 9 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 119,82 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 2 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 1,5 %;

- Принято к выполнению: 98,5 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 27.11.2019 № 11 (отчетный период с 28.10.2019 по 27.11.2019) на сумму 2717171 руб.  

Согласно Акту оценки уровня содержания сети автомобильных дорог Чойского района (приемки работ) за декабрь 2019 года комиссией установлено:

1) Всего обследовано: 128,82 км.;

2) Не соответствует заданному уровню содержания следующие километры: 7 км.;

3) Соответствует заданному уровню: 121,82 км.;

4) Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания: 1,3 км.   

Результат оценки:

- Процент снижения объема выполнения: 1 %;

- Принято к выполнению: 99 %.

На основании указанного акта составлен Акт о приемке выполненных работ от 20.12.2019 № 12 (отчетный период с 28.11.2019 по 31.12.2019) на сумму 2733668 руб.  

            Таким образом,  общество  сдало работы  надлежащего   качества  согласно  разделу 6   контракта, на общую сумму  31496750 руб. 

 Работы на сумму 1852441 руб.  были выполнены истцом некачественно,   поэтому  ответчик   как заказчик их не принял и не оплатил, что соответствует условиям контракта- положениям  пункта  3.4, 6.1, 6.2,  и 6.6   контракта. 

Так, условиями контракта  определен Порядок сдачи и приемки выполненных работ ( раздел 6). 

Согласно пункту 6.1 контракта приемка выполненных работ по объекту   проводится ежемесячно  начиная   с 20  по 30 (28.02)   число   отчетного  месяца с  участием   представителя   подрядчика и заказчика и оформляется  актом проверки  уровня содержания автомобильной дороги  в соответствии с   Приказом Минтранса   РФ от   08 июня   2012 года  № 163 «Об  утверждении   Порядка   проведения   оценки   уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» на  основании Постановления  Правительства  Республики Алтай   от 19.02.2013 года № 32 «Об утверждении  Порядка  содержания   и ремонта автомобильных   дорог общего пользования регионального   или  межмуниципального   значения».  

Поскольку   выполнение  работ на   спорную сумму  1852441 руб.  состоялось с нарушением    условий контракта, отказ  ответчика от   оплаты работ, указанных в Акте от  31.12.2019 года, направленном   ответчику в марте 2020 года,  является законным  и обоснованным.  

Делая такой вывод,  суд руководствуется следующим. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

 Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ дорожной деятельностью признается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Согласно пункту  12  статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог (пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ).

Требования к содержанию автомобильных дорог Чойского района также  согласованы  в контракте, в том числе в   приложении №3  к контракту  от 30.05.2018.

Учитывая, что истец не обеспечил соблюдение требований, указанных в техническом задании ( приложение № 3 контракта)   по состоянию на  30 (28.02) число  отчетного   месяца, что подтверждается промежуточными и итоговыми ведомостями, в которых отражены выявленные при  приемке выполненных работ дефекты качества   уровня содержания автомобильных дорог, уменьшение ответчиком стоимости  выполненных работ  на  сумму  1852441 руб.  и отказ   от их оплаты  соответствует  положениям  статьи 711 и 753 ГК РФ.

Истец получил оплату работ в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 контракта, на основании представленного им  пакета документов, предусмотренных пунктом 6.2 контракта.

Работы с выявленными  дефектами,  которые нашли отражение  в промежуточных и итоговых ведомостях, составляемых   ежемесячно   по факту  проверки  качества и объемов выполненных работ, оплате не подлежат.  

По представленным в материалы дела доказательствам суд не установил нарушение ответчиком требований закона и условий  контракта при  отказе   от  оплаты  работ, выполненных  несвоевременно и некачественно.

После устранения недостатков в работах, указанных в промежуточных и итоговых ведомостях, на основании которых состоялось уменьшение  стоимости работ, выполненных  с нарушениями требований технического задания, истец получил  право на  оплату  работ, выполненных в другом периоде,  при выполнении которых были учтены ранее выявленные и отраженные  в  ведомостях дефекты  и  соблюдены   требования,  предусмотренные  в техническом задании. 

Оплата работ за другой период, когда работы были выполнены своевременно и качественно, не порождает у истца права требовать оплаты   работ, ранее выполненных некачественно, а у ответчика обязанности   по их оплате. 

Учитывая отсутствие  у  истца  права  требовать оплату   ранее  выполненных работ, в которых  имелись дефекты  на дату  их  сдачи  и приемки,  оснований  для удовлетворения  иска не имеется. 

В связи с отказом в удовлетворении иска,   судебные расходы  истца возмещению не подлежат.    

На основании вышеизложенного   и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении  иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья

О.Л. Новикова