ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А 

http://13aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-64723/2023

11 февраля 2025 года

г. Санкт-Петербург

 Резолютивная часть постановления объявлена 10 февраля 2025 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 11 февраля 2025 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

в составе: председательствующего Масенковой И.В. судей Пивцаева Е.И., Семиглазова В.А. при ведении протокола судебного заседания: ФИО1 при участии: 

от истца (заявителя): ФИО2 по доверенности от 08.11.2024 от ответчика (должника): ФИО3 по доверенности от 01.01.2025  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-30811/2024) акционерного общества «ЛОЭКС- Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.08.2024 по делу № А56-64723/2023 (судья Сурков А.А.), принятое  

по иску общества с ограниченной ответственностью «РИЭСК-СПБ»  

к акционерному обществу «ЛОЭКС-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»  

о взыскании, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «РИЭСК-СПБ» (далее – истец, Общество «РИЭСК-СПБ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской Области» (далее – Общество «ЛОЭСК») о взыскании по договорам подряда: № 00- 0360/2020 РДПДР-7, 00-0360/2020 ФИО4, 00-0360/2020 РДПДР-11, 00-0360/2020 РДПДР-13, 00-0360/2020 РДПДР-15, 000360/2020 РДПДР-16, 00-0561/2019 ПДР, 00- 0360/2020 РДПДР-17, 00-0360/2020 РДПДР18, 00-0360/2020 РДПДР-22, 00-0748/2021 ПДР, 00-0360/2020 РДПДР-6, 000360/2020 РДПДР-8, 00-0360/2020 РДПДР-10, 00- 0360/2020 РДПДР-14, 000360/2020 РДПДР-16, 00- 0360/2020 РДПДР-19, 00-0360/2020 РДПДР-20, 000633/2021 РДПДР-2, 00-0633/2021 РДПДР-4, 00-0633/2021 РДПДР-5, 00- 0633/2021 РДПДР-1, 00-0633/2021 РДПДР-3, 00- 0633/2021 РДПДР-7, 00-0633/2021 РДПДР-8, 00-0633/2021 РДПДР-9, 00-0633/2021 РДПДР10, 00-0633/2021 РДПДР-11, 00- 

0633/2021 РДПДР-12, 00-0633/2021 РДПДР-14, 00- 0633/2021 РДПДР-15, 000633/2021 РДПДР-16, 00-0562/2019 ПДР, 00-0002/2019 РДПДР21, 00-0633/2021 РДПДР-25, 00-0746/2021 ПДР, 00-0747/2021 ПДР, 00-0757/2021 ПДР, 00-0896/2021 ПДР, 00-0994/2018 ПДР, 00-0750/2021 ПДР, 20-097/2022 ПДР (далее – Договоры): 22 348 371,61 руб. задолженности.  

От истца поступило заявление об уточнении заявленных требований, просил взыскать 21 951 012,01 руб. задолженности, 3 780 342,62 руб. неустойки за просрочку оплаты выполненных работ. Уточнение принято судом в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

Решением суда от 13.08.2024 исковые требования удовлетворены частично, с акционерного общества «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РИЭСК-СПБ» взыскан 21 806 576,98 руб. задолженности, 1 840 777,06 руб. неустойки, 134 742 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В остальной части в иске отказано.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой он, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт об уменьшении подлежащей взысканию с ответчика суммы основного долга, а также просит признать выводы суда первой инстанции о невозможности завершения работ истцом по вине ответчика и праве истца расторгнуть договоры в одностороннем порядке не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.  

Истцом в материалы дела поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он доводы жалобы по существу оспаривает и просит обжалуемое решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

К дате судебного заседания в материалы дела от сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения по делу.  

В судебное заседание явились представители сторон спора, поддержали ходатайства об утверждении по делу мирового соглашения, на их удовлетворении настаивали.  

Судом апелляционной инстанции представленное сторонами мировое соглашение проверено на соответствие требованиям действующего законодательства, установлены полномочия лиц на подписание соглашения.  

В соответствии с ч.1 ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.  

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (ч.3 ст.139 АПК РФ).  

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело (ч.1 ст.141 АПК РФ).  

В силу ч.6 ст.141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.  

В соответствии с ч.7 ст.141 АПК РФ при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.  

Исследовав и оценив условия мирового соглашения по настоящему делу и проверив их на соответствие закону, апелляционный суд полагает, что данное мировое соглашение не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.  

Последствия заключения мирового соглашения по делу сторонам известны и понятны.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что мировое соглашение подлежит утверждению на основании ст. 141 АПК РФ.  

Последствием утверждения арбитражным судом мирового соглашения на условиях, согласованных сторонами, является прекращение производства по делу (ч. 2 ст. 150 АПК РФ).  

Из разъяснений, содержащихся в п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 следует, что прекращая производство по делу, арбитражный суд апелляционной инстанции со ссылкой на ст. 151 АПК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ решает вопрос о возврате суммы государственной пошлины, уплаченной как при подаче апелляционной жалобы, так и при рассмотрении дела судом первой инстанции.  

В силу абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.  

Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае: прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.  

В соответствии с п. 3 ст. 333.40 НК РФ обществу с ограниченной ответственностью «РИЭСК–СПб» из федерального бюджета подлежит возврату 67 371 руб. госпошлины, уплаченной при подаче иска.  

Акционерному обществу «ЛОЭСК» из федерального бюджета подлежит возврату 1 500 руб. госпошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.  

Руководствуясь статьями 139-140, 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «РИЭСК-СПб» и АО «ЛОЭСК», на следующих условиях:  

«Истец — ООО «РИЭСК-СПб» (далее по тексту - Истец), в лице Генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, Ответчик - АО «ЛОЭСК» (далее по тексту — Ответчик), в лице Заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ФИО6, действующей на основании доверенности № 499/2024 от 19.12.2024, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях мирного урегулирования спора по делу № А56-64723/2023, рассматриваемому  

Тринадцатым арбитражным апелляционным судом, руководствуясь статьями 139141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение (далее - мировое соглашение) о нижеследующем:  

1. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что: 

(а) задолженность (основной долг) в общей сумме 21 806 576 (двадцать один миллион восемьсот шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 98 коп., в том числе НДС 20%, по договорам подряда (заявкам к рамочным договорам подряда):  

 п/п  

 №№ /дата Договора/Заявки  

Сумма основного долга, руб. с НДС 20% 

1 

2 

3 

1 

00-0633/2021 РДПДР-2 от  

22.11.2021 

39 538,75 

2 

00-0633/2021 РДПДР-7 от  

13.05.2022 

69 905.57 

3 

00-0633/2021 РДПДР-9 от  

13.05.2022 

208 987,96 

1.1. Ответчик признает: 

4 

00-0633/2021 РДПДР-11 от  

13.05.2022 

10 200,00 

5 

00-0633/2021 РДПДР-12 от  

13.05.2022 

235 048,72 

6 

00-0633/2021 РДПДР-13 от  

13.05.2022 

832 133,64 

7 

00-0633/2021 РДПДР-14 от  

23.06.2022 

48 960,00 

8 

00-0633/2021 РДПДР-15 от  

27.06.2022 

117 925,00 . 

9 

00-0633/2021 РДПДР-16 от  

27.06.2022 

35 700,00 

10 

00-0337/2022 РДПДР-1 от  

18.08.2022 

144 435,60 

11 

00-0337/2022 РДПДР-3 от  

06.09.2022 

285 483,08 

12 

00-0337/2022 РДПДР-4 от  

26.09.2022 

145 354,30 

13 

00-0337/2022 РДПДР-5 от  

04.10.2022 

278 227.64 

14 

00-0351/2022 РДПДР-6 от  

22.09.2022 

303 300,00 

15 

00-0747/2021 ПДР от  

02.11.2022 

568 924,45 

16 

00-0757/2021 ПДР от  

08.11.2022 

10 200,00 

17 

00-0564/2019 ПДР от  

18.06.2019 

1 077 235,33 

18 

00-0994/2018 ПДР от  

1 081 634,39 

20 

00-0360/2020 РДПДР-19 от  

30.09.2021 

46 970,17 

21 

00-0360/2020 РДПДР-20 от  

30.09.2021 

42 980,94 

22 

00-0633/2021 РДПДР-4 от  

17.01.2022 

4 073 551,62 

23 

00-0633/2021 РДПДР-5 от  

17.01.2022 

41 154,45 

24 

00-0633/2021 РДПДР-10 от  

13.05.2022 

2 733 758,75 

25 

00-0351/2022 РДПДР-8 от  

22.09.2022 

50 550,00 

26 

00-0355/2022 РДПДР-1 от  

29.11.2022 

37 941,35 

27 

00-0746/2021 ПДР от  

02.11.2021 

1 790 723,04 

28 

00-0749/2021 ПДР от  

02.11.2021 

34 484,29 

29 

00-0750/2021 ПДР от  

02.11.2021 

635 923,55 

30 

00-0896/2021 ПДР от  

29.12.2021 

6 192 283,61 

Итого сумма, руб., с НДС 20% 

 21 806 576,98 

(б) неустойку в пользу Истца за нарушение сроков оплаты по договорам подряда (заявкам к рамочным договорам подряда) в общей сумме 2 663 227 (два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести двадцать семь) руб. 11 коп.:  

 № п/п 

 № /дата Договора/Заявки  

Размер неустойки, руб. 

1 

2 

3 

1 

00-0633/2021 РДПДР-2 от  

22.11.2021 

- 

2 

00-0633/2021 РДПДР-7 от  

13.05.2022 

- 

3 

00-0633/2021 РДПДР-9 от  

13.05.2022 

- 

4 

00-0633/2021 РДПДР-11 от  

13.05.2022 

- 

5 

00-0633/2021 РДПДР-12 от  

13.05.2022 

6 

00-0633/2021 РДПДР-13 от  

13.05.2022 

- 

7 

00-0633/2021 РДПДР-14 от  

23.06.2022 

- 

8 

00-0633/2021 РДПДР-15 от  

27.06.2022 

- 

9 

00-0633/2021 РДПДР-16 от  

- 

11 

00-0337/2022 РДПДР-3 от  

06.09.2022 

- 

12 

00-0337/2022 РДПДР-4 от  

26.09.2022 

- 

13 

00-0337/2022 РДПДР-5 от  

04.10.2022 

- 

14 

00-0351/2022 РДПДР-6 от  

22.09.2022 

- 

15 

00-0747/2021 ПДР от  

02.11.2022 

- 

16 

00-0757/2021 ПДР от  

08.11.2022 

- 

17 

00-0564/2019 ПДР от  

18.06.2019 

- 

18 

00-0994/2018 ПДР от  

21.08.2018 

- 

19 

00-0360/2020 РДПДР-17 от  

14.09.2021 

126 612,16 

20 

00-0360/2020 РДПДР-19 от  

30.09.2021 

9 394,03 

21 

00-0360/2020 РДПДР-20 от  

30.09.2021 

8 940,04 

22 

00-0633/2021 РДПДР-4 от  

17.01.2022 

225 530,48 

23 

00-0633/2021 РДПДР-5 от  

17.01.2022 

8 230,89 

24 

00-0633/2021 РДПДР-10 от  

13.05.2022 

546 751,75 

25 

00-0351/2022 РДПДР-8 от  

22.09.2022 

5 055,00 

26 

00-0355/2022 РДПДР-1 от  

29.11.2022 

2 029,86 

27 

00-0746/2021 ПДР от  

02.11.2021 

358 144,61 

28 

00-0749/2021 ПДР от  

02.11.2021 

6 896,86 

29 

00-0750/2021 ПДР от  

02.11.2021 

127 184,71 

30 

00-0896/2021 ПДР от  

29.12.2021 

1 238 456,72 

Итого сумма, руб. 

2 663 227,11 

1.2. Истец признает неустойку в пользу Ответчика за нарушение Истцом сроков выполнения работ по договорам подряда (заявкам к рамочным договорам подряда) в общей сумме 822 450 (восемьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят) руб. 05 коп.:  

 № п/п 

 № /дата Договора/Заявки 

Размер неустойки, руб. 

2 

00-0633/2021 РДПДР-7 от  

13.05.2022 

- 

3 

00-0633/2021 РДПДР-9 от  

13.05.2022 

- 

4 

00-0633/2021 РДПДР-11 от  

13.05.2022 

- 

5 

00-0633/2021 РДПДР-12 от  

13.05.2022 

- 

6 

00-0633/2021 РДПДР-13 от  

13.05.2022 

- 

7 

00-0633/202] РДПДР-14 от  

23.06.2022 

- 

8 

00-0633/2021 ФИО7 от  

27.06.2022 

- 

9 

00-0633/2021 РДПДР-16 от  

27.06.2022 

- 

10 

00-0337/2022 РДПДР-1 от  

18.08.2022 

- 

11 

00-0337/2022 РДПДР-3 от  

06.09.2022 

- 

12 

00-0337/2022 РДПДР-4 от  

26.09.2022 

- 

13 

00-0337/2022 РДПДР-5 от  

04.10.2022 

- 

14 

00-0351/2022 РДПДР-6 от  

22.09.2022 

- 

15 

00-0747/2021 ПДР от  

02.11.2022 

95 579,31 

16 

00-0757/2021 ПДР от  

08.11.2022 

- 

17 

00-0564/2019 ПДР от  

18.06.2019 

21 385,62 

18 

00-0994/2018 ПДР от  

21.08.2018 

15 906,40 

19 

00-0360/2020 РДПДР-17 от  

14.09.2021 

105 921,15 

20 

00-0360/2020 РДПДР-19 от  

30.09.2021 

6 951,58 

21 

00-0360/2020 РДПДР-20 от  

30.09.2021 

6 861,15 

22 

00-0633/2021 РДПДР-4 от  

17.01.2022 

- 

23 

00-0633/2021 РДПДР-5 от  

17.01.2022 

- 

24 

00-0633/2021 РДПДР-10 от  

13.05.2022 

225 824,86 

25 

00-0351/2022 РДПДР-8 от  

22.09.2022 

- 

26 

00-0355/2022 РДПДР-1 от  

- 

29.11.2022 

27 

00-0746/2021 ПДР от  

02.11.2021 

14 668,16 

28 

00-0749/2021 ПДР от  

02.11.2021 

8 414,17 

29 

00-0750/2021 ПДР от  

02.11.2021 

41 074,65 

30 

00-0896/2021 ПДР от  

29.12.2021 

279 863,00 

Итого сумма, руб. 

822 450,05 

2. Стороны производят зачет встречных взаимных однородных требований, а именно, суммы неустойки, подлежащей взысканию с Истца в размере 822 450,05 руб., и суммы неустойки, подлежащей взысканию с Ответчика в размере 2 663 227,11 руб. Итого сумма неустойки, подлежащая взысканию с Ответчика в результате зачета взаимных однородных требований, составляет 1 840 777,06 руб.  

3. В соответствии с мировым соглашением Ответчик обязуется выплатить Истцу денежные средства в общем размере: 23 647 354 (двадцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 04 коп., из них задолженность в размере 21 806 576 (двадцать один миллион восемьсот шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 98 коп. в том числе НДС 20% и 1 840 777 (один миллион восемьсот сорок тысяч семьсот семьдесят семь) руб. 06 копеек неустойки, в рассрочку в соответствии со следующим графиком оплаты:  

Срок оплаты  

Общая сумма,  

подлежащая оплате, руб.  

Сумма платежа 

оплаты, руб.  

Остаток общей  

суммы подлежащей

оплате, руб.  

до 09.02.2025  

23 647 354,04  

1 000 000,00  

22 647 354,04  

до 28.02.2025  

10 000 000,00  

12 647 354,04  

до 31.03.2025  

12 647 354,04  

0 

Стороны пришли к соглашению, что на указанную сумму долга начисляются проценты по денежному обязательству за пользование Ответчиком денежными средствами в размере 21 (двадцать один) % годовых от суммы оставшегося долга, начиная с 10.02.2025 по даты его оплаты. Проценты исчисляются и выплачиваются Ответчиком в сроки согласно графика оплат, предусмотренные для оплаты долга согласно настоящему пункту мирового соглашения.  

4. Все оплаты производятся путем перевода денежных средств на расчетный счет Истца в соответствии со сроками оплаты, указанными в графике оплаты в п.З настоящего мирового соглашения. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Ответчика.  

5. Во всем остальном, что не предусмотрено мировым соглашением Стороны отказываются взаимно от предъявления всех иных требований, связанных с исполнением договоров (заявок), указанных в п.1 настоящего мирового соглашения, а также от предъявления любых иных требований друг к другу, связанных с затратами на оказание юридической помощи (расходов на представителя) по делу № А56-64723/2023.  

6. По мировому соглашению Ответчик возмещает Истцу судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска судом первой инстанции в размере 50% уплаченной госпошлины - 67 371 (шестьдесят семь тысяч триста  

семьдесят один) руб. 00 коп. Оставшиеся 50% государственной пошлины, перечисленной Истцом, подлежат возврату в порядке, предусмотренном подпунктом 3 п. 9 ст. 141 АПК РФ.  

7. Стороны подтверждают, что при заключении данного мирового соглашения, права третьих лиц не затронуты. Ответчиком получены все необходимые согласия и разрешения третьих лиц, для заключения настоящего мирового соглашения.  

8. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.  

9. Стороны подтверждают, что в случае не перечисления Ответчиком платежей по графику платежей, предусмотренному в п. 3 мирового соглашения, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.  

10. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Арбитражного суда. Мировое соглашения вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом.  

11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны».  

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.08.2024 по делу № А56-64723/2023 отменить.  

Производство по делу и по апелляционной жалобе (регистрационный номер 13АП-30811/2024) прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «РИЭСК –СПб» из федерального бюджета 67 371 руб. госпошлины, уплаченной при подаче иска.  

Возвратить акционерному обществу «ЛОЭСК» 1 500 руб. госпошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий И.В. Масенкова Судьи Е.И. Пивцаев  

 В.А. Семиглазов