АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, 

<

...>, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-24810/24

г. Уфа

04 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 25.03.2025

Полный текст решения изготовлен 04.04.2025

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола помощником судьи Ибрагимовой А.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

 Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "ВентСервис" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

об обязании безвозмездно в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по Муниципальному контракту № 61 от 01.06.2022 г., устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...> (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований от 04.02.2025)

при участии в судебном заседании (до перерыва):

от истца – ФИО1, доверенность от 27.04.2024г., паспорт, диплом;

от ответчика – не явились, извещены;

Администрация муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан /далее – истец/ обратилась в Арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ВентСервис" /далее – ответчик/ об обязании Общество с ограниченной ответственностью «ВентСервис» безвозмездно в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по Муниципальному контракту № 61 от 01.06.2022 г., устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...>, а именно произвести следующие виды работ:

№

Наименование работ

Единица измерения

Количество

Кровля в осях г-е; 1-6

1

Разборка покрытии кровель из рулонных материалов 2слоя.

м2

880,36

2

Разборка покрытии кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.

п.м.

282,64

3

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 54мм

м3

47,53944

4

Демонтаж теплоизоляции (экструзии толщиной 50мм).

м3

44,018

5

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.

м2

880,36

Устройство кровли техиониколь стандарт

6

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм.

м2

880,36

7

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер.

м2

880,36

8

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.

м2

880,36

9

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100 мм

м2

880,36

10

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).

м2

880,36

11

Нарезка деформационных швов в стяжке.

п.м.

400

12

Нанесения гидроизоляции (Праймпрование поверхности Праймер Техиониколь)

м2

880,36

13

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:

1 слой - Унифлекс ВЕНТ И

2 слой - Технооласт ПЛАМЯ СТОП

м2

880,36

14

Устройство кровельных воронок

шт.

4

15

Устройство аэраторов диаметром 1 10мм.

шт.

9

16

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.

м2

84,792

17

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм

п.м.

282,64

18

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

131,78

Кровля в осях а-в; 1-6

19

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 2слоя.

м2

860,9

20

Разборка покрытий кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.

п.м.

303,16

21

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 102мм

м3

87,81 18

22

Демонтаж теплоизоляции (экструзии толщиной 50мм).

м3

43,045

23

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.

м2

860,9

Устройство кровли техиониколь стандарт

24

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм.

м2

860,9

25

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер.

м2

860,9

26

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.

м2

860,9

27

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100мм

м2

860,9

28

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).

м2

860,9

29

нарезка деформационных швов в стяжке.

п.м

400

30

Нанесения гидроизоляции (Праймирование поверхности Праймер Технониколь)

м2

860,9

31

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:1 слой - Унифлекс BEНT П 2 слой - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

м2

860,9

32

Устройство кровельных воронок

шт.

4

33

Устройство аэраторов диаметром 110мм.

шт.

9

34

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.

м2

90,948

35

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм

п.м.

303,16

36

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

152,3

Кровля в осях в-г; 2-5

37

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 2слоя.

м2

525,57

38

Разборка покрытий кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.

п.м.

126,48

39

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 50мм

м3

26,2785

40

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.

м2

525,57

Устройство кровли технониколь стандарт

41

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм.

м2

525,57

42

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер.

м2

525,57

43

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.

м2

525,57

44

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100 мм

м2

525,57

45

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).

м2

525,57

46

Нарезка деформационных швов в стяжке.

п.м.

249

47

Нанесения гидроизоляции (Праймирование поверхности Праймер Технониколь)

м2

525,57

48

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:

1 слой - Унифлекс ВЕНТ П

2слой - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

м2

525,57

49

Устройство кровельных воронок

шт.

4

50

Устройство аэраторов диаметром 110мм.

шт.

6

51

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.

м2

37,944

52

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм

п.м.

126,48

53

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

25,58

Зенитные фонари

54

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

25,58

55

Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 20 м2

м2

73,5185

56

Остекление зенитных фонарей двухкамерными стеклопакетами.

м2

147,037

Отделка 1 этаж

57

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

22,66

58

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.

м2

22,66

59

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

22,66

60

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

22,66

61

Демонтаж керамической плитки со стен

м2

57,24

62

Очистка стен металлическими щетками от масляных красок.

м2

57,24

63

Нанесение на стены бетоноконтакт.

м2

57,24

64

Выравнивание штукатурки стен до 10мм.

м2

57,24

65

Облицовка стен керамической плиткой.

м2

57,24

Отделка 2 этаж

66

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

581,3

67

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.

м2

581,3

68

Сборка лесов высотой 8,5м горизонтальной проекции.

м2

558

69

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

581,3

70

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

581,3

71

Демонтаж керамической плитки со стен

м2

33,66

72

Очистка стен металлическими щетками от масляных красок.

м2

33,66

73

Нанесение на стены бетоноконтакт.

м2

33,66

74

Выравнивание штукатурки стен до 10мм.

м2

33,66

75

Облицовка стен керамической плиткой.

м2

33,66

Отделка 3 этаж

76

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

159.5

77

Обработка степ и потолков антигрибковыми составами.

м2

159,5

78

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

159,5

79

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

159,5

80

Демонтаж керамической плитки со стен

м2

75,6

81

Очистка степ металлическими щетками от масляных красок.

м2

75,6

82

Нанесение па стены бетоноконтакт.

м2

75,6

83

Выравнивание штукатурки стен до 10мм.

м2

75,6

84

Облицовка стен керамической плиткой.

м2

75,6

Отделка 4 этаж

85

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

180,3

86

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.

м2

180,3

87

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

180,3

88

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

180,3

Лестничные клетки

89

Демонтаж керамогранита.

м2

273,6

90

Демонтаж стяжек бетонных толщиной 30мм.

м2

273,6

91

Очистка лестничных маршей от масляных красок.

м2

273,6

92

Обработка лестничных маршей бетоноконтакт.

м2

273,6

93

Устройство стяжек бетонных толщиной 30мм.

м2

273,6

94

Укладка керамогранита 300*300мм

м2

273,6

Актовый зал

95

Демонтаж ламината.

м2

184,5

96

Демонтаж плинтусов пластиковых

м.п.

54,8

97

Устройство выравнивающих стяжек толщиной 40мм

м2

184.5

98

Устройство наливных полов до 5 мм.

м2

184,5

99

Устройство напольного покрытия из кварц винила

м2

184,5

100

Устройство пластиковых плинтусов

м.п.

54,8

(согласно уточнению, принятому в порядке ст. 49 АПК РФ.)

Частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания путем направления копии судебного акта не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Абзацем первым части 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные извещения, юридическим лицам направляются по адресу юридического лица. При этом адрес юридического лица определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

На основании статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом в том случае, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Доказательства надлежащего извещения ответчика содержатся в материалах дела. 

От ответчика отзыв не поступал.

В судебном заседании истец уточненные исковые требования поддержал.

Представители ответчика в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу, в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав обстоятельства и материалы дела, заслушав истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Между Администрацией муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и Обществом с ограниченной ответственностью "ВентСервис" заключен Муниципальный контракт № 61 от 01.06.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...>, а именно п (далее - Объект).

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона N 44-ФЗ контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По смыслу статьи 768 ГК РФ к отношениям по контрактам применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, а в части, не урегулированной им - закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Цена Контракта составила 97 823 527 руб. 25 коп. (Дополнительное соглашение № 8 от 31.10.2024 г.). Выполненные работы оплачены истцом в полном объеме. По окончании произведенных работ заказчик принял их у подрядчика, по в ходе эксплуатации результата работ был выявлен ряд недостатков. Подрядчик их не устранил, поэтому заказчик был вынужден обратиться с иском в суд.

В соответствии с пунктом 1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность в установленный Контрактом срок выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

В соответствии с пунктом 1.3. работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту), графиком выполнения работ (Приложение №2 к Контракту), а также согласно строительным нормам и правилам, ГОСТ, действующему законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.

В соответствии с п. 11.1. Подрядчик гарантирует:

возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

высокое качество всех работ;

своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Гарантийный срок па качество выполненных работ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами последнего документа о приемке (п. 11.2 Контракта), т.е. до октября 2028 года.

В процессе эксплуатации МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск Республики Башкортостан были выявлены дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств. По итогам выявленных нарушений были составлены рекламационные акты № 1 от 18.01.2024 г., № 2 от 16.04.2024 г., № 3 от 21.06.2024 г.

Подрядчику, направлялись извещения для участия в составлении рекламационного акта (16.01.2024 г., 12.04.2024 г., 21.06.2024 г.). В установленный Контрактом срок представитель Подрядчика на составление рекламационных актов не являлся, в связи с чем Заказчик составил односторонние рекламационные акты (п. 11.4, п. 11.5 Контракта).

О результатах выявленных недостатков, зафиксированных в Рекламационных актах Истец сообщил Ответчику (претензии от 29.01.2024 г., от 27.05.2024 г., письма от 11.06.2024 г, 14.06.2024 г., 18.06.2024 г., 25.06.2024 г.) предложив безвозмездно устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...> в рамках гарантийного срока.

Ответчиком указанное письмо оставлено без удовлетворения.

В связи с тем, что в добровольном порядке недостатки не устранены, ответчиком в рамках гарантийных обязательств работы не выполнены, а администрация лишена возможности принять спорное имущество в муниципальную собственность в надлежащем состоянии, истец обратился в суд с настоящим иском.

От истца поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Для проверки доводов сторон определением суда от 15.10.2024 по делу назначена судебная комиссионная строительно-техническая экспертиза, производство которой поручиено экспертам Общества с ограниченной ответственностью «Служба Технического заказчика Консалтинг» ФИО2, имеющему высшее образование, специальность строительство, общий стаж работы в сфере строительства с 2016 г., ФИО3, имеющей высшее образование, специальность «Экспертиза и управление недвижимостью», стаж с 2013 г.

13.12.2024 поступило заключение эксперта.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

Вопрос№ 1:

1.Соответствуют ли фактически выполненные работы по контракту № 61 от 01.06.2022 г., по качеству условиям контракта, проектно-сметной документации, действующим строительным, техническим, санитарным и иным нормам, ГОСТу?

Ответ на 1 вопрос: 

Нет не соответствует. По результатам проведённого исследования, экспертами ООО «СТЗ Консалтинг» установлены недостатки:

1 На поверхности кровли гидроизоляционный слой имеет дефекты в виде: гофр, отсутствие вытека из-под боковой кромки, вздутия, разрывов гидроизоляции.

2. Дефекты в части отделочных покрытий:

 2.1 На лестничных клетках напольного покрытия в виде керамической плитки, по всей поверхности присутствует изменение характера звучания, что свидетельствует об отсутствие сцепления к нижележащим элементам пола.

 2.2 В помещениях санузлов 2-го, 3-го, 4-го этажей обнаружены протечки кровельного покрытия.

2.3 В помещениях санузлов 1-го, 2-го, 3-го этажей обнаружены пустоты, выпадение отдельных плиток, трещины в швах.

 Вопрос № 2:

2. Если имеются недостатки выполненных работ, указать их перечень, характер недостатков (явные, скрытые, существенные, несущественные, неустранимые, устранимые,) причины их возникновения (некачественно выполненные работы, эксплуатационный характер), стоимость и способ устранения недостатков выполненных работ? 

Ответ на 2 вопрос: 

Недостатки качества работ, выполненных по договору №61 от 01.06.2022 - Имеют место быть отражены:

в таблице №1 Дефектная ведомость по натурному исследованию;

в таблице №2 Дефектная ведомость на вскрытие участков кровли;

в таблице №3 Фотоматериалы дефектов;

на плане кровли Схема с указанием метаположения недостатков и мест вскрытий

участков;

в таблице №4 Ведомость объемов работ по устранению выявленных замечаний.

Стоимость устранения выявленных недостатков/дефектов строительно-монтажных работ по устройству кровельного покрытия, отделочных работ здания расположенного по адресу: 

<

...>, согласно Локального сметного расчета №1 составляет: 31 750 959, 58 рублей (в т.ч. НДС (20%) 5 291 826,60 рублей.

 Вопрос № 3:

3. Какова стоимость качественно и некачественно выполненных работ?

Ответ на 3 вопрос: 

 Эксперты ООО «СТЗ Консалтинг» в полном объеме ответили на выше поставленный вопрос в выводах.

Экспертное заключение полностью соответствуют требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса РФ, оно изготовлено в письменной форме, содержит описание проведенных исследований, их результаты, ссылку на использованные нормативные документы. В заключении приведены выводы эксперта об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Согласно пунктам 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона N 273-ФЗ, пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) организация дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение, которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 кодекса).

Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Согласно пункту 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

В силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (часть 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 737 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен (пункт 2).

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая результаты судебной экспертизы и конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению.

В силу п. 1.1. ч.1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ВентСервис» безвозмездно в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по Муниципальному контракту № 61 от 01.06.2022 г., устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск, расположенного по адресу: 453431, Республика Башкортостан, 

<

...>, а именно произвести следующие виды работ:

№

Наименование работ

Единица измерения

Количество

Кровля в осях г-е; 1-6

1

Разборка покрытии кровель из рулонных материалов 2слоя.

м2

880,36

2

Разборка покрытии кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.

п.м.

282,64

3

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 54мм

м3

47,53944

4

Демонтаж теплоизоляции (экструзии толщиной 50мм).

м3

44,018

5

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.

м2

880,36

Устройство кровли техиониколь стандарт

6

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм.

м2

880,36

7

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер.

м2

880,36

8

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.

м2

880,36

9

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100 мм

м2

880,36

10

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).

м2

880,36

11

Нарезка деформационных швов в стяжке.

п.м.

400

12

Нанесения гидроизоляции (Праймпрование поверхности Праймер Техиониколь)

м2

880,36

13

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:

1 слой - Унифлекс ВЕНТ И

2 слой - Технооласт ПЛАМЯ СТОП

м2

880,36

14

Устройство кровельных воронок

шт.

4

15

Устройство аэраторов диаметром 1 10мм.

шт.

9

16

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.

м2

84,792

17

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм

п.м.

282,64

18

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

131,78

Кровля в осях а-в; 1-6

19

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 2слоя.

м2

860,9

20

Разборка покрытий кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.

п.м.

303,16

21

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 102мм

м3

87,81 18

22

Демонтаж теплоизоляции (экструзии толщиной 50мм).

м3

43,045

23

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.

м2

860,9

Устройство кровли техиониколь стандарт

24

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм.

м2

860,9

25

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер.

м2

860,9

26

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.

м2

860,9

27

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100мм

м2

860,9

28

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).

м2

860,9

29

нарезка деформационных швов в стяжке.

п.м

400

30

Нанесения гидроизоляции (Праймирование поверхности Праймер Технониколь)

м2

860,9

31

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:1 слой - Унифлекс BEНT П 2 слой - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

м2

860,9

32

Устройство кровельных воронок

шт.

4

33

Устройство аэраторов диаметром 110мм.

шт.

9

34

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.

м2

90,948

35

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм

п.м.

303,16

36

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

152,3

Кровля в осях в-г; 2-5

37

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 2слоя.

м2

525,57

38

Разборка покрытий кровель парапетов и примыканий вентиляционных каналов до 600мм из рулонных материалов 2 слоя.

п.м.

126,48

39

Разборка бетонных поверхностей (стяжки) толщиной 50мм

м3

26,2785

40

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 4 слоя.

м2

525,57

Устройство кровли технониколь стандарт

41

Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм.

м2

525,57

42

Устройство пароизоляции в один слой Технобарьер.

м2

525,57

43

Устройство теплоизоляционного слоя из XPS ТЕХИОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50мм.

м2

525,57

44

Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия толщиной 100 мм

м2

525,57

45

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (при помощи бетононасоса) толщиной 60мм (сетка 100*100*3мм).

м2

525,57

46

Нарезка деформационных швов в стяжке.

п.м.

249

47

Нанесения гидроизоляции (Праймирование поверхности Праймер Технониколь)

м2

525,57

48

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя:

1 слой - Унифлекс ВЕНТ П

2слой - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

м2

525,57

49

Устройство кровельных воронок

шт.

4

50

Устройство аэраторов диаметром 110мм.

шт.

6

51

Оштукатуривание вертикальных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой парапетов вентиляционных каналов.

м2

37,944

52

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм

п.м.

126,48

53

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

25,58

Зенитные фонари

54

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимная планка)

м.п.

25,58

55

Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 20 м2

м2

73,5185

56

Остекление зенитных фонарей двухкамерными стеклопакетами.

м2

147,037

Отделка 1 этаж

57

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

22,66

58

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.

м2

22,66

59

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

22,66

60

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

22,66

61

Демонтаж керамической плитки со стен

м2

57,24

62

Очистка стен металлическими щетками от масляных красок.

м2

57,24

63

Нанесение на стены бетоноконтакт.

м2

57,24

64

Выравнивание штукатурки стен до 10мм.

м2

57,24

65

Облицовка стен керамической плиткой.

м2

57,24

Отделка 2 этаж

66

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

581,3

67

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.

м2

581,3

68

Сборка лесов высотой 8,5м горизонтальной проекции.

м2

558

69

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

581,3

70

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

581,3

71

Демонтаж керамической плитки со стен

м2

33,66

72

Очистка стен металлическими щетками от масляных красок.

м2

33,66

73

Нанесение на стены бетоноконтакт.

м2

33,66

74

Выравнивание штукатурки стен до 10мм.

м2

33,66

75

Облицовка стен керамической плиткой.

м2

33,66

Отделка 3 этаж

76

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

159.5

77

Обработка степ и потолков антигрибковыми составами.

м2

159,5

78

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

159,5

79

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

159,5

80

Демонтаж керамической плитки со стен

м2

75,6

81

Очистка степ металлическими щетками от масляных красок.

м2

75,6

82

Нанесение па стены бетоноконтакт.

м2

75,6

83

Выравнивание штукатурки стен до 10мм.

м2

75,6

84

Облицовка стен керамической плиткой.

м2

75,6

Отделка 4 этаж

85

Очистка стен и потолков металлическими щетками.

м2

180,3

86

Обработка стен и потолков антигрибковыми составами.

м2

180,3

87

Выравнивание штукатурки стен и потолков до 10мм.

м2

180,3

88

Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами.

м2

180,3

Лестничные клетки

89

Демонтаж керамогранита.

м2

273,6

90

Демонтаж стяжек бетонных толщиной 30мм.

м2

273,6

91

Очистка лестничных маршей от масляных красок.

м2

273,6

92

Обработка лестничных маршей бетоноконтакт.

м2

273,6

93

Устройство стяжек бетонных толщиной 30мм.

м2

273,6

94

Укладка керамогранита 300*300мм

м2

273,6

Актовый зал

95

Демонтаж ламината.

м2

184,5

96

Демонтаж плинтусов пластиковых

м.п.

54,8

97

Устройство выравнивающих стяжек толщиной 40мм

м2

184.5

98

Устройство наливных полов до 5 мм.

м2

184,5

99

Устройство напольного покрытия из кварц винила

м2

184,5

100

Устройство пластиковых плинтусов

м.п.

54,8

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВентСервис" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) сумму государственной пошлины в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист в доход федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

Судья И.Р. Юсеева