АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 г. Москва 05.07.2019г. Дело № А40-286534/18-151-2063 

Резолютивная часть решения оглашена 05.07.2019г. Решение изготовлено в полном объеме 05.07.2019г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе  

Судьи Щербаковой И.Э, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению иску - Фонда  капитального строительства многоквартирных домов города Москвы (ИНН  

<

***>)  

 к ответчику - АО "Международная корпорация "Атон" (ИНН 

<

***>)  о взыскании 4 360 438 руб. 40 коп.  

от истца – согласно протокола. от ответчика – неявка, извещен.  

УСТАНОВИЛ:

Иск предъявлен о взыскании 4 360 438 руб. 40 коп., в том числе : 3 270 328 руб.  80 коп. неосновательного обогащения, 1 090 109 руб. 60 коп. штрафа.  

 Истец исковые требования поддержал, представил письменные пояснения. 

 Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела в  порядке ст.ст. 121 -123 АПК РФ, в судебное заседание не явился.  

 Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

 Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, обозрев  представленные по делу документы, суд установил, 30.05.2017 Фонд капитального  ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - ФКР Москвы, Заказчик,  Истец) и АО «Международная корпорация «АТОН» (далее - АО «МК «АТОН»,  Генподрядчик, Ответчик) заключили договор № КР-001217-17 на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЗАО г. Москвы по  адресу: ул. Алябьева, д. 8 (далее - Объект), (далее - Договор).  

 В соответствии с пунктом 6.1.1 Договора, Генподрядчик обязан выполнить и  сдать работы по Объекту в объеме и сроки, предусмотренные Договором, и сдать  работы по актам согласно пунктам 1.3, 1.8 Договора.  

 30.05.2017 Заказчик передал, а Генподрядчик принял Объекты для производства  работ по капитальному ремонту, что подтверждается Актом открытия работ.  

 В соответствии с пунктом 3.4. Договора Истец произвел выплату авансового  платежа Ответчику:  

 - по объекту 

<

...> в размере 3 270 328,80 руб.   Это подтверждается платежным поручением от 10.07.2017 № 15943.  

 Вопреки положениям статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ), и обязательств по Договору Генподрядчик нарушил сроки  выполнения работ продолжительностью более 15 дней по Объекту.  

 На основании статьи 715 ГК РФ и согласно пунктам 14.7 и 14.7.6 Договора,  Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием  причиненных убытков в случае нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ  продолжительностью более 15 дней по любому из объектов.  

 В установленные Договором сроки и в порядке статьи 753 ГК РФ и пункта 7.5  Договора Ответчик не уведомил Истца о готовности к сдаче результатов выполненных  работ ни по одной системе по Договору.  

 На основании изложенного, у Генподрядчика возникло неосновательное  обогащение на сумму 3 270 328,80 руб.  

 На основании изложенного, ФКР Москвы был вынужден расторгнуть Договор,  направив 06.07.2018 Ответчику уведомление от 04.07.2018 с приложением Решения от  04.07.2018 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора. В адрес ФКР  Москвы возражения Ответчика по односторонней сделке не поступали.  

 В соответствии с пунктом 12.4.13 Договора, в случае досрочного расторжения  договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям,  указанным в пункте 14.7 Договора, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в  размере, предусмотренном пунктом 228 постановления  

 Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке  привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке  осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций  специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,  направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» (далее - 615-ПП), который закрепляет, что Договор об  оказании услуг должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае  расторжения договора об оказании услуг в одностороннем порядке, подрядная  организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора  об оказании услуг в порядке, установленном договором об оказании услуг.  

 Следовательно, АО «МК «АТОН» обязан уплатить Заказчику штраф. Расчет  штрафных санкций: Стоимость работ по Договору: 10 901 096,01 руб. Сумма  штрафных санкций составляет 10% от стоимости работ: 1 090 109,60 руб.  

 02.10.2018 в адрес Ответчика направлена претензия от 01.10.2018 № ИСХ-КС- 4632/8 с требованием оплатить Истцу штраф в размере 1 090 109,60 руб., однако  указанная претензия осталась без ответа.  

 В соответствии с пунктом 14.13 Договора, в случае расторжения договора в  порядке, установленном разделом 14 Договора, АО «МК «АТОН» обязано возвратить  сумму неиспользованного аванса в течение 5 банковских дней со дня направления  Заказчиком требования о возврате неиспользованного аванса.  

 Согласно части 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения договора  одна из сторон, получив от другой стороны неисполнение обязательства по договору,  не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное  исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие  неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором  либо не вытекает из существа обязательства.  

 11.10.2018 Заказчиком направлено требование АО «МК «АТОН» о возврате  неиспользованного аванса от 09.10.2018 № ИСХ-КС-5300/8. Однако данное требование  Ответчиком не удовлетворено.  

 На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению.  Расходы по госпошлине суд относит на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ. 

 Руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307, 310, 314, 330, 453, 702, 740, 746 ГК РФ, ст. ст.  65, 102, 110, 121-123, 156, 167-171, 180, 319 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "Международная корпорация "Атон" (ИНН 7705942620) в  пользу Фонда капитального строительства многоквартирных домов города Москвы  (ИНН 7701090559) 3 270 328 руб. 80 коп. неосновательного обогащения, 1 090 109  руб. 60 коп. штрафа, 44 802 руб. госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

СУДЬЯ  И.Э. Щербакова