Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Пермь 25.09.2025 № А50-12273/2025 

Резолютивная часть решения объявлена 11.09.2025 Решение в полном объеме изготовлено 25.09.2025  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаптевой М.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гомзяковой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТС" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2010, ИНН: 

<

***>; 614016, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЕЛЬКИНА, Д. 41А, ЭТАЖ 1, ПОМ. 19)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; 618740, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ДОБРЯНКА, УЛ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 2, ОФИС 112)  

о взыскании задолженности, неустойки по договорам субподряда от 07.02.2024 № 23-30/012, от 01.03.2024 № 23-30/018,  

при участии в судебном заседании: от истца - ФИО1 по доверенности от 15.05.2023, паспорт, диплом; от ответчика - не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "УТС" (истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СУ Энергострой" (ответчик) о взыскании задолженности по договорам субподряда от 07.02.2024 № 23-30/012, от 01.03.2024 № 23-30/018 в размере 2 108 010 руб. 62 коп., неустойки в размере 157 749 руб. 86 коп. за период с 15.08.2024 по 27.04.2025.  

Ответчик письменного отзыва на иск не направил; судебное извещение направлено ответчику по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, вручено ответчику 24.06.2025, что подтверждено имеющимся в деле уведомлением о вручении почтового отправления.  

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 АПК РФ непредставление отзыва и неявка в судебное заседание истца, ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.  

Судебном заседании 11.09.2025 представитель истца представил в материалы дела письмо от 26.12.2024 № 27/01-2255; письмо от 27.12.2024 № 23-15/2295; акт выполненного комплекса работ от 28.12.2024 к договору субподряда № 23-30/012 от 07.02.2024; акт выполненного комплекса работ от 28.12.2024 к договору субподряда № 23-30/018 от 01.03.2024, которые приобщены к материалам дела в порядке ст. 159 АПК РФ.  

В судебном заседании 11.09.2025 истец заявил об отказе от исковых требований в части взыскания неустойки в размере 157 749 руб. за период с 15.08.2024 по 27.04.2025.  

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).  

Судом установлено, что отказ от иска в части взыскания неустойки, начисленной за период с 15.08.2024 по 27.04.2025 в размере 157 749 руб. 86 коп. заявлен уполномоченным лицом, содержит собственноручную подпись, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем подлежит принятию судом.  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.  

Исходя из вышеизложенного, производство по делу подлежит прекращению в части взыскания неустойки в размере 157 749 руб. 86 коп. за период с 15.08.2024 по 27.04.2025.  

По результатам исследования материалов дела арбитражным судом установлено следующее.  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор субподряда от 07.02.2024 № 23-30/012, по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок на объекте ПАО «Уралкалий» «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть- Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс. Строительство корпуса среднего дробления с объектами инфраструктуры» выполнить комплекс общестроительных работ по устройству полов, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта работ в эксплуатацию (далее - работы), а подрядчик - принять и оплатить результат работ.  

Срок окончания работ – 03.06.2024. 

В соответствии с п. 3.1. договора цена работ составляет 14 523 589 руб., без учета налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе затраты связанные с доставкой рабочих, командировочные затраты, затраты с организацией работ вахтовым методом. НДС предъявляется и оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена работ учитывает весь комплекс работ, в том числе прочие работы, которые субподрядчику необходимо выполнить для достижения результата работ в соответствии с п. 1.1 договора. Затраты на выполнение работ, непредвиденные и прочие затраты, в случае их формирования в процентном соотношении от сметной стоимости работ при сдаче выполненных работ Подрядчику, подтверждаются сметной документацией, которая формируется по параметрам ценообразования, определенным в локальных сметных расчетах (Приложение № 1 к Договору) и оформляются актами выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3.  

Кроме того, между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор субподряда от 01.03.2024 № 23/30-018, по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок на объектах СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» «Техническое перевооружение схемы транспортирования галитовых отходов с СОФ»: «Конвейерный транспорт подачи галитовых отходов. Галерея № 19», «Перегрузочный узел-6 с пунктом среднего дробления», «Узел пульпоприготовления», «Техническое перевооружение гидрозакладочного комплекса ствола № 2» выполнить комплекс общестроительных работ по устройству полов, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта работ в эксплуатацию (далее - работы), а Подрядчик - принять и оплатить результат работ.  

Срок окончания работ - 20.05.2024. 

В соответствии с п. 3.1. договора цена работ составляет 2 646 038 руб.. без учета налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе затраты связанные с доставкой рабочих, командировочные затраты, затраты с организацией работ вахтовым методом. НДС предъявляется и оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена работ учитывает весь комплекс работ, в том числе прочие работы, которые субподрядчику необходимо выполнить для достижения результата работ в соответствии с п. 1.1 договора. Затраты на выполнение работ, непредвиденные и прочие затраты, в случае их формирования в процентном соотношении от сметной стоимости работ при сдаче выполненных работ подрядчику, подтверждаются сметной документацией, которая формируется по параметрам ценообразования, определенным в локальных сметных расчетах (приложение № 1 к Договору) и оформляются актами выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3.  

В соответствии с п. 3.8.1 договоров подрядчик уплачивает стоимость работ по мере сдачи и приемки выполненных работ в соответствии с разделом 7 договора в размере 85 % от стоимости выполненных работ, указанных в каждом акте формы КС-2 и соответствующей счете-фактуре, в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  

(форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления субподрядчиком оригиналов счета, счета-фактуры.  

Согласно п.3.8.2 договоров в порядке обеспечения выполнения субподрядчиком работ качественно и в установленный договором срок подрядчик удерживает в качестве резерва гарантирования исполнения субподрядчиком обязательств по договору сумму в размере 15 % от стоимости выполненных работ, указанных в каждом акте формы КС-2 и соответствующем счете-фактуре. Подрядчик уплачивает субподрядчику удержанную сумму в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки результата работ, предусмотренных п. 1.1. договора и с момента подписания сторонами акта о приемке выполненного комплекса работ, составленного по форме, которая является приложением № 3 к настоящему договору и подписания сторонами последних акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В случае ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств выплата удержанного резерва производится, в том числе, за вычетом начисленных сумм штрафных санкций (неустойки, штрафов и пеней), убытков подрядчика, а также расходов, связанных с устранением недостатков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны субподрядчика.  

Во исполнение договора субподряда от 07.02.2024 № 23-30/012 между сторонами подписаны акты приемки работ (формы КС-2, КС-3) от 06.04.2024, 08.05.2024, 17.06.2024, 15.07.2024, 31.10.2024, 25.11.2024 на общую сумму 11 714 529 руб. 70 коп.  

Предусмотренный пунктом 3.8.2 договора акт приемки выполненного комплекса работ подписан между сторонами 28.12.2024.  

Принятые работы оплачены ответчиком частично, по расчету истца размер задолженности составил 1 718 121 руб. 42 коп.  

Во исполнение договора субподряда от 01.03.2024 № 23/30-018 между сторонами подписан акт приемки (формы КС-2, КС-3) от 06.05.2024 на сумму 493 903 руб. 20 коп.  

Предусмотренный пунктом 3.8.2 договора акт приемки выполненного комплекса работ подписан между сторонами 28.12.2024.  

Принятые работы оплачены ответчиком частично, по расчету истца размер задолженности составил 389 889 руб. 20 коп.  

Претензионные требования об оплате задолженности на общую сумму 2 108 010 руб. подрядчиком не исполнены, в связи с чем субподрядчик обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

Оценив в порядке ст.71 АПК РФ материалы дела, арбитражный суд приходит к следующим выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

 Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  

выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

В силу пункта 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.  

Согласно абзацу 1 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Обстоятельства действительного выполнения истцом спорных работ подтверждены подписанными сторонами справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), актами выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 12 208 432 руб. 92 коп., актом выполненного комплекса работ от 28.12.2024 к договору субподряда № 23-30/012 от 07.02.2024; актом выполненного комплекса работ от 28.12.2024 к договору субподряда № 23-30/018 от 01.03.2024.  

Согласно данным документам подрядчик принял результаты работ в отсутствие замечаний по объему, качеству и срокам исполнения.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласно ст. 310 ГК РФ, не допускается.  

Доказательств надлежащего исполнения подрядчиком обязательств по оплате работ в установленный договором срок не представлено (ст.65 АПК РФ).  

При таких обстоятельствах и в отсутствие доказательств оплаты, исковые требования следует признать обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании ст.309, 702, 711 ГК РФ.  

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 104, 110 АПК РФ, ст. 333.40 Налогового кодекса РФ.  

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.  

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.  

В связи с удовлетворением иска судебные расходы истца на уплату государственной пошлины по иску относятся на ответчика в соответствии ч.1 ст.110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от исковых требований в части взыскания неустойки в размере 157 749 руб. 86 коп. за период с 15.08.2024 по 27.04.2025. Производство по делу в указанной части прекратить.  

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 2 108 010 руб., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 86 500 руб.  

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 4 558 руб. 10 коп., уплаченную платежным поручением от 03.06.2025 № 446.  

Решение может быть обжаловано порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья М.М. Лаптева