﻿

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-57428/2021

10 декабря 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  18 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  10 декабря 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Шелемы З.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ходыревой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (адрес:  Россия 195009, г. Санкт-Петербург, улица Ватутина, д. 3, литер А, ОГРН: 1027700004012)

к акционерному обществу "Альфа Лаваль Поток" (адрес:  Россия 141060, г. Королёв, Московская область, улица Советская (Болшево мкр), дом 73, ОГРН: 1025002027050)

о взыскании 6.720.000 руб. 00 коп.

при участии

- от истца: Разборова Д.В. по доверенности от 06.09.2021;

- от ответчика: Литвинов А.Н. по протоколу №1/2021 от 03.02.2021

установил:

Акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (далее – истец) обратилось в суд с исковым заявлением к акционерному обществу "Альфа Лаваль Поток" (далее – ответчик) с требованием о взыскании неустойки за нарушение обязательств по договору №37797/140389 от 07.11.2018 в размере 6 720 000 руб. 00 коп. за нарушение ответчиком сроков исполнения обязательств по достижению ключевых событий, разработке и передаче документации на оборудование, поставке оборудования, предоставлению обеспечения возврата авансовых платежей, предоставлению ежемесячных отчетов.

Выслушав представителей истца, исследовав и оценив в совокупности, представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между АО «Силовые машины» (Заказчик) и АО «Альфа Лаваль Поток» (Поставщик) заключен договор №37797/140389 от 07.11.2018 (далее – Договор) на поставку маслоохладителей (далее – Оборудование) для АЭС Руппур.

Поставке подлежало 6 единиц маслоохладителей – по 3 на каждый Блок (энергоблоки №1 и №2). Стоимость каждой единицы Оборудования с НДС составляет 2 700 000,00 рубля с НДС 20%.

Полная цена Договора составляла 16.530.000 руб. 00 коп. с учетом НДС.

К Договору подписаны дополнительные соглашения №1 от 27.09.2019 (корректировка в связи с изменением ставки НДС и реквизитов Поставщика – общая цена Договора составила 16 800 000 руб. 00 коп.) и №2 от 10.06.2020 (новая редакция п. 8.2 Договора о промежуточных авансовых платежах).

Договором предусмотрено выполнение ряда обязательств, в том числе обязательства по достижению ключевых событий, разработке и передаче документации на Оборудование, поставке Оборудования, предоставлению обеспечения возврата авансовых платежей, надлежащего исполнения Договора и гарантийных обязательств, предоставлению ежемесячных отчетов.

За нарушение сроков исполнения каждого из них Договором установлена ответственность.

Наименования ключевых событий по изготовлению Оборудования, их стоимость и сроки достижения, а также предоставляемые отчетные документы определяются Приложением № 12 к Договору (п. 3.3 Договора).

С учетом положений дополнительного соглашения №1 от 27.09.2019 к Договору, при изготовлении Поставщиком Оборудования для энергоблока №1 предусмотрено достижение Поставщиком Ключевого события «Входной контроль теплообменных пластин» не позднее 04.10.2019. Цена Ключевого события составляет 810.000 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 4.15 Договора Поставщик обязан не менее чем за 30 календарных дней письменно информировать Заказчика, Генерального заказчика и Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору.

Порядок оформления Ключевых событий установлен пунктом 6.9 Договора и предусматривает вызов представителя Заказчика и подписание совместных документов, подтверждающих достижение Ключевого события.

В материалы дела не представлены доказательства достижения ключевого события «Входной контроль теплообменных пластин» в отношении Оборудования для энергоблока №1 (далее – Ключевое событие).

При этом, в связи с поставкой Оборудования для энергоблока №1 17.06.2020, что подтверждается товарной накладной №330610 от 16.06.2020, Ключевое событие можно считать достигнутым 17.06.2020.

Ответчик не представил доказательства достижения Ключевого события в более ранние сроки.

Утверждение ответчика о том, что сроки достижения Ключевого события были установлены в качестве даты наступления обязательства по внесению авансового платежа, не основано на положениях Договора.

В соответствии с п. 10.2 Договора если Поставщик не сможет достичь Ключевое событие в срок, предусмотренный Приложением №12 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,03% от цены просроченного Ключевого события за каждый день просрочки, но не более 20% (Двадцати процентов) от цены просроченного Ключевого события.

Учитывая вышеизложенное, продолжительность нарушения срока достижения Ключевого события в отношении Оборудования для энергоблока №1 составила 257 дней (с 05.10.2019 по 17.06.2020).

Рассчитанная в соответствии с п. 10.2 Договора и подлежащая уплате неустойка составляет 62 451,00 рубля (810 000,00*257*0,03%). Указанная сумма составляет менее 20% цены просроченного Ключевого события (810 000,00*20% = 162 000,00).

В соответствии с п. 4.2. Договора на основании Технических требований Поставщик обязан разработать Техническую документацию, а также Проектную и Рабочую конструкторскую документацию на Оборудование и Системы в объеме проектирования и поставки Поставщика в соответствии с Приложениями №№ 5.1, 5.2, 5.3 Договора.

Программа и методика испытаний (п.п.2 п. 1.4 Приложения №5.3 Договора) была направлена на согласование письмом Поставщика от 03.12.2018 №02/123.

Доказательства разработки и передачи документации, указанной в пунктах 6, 11.2, 16, 16.1, 18.1, 20.4 перечня документации и исходных данных, указанных в п. 3.1 Приложения 5.2 к Договору, в материалы дела не представлены.

В соответствии с п. 10.3 Договора если Поставщик не выполнит в сроки, установленные в пункте 4.2 Договора, Приложении №5.3 «Перечень, условия и сроки передачи Документации», разработку и/или согласование и/или передачу Технической документации, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку, которая должна рассчитываться следующим образом: за первые пять календарных дней – в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу; за все последующие календарные дни – в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу.

Предусмотренная п. 10.3 Договора неустойка подлежит начислению с 6-го календарного дня просрочки Поставщика.

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности в отношении требований об уплате договорной неустойки за нарушение сроков разработки и передачи документации, указанной в пунктах 6, 11.2, 16, 16.1, 18.1, 20.4 перечня документации и исходных данных, указанных в п. 3.1 Приложения 5.2 к Договору.

В связи с тем, что Договор заключен 07.11.2018 к дате обращения истца в суд (29.06.2021) срок исковой давности по требованиям о взыскании неустойки за нарушение сроков разработки и передачи документации, указанной в пунктах 6, 11.2, 16, 16.1, 18.1, 20.4 перечня документации и исходных данных, указанных в п. 3.1 Приложения 5.2 к Договору, не истек.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора поставка Оборудования должна осуществляться в сроки, указанные в Приложении №1.1 и №1.2 к Договору.

В первоначальной редакции указанных приложений в качестве срока поставки Оборудования для энергоблока №1 указывалось 30.11.2019, а для энергоблока №2 – 30.11.2020.

Дополнительным соглашением №1 от 27.09.2019 к Договору сроки поставки не были изменены - 30.11.2019 и 30.11.2020 соответственно.

Датой поставки Оборудования считается дата передачи Оборудования перевозчиком Поставщика надлежащему Грузополучателю в Месте поставки, которая подтверждается подписью Грузополучателя о приемке Грузовых мест Оборудования в Транспортном документе. При поставке оборудования в комплекте моментом поставки на такое Оборудование является Дата поставки последнего грузового места из комплекта. (п. 6.7.2 Договора).

Право собственности в отношении каждой единицы Оборудования переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания товарной накладной (форма №ТОРГ-12) на территории завода-изготовителя после подписания удостоверения о Приемочной инспекции Оборудования (п. 6.7.1 Договора).

В рассматриваемом случае переход права собственности на Оборудование для энергоблока №1 в количестве 3-х единиц подтверждается товарной накладной №330610 от 16.06.2020, подписанной 17.06.2020, а на Оборудование для энергоблока №2 в количестве 3-х единиц – товарной накладной №334608 от 04.12.2020, подписанной 07.12.2020.

Таким образом, Поставщиком допущены нарушения сроков поставки на 200 дней (17.06.2020 – 30.11.2019) в отношении Оборудования для энергоблока №1 и на 7 дней (07.12.2020 – 30.11.2020) в отношении Оборудования для энергоблока №2.

Возражения Ответчика, основанные на утверждении о наличии вины Истца в нарушении срока поставки Оборудования по энергоблоку №1 и нарушении сроков поставки в связи с действиями обстоятельств непреодолимой силы, рассмотрены судом и признаны необоснованными.

Основания для исключения ответственности, уменьшения периода нарушения или размера ответственности отсутствуют.

В соответствии с пунктом 10.4 Договора, если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями №.1.1 и №1.2 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены не поставленного Оборудования за каждый день просрочки. Если в Приложениях №1.1. и №1.2 Договора любая комплектная позиция Оборудования детализируется на поставочные единицы, расцененные отдельно и вместе составляющие данную комплектную позицию Оборудования, то неустойка начисляется от цены данной комплектной позиции Оборудования. 

Общий размер неустойки по пункту 10.4 Договора не может превышать 35% (Тридцати пяти процентов) от общей цены Оборудования соответствующего Блока. 

Так как общая цена Оборудования для каждого Блока составляет                    8.100.000 руб. 00 коп. с НДС, максимальный размер неустойки в отношении Оборудования для каждого Блока не может превышать 2.835.000 руб. 00 коп.        (8 100 000,00 * 35%).

Учитывая тот факт, что срок поставки нарушен в отношении 6 комплектных единиц Оборудования стоимостью 2 700 000,00 рубля с НДС каждая, сумма подлежащей уплате неустойки за нарушение срока поставки составляет                    838.350 руб. 00 коп., в том числе 810 000,00 рубля за нарушение срока поставки Оборудования для энергоблока №1 и 28 350,00 рубля за нарушение срока поставки Оборудования для энергоблока №2. Максимальный размер неустойки не превышен.

Пунктом 4.21 Договора установлена обязанность Поставщика предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по Договору (кроме гарантийных) и обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору.

Условия предоставления обеспечения описаны в пункте 4.21 Договора и его подпунктах.

Во всех случаях Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение в случае, если ране выданное обеспечение заканчивает свое действие, по каким-либо причинам перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика (п. 4.21.11 Договора).

Во всех случаях новое обеспечение подлежит предоставлению Поставщиком не позднее 30-ти календарных дней до даты окончания срока действия ранее выданного обеспечения, а если указанную дату невозможно было определить заранее – не позднее 15-ти календарных дней с даты, когда такое обеспечение перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Поставщиком (п. 4.21.11 Договора).

Таким образом, Поставщик должен был предоставить следующее обеспечение: банковскую гарантию в обеспечение возврата аванса по Блоку №1 на общую сумму 1 194 750,00 рубля или две гарантии на суммы 398 250,00 и 796 500,00 рубля соответственно не позднее 22.11.2018; банковскую гарантию в обеспечение возврата аванса по Блоку №2 на общую сумму 1 194 750,00 рубля или две гарантии на суммы 398 250,00 и 796 500,00 рубля соответственно не позднее 22.11.2018; банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора по Блоку №1 на сумму 826 500,00 рубля не позднее 22.11.2018; банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора по Блоку №2 на сумму 826 500,00 рубля не позднее 22.11.2018; банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Блоку №1 на сумму 420 000,00 рубля не позднее 31.10.2019; банковскую гарантию в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Блоку №2 на сумму 420 000,00 рубля не позднее 02.11.2020.

Фактически Поставщик предоставил банковские гарантии №100122 от 10.12.2018 ПАО «Совкомбанк» на сумму 398.250 руб. 00 коп. в обеспечение возврата аванса по Блоку №1; №100204 от 10.12.2018 ПАО «Совкомбанк» на сумму 796.500 руб. 00 коп. в обеспечение возврата аванса по Блоку №1; №100203 от 10.12.2018 ПАО «Совкомбанк» на сумму 398 250,00 рубля в обеспечение возврата аванса по Блоку №2; №100205 от 10.12.2018 ПАО «Совкомбанк» на сумму 796.500 руб. 00 коп. в обеспечение возврата аванса по Блоку №2; №100121 от 10.12.2018 ПАО «Совкомбанк» на сумму 826.500 руб. 00 коп. в обеспечение надлежащего исполнения Договора по Блоку №1; №100106 от 10.12.2018 ПАО «Совкомбанк» на сумму 826.500 руб. 00 коп. в обеспечение надлежащего исполнения Договора по Блоку №2.

Банковские гарантии в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Поставщиком не выданы.

Таким образом, Поставщиком допущены нарушения сроков выдачи обеспечений.

Нарушения в полном объеме признаются ответчиком.

В соответствии с пунктом 10.9 Договора в случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в пункте 4.21 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы обеспечения за каждый день просрочки в отношении каждого обеспечения.

Общая сумма неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 10.9 Договора, за допущенные Поставщиком нарушения сроков предоставления обеспечений по состоянию на 31.03.2021 составляет 176.242 руб. 50 коп.

В соответствии с пунктом 4.16 Договора ежемесячно, не позднее 4 числа каждого месяца, следующего за отчетным, Поставщик обязан направлять Заказчику отчеты по формам, приведенным в Приложении №10 и №10.1 к Договору, в виде подписанных документов в сканированном виде в формате pdf (Adobe Acrobat), а также в формате mpp (MS Project) (Приложение №10) и xlsx (MS Excel) (Приложение №10.1).

Таким образом, ежемесячный отчет состоял из 4 документов, подлежавших предоставлению начиная с 04.12.2018 по 04.01.2021 ежемесячно. За весь указанный период подлежало передаче 104 документа в составе 26-ти отчетов.

Поставщик на протяжении всего исполнения Договора не исполнял обязанность по предоставлению ежемесячных отчетов.

В соответствии с пунктом 10.12 Договора в случае нарушения Поставщиком сроков предоставления отчетов, указанных в пункте 4.16 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 10.000 руб. 00 коп. за каждый случай нарушения по каждому документу.

Истец настаивает на том, что из 104 документов представлен был только один – график из отчета за август 2019 года, представленный с письмом Поставщика №AANV-B8YFNE06 от 04.09.2019.

Таким образом, 103 документа отчета не предоставлено в срок.

Учитывая вышеизложенное, общая сумма штрафа составляет                           1.030.000 руб. 00 коп. 

Общая сумма неустоек, в том числе штрафов, начисленных на основании положений Договора за указанные выше нарушения, составляет 54.711.592 руб. 50 коп.

В соответствии с пунктом 10.25 Договора максимальный совокупный размер неустоек, подлежащих выплате каждой Стороной составляет 40% от общей цены Договора, указанной в пункте 7.2 Договора.

С учетом положений Дополнительного соглашения №1 от 27.09.2019 к Договору общая цена Договора составляет 16.800.000 руб. 00 коп. с НДС.

Максимальная сумма неустоек, которая может быть взыскана с Поставщика, составляет 6.720.000 руб. 00 коп.

Претензионный порядок соблюден путем направления в адрес Поставщика претензии от 31.03.2021 №И-СМ-ДАЭ-2021-0009922, содержащей требование об уплате указанных выше неустоек на общую сумму 68.632.463 руб. 50 коп. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

решил:

Взыскать с акционерного общества "Альфа Лаваль Поток" в пользу акционерного общества "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" 6.720.000 руб. 00 коп. неустойки, а также                                   56.600 руб. 00 коп.расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья 							Шелема З.А.