28/2022-343859(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-30254/2022

г. Новосибирск

28 декабря 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  

О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление  

дорожного строительства" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Новосибдорстрой" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, об обязании устранить недостатки, при участии: 

от истца: ФИО2 (доверенность от 10.01.2022, паспорт, диплом);  от ответчика: ФИО3 (доверенность от 14.05.2020, паспорт, диплом),  руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Новосибдорстрой"  

(ОГРН 

<

***>) в весенний период с 01.04.2023 по 31.05.2023, при  

наступлении климатических условий (в сухую погоду, при температуре  

окружающего воздуха не ниже 5°С), устранить следующие недостатки  

(дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту от  13.07.2021 № 46/21:  

1. выбоины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия на  парковочных карманах площади Станиславского около домов по ул.  Станиславского, 

<

...>, д. 17;  

2. выкрашивание а/б покрытия на участке ПК 4+40—ПК 5+30  (право) правая полоса;  

3. выкрашивание а/б покрытия на участке ПК 2+00 - ПК 5+00 (лево)  левая полоса;  

4. выступ на а/б покрытии ПК 10+76 (лево) левая полоса; 

5. выкрашивание а/б покрытия на участке ПК 10-45 (примыкание,  лево);  

6. просадка а/б покрытия на технической полосе ПК 2+00 - ПК 2+80  (лево);  

7. выкрашивание а/б покрытия на парковочных карманах ПК 3+80 -  ПК 4+10 (право);  

8. выкрашивание а/б покрытия на примыкании ПК 9+23 (лево); 

9. раскрытие продольного шва а/б между кромкой проезжей части и  парковочным карманом вдоль дома № 12;  

10. выкрашивание а/б покрытия около островка безопасности на площади Станиславского между домами № 12 и № 14; 

11. отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности  проезжей части 1,5 см ПК 11 +69 право (Станиславского, д. 2/3);  

12. отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности  проезжей части 1,5 см ПК 2+20 лево.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Новосибдорстрой" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

 Дата 29.12.2021 6:04:02

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна