Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18039/2021

24 августа 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  04 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  24 августа 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Акционерное общество "Инжиниринговая компания "Оборудование водоснабжения и водоотведения" (Россия, 392003, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.04.2008, ИНН: 

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефть шельф" (адрес:  191186, Санкт-Петербург город, Невский проспект, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.06.2007, ИНН: 

<

***>);

о взыскании, 

при участии:

- от истца: ФИО2, посредством онлайн-заседания,

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.05.2021

установил:

Акционерное общество "Инжиниринговая компания "Оборудование водоснабжения и водоотведения" (далее – Истец, Подрядчик) в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Газпром нефть шельф" (далее – Ответчик, Заказчик) о взыскании 5 423 296 руб. 38 коп. неосновательного обогащения, 21 470 руб. 31 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.01.2021 по 17.02.2021 с последующим их начислением по день фактической оплаты долга.

В судебном заседании представитель Истца исковые требования поддержал в полном объёме, представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска.     

Исследовав материалы дела, доводы иска и отзыва на него, заслушав мнение представителей сторон, суд установил следующее.

Между Заказчиком и Подрядчиком заключен договор генерального подряда от 20 декабря 2013 года № СЗ.-1.1170.13 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Водопроводные сооружения и комплекс сооружений для закачки сточной воды в утилизационную скважину для нужд «Вахтового поселка перевалочной базы для временного размещения персонала МЛСП «Приразломная на Варандее» (далее - Договор).

В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта - водопроводные сооружения и комплекс сооружений для закачки сточной воды в утилизационную скважину для нужд «Вахтового поселка перевалочной базы для временного размещения персонала МЛСП «Приразломная на Варандее» (далее - Объект), включая следующие:

- строительно-монтажные работы по строительству Объекта;

- монтаж оборудования;

- полный комплекс ПНР, включая затраты на проведение комплексных испытаний;

- поставка материалов и оборудования;

-подключение сооружений Объекта и инженерных сетей к действующим коммуникациям;

-устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, а также в период гарантийной эксплуатации;

-сдачу Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

- иные, неразрывно связанные со строящимся объектом работы.

В связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, 30 марта 2015 года между сторонами было заключено Соглашение о расторжении Договора (далее -Соглашение) в соответствии с условиями которого до 30 апреля 2015 года Подрядчик должен был выполнить передачу Заказчику строительной площадки и объекта незавершенного строительства по акту приема-передачи, а также предъявить Заказчику к оплате остатки выполненных работ.

Акт приема-передачи объекта незавершенного строительства подписан сторонами 30 апреля 2015 года и приложен к материалам дела.

В соответствии с условиями подписанного Соглашения:

По результатам приемки остатков выполненных, предъявленных Подрядчиком работ, Заказчик производит их оплату, за вычетом 5% в счет обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика.

Гарантийный срок для работ, выполненных по Договору, составляет 30 (тридцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи объекта незавершенного строительства.

Окончательный расчет с Подрядчиком (возврат гарантийного удержания) осуществляется в течение 30 дней после даты окончания гарантийного срока и выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, зафиксированных соответствующим актом. По состоянию на сегодняшний день соответствующий акт отсутствует.

Если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в течение гарантийного периода, Заказчик обеспечивает их устранение за счет суммы гарантийного удержания.  

С учётом изложенного, принимая во внимание акты выявленных недостатков от 06.09.2015,04.07.2016, 09.08.2016, 16.08.2016, 26.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 15.06.2016,24.06.2016, а также с учётом расчета стоимости устранениядефектов по Объекту, стоимость устранения недостатков, выполненныхГенподрядчиком работ составила 10 188 171 руб. 63 коп.

Дефекты и недостатки, выявленные в соответствии с актами от 02.12.2015,25.06.2016, 22.08.2016, 09.08.2016 не устранены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности.

В соответствии со статьями 195 и 196 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года.

Согласно пункту 2 статьи 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В соответствии с пунктом 10 Соглашения, гарантийный срок для работ, выполненных по Договору, составляет 30 (тридцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи объекта незавершённого строительства. 

Акт приёма-передачи объекта незавершенного строительства с фиксацией объёма всех выполненных Подрядчиком работ подписан сторонами Договора 30.04.2015, гарантийный срок истёк 30.10.2017.

Иск подано в суд 11.03.2021.

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

С учётом изложенного суд приходит к выводу о пропуске истцом срока исковой давности.  

То обстоятельство, что часть актов о приемке выполненных работ подписано после составления акта приёма-передачи объекта незавершенного строительства с фиксацией объёма всех выполненных Подрядчиком работ, не изменят момент возникновения у истца права требования оплаты спорной суммы. 

При таких обстоятельствах в иске следует отказать.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.