Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236040 http://kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Калининград Дело № А21-10294/2023 «18» декабря 2023 года 

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНУЮ  КОМПАНИЮ «СТАНДАРТ» в течение двух месяцев со дня вступления в силу  решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-10294/2023  устранить дефекты выполненного капитального ремонта по договору № 2770100011-17 от 17.03.2017 года многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

...> , а именно,  

- выполнить устройство деревянных накладок с двух сторон в местах (узлах)  сопряжения стропил с коньковым прогоном. Крепление накладок осуществлять на  гвоздях в количестве не менее 10 шт. на одну накладку. Произвести замену  стальных накладок на деревянные накладки. Работы выполнить в соответствии с  технологической картой ТЗК.33.05.2018-К (узел 1). Выполнить усиление  стропильной ноги с повреждениями в виде расщепления древесины и уменьшения  сечения в месте опирания на коньковый прогон;  

- произвести работы по выравниванию нижней плоскости ригелей в один уровень  посредством крепления дополнительных брусков и досок к нижним граням затяжек  (в зависимости от величины перепада). Произвести монтаж отсутствующей  затяжки у торцевой стены;  

- разобрать деревянную обшивку стенок слухового окна и обрезать выступающие  части каркаса в уровень заподлицо за стропильными ногами. Вновь произвести  обшивку стенок слухового окна;  

- обеспечить герметичность соединений между собой полотнищ пароизоляционной  пленки в местах нахлеста посредством их проклейки;  

- все не обработанные защитными составами деревянные конструкции  стропильной системы крыши обработать антисептиками и антипиренами;  

- произвести замену всех деформированных шпилек, стягивающих элементы  стропильной системы, а также выполнить затяжку гаек. Для дальнейшего  

предотвращения раскручивания гаек, необходимо установить контргайки на все  шпильки;  

- заделать цементным раствором трещины, образовавшиеся в штукатурном слое  дымохода, с последующей окраской всей площади оштукатуренной поверхности  дымохода.  

В случае неисполнения решения Арбитражного суда Калининградской  области по делу № А21-10294/2023 взыскать с общества с ограниченной  ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «СТАНДАРТ» в пользу  Специализированная некоммерческая организация Калининградской области  «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  судебную неустойку равную 1000 рублей в день за каждый день просрочки  исполнения.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЙ  КОМПАНИИ «СТАНДАРТ» в пользу Специализированная некоммерческая  организация Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах» расходы по госпошлине сумме 6000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный  апелляционный суд.  

Судья О.Н.Шкутко