РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 08 июля 2025 года по делу А33-33191/2024 Красноярск  

8 июля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления судебного решения по настоящему делу в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.14422.22 от 10.01.2023 в соответствии с техническими условиями № 8000537370 путем совершения следующих действий:  

1. Осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) – «Базовая станция/оборудование сотовой связи» по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, сады «Электромашиностроитель», ул. Лесная, в точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 10 кВт Линия (0,4) Проектируемая ТП Проектируемая Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф.3-19 г. Минус-к, с. Селиваниха ПС ПС 110/10 кВ № 3 «Тагарская» Основной источник питания: ПС 110/10 кВ № 3 «Тагарская» Резервный источник питания: отсутствует 

2. Исполнить пункт 10.1.1. технических условий № 8000537370: Подготовка технических условий на технологическое присоединение.  

3. Исполнить пункт 10.1.2. технических условий № 8000537370: Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.  

4. Исполнить пункт 10.2. технических условий № 8000537370: Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.  

5. Исполнить пункт 10.2.1. технических условий № 8000537370: запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом.  

6. Исполнить пункт 10.2.2. технических условий № 8000537370: от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение провода определить проектом.  

7. Исполнить пункт 10.2.3. технических условий № 8000537370: от проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.  

8. Исполнить пункт 10.2.4. технических условий № 8000537370: определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.3-19 г. Минус-к, с. Селиваниха. Тип и место установки разъединителя определить проектом.  

9. Исполнить пункт 10.2.5. технических условий № 8000537370: выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору № 20.2400.14422.22 от 10.01.2023 в размере 31 684,72 руб. за период с 12.07.2023 по 10.10.2024, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного решения по настоящему делу со дня, следующего за днем истечения установленного судом срока исполнения настоящего решения.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья В.В. Белов