РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-221048/22-110-1659

г. Москва

17 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПСК ТЕХПРОЕКТ" (107140, МОСКВА ГОРОД, МОСКВА ГОРОД, ПЕР.. 3-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, Д./21, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМ XIV-27 ОГРН: 1187746795103) к обществу с ограниченной ответственностью   "БИОКАМ" (109428, МОСКВА ГОРОД, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ. РЯЗАНСКИЙ, Д./22, К. 2, ПОМ X КОМ 13, ОГРН: 1037722048946) о взыскании 8 030 303,54 рублей,

при участии:

от истца – Алиева С.Н. по дов.  от 10.01.2023,

от ответчика-  Каширская  Н.А. по дов.  от  28.09.2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПСК ТЕХПРОЕКТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью   "БИОКАМ" о взыскании 5 739 300,64 руб. задолженности по договору от 16.02.2021 №1/02-21 СП, 1 938 239,69 руб. гарантийного удержания, 352 763,21 руб. пени.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск о взыскании 63 851,23 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору №1/02-21 СП от 16.02.2021.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 16 февраля 2021 года между ООО «ПСК ТехПроект» (исполнитель) и ООО «БиоКАМ» (заказчик) был заключен договор №1/02-21 СП.

В соответствии с п. 1.1. Договора Исполнитель принял на себя обязательства в целях создания Автомобильной Дороги выполнить работы по разработке рабочей документации по переустройству объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» (Этап 3.4) в отношении участка линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД», а также иные работы в объеме, предусмотренном условиями Договора, включая Техническое задание, являющейся Приложением № 2 к Договору, Проектной Документацией, действующими строительными нормами и правилами.

Цена Договора составляет 19 905 105 (Девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч сто пять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 317 517 (Три миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 64 копейки.

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору от «15» апреля 2021 года, Заказчик поручил, а Исполнитель принял на себя обязательства выполнить корректировку проектной документации и разработку рабочей документации для строительства платной автомобильной дороги: «Участок линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы — Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления М)КД». Этап 3.4. Переустройство» в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к Соглашению), Графиком работ (Приложение №2 к Соглашению). Общая стоимость дополнительных Работ по Соглашению составляет 544 500 (Пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей) 00 копеек, включая НДС, в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к Соглашению).

Таким образом, финальная цена Договора составляет 20 499 605 (Двадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот пять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (20%).

Согласно п. 1.3. и п. 1.5. Договора Исполнитель принимает на себя обязательства в порядке и на условиях, установленных Договором, разработать и согласовать с Заказчиком Рабочую Документацию в соответствии с Приложением № 2 «Техническое Задание», в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик принимает на себя обязательства в порядке и на условиях, установленных Договором, осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ, а также производить оплату выполненных и принятых работ в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.

На основании п. 1.6. Договора, целью Договора и условием, при котором обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными надлежащим образом, является создание Рабочей документации на основании Предоставленной Заказчиком Проектной документации.

Исполнитель обязан выполнить весь объем работ (в рамках своих обязательств и полномочий согласно Договору), как прямо поименованных в Договоре, гак и непоименованных, но необходимых для достижения цели Договора.

В соответствии п.3.2, п.3,5., п.3.7. Договора, оплата в адрес Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, а также надлежащим образом оформленных Исполнителем счета и счета-фактуры. Условиями оплаты выполненных работ являются: а) наличие согласованной Заказчиком Рабочей Документации; б) отсутствие замечаний к объему, срокам и качеству выполненных работ со стороны Заказчика, и уполномоченных Государственных Органов; в) подписание сторонами Графика разработки Рабочей Документации, содержащего сроки, а также стоимость этапов (подэтапов) работ, оплата выполненных Исполнителем работ производится до 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу и/или виду работ с учетом сумм Гарантийных удержаний, при условии поступления соответствующих денежных средств от Генерального заказчика.

Обязательства по Договору исполнены, результаты работ переданы Заказчику Исполнителем в полном объеме, что подтверждается подписанием Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (копии прилагаются). Претензий по качеству и срокам выполнения Работ от Заказчика не поступало.

Однако выполненные Работы Заказчиком не оплачены. Размер задолженности по Договору Заказчика перед Исполнителем составляет 5 739 300 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч триста) рублей 64 копейки.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту -ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию с другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты и оплатить его.

На основании п. 13.1.4. Договора, в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору перед Исполнителем (просрочка оплат, предусмотренных договором, просрочка выполнения встречных обязательств, немотивированная задержка в приеме выполненных работ и пр.) Исполнитель вправе начислить штраф в размере 1/300 от ставки рефинансирования от стоимости задержанного исполнения за каждый день такой просрочки. Настоящий штраф не является возмещением убытков по смыслу ст. 395 ГК РФ.

Таким образом, неустойка по договору составляет 352 763,21 руб.

Помимо этого, Заказчиком были произведены гарантийные удержания, которые на основании п. 14.1.2. Договора составляют 10% (Десять процентов) от стоимости выполненных Исполнителем работ, включая НДС, а именно 1 938 239 (Один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 69 копеек.

В соответствии с п. 14.1.4. Договора, выплата (возврат) суммы Гарантийных удержаний Исполнителю осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 100% (Сто процентов) от общей суммы произведённых Гарантийных Удержаний возвращается после Даты завершения выполнения работ при условии обязательного соблюдения Исполнителем следующих условий:

Исполнителем устранены все выявленные к этому моменту недостатки (дефекты) и все обязанности Исполнителя по Договору исполнены надлежащим образом и в полном объеме (за исключением обязанностей, срок исполнения которых не наступил).

На основании п. 14.1.6. Договора, возврат сумм Гарантийных удержаний осуществляется Заказчиком не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента приемки Заказчиком Рабочей документации.

По состоянию на «05» октября 2022 года Заказчиком не был осуществлен возврат сумм Гарантийных удержаний.

Согласно нормам действующего законодательства и условиям Договора стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит удовлетворению.

При  этом встречный иск не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно п.13.3.1 договора неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору начисляются исполнителю в размере, установленном договором и ГК РФ.

Соглашение о неустойки в Договорное от 16.02.2021 №1/02-21 СП отсутствует,  при спорных отношениях  законом неустойка за нарушение срока выполнения работ не предусмотрена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью   "БИОКАМ" ( ОГРН: 1037722048946)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "ПСК ТЕХПРОЕКТ" (ОГРН: 1187746795103) 5 739 300 руб. 64  коп. задолженности, 1 938 239 руб. 69  коп. гарантийного удержания, 352 763 руб. 21  коп. пени, 63 152 руб. в возмещение расходов по госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко