110/2022-1348(1) 

 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-8662/2021

г. Петрозаводск

14 января 2022 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

Внести изменения в Государственный контракт от 29.05.2020 № 72/ПИР/20,  

заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Мост- 

проект» и федеральным казённым учреждением "Управление автомобильной  

магистрали Санкт-Петербург - Мурманск федерального дорожного агентства"  

следующего содержания: Изложить пункты 1.3, 3.1, 3.2 Контракта в следующей редакции: 

«1.3. Сроки выполнения работ определены Календарным графиком работ. 

Начало работ: с момента (даты) заключения контракта.  Окончание работ: «12» ноября 2021 года.  

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Государственному контракту  составляет 3 871 907 руб. 21 коп. без учета НДС, исполнитель не является  плательщиком НДС.  

3.2. Планируемый объем работ, выполняемых Исполнителем по годам,  составляет:  

- 2020 год – 1 348 960,35 руб.; - 2021 год – 2 522 946,86 руб. 

(лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с  федеральным законом от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов")».  

Внести изменение в Задание (приложение № 1 к Государственному  контракту от 29.05.2020 № 72/ПИР/20), а именно: слова «экспертиза  проектной документации, проведенной в объеме проверки достоверности  определения сметной стоимости капитального ремонта» заменить на  «экспертизу проектной документации».  

Установить следующие сроки выполнения 2.3 и 3 этапов работ по  Государственному контракту от 29.05.2020 № 72/ПИР/20:  

- Этап 2.3 Экспертиза проектной документации - с 16.03.2021 по  18.10.2021;  

- Этап 3. Предоставление проектной документации Заказчику в полном  объеме - с 19.10.2021 по 12.11.2021.  

Увеличить стоимость выполнения работ по этапу 2.3 «Экспертиза  

проектной документации» до 925 816 руб. 94 коп. 

2. Взыскать с федерального казённого учреждения "Управление автомобильной  

магистрали Санкт-Петербург - Мурманск федерального дорожного агентства"  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью "Мост-проект" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

расходы по госпошлине в сумме 6 000 руб. 3. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>, литер А);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Терешонок М.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.11.2021 5:56:46

Кому выдана Терешонок Марина Вячеславовна