Арбитражный суд Чукотского автономного округа

улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000,

www.chukotka.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А80-449/2021

г. Анадырь

15 апреля 2022 года

резолютивная часть объявлена 08 апреля 2022 года

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Руникиной Н.П. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Акпасовой З.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению от 09.11.2021 № 29/11276 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 306870636100016, ИНН 

<

***>)

о взыскании пени по государственному контракту в размере 5225,37 руб.,

при участии представителей истца: 

ФИО2 – по доверенности от 17.01.2022 № 1/10, диплом;

ФИО3 – по доверенности от 10.03.2022 № 1/19, диплом,

установил:

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с требованием к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик), о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства по государственному контракту на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту устройства охранного освещения административного здания МОМВД России «Билибинский» от 16.04.2019                               № 0188100002519000022 за период с 01.12.2020 по 28.12.2020 в размере 5225,37 руб.

Определениями суда: 

- 16.11.2021 заявление принято, возбуждено дело в порядке упрощенного производства, установлен срок для предоставления  отзыва до 08.12.2021 и дополнительных документов содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений (отзыва) в обоснование своей позиции, в срок 29.12.2021;

- 30.12.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства с назначением предварительного судебного заседания на 14 часов 30 минут 21.02.2022; 

- 21.02.2022 предварительное судебное заседание отложено на 14 часов 30 минут 01.03.2022;

- 01.03.2022 подготовка дела к судебному разбирательству завершена, судебное заседание назначено на 04.04.2022, объявлен перерыв до 11 часов 30 мину 08.04.2022.    

О принятии заявления, возбуждении производства по делу стороны извещены судом в порядке, предусмотренном статьями 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Судебные акты размещены в «Картотеке арбитражных дел». Доказательства надлежащего извещения сторон имеются в материалах дела.

В судебном заседании принимают участие представители истца. Ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, о причинах неявки не проинформировал. Ходатайство об отложении судебного заседания не заявлено.

Судебное заседание проводится в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о начавшемся судебном процессе.

Истцом в материалы дела представлены дополнительные доказательства.

Ответчиком отзыв в материалы дела не представлен. Заявления, ходатайства от ответчика не поступили.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования, настаивали на их удовлетворении в полном объеме.

Исследовав материалы дела, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ доводы иска и представленные в их подтверждение доказательства, судом установлены следующие существенные обстоятельства.

16.04.2019 между управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (далее – истец, Заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее – ответчик, Подрядчик) заключен государственный контракт № 0188100002519000022 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту устройства охранного освещения административного здания МОМВД России «Билибинский» (далее - Контракт).

Контракт заключен в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, подписан сторонами в электронном виде, сведения о заключенном контракте и порядке его исполнения размещены в свободном доступе в Единой информационной системе закупок. 

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик принял на себя обязательство выполнить подрядные работы по капитальному ремонту  устройства охранного освещения административного здания МОМВД России «Билибинский» (далее - Объект, Работы) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), сметным расчетом (который прикреплен в составе документации об аукционе в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок), в установленный Контрактом срок и сдать результат выполненных работ, а Заказчик принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

Цена Контракта составляет 2387134,32 руб. НДС не облагается (пункт 2.1. Контракта).

Срок действия Контракта устанавливается со дня его заключения по 31 декабря 2020 года включительно, а в части обязательств, возникших в ходе досудебного спора - до полного их исполнения (пункт 14.1 Контракта).

Разделом 3 Контракта и пунктом 2 технического задания к Контракту установлены сроки выполнения работ.

 Дата начала выполнения работ - по 30 января 2020 года. Дата окончания выполнения работ -  30 ноября 2020 года.

 В соответствии с пунктом 3.3. Контракта место выполнения работ: 689450, Чукотский автономный округ, 

<

...>.

Подрядчик обязан в силу пункта 4.1.1. Контракта выполнить надлежащим образом работы в объеме и в сроки, установленные Контрактом, в силу пункта 4.1.14. Контракта не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения работ представлять уведомление Заказчику о готовности работ к сдаче.

В соответствии с пунктом 4.1.16. Контракта по завершению ремонтно-строительных работ (этапа работ) на объекте в трехдневный срок передать Заказчику комплект исполнительной и технической документации, акты на выполнение скрытых работ, сертификаты на материалы и изделия, технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, иные документы, служащие подтверждением выполнения работ на Объекте.

В соответствии с пунктом 2.7 Контракта оплата осуществляется после сдачи выполненных подрядчиком и приемки выполненных работ Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

С целью осуществления расчетов по настоящему Контракту, Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента выполнения работ представляет Заказчику отчеты, составленные по формам: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее чем в 2 (двух) экземплярах с приложением комплекта исполнительной документации, включая счет и счет-фактуру, подтверждающей объем выполненных работ. Акты выполненных работ (форма КС-2) составляются на основании фактически выполненных объемов работ, с использованием индексов пересчета стоимости на момент заключения Контракта и которые не меняются в течение срока действия Контракта. Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются. Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке работ является основанием для отказа в их приемке.

Заказчик вправе в соответствии с пунктами 4.4.3., 4.4.4. Контракта  требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, в том числе актов на скрытые и монтажные работы, сертификатов соответствия качества, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счетов и счетов-фактур.

После завершения выполнения работ (этапа работ), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ (пункт 5.1. Контракта). 

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.4.4. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте, Техническом задании и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет (пункт 5.2. Контракта). 

В соответствии с пунктом 5.3. Контракта в случае непредставления Подрядчиком отчётных документов по перечню пункта 4.1.16 Контракта Заказчик вправе отложить рассмотрение актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) до исполнения Подрядчиком  условий Контракта, при этом, срок проверки будет отсчитываться от даты предоставления Подрядчиком документов по перечню пункта 4,1.16 Контракта.

В силу пункта 5.8. Контракта завершение Подрядчиком работ на объекте оформляется актом о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 9.1. Контракта).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), (пункт 9.4 Контракта).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от  цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Контракт содержит все существенные условия для данного вида договоров и признается судом заключенным и действующим в период спорных правоотношений.

28.12.2020 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к Контракту. Сторонами скорректирована ведомость состава работ технического задания без изменения результата выполнения работ, цены контракта и сроков производства работ (т. 1, л.д. 108-109). 

28.12.2020 сторонами без возражений по объему, качественных и количественных характеристик, подписан акт о приемке выполненных работ (КС-2), (т. 1, л.д. 28-32).

В Единой информационной системе закупок отсутствует информация об изменении Контракта в части сроков выполнения работ, в материалах дела отсутствуют доказательства изменения сроков выполнения работ. 

31.03.2021 Заказчиком в адрес Подрядчика направлена претензия № 4/23/3138 с уведомлением о нарушении Подрядчиком срока выполнении работ, и требованием оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 5225,37 руб.

Претензия ответчиком получена 17.05.2021, о чем свидетельствует отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 68900057578818.

Оплата неустойки от ответчика не поступила, что послужило поводом к предъявлению иска в суд.

Судом признаются обоснованными требования истца в связи со следующим.

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются общими нормами об обязательствах, главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) как правоотношения в рамках договора строительного подряда. Кроме того, учитывая, что Контракт заключен в рамках Закона 44-ФЗ, к рассматриваемым правоотношениям подлежат применению и нормы названного федерального закона. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В силу пункта 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные 1 параграфом главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пунктов 1, 2 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу пункта 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

На основании части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Из условий Контракта следует, что срок окончания выполнения работ установлен 30.11.2020, акт приемки выполненных работ, в том числе по форме КС-2 подписан сторонами 28.12.2020. Таким образом, просрочка исполнения обязательства подрядчиком в 28 дней подтверждена материалами дела.

Ответчик отзыв на иск не представил, доводы, изложенные в иске не опровергнул, доказательства, по правилам статьи 65 АПК РФ, в подтверждение надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с условиями Контракта не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Дополнительное соглашение № к Контракту подписанное сторонами 28.12.2020, вносит изменение в ведомость состава работ технического задания, без изменения сроков выполнения работ. Сведений о наличии разногласий со стороны Подрядчика при заключении сторонами дополнительного соглашения, материалы дела не содержат. 

Напротив, представленная в материалы дела переписка сторон, свидетельствует об обоюдной цели исполнить Контракт в течение срока его действия (т. 1, л.д. 131-144). 

При таких обстоятельствах, факт нарушения исполнения обязательств со стороны Подрядчика подтвержден.

Заказчик не воспользовался правом на удержание неустойки при оплате стоимости выполненных работ, предусмотренным пунктом 9.7 Контракта, равно как и удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения, предусмотренных пунктом 10.7 Контракта. 

Таким образом, имеются основания для начисления и взыскания пени, предусмотренной пунктом 9.5 Контракта.

В силу пункта 9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Главой 11 Контракта предусмотрено, что стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных компетентными органами, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 34 Закона 44-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 42.1 Закона 44-ФЗ начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (в редакции от 23.03.2022) утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (далее – Правила № 783).

В соответствии с пунктом 2 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

 Материалами дела подтверждается, что в Контракт в 2020 году внесены изменения в части объема работ, что исключает списание неустойки по правилам подпункта «а» пункта 2 Правил № 783.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»  (далее – Постановление № 497) в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Постановление № 497 вступило в силу 01.04.2022 и действует в течение 6 месяцев.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется: наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Абзацем 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве установлено, что не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

 В пункте 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

Неустойка начислена истцом за период с 01.12.2020 по 28.12.2020, то есть до начала периода действия моратория, в связи с чем, оснований для освобождения ответчика от финансовых санкций на основании Постановления № 497 не имеется.

Ответчик не представил суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины в неисполнении предусмотренного Контрактом обязательства, в том числе наличия объективной невозможности выполнить работы в установленный Контрактом срок. 

Материалы дела не содержат доказательств, позволяющих освободить ответчика от ответственности за неисполнение обязательств. 

Судом проверен расчет неустойки  выполненный истцом и признан арифметически неверным. По расчету суда за период с 01.12.2020 по 28.12.2020, с применением 1/300 доли ключевой ставки в размере 4,25 %, действующей на дату исполнения обязательства, с учетом частичного исполнения в установленный срок, неустойка составит 5483,41 руб.  

При таких обстоятельствах, учитывая невозможность суда выйти за пределы заявленных исковых требований, суд находит требование о взыскании неустойки обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере 5225,37 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Частью 3 статьи 110 АПК РФ определено, что государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) истец освобожден от уплаты государственной пошлины, при подаче иска истцом государственная пошлина не уплачивалась. 

Поскольку иск подлежит удовлетворению полностью, государственную пошлину по иску в размере 2000 рублей (абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ) суд относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 306870636100016, ИНН 

<

***>) в пользу Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 16.04.2019 № 0188100002519000022 за период с 01.12.2020 по 28.12.2020 в размере 5225,37 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 306870636100016, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда подается через Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

Судья                                                                                       Н.П. Руникина