АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А48-2080/2017

г. Орёл

04 июля 2017 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Субъекта РФ  Орловская область в лице казенного учреждения Орловской области "Орелгосзаказчик" (

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «321 военно-строительное управление» (

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) о понуждении к  исполнению гарантийных обязательств по государственному контракту № 3-ЗД от  04.07.2012 путем устранения дефектов и недостатков, зафиксированных в акте  обследования выполненных работ от 08.02.2017  

третье лицо: бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области  «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям  имени З.И. Круглой»: 

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН  (

<

***>)  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Субъекта РФ Орловская область в лице казенного учреждения  Орловской области "Орелгосзаказчик" (

<

...>, ИНН (

<

***>),  ОГРН (

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «321 военно-строительное  управление» (

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН  (

<

***>) выполнить следующие гарантийные работы по государственному  контракту № 3-ЗД от 04.07.2012 по строительству Параклинического корпуса с  консультативной поликлиникой областного государственного учреждения  здравоохранения «Детская областная клиническая больница» г. Орел, 

<

...>:  

1. Общественные работы по зданию:  

1.1 закончить монтаж козырька над входом в молочную кухню, 

1.2 выполнить кровлю и примыкания к выходам на кровлю и вентиляционным  

шахтам в соответствии с проектом 11516 лист АС-180,182, 

1.3 произвести замену расколотых стекол и восстановить декоративную отделку на  

витражах, 

1.4 заменить разбитые фасадные плиты в приямках над подвальными окнами, а  

также установить недостающие, 1.5 заменить дефектные плитки подвесных потолков, 

1.6 в санузлах для инвалидов установить поручни в соответствии с проектом  

11516-ТХ, 

1.7 выполнить герметизацию примыкания конструкций перехода к наружным  

стенам, 

1.8 выполнить заземление и молниезащиту в соответствии с проектом, представить  

документы о приемке; 2. электротехнические работы: 

2.1 заменить светильники дежурного освещения в палатах, находящиеся в  

нерабочем состоянии в соответствии с требованиями проектной документации, 

2.2 выполнить повторно соединение к светильникам по коридорам с 1 по 9 этаж в  

соответствии с ПУЭ издание 6 пункт 2.1.26 через закрытые соединения коробки, 

2.3 выполнить автоматизацию и электроснабжение пожарной насосной станции и  

станции повышения давления воды в помещении теплового пункта, 2.4 выполнить автоматизацию и электромонтажные работы по тепловому пункту, 

2.5 подключить клапаны дымоудаления к электроснабжению в связи с тем, что они  

находятся в нерабочем состоянии, 2.6 подключить вытяжную вентиляцию, находящуюся в нерабочем состоянии; 3. приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование: 

3.1 подключить автоматику систем приточно-вытяжной вентиляции для вывода её  

в рабочий режим, 

3.2 смонтировать систему кондиционирования в приточных установках  

(обеспечить температурный режим в помещениях); 4. система охранно-пожарной сигнализации (ОПС): 

4.1 закончить монтаж охранно-пожарной сигнализации для сдачи системы органам  

пожарного надзора с последующим предоставлением соответствующих документов в  

адрес эксплуатирующей организации; 

5. противопожарные меры:  

5.1 повторно выполнить монтажные работы по установке пожарных кранов и сдать  

ОПС МЧС России, 

5.2 установить отсутствующие стволы на пожарных рукавах (29 шт.) и головки  

поворотных замыканий, 5.3 установить отсутствующие пожарные рукава (6 шт.), 

5.4 установить недостающие огнетушители, провести перезаправку или замену  

огнетушителей с истекшим сроком годности, 5.5 повторно настроить систему дымоудаления для её работы в штатном режиме; 

6. лифты: выполнить отделочные работы в приямках и шахтах всех лифтов в связи  

с обнаружением брака; 7. индивидуальный тепловой пункт (ИТП): 

7.1 закончить работы по отделке помещения с проявлением недостатков,  

вызванных некачественным выполнением работ, 

7.2 выполнить повторно строительно-монтажные работы рампы по входу № 5 в  

соответствии с проектом, 

7.3 заменить утеплитель и плиты ЦСП в связи с намоканием конструкций потолка  

на ИТП 1, 

7.4 устранить недостатки строительных работ по тамбуру входа № 5 в соответствии  

с проектом, 

7.5 закончить монтаж оборудования ИТП 1, провести пусконаладочные работы с  

предоставлением паспортов на оборудование и исполнительной документации в адрес  

эксплуатирующей организации; 

8. котельная: установить недостающий сигнализатор загазованности САЗК в  

помещении. 

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «321 военно-строительное  

управление» (

<

...>, ИНН (

<

***>), ОГРН  

(

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины. 

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  

Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Орловской области в течение  

месяца со дня его принятия. Судья Г.Н. Родина