РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-210354/23-110-1705

г. Москва

12 февраля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2024 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12 февраля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "АВМ" (105066, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВОРЯЗАНСКАЯ УЛ., Д. 38, ПОМЕЩ. 2П, ОГРН: 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>) о взыскании 929 502,58 руб.,

при участии:

от истца-Крючкова  Е.Ю. по дов.  от 14.09.2023,

от ответчика – не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "АВМ" обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 663 965,75 руб. неотработанного аванса по договору №А86-БЛГ/23/СУБ2/3 от 18.05.2023, 199 963,44 руб. штрафа, 464 981,66 руб. пени.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела,  между ООО «АВМ» (Субподрядчик) и ИП ФИО3 (Субсубподрядчик) был заключен Договор № А86-БЛГ/23/СУБ2/3 от 18 мая 2023г., согласно п. 1.1 которого Субсубподрядчик обязуется по заданию Субподрядчика выполнить работы по ремонту многофункциональной спортивной площадки на территории района Бибирево по адресу: ул. Белозерская д.10 (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Субподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 2.1. Цена Договора установлена в соответствии с Локальной сметой (приложение № 2 к Договору) и составляет 3 999 268,84 руб. (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч двести шестьдесят восемь рублей 84 коп.). 

На основании п. 2.5. оплата по Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:

Авансовый платеж выплачивается Субподрядчиком в размере 50% от цены договора, что составляет 1 999 634,42 руб. (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать четыре руб., 42 коп.), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

Согласно условиям договора Субподрядчик произвел выплату аванса в размере 1 999 634,42 руб. на расчетный счет Субсубподрядчика 19 мая 2023г., что подтверждается платежным поручением №  6 от 19.05.2023г.

Также Субподрядчик произвел в пользу Субсубподрядчика авансовые платежи в размере 150 000,00 руб. 31 мая 2023г. и 649 853,77 руб. 04 июля 2023г. 

Согласно пункту 2.5.3. Договора В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субсубподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Субподрядчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Согласно пункту 2.5.4. Договора Обязательства Субподрядчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Субодрядчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

Сроки выполнения работ по Договору установлены п. 3.1. Договора в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора: с «18» мая 2023 г. по «15» июня 2023 г.

Договором установлен порядок сдачи-приемки работ:

Субсубподрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания завершения выполнения работ, представляет Субподрядчику комплект отчетной документации в 2 (двух) экземплярах, предусмотренной Техническим заданием.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Субсубподрядчика документов, указанных в настоящей статье Договора, Субподрядчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании, либо направляет подписанный структурированный Документ о приемке, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения. В случае получения мотивированного отказа от Субподрядчика Субсубподрядчик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи) календарных дней, и представляет Субподрядчику структурированный Документ о приемке повторно.

К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.1 Договора, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Субсубподрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В случае получения от Субподрядчика акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Субсубподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить полученные от Субподрядчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Субподрядчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

На основании п. 5.1. Субподрядчик вправе:

Требовать от Субсубподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Субсубподрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Техническим заданием и Договором.

Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств бюджета города Москвы.

При невыполнении Субсубподрядчиком обязательств по устранению выявленных в период гарантийного срока нарушений/дефектов, Субподрядчик вправе привлечь третьих лиц для устранения с возложением на Субсубподрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков Субподрядчика.

Согласно п. 5.4.3. Субсубподрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет, обеспечить возмещение убытков, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субсубподрядчиком своих обязательств по Договору.

Согласно ч. 1 ст. 720 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пунктом 7.4. установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субсубподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

5 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Субсубподрядчик должен уведомить Заказчика о завершении выполнения работ в письменном виде (п. 2.4.4. Технического задания).

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком уведомления, Субсубподрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации (п. 2.4.4.1 ТЗ).

В соответствии с требованиями Контракта Субсубподрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке (п. 2.4.4.2 ТЗ).

В адрес Субподрядчика не поступали акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), равно как и уведомление о завершении выполнения работ и структурированный документ о приемке, однако по оплате свои обязательства Субподрядчиком выполнялись без нарушений. 

Частью 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ установлено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В таком случае не отработанный аванс подлежит возвращению Субподрядчику на основании ст. 1102 ГК РФ. 

На расчетный счет Субсубподрядчика были произведены следующие платежи: 

Аванс по договору в размере 1 999 634,42 руб. 19 мая 2023г. , сумма в размере 150 000,00 руб. 31 мая 2023г.,  649 853,77 руб. 04 июля 2023г., а всего 2 799 488,19 руб. 

Статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

При этом обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Работы Субсубподрядчиком выполнялись не в полном объеме, с нарушением сроков их выполнения, объемов и качества, в связи с чем адрес Субсубподрядчика было направлено требование (исх. № 39 от 21.06.2023г.) об устранении замечаний, выявленных в ходе комиссионной проверки проведенной  20.06.2023г. (некачественное асфальтобетонное покрытие). Срок для устранения замечаний – не позднее 25.06.2023г. 

Состав работ по настоящему договору установлен Техническим заданием (Приложение к договору), а именно п. 2.3.1. 

Замечания в выполненных Субсубподрядчиком работах были устранены с опозданием, отчетные документы не представлены, что является основанием требовать уплаты штрафа в размере 199 963 руб. 44 коп. согласно п. 7.4. Договора (5% от 3 999 268,84 руб.). 

Согласно п. 7.8. Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Субсубподрядчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Сумма пени подлежащая уплате,  по расчету Истца, Субсубподрядчиком составляет 145 573,39 руб. (3 999 268,84 × 91 × 1/300 × 12%). 

Выплата штрафа и пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств по договору. 

Согласно ч.1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В связи с тем, что работы Субсубподрядчиком Субподрядчику не сданы, уведомления о завершении работ, в т.ч. гарантийных, Субсубподрядчик Субподрядчику не направил, комплект отчетной документации не предоставил, электронный структурированный документ о приемке не передал согласно пунктов 2.4.4, 2.4.4.1 и 2.4.4.2 Технического задания, а фактически работы выполнены после направления досудебной претензии на сумму 2 135 522,44 руб., то сумма неотработанного аванса в размере 663 965,75 руб. подлежит возврату. 

В адрес Ответчика 08 августа 2023г. была направлена досудебная претензия, которая оставлена без ответа.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ, в части увеличения суммы неустойки до 464 981,66 руб. за период с 16.06.2023 по 19.01.2024.

Вместе с тем , договор прекратил  действие 10.09.2023(после одностороннего отказа и истечения срока для  хранения корреспонденции),  в связи с чем  неустойка за заявленный период (после прекращения действия договора) начислению не подлежит ,  соответственно, размер пени составляет185 566  руб

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью  "АВМ" (ОГРН: 

<

***>)  сумму аванса в размере 663 965 руб. 75 коп. ,  199 963 руб. 44 коп. штрафа,  185 566  руб. пени,  63 179 руб. в возмещение судебных издержек, 20 761 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении  остальной части иска отказать.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью  "АВМ" (ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 6 194  руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1