ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дело № А40-84414/20

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 26 октября 2020 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Истца 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.08.2020г. (резолютивная часть от 18.08.2020г.) по делу № А40-84414/20 

по иску ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (ОГРН 

<

***>) к ООО "ЧИСТОВОД" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 23.12.2019,

от ответчика: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"  (далее – истец) предъявило ООО "ЧИСТОВОД"  (далее – ответчик) иск о взыскании неотработанного аванса по договору от 22.05.2015 №545/02-ПД/15 в размере 375 666,41 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 02.07.2015 по 11.01.2020 в размере 177 427,23 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2020 по 19.03.2020 в размере 4 262,17 руб., неустойки за просрочку в работе за период с 08.06.2015 по 11.01.2020 в размере 10 512 398 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 18.08.2020г., изготовленным в полном объеме 18.08.2020г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением, Истец подал апелляционную жалобу. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Истец требования и доводы своей жалобы поддержал, неявившийся Ответчик уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 2 л.д. 11). 

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 14» (далее – Субподрядчик, правопреемник Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 11», ранее - ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЧистоВод» (далее - Проектировщик) заключен договор подряда № 545/02-ПД/15 от 22 мая 2015 (далее - Договор) на выполнение комплекса работ по разработке раздела «Водоснабжение и водоотведение» стадии проектирования «Рабочая документация» по объекту: «Строительство зоны хранения № 1 войсковой части № 11777» по адресу: г. Торопец, Тверская область (шифр 606/60-1). 

В соответствии с п. 2.1. Договора Проектировщик принял обязательство выполнить комплекс работ по разработке раздела «Водоснабжение и водоотведение» стадии проектирования: «Рабочая документация» реконструкции объекта «Строительство зоны хранения № 1 войсковой части № 11777» по адресу: г. Торопец, Тверская область, согласно заданию на проектирование (Приложение № 1 к Договору) иным документам и указаниям Заказчика (далее - Работы) в установленный Договором срок. 

Цена Договора в соответствии с п. 3.1. Договора составляет 1 252 221, 37 руб. 

В соответствии с п. 2.6. и Приложением № 2 к Договору определены следующие сроки выполнения Работ: дата начала Работ – дата подписания Договора; разработка раздела «Водоснабжение и водоотведение» стадии проектирования: «Рабочая документация» - 15 календарных дней с даты подписания Договора. 

Субподрядчиком перечислены Проектировщику денежные средства в размере 375 666, 41 руб. 

Истец утверждает, что Ответчик обязательства, работы, предусмотренные Договором, не выполнил, результаты работ Субподрядчику (Истцу) не передал. 

В связи с этим Истцом было принято решение о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, т.е. в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия исх. от 19.02.2020 с требованием перечислить в адрес ответчика неотработанный аванс, проценты  за пользование коммерческим кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также неустойку за просрочку в работе, однако требования истца были оставлены ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности исковых требований.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции. 

Судом установлено, что Проектировщик (Ответчик) добросовестно выполнил обязательства, принятые им на себя по Договору и передал надлежащим образом оформленную Рабочую документацию, что подтверждается Накладной № 1 от 29.05.2015, согласно которой ООО «ЧистоВод» передал, а ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России» принял проектную документацию стадии «Рабочая документация» раздел: «Водоснабжение и водоотведение» по объекту: «Строительство зоны хранения № 1 войсковой части № 17777» по адресу: г. Торопец, Тверская область (шифр объекта: 606/60-1) в количестве 5 экземпляров каждого тома Рабочей документации на бумажном носителе, на CD-диске в 2 экз. в электронном формате JPEG, PDF, и на CD-диске в 1 экз. в электронном формате DWG. WORD. PDF. 

Факт получения Субподрядчиком результата работ, предусмотренных Договором подтверждается подписью представителя Субподрядчика - ГИПа ФИО3, который также подписывал Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору). 

Согласно пункту 5.1. Договора после выполнения работ Проектировщик представляет Субподрядчику накладные, отчётные документы (рабочая документация) и иные документы в соответствии с настоящим Договором, Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и указаниями Субподрядчика. 

В соответствии с пунктом 2.9. Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) Рабочая документация (Работы) выполняется в 5 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде (программы электронных версий формат DWG, PDF). 

В соответствии с пунктом 5.2. Договора приемка, проверка рабочей документации осуществляется Субподрядчиком в течение 50 рабочих дней с момента получения документов. 

В течение указанного срока при наличии замечаний Субподрядчик направляет Проектировщику для переоформления перечень недостатков, доработок, исполнительную смету, со сроками их выполнения. 

Однако Субподрядчик по прошествии периода, указанного в пункте 5.2. Договора, каких-либо замечаний к работе, выполненной Субподрядчиком не предъявлял, требование об устранении недостатков не направлял. 

Таким образом, результаты работ, выполненные Проектировщиком (Ответчиком), были приняты Субподрядчиком (Истцом) без замечаний и подлежат оплате. 

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ предусмотрено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о неправомерности заявленных исковых требований.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что в Накладной № 1 от 29.05.2015 (т. 1 л.д. 113) отсутствует печать Истца, указанная накладная подписана неуполномоченным лицом, подтверждающих документов о полномочиях представителя Истца подписывать указанные документы, в материалы дела Ответчиком представлено не было, отклоняются судом апелляционной инстанции как не обоснованные в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поскольку заявление о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец в суде первой инстанции не сделал, оснований полагать, что Накладная № 1 от 29.05.2015 подписана неуполномоченным лицом со стороны истца, у суда апелляционной инстанции не имеется. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2020г. (резолютивная часть от 18.08.2020г.) по делу № А40-84414/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья  Е.Е. Кузнецова

Судьи Е.В. Бодрова  

                                                                                                            П.А. Порывкин    

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.