45/2017-40923(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-1333/2017

город Вологда

18 апреля 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуально- го кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л :

внести изменения в муниципальный контракт   № 0830300000416000045_321050 от 22.08.2016:  

абзац 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «окончание вы- полнения работ – до 31.05.2017»;  

в абзаце 3 пункта 11 Технического задания к контракту текст «окончание выполнения работ: до 01.10.2016» заменить на текст «окончание выпол- нения работ – до 31.05.2017».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Райсоцзаказ- чик» в федеральный бюджет 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Н.А. Колтакова