83_36723162 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке статьи 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-139280/2023-83-781

г. Москва

24 августа 2023 г.

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-781),  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФГКУ "СТЗ" ФМБА России (ИНН  

<

***>) к ООО "РТ-Соцстрой" (ИНН 

<

***>) об обязании устранить 32 выявленных  нарушения, согласно акту выездной проверки Крымского управления Ростехнадзора № 14-03/0933/А от 14.03.2023, по государственному контракту № F9230-17/22 от 17.08.2022,  

при участии: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 16.04.2021, ФИО3 по доверенности № 2/Д-47  от 31.05.2023,  

от ответчика – ФИО4 по доверенности № 43 от 14.12.2022,  

РЕШИЛ:

Исковые требования ФГКУ "СТЗ" ФМБА России (ИНН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Обязать ООО "РТ-Соцстрой" (ИНН 

<

***>), в месячный срок с даты вступления  решения в законную силу, устранить выявленные нарушения, согласно акту выездной проверки  Крымского управления Ростехнадзора № 14-03/09-33/А от 14.03.2023, по государственному  контракту № F9230-17/22 от 17.08.2022, а именно:  

1. Устранить нарушения требований порядка ведения общего журнала работ (3 и 6  разделы);  

2. Устранить нарушения требований предоставления исполнительной документации (в  полном объеме представить исполнительную документацию на выполненные работы по  устройству свай и бетонирование подпорных стен);  

3. Устранить нарушения требований, предъявляемых к проектной документации  (установить на выезде из стройплощадки посты мойки колес, предусмотренные проектом);  

4. Устранить нарушения требований, предъявляемых к проектной документации,  организовать на строительную площадку (количество и расположение бытовых контейнеров и  складских помещений, количество выездов, устройство временных дорог должно соответствовать  проекту организации строительства);  

5. Устранить нарушения требований, предъявляемых к проектной документации,  организовать отвод поверхностных вод контуру строительной площадки;  

6. Устранить ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту в части требований  проектной документации (не предоставлена техническая документация, согласно требованиям,  

правил, в том числе ее утвержденные перечни по эксплуатации электроустановок строительной  площадки объекта и организацию эксплуатации временных сетей электроснабжения).  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО "РТ-Соцстрой" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: В.П. Сорокин