АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-27834/2017

г. Новосибирск

24 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2018 года

Решение изготовлено в полном объеме 24 января 2018 года

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Киселевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой У.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 630102, 

<

...>, кабинет № 501, дело по исковому заявлению Государственного казённого учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск

к акционерному обществу «Сибмост» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Оганер», 

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств

при участии: 

от истца: ФИО1 - представитель (доверенность № 10/199 от 15.08.2017, паспорт)

от ответчика: не явился

от третьего лица: ФИО2 – представитель (решение № 1 от 15.01.2018),  

установил:

сущность спора: иск заявлен об обязании ответчика исполнить гарантийные обязательства.

Ответчик отзыв по делу не представил.

Третье лицо иск поддержало, сообщило, что согласно решения по делу № А45-24834/2017 по иску АО «Сибмост» обязано устранить указанные истцом по настоящему делу недостатки в срок до 31.05.2018.

Истец уточнил заявленные требования в части срока устранения недостатков – до 31.05.2018.

Рассмотрев  материалы дела и выслушав представителей истца и третьего лица, суд установил следующее.

Требования истца основаны на следующих обстоятельствах.

Согласно пункту 10 раздела II Устава Государственного/казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (сокращённо - ПСУ НСО ТУ АД) создано для оказания государственных услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

В целях выполнения возложенных полномочий ГКУ НСО ТУ АД (Заказчик), для устранения приобретенных за время эксплуатации дефектов, повышения уровня транспортно-эксплуатационного состояния, приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документации конструктивных элементов моста, обеспечения безопасности проезда транзитного транспорта размещен государственный заказ, и по результатам открытого  аукциона в электронной форме заключен государственный контракт №. 2013.16258 от 25.02.2013 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста ч/р Кама на 80 км а/д «Куйбышев - Северное» в Северном районе Новосибирской области с открытым акционерным обществом «Сибмост» (Подрядчик).

В соответствии с п. 1.1. Контракта Подрядчик принял на себя обязательство выполнить подрядные работы по капитальному ремонту моста ч/р Кама на 80 км а/д «Куйбышев - Северное» в Северном районе Новосибирской области (работы), в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1 к Контракту) и утвержденной проектной и рабочей документацией, обеспечив выполнение работ в установленные п. 3.2. Контракта сроки и сдачу Объекта в эксплуатацию, а Заказчик обязался принять качественно выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

В соответствии с п. 9.1 Контракта гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.

Согласно п. 9.2 Контракта гарантийный срок исчисляется с даты приемки объекта в эксплуатацию и устанавливается на:

-земляное полотно - 4 года;

-мостовое сооружение - 5 лет;

-дорожная одежда (асфальтобетон) - 4 года;

-дорожные знаки, сигнальные столбики - 2 года;

-металлическое барьерное ограждение - 4 года.       

Объект принят в эксплуатацию в октябре 2013 года, что подтверждается Актом приемочной комиссии от 02.10.2013.

В соответствии с выданным гарантийным паспортом на указанный Объект  гарантийный срок на мостовое сооружение составляет 5 лет, на подходы к мостовым сооружениям (земляное полотно, дорожная одежда, металлическое барьерное ограждение) - 4 года.

Согласно условиям Контракта в случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.

В соответствии с п. 1 статьи 755 Гражданского кодекса РФ Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с государственным контрактом на протяжении гарантийного срока.

В рамках контроля за исполнением гарантийных обязательств Подрядчиком в ходе проведенного 15 мая 2017 года комиссионного осмотра мостового перехода, о дате проведения которого уведомлен Подрядчик посредством направления телефонограммы 12.05.2017 и письма № 2584 от 12.05.2017 о проведении комиссионного обследования, был выявлен ряд дефектов, в том числе, повреждения, разрушения, снижающие транспортно-эксплуатационные характеристики сооружения:

морозное разрушение бетона укрепления конусов насыпи -18 м2, морозное   разрушение   бетона   водоприемных   приспособлений водоотводных лотков - 2 м2,  морозное  разрушение  цементнобетонного  покрытия  тротуарных проходов - 8 м2.

Срок устранения выявленных дефектов установлен до 15.06.2017.

Данные обстоятельства подтверждаются актом обследования сооружения от 15.05.2017, ведомостью выявленных дефектов, фотоматериалами.

Акт обследования сооружения составлен в присутствии представителей Заказчика, Подрядчика, эксплуатирующей организации.

Дополнительно 05.06.2017 Заказчиком в адрес ответчика направлено письмо о выявлении дефектов.

В ходе проведенного 23.06.2017 повторного осмотра сооружения установлено, что подрядная организация выявленные ранее повреждения, разрушения, дефекты, снижающие транспортно-эксплуатационные качества сооружения, не устранила в полном объеме, что подтверждается Актом повторного обследования гарантийного объекта от 23.06.2017, составленного при участии Заказчика и эксплуатирующей организации, ведомости устранения дефектов, согласно которой 2 из выявленных ранее дефектов не устранены, а именно: морозное разрушение бетона укрепления конусов насыпи, морозное разрушение цементнобетонного покрытия тротуарных проходов. 

Дефекты, перечисленные в приложении к акту повторного обследования объекта от 23.06.2017, АО «Сибмост» должно было устранить в срок до 08.07.2017.

Письмом № 1946 от 12.07.2017, поступившим в адрес ПСУ НСО ТУ АД, подрядная организация АО «Сибмост» обязалась приложить все усилия для скорейшего устранения выявленных дефектов, однако к устранению дефектов не приступила.

Согласно Акту третьего обследования гарантийного объекта от 19.07.2017 и ведомости устранения недостатков выявленные дефекты ответчиком не устранены.

Срок устранения дефектов установлен до 03.08.2017.

В то же время, в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в соответствии с п. 15.4 Контракта в адрес Ответчика ГКУ НСО ТУ АД направлена претензия об устранении дефектов, возникших в период действия гарантийных обязательств № 4469 от 01.08.2017, которая до настоящего времени не исполнена.

Ответчик не оспаривает, сам факт наличия дефектов, а также то, что они были обнаружены в пределах гарантийного срока. Согласно письмам № 1946 от 12.07.2017, № 2537 от 31.08.2017 прилагает все усилия для урегулирования данного вопроса, в качестве причин неисполнения гарантийных обязательств по устранению дефектов сооружения ссылается на то, что работы выполнялись субподрядной организацией ООО «Оганер», г. Омск, которая своевременно не устранила выявленные дефекты по требованию ответчика.

Однако, в договорных отношениях по предмету спора какое-либо третье лицо, в том числе, субподрядная организация, с истцом не состоит. Действия либо бездействие субподрядной организации на обязательства сторон по Контракту не влияют.

Согласно п. 11.5 Контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.

Таким образом, до настоящего времени работы по устранению повреждений и иных дефектов моста ч/р Кама на 80 км а/д «Куйбышев -Северное» в Северном районе Новосибирской области (гарантийные обязательства по Контракту) АО «Сибмост» не выполнены, в результате чего, выявленные недостатки значительно снижают транспортно-эксплуатационные показатели мостового перехода, угрожают безопасности дорожного движения и негативно влияют на долговечность сооружения, следовательно, движение транспортных средств на данном участке является небезопасным.

В предмет доказывания по данному спору включены и подтверждаются фактическими обстоятельствами и приложенными письменными доказательствами, следующие моменты:

-существование у ответчика обязанности, о понуждении к исполнению которой заявлен иск - в данном случае с исполнением гарантийных обязательств,

-направление уведомления об обнаружении недостатков и их исправлении в течение гарантийного срока,

-факт неисполнения гарантийных обязательств.

По гарантийному обязательству, сколько бы недостатки не проявлялись, они подлежат устранению, если срок на такое устранение не истек.

Ответчик иск не оспорил.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с п. 1 статьи 755 Гражданского кодекса РФ подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

В соответствии с п. 2 ст. 755 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

Согласно ч. 3 ст. 724 и ч. 1 ст. 737 ГК РФ Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Истец заявленные требования документально обосновал.

Ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств устранения недостатков не представил.

При указанных обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

обязать акционерное общество «Сибмост» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск в срок до 31.05.2018 безвозмездно устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока, указанные в актах обследования сооружения и ведомостях устранения дефектов от 15.05.2017  (с учетом частичного  выполнения), 23.06.2017, 19.07.2017, на Объекте мост ч/р Кама на 80 км а/д «Куйбышев – Северное» в Северном  районе Новосибирской области, а именно: 

- морозное разрушение бетона укрепления конусов насыпи 18 м2;

- морозное разрушение цементнобетонного покрытия тротуарных проходов 8 м2.

Взыскать с акционерного общества «Сибмост» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск в пользу Государственного казённого учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск 6 000 рублей госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Резолютивная часть решения объявлена в заседании суда. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, постановления арбитражного суда, в Арбитражный суд Западно - Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

   Судья                                                                                         И.В. Киселева