Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7460/2022

09 июля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с.з. ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "МОСОБЛСТРОЙ-31" (ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ДАК ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО2 по д. от 10.01.2022; 

- от ответчика: ФИО3; 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МОСОБЛСТРОЙ-31" (далее – ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДАК ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ") о взыскании 10753877,71 руб. задолженности, 1075387,77 руб. неустойки за период с 11.07.2019 по 17.01.2022 с перерасчетом неустойки до фактического исполнения решения суда по договору подряда от 25.10.2018 № 33-2018 (далее – Договор).

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" (подрядчиком) и ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого Подрядчик из собственных материалов, своими силами и средствами выполнит работы по декоративной отделке внутренних фасадов «Тематическая зона» - в соответствии с требованиями технической документации и Укрупненной сметы (Приложение №1 к настоящему Договору подряда), установленными законодательством РФ нормами, правилами и стандартами, в т.ч. СНиП РФ, на объекте Заказчика «Парк развлечений», расположенном по адресу: РФ, г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1 (далее - Объект), и сдаст результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его - в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с п. 3.2. Договора Подрядчик должен практически завершить работу не позднее 30 мая 2019 года, плюс один месяц на устранение замечаний - в соответствии с Графиком производства работ - Приложение №2 к настоящему Договору. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком п. 2.3. настоящего Договора, сроки начала и завершения работ увеличиваются на соразмерное количество дней просрочки исполнения Заказчиком обязательств.

Согласно п. 3.4. Договора в случае нарушения сроков начала, завершения работ, промежуточных сроков, установленных настоящим Договором и Графиком производства работ, сроков предоставления банковских гарантий, Заказчик имеет право по своему выбору:

-применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1%, но не более 10 % от цены Договора, согласованной в п. 4.1. Договора, за каждый календарный день просрочки обязательства. Стороны подтверждают соразмерность указанной неустойки последствиям нарушения Подрядчиком обязательства по срокам выполнения работ. Убытки, причинённые Подрядчиком Заказчику в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, взыскиваются сверх неустойки.

-потребовать от Подрядчика возврата неотработанной части аванса (-ов), уплаченного Заказчиком по настоящему договору, а Подрядчик обязан осуществить возврат неотработанной части аванса в полном объеме в течение трех дней, начиная с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику

По п. 4.1. Договора Заказчик оплатит Подрядчику за выполнение всех работ, оговоренных в условиях Договора, общую сумму в размере, обусловленном утвержденными сторонами расценками (Приложение № 1 к настоящему Договору) и фактически выполненными объемами работ. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 196101186,12 руб. 

В силу пункта 5.1.1. Договора первый авансовый платеж - 10 % от общей суммы настоящего Договора, указанной в п.4.1. Договора, что составляет 19610118,62 руб. перечисляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора и получения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату. В течение 5-ти дней, начиная с даты оплаты Заказчиком аванса - Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру на сумму оплаченного аванса.

В соответствии с пунктом 5.1.2. Договора второй авансовый платеж в размере 20% от общей суммы настоящего Договора, указанной в п. 4.1. Договора, что составляет 39220237,23 руб. перечисляется Заказчиком до конца ноября 2018 г., при условии получения Заказчиком от Подрядчика оригиналов банковской гарантии возврата первого и второго авансового платежа, предусмотренных п. 5.1.1. и 5.1.2. Договора и банковской гарантии исполнения обязательств, согласованных в п. 5.3. Договора, и получения счета Заказчиком. В течение 5-ти дней, начиная с даты оплаты Заказчиком аванса - Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру на сумму оплаченного аванса.

Согласно пункту 5.1.3. Договора стороны ежемесячно производят приемку-сдачу выполненных работ, что подтверждается актами приемки (акт формы КС-2 и справка КС-3). Оплата указанных работ производится Заказчиком с пропорциональным зачетом перечисленных авансов и удержанием суммы окончательного расчета, согласованной в п. 5.1.4. Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами актов и справок формы КС-2 и КС-3, предоставления счета и счета-фактуры и передачи Подрядчиком по акту Заказчику исполнительной документации, необходимой для сдачи результата выполненных работ в эксплуатацию.

По пункту 5.1.4. Договора окончательный расчет (гарантийное удержание) по настоящему Договору составляет 5%) от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора. Выплата суммы окончательного расчета производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после:

- завершения всех работ (подписания сторонами последнего (по хронологии) из актов приемки-передачи выполненных работ по настоящему договору и справок форм КС-2 и КС-3 и актов-отчетов) давальческом сырье),

-передачи Подрядчиком по акту Заказчику исполнительной документации, необходимой для сдачи результата выполненных работ в эксплуатацию (подписание Заказчиком Акта приема-передачи исполнительной документации и журналов учета выполнения работ),

-получения Заказчиком от Подрядчика оригинала безотзывной и безусловной банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период, выданной согласованным с Заказчиком банком, в форме, предварительно согласованной с Заказчиком (Приложение № 5 - Образец банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период), соответствующей условиям, согласованным в п. 5.5. Договора,

-предоставления Заказчику Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату.

В силу пунктов 5.3., 5.3.2. Договора выплата авансового платежа, предусмотренного п. 5.1.1 Договора, производится Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком следующей банковской гарантии: безотзывной и безусловной банковской гарантии исполнения обязательств, выданной согласованным с Заказчиком банком, в форме, предварительно согласованной с Заказчиком (Приложение № 4 - Образец банковской гарантии исполнения обязательств).

В соответствии с пунктом 6.38. Договора при нарушении Заказчиком своих договорных обязательств, указанных в п. 6.31. - 6.37. Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0.1% от стоимости не принятых (неоплаченных) в срок работ, но не более 10% от общей суммы Договора, а так же обязуется компенсировать Подрядчику документально подтверждённые убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком в ходе выполнения Работ норм и требований органов строительного надзора г. Москвы, в том числе суммы выплаченных Подрядчиком штрафов/пеней, наложенных государственными или муниципальными органами, в связи с нарушениями строительных норм и требований при производстве работ.

Согласно пункту 7.1. Договора Стороны ежемесячно производят приемку-сдачу выполненных работ, что подтверждается актами приемки (справки формы КС-2 и КС-3). В случае, когда последняя календарная дата отчетного периода приходится на выходной или праздничный дни - указывать в акте и справке форм КС-2 и КС-3 последний рабочий день отчетного периода. Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о необходимости приемки работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такого уведомления (акта приемки-передачи работ и справки по формам КС-2, КС-3) проверяет и принимает работу с условием, что все обязательства Подрядчика в соответствии с Договором выполнены. Установленный настоящей статьей период приемки Заказчиком работ входит в общий срок выполнения работ Подрядчиком (ст.3.2. Договора).

По пункту 7.4. Договора Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы в состоянии, обеспечивающем дальнейшее производство работ и нормальную эксплуатацию объекта, в соответствии с требованиями СНиП. Одновременно со сдачей результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику по Акту приема-передачи (Приложение №7 к настоящему договору) комплект исполнительной документации и журналов учета выполнения работ (исполнительные схемы, акты скрытых работ, акты испытаний, наладки, сертификаты, паспорта и т.п.), соответствующих требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации, установленным РД-11-02-2006, к порядку ведения журналов учета выполнения работ, установленным РД-11-05-2007,- в четырех экземплярах на бумажном носителе, заверенных печатью Подрядчика, и один экземпляр на CD-диске, в согласованном Сторонами формате.

В силу пункта 7.5. Договора, в случае если Подрядчик не предоставит Заказчику одновременно с последним (по хронологии) актом о приемке выполненных работ формы КС-2 исполнительную документацию и журналы учета выполнения работ, необходимые для сдачи результата работ в эксплуатацию, в соответствии с п. 7.4. Договора, в полном объеме. Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый календарный день просрочки предоставления исполнительной документации, но не более 10% от стоимости Договора.

В соответствии с пунктом 7.6. Договора стороны договорились, что после окончательной приемки работ, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков предоставления исполнительной документации и журналов учета выполнения работ. Заказчик имеет право при окончательном расчете с Подрядчиком, при проведении окончательных расчетов, имеет право удержать из причитающихся Подрядчику сумм, сумму штрафа (нестойки) за нарушение последним договорных обязательств либо, по своему усмотрению, провести зачет суммы штрафа (неустойки) в счет суммы окончательного расчета. Настоящим, Подрядчик заявляет, что дает согласие на проведение указанного зачета Заказчиком при обязательном уведомлении Подрядчика за 15 календарных дней.

Стороны Договора подписали акт о приемке выполненных работ от 30.06.2019 № 5, согласно которому за отчетный период с 01.06.2019 по 30.06.2019 выполнено работ стоимостью 15986424,39 руб., выполнено работ с начала строительства включая отчетный период стоимостью 169123021,81 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2019 № 5 на сумму 15986424,39 руб. 

ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" направило ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" претензию от 08.12.2021 с требованием оплаты задолженности 

Отказ ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" в суд с настоящим иском. 

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт сдачи-приемки работ стоимостью 15986424,39 руб. подтверждается подписанным заказчиком без возражений по объему и качеству работ актом о приемке выполненных работ от 30.06.2019 № 5, справкой о стоимости выполненных работ и затрат. 

Ответчик указывает, что дополнительным соглашением от 30.12.20218 № 1 стоимость работ уточнена и составила 199424935,04 руб. Подрядчик выполнил работы стоимостью 169123021,81 руб., в том числе 8456151,09 руб. гарантийного удержания, согласно актам от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 30.04.2019 № 3, от 31.05.2019 № 4, от 30.06.2019 № 5. 

Заказчик оплатил работы на сумму 158369144,10 руб. согласно представленным в материалы дела платежным поручениям. Исполнительная документация представлена подрядчиком частями и с большим опозданием (10.12.2019 и 24.03.2020). Последние КС-2, КС-3 подписаны 30.06.2019. 

В соответствии с п. 7.5. Договора сумма неустойки за период с 01.07.2019 по 23.03.2020 составляет 53246456,31 руб., но не более 10%, то есть 19942493,50 руб.  

Ответчик указывает, что Подрядчик не предоставил банковскую гарантию (п. 5.3.2. Договора). 

Между тем в соответствии с п. 3.4. Договора размер неустойки за период с 26.01.2019 по 31.05.2019 составляет 25127541,18 руб., но не более 10% от стоимости Договора, то есть 19942493,50 руб. 

Таким образом, ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" имеет задолженность в размере 10753877,71 руб., ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" имеет задолженности на сумму 39884987 руб. 

Руководствуясь п. 7.6. Договора и ст. 410 ГК РФ ответчик произвел зачет задолженности по оплате работ на сумму штрафа неустойки, о чем уведомил истца письмом от 25.05.2022 № 6. 

В результате зачета задолженность в пользу ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" составляет 29131109,29 руб., в связи с чем ответчик просит суд отказать истцу в иске.

Как следует из заявления о зачете от 25.05.2022 № 6, ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" на основании п. 7.6. Договора и ст. 410 ГК РФ произвел зачет суммы задолженности заказчика в размере 10753877,71 руб. на суммы штрафов подрядчика в размере 39884987 руб.

ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" представило доказательства направления письма от 25.05.2022 № 06 ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" в виде почтовой квитанции, описи вложения в ценное письмо. 

Истец указывает, что заявленная сумма исковых требований не является гарантийным удержанием, имея другую правовую природу, являясь оплатой за выполненные в июне 2019 года работы, в связи с чем порядок их оплаты предусмотрен п. 5.1.3. Договора, а не п. 5.1.4. Договора, как ошибочно полагает ответчик. Вся исполнительная документация 10.12.2019 и 24.03.2020 передана подрядчиком заказчику, что подтверждается соответствующими актами приема-передачи исполнительной документации, подписанными ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" и застройщиком – АО «Регион-Строй»; с момента передачи исполнительной документации каких-либо претензий, связанных с выполнением работ истцу не поступало. Декоративная отделка фасадов была выполнена в полном объеме, необходимом заказчику для введения объекта в эксплуатацию. В начале 2020 года Парк развлечений «Остров мечты» сдан в эксплуатацию, в настоящее время функционирует. 

Истец указывает, что в ходе выполнения работ ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" периодически выявляло обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению работ: отсутствие строительной готовности объекта для осуществления работ, отсутствие смонтированных рам, не передача проектной, технической документации. Указанные факты фиксировались в форме фотоотчетов; с соответствующими письмами-уведомлениями передавались заказчику для их устранения (от 13.08.2019 № 101, от 30.08.2019 № 047/19, от 15.08.2019 № 040/1, от 13.05.2019). В срок недостатки устранены не были, в результате чего сроки выполнения работ увеличились. Заказчику направлялись письма и проект дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ ввиду непредставления строительной готовности фасадов для выполнения истцом предусмотренных Договором работ. Ответ получен не был. Заказчик 04.09.2019 в одностороннем порядке принял решение передать часть объема работ сторонней организации (письмо от 04.09.2019 № 101), тем самым отказавшись от части выполняемых истцом работ; 25.12.2019 заказчик направил письмо истцу, указав, что выполнение работ уже не лежит в зоне ответственности истца, тем самым отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке, уменьшив объем и стоимость работ. 

Истец представил письмо от 23.03.2020 о передаче исполнительной документации по Договору, подписанное ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ", акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, письмо от 13.05.2019, уведомления об отсутствии строительной готовности фасадов от 13.08.2019 № 101, от 25.08.2019 № 040/19, от 30.08.2019 № 047/19, от 12.09.2019 № 064/19, от 24.09.2019, от 08.10.2019, от 15.10.2019, письмо от 22.10.2019 о протечке кровли, остановке работ, письмо ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" от 04.09.2019 № 101 о передачи работ сторонней организации, письмо ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" от 25.12.2019 о том, что выполнение работ более не лежит в зоне ответственности ООО "МОСОБЛСТРОЙ-31" ввиду недопустимого срыва сроков завершения работ. 

В силу ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Доказательств приостановки работ, за исключением письма от 22.10.2019 б/н, доказательств предоставления банковской гарантии истец в материалы дела не представил. 

Поскольку ООО "ДАК ИНЖИНИРИНГ" произвело зачет задолженности по оплате неустойки за нарушение пунктов 5.3.2 и 3.4 договора, суд отказывает в иске. 

Истец не заявил ходатайство о снижении неустойки, контррасчет не представил.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Косенко Т.А.