АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-10144/2025

г. Нижний Новгород                                                                                 16 сентября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 02.09.2025.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Селезневой Марины Романовны (шифр 42-237),

при ведении протокола открытого судебного заседания  секретарем судебного заседания Ануфриевой А.А., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «А2 ТЭК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 5 548 377 руб. 29 коп., 

в судебном заседании приняли участие:

от истца - ФИО1 (доверенность от 06.06.2025),

от ответчика - ФИО2 (доверенность от 10.04.2025),

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось ООО "Развитие" к ответчику ООО "А2 ТЭК" с иском о взыскании 5 548 377 руб. 29 коп.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.04.2025 указанное заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 17.06.2025 на 14 часов 00 минут, к судебному разбирательству на 17.06.2025 на 14 часов 05 минут.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 17.06.2025 предварительное судебное заседание завершено, дело назначено к судебному разбирательству на 17.07.2025.

В судебном заседании истец ходатайствовал о приобщении расчета неустойки. Ответчик ходатайствовал о приобщении дополнительных материалов, отложении судебного разбирательства. Ходатайства судом рассмотрены и удовлетворены.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 17.07.2025 рассмотрение дела отложено до 02.09.2025.

В материалы дела от истца поступили уточнения, которые в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты судом к рассмотрению.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между ООО "Развитие" (субподрядчик) и ООО "А2 ТЭК" (подрядчик) заключен договор ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023, согласно условиям которого субподрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего Договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Договора, Нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и Строительного контроля, и передать результат Работ подрядчику.

В силу пункта 2.2 договора ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023 субподрядчик в рамках Договора выполняет собственными и/или привлеченными силами следующие работы: работы по изготовлению и монтажу перегородок. Шифр «04-РА-45-4022-РД-АР», виды и объем которых указаны в Спецификации № 1 (Приложение №2); выполнение своих обязательств в течении Гарантийного срока; иные необходимые работы и услуги, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Договором.

Согласно пунктам 3.1, 3.2 договора ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023 субподрядчик обязуется приступить к выполнению работ с даты получения авансового платежа в соответствии с п. 4.1.2. и передачи Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки выполнения работ по изготовлению и монтажу перегородок - с 21 марта 2023 г. по 18 июня 2023 г. с учетом Графика производства работ (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 4.1 договора ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023 цена Договора определена в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и составляет   9 437 846,50 руб., в том числе НДС (20%) 1 572 974,42 руб.

Порядок оплаты предусмотрен пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2 договора ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023 Подрядчик обязуется двумя траншами произвести авансирование по настоящему договору в размере 55,49% от цены договора, что составляет 5 236 616,85 руб., включая НДС (20%) в сумме 872 769,47 руб. Первый транш в размере 27,74% процентов, что составляет 2 618 308,42 руб., включая НДС (20%) в сумме 436384,74 руб. Подрядчик оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату; Второй транш в размере 27,74% процентов, что составляет 2 618 308,42 руб., включая НДС (20%) в сумме 436 384,74 руб. Подрядчик оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 35 (Тридцати пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату; Оставшуюся сумму в размере 44,51% процентов, что составляет 4 201 229,65 руб., включая НДС (20%) в сумме 700 204,94 руб., Подрядчик выплачивает Субподрядчику за фактически выполненные и принятые Подрядчиком, Генподрядчиком работы в течение пяти банковских дней в соответствии с условиями п. 5.3. настоящего Договора.

Порядок приемки выполненных работ указан в пункте 5.8 договора ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023, подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7. Договора, осуществляет осмотр выполненных работ при участии генподрядчика, осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленныхдокументах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенного между Подрядчиком, Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и по результатам: подписывает представленные Субподрядчиком документы, указанные в пункте 5.7. Договора, и направляет пакет документов, представленный Субподрядчиком, Генеральному подрядчику, или направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, факт выполнения работ по договору ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023 подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ №1 от 18.04.2024 и №2 от 10.07.2024 по форме КС-2.

С учетом ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, истцом заявлена ко взысканию задолженность в размере 1 512 472,73 руб.

В соответствии с пунктом 16.2 договора ЖКР/р-4022/4/44 от 21.03.2023 в случае нарушения Подрядчиком, Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых работ по Договору Субподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика, Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

С учетом обстоятельств дела начислена неустойка в сумме 15124,73 руб. 

Вместе с тем между ООО "Развитие" (субподрядчик) и ООО "А2 ТЭК" (подрядчик) заключен договор ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023, согласно условиям которого Субподрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего Договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Договора, Нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и Строительного контроля, и передать результат Работ подрядчику.

В соответствии с пунктом 2.2 договора ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023 субподрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего Договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Договора, Нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и Строительного контроля, и передать результат Работ подрядчику. Субподрядчик в рамках Договора выполняет собственными и/или привлеченными силами следующие Работы: Заделка проходок вентблоков Шифр «04-РА-45-4022-РД-АР», виды и объем которых указаны в Спецификации № 1 (Приложение №2); выполнение своих обязательств в течении Гарантийного срока; иные необходимые работы и услуги, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Договором.

В силу пункта 3.1, 3.3 договора ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023 Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с даты получения авансового платежа в соответствии с п. 4.1.2. и передачи Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки выполнения работ по изготовлению и монтажу перегородок - с 13 июня 2023 г. по 15 июля 2023 г. с учетом Графика производства работ (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 4.1 договора ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023 цена Договора определена в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и составляет1 204 266,00 руб. в том числе НДС (20%) 200 711 руб.

Порядок оплаты предусмотрен пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2 Подрядчик обязуется одним траншем произвести авансирование по настоящему договору в размере 70% от цены договора, что составляет 842 986,20 руб., включая НДС (20%) в сумме 140 497,70 руб. на расчетный счет Субподрядчика в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату. Оставшуюся сумму в размере 30% процентов, что составляет 361 279,80 руб., включая НДС (20%) в сумме 60 213,30 руб, Подрядчик выплачивает Субподрядчику за фактически выполненные и принятые Подрядчиком, Генподрядчиком работы в течение пяти банковских дней в соответствии с условиями п. 5.3. настоящего Договора.». Расходы по материалам несет Подрядчик.

Порядок приемки выполненных работ указан в пункте 5.8 договора                   ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023 подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7. Договора, осуществляет осмотр выполненных Работ при участии Генподрядчика, осуществляетпроверку сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенногомежду Подрядчиком, Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и по результатам: подписывает представленные Субподрядчиком документы, указанные в пункте 5.7. Договора, и направляет пакет документов, представленный Субподрядчиком, Генеральному подрядчику, или направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, факт выполнения работ по договору ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023 подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ №1 от 10.07.2024 по форме КС-2.

С учетом ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, истцом заявлена ко взысканию задолженность в размере 337194,48 руб.

В соответствии с пунктом 16.2 договора ЖКР/р-4022/4/49 от 09.06.2023 В случае нарушения Подрядчиком, Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ по Договору Субподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика, Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

С учетом обстоятельств дела начислена неустойка в сумме 3371,95 руб. 

Между ООО "Развитие" (субподрядчик) и ООО "А2 ТЭК" (подрядчик) заключен договор ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022, согласно условиям которого субподрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего Договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Договора, Нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и Строительного контроля, и передать результат Работ подрядчику.

В соответствии с пунктом 2.2 договора ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022 субподрядчик в рамках Договора выполняет собственными и/или привлеченными силами следующие Работы: работы по установке дверей, шифр 04-РА-23-419-ПД-АР , виды и объем которых указаны в Спецификации № 1 (Приложение №1), выполнение своих обязательств в течении Гарантийного срока; иные необходимые работы и услуги, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Договором.

В силу пункта 3.1, 3.2 договора ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022 Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в течение 3 календарных дней с даты получения авансового платежа в соответствии с п. 4.1.1. и передачи Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки выполнения работ составляют с 02 декабря 2022г. по 10 декабря 2022г. с учетом Графика производства работ (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 4.1 договора ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022 цена Договора определена в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и составляет 1 531 700 руб., в том числе НДС (20%) в размере 255 283,33 руб.

Порядок оплаты предусмотрен пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2 Оплата за выполнение Работ производится следующим образом: подрядчик обязуется произвести авансовый платеж по договору составляет 50% от цены договора, что составляет 765 850 руб., в т.ч. НДС (20%) в сумме 127 641,67 руб., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату; Оставшуюся сумму Подрядчик выплачивает Субподрядчику одним траншем, который составляет 50% от цены договора в размере 765 850 руб., в т.ч. НДС (20%) в сумме        127 641,67 руб., оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика за фактически выполненные и принятые Генподрядчиком работы в течение пяти банковских дней на основании Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2). Расходы по материалам несет Субподрядчик.

Согласно дополнительному соглашению №2 от 20.02.2023 цена по договору установлена в размере 1484100 руб.

Порядок приемки выполненных работ указан в пункте 5.8 договора                   ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022 подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7. Договора, осуществляет осмотр выполненных Работ при участии Генподрядчика, осуществляетпроверку сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенногомежду Подрядчиком, Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и по результатам: подписывает представленные Субподрядчиком документы, указанные в пункте 5.7. Договора, и направляет пакет документов, представленный Субподрядчиком, Генеральному подрядчику, или направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, факт выполнения работ по договору ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022 подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ №1 от 13.11.2023 по форме КС-2.

С учетом ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, истцом заявлена ко взысканию задолженность в размере 188568 руб.

В соответствии с пунктом 17.2 договора ЖКР/р-419/2/28 от 02.12.2022 в случае нарушения Подрядчиком, Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ по Договору Субподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика, Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

С учетом обстоятельств дела начислена неустойка в сумме 1885,68 руб. 

Также между ООО "Развитие" (субподрядчик) и ООО "А2 ТЭК" (подрядчик) заключен договор ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023, согласно условиям которого Субподрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего Договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Договора, Нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и Строительного контроля, и передать результат Работ подрядчику.

В соответствии с пунктом 2.2 договора ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 Субподрядчик в рамках Договора выполняет собственными и/или привлеченными силами следующие Работы:   работы по изготовлению и монтажу ограждений входных групп секций № 6, 7, 8, 9, Шифр проекта 04-РА-45-4022-ПД-АР л.50-59, виды и объем которых указаны в Спецификации № 1 (Приложение №2); выполнение своих обязательств в течении Гарантийного срока; иные необходимые работы и услуги, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Договором.

Между сторонами заключено дополнительное соглашение №1 от 17.01.2024 об увеличении объема и стоимости работ.

В силу пункта 3.1, 3.2 договора ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с даты передачи Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций ограждений - с 20 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. с учетом Графика производства работ (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 4.1 договора ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 цена Договора определена в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и составляет    1 488 876 руб., в том числе НДС (20%) 248 146 руб.

Порядок оплаты предусмотрен пунктами 4.1.1, 4.1.2 договора ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 Оплата за выполнение Работ производится следующим образом: Подрядчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 60% (Шестьдесят) процентов, что составляет 893 325,60 (Восемьсот девяносто три тысячи триста двадцать пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС (20%) 148 887,60 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 коп., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату; Оставшуюся сумму Подрядчик выплачивает Субподрядчику за фактически выполненные и принятые Генподрядчиком работы в течение пяти банковских дней в соответствии с условиями п.п.4.9., 5.5. настоящего Договора. Расходы по материалам несет Подрядчик. Подрядчик приобретает и оплачивает материалы на основании Спецификации, предоставленной Субподрядчиком, и согласованной с Подрядчиком. Ответственность за выбор Поставщика, количество и качество приобретаемых материалов несет Субподрядчик.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 17.01.2024 цена договора указана в сумме 1965041 руб.

Порядок приемки выполненных работ указан в пункте 5.8 договора ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7. Договора, осуществляет осмотр выполненных работ при участии Генподрядчика, осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенного между Подрядчиком, Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и по результатам: подписывает представленные Субподрядчиком документы, указанные в пункте 5.7. Договора, и направляет пакет документов, представленный Субподрядчиком, Генеральному подрядчику, или направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, факт выполнения работ по договору ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ №1 от 10.07.2024 по форме КС-2.

С учетом ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, истцом заявлена ко взысканию задолженность в размере 1032414,58 руб.

В соответствии с пунктом 17.2 договора ЖКР/р-4022/4/79 от 20.12.2023 в случае нарушения Подрядчиком, Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ по Договору Субподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика, Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

С учетом обстоятельств дела начислена неустойка в сумме 10324,15 руб. 

Наряду с изложенным между ООО "Развитие" (субподрядчик) и ООО "А2 ТЭК" (подрядчик) заключен договор ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023, согласно условиям которого Субподрядчик обязуется в срок и на условиях, настоящего Договора, выполнить комплекс работ, направленный на завершение строительства Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Договора, Нормативно-технической документации, указаниями подрядчика и Строительного контроля, и передать результат Работ подрядчику.

В соответствии с пунктом 2.2 договора ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 Субподрядчик в рамках Договора выполняет собственными и/или привлеченными силами следующие Работы: работы по кладке наружных стен и стен лоджий СЕКЦИЙ № 8, № 9, Шифр проекта 04-РА-45-4022-РД-АР листы 14-20, виды и объем которых указаны в Спецификации № 1 (Приложение №2); выполнение своих обязательств в течении Гарантийного срока; иные необходимые работы и услуги, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с Договором.

В силу пункта 3.1, 3.2 договора ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ с даты передачи Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций ограждений - с 17 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. с учетом Графика производства работ (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 4.1 ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 цена Договора определена в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и составляет1 816 295,80 руб., в том числе НДС (20%) 302 715,97 руб.

Порядок оплаты предусмотрен пунктами 4.1.1 договора ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 подрядчик обязуется произвести оплату Субподрядчику за фактически выполненные и принятые Подрядчиком, Генподрядчиком работы в течение пяти банковских дней в соответствии с условиями п. 5.5. настоящего Договора.

Порядок приемки выполненных работ указан в пункте 5.8 договора ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в пункте 5.7. Договора, осуществляет осмотр выполненных Работ при участии Генподрядчика, осуществляет проверку  сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся впредставленных документах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенного между Подрядчиком, Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и порезультатам: подписывает представленные Субподрядчиком документы, указанные в пункте 5.7. Договора и направляет пакет документов, представленный Субподрядчиком, Генеральному подрядчику, или направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. Повторное рассмотрение Подрядчиком представленных Субподрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, факт выполнения работ по договору ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ №1 от 10.07.2024 по форме КС-2.

С учетом ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, истцом заявлена ко взысканию задолженность в размере 1836338,51 руб.

В соответствии с пунктом 17.2 договора ЖКР/р-4022/4/63 от 17.10.2023 в случае нарушения Подрядчиком, Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ по Договору Субподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика, Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

С учетом обстоятельств дела начислена неустойка в сумме 18363,39 руб. 

В связи с наличием задолженности по оплате выполненных работ в рамках  перечисленных договоров ответчику направлена претензия, оставленная последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с данными исковыми требованиями.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье  431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (пункт 3 статьи 709 Гражданского кодекса).

С учетом статей 1, 9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Подписав договоры на данных условиях, стороны действовали в соответствии с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе и как следствие согласились с условиями договоров. 

Исполнение обязательств истца по перечисленным выше договорам подтверждено представленными в материалы дела КС-2, КС-3 и не оспорено участниками дела.

В свою очередь ответчиком обязательства по оплате выполненных работ в заявленной части с учетом принятых судом уточнений не исполнены, доводы об отсутствии подтверждающих документов по факту выполненных работ опровергаются материалами дела.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо опровергающих доводы истца доказательств, ответчиком в материалы дела не представлено.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Каких-либо обоснованных возражений ответчиком в материалы дела не представлено. 

Неустойка является одни из способов обеспечения обязательств в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Представленные в материалы дела расчеты и период проверены судом и признаны обоснованными, ходатайств о снижении неустойки применительно к статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено. 

Доводы ответчика опровергаются представленными в материалы дела доказательствами и не могут быть приняты судом во внимание.

Принимая во внимание изложенное, заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по государственной пошлине согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А2 ТЭК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 4 906 988 руб. 30 коп. основного долга, 49 069 руб. 90 коп. неустойки, а также 173 682 руб.00коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                         М.Р. Селезнева