405/2023-55167(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  28 марта 2023 года А46-17211/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Пантелеевой С.С., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Московка-филиал Ленинский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к управляющей  компании обществу с ограниченной ответственностью «Дом-уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании исполнить гарантийные обязательства, при участии в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  индивидуального предпринимателя ФИО2, индивидуального  предпринимателя ФИО3 ФИО4, Государственной жилищной инспекции  по Омской области  

в судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО5 по доверенности от 01.03.2022 № 1, 

от ответчика – ФИО6 по доверенности от 15.12.2021, участие путем использования  веб-конференции (онлайн-заседание)  

от третьих лиц – не явились, извещены. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по договору № 01/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 8 по ул. В. Иванова, а именно  произвести работы:  

- восстановить целостность конструкции 4 балконов площадью 10,8 кв.м., устранить  отслоение штукатурного слоя, произвести окраску;  

- произвести окраску фасада (со стороны двора) площадью 100 кв.м.; - произвести окраску цоколя площадью 150 кв.м.; 

- восстановить целостность конструкции 4 подъездных козырьков, цементной стяжкой  устроить уклон на козырьках для отвода воды от стены, восстановить гидроизоляцию.  

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по договору № 03/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 46 по пр-кт К. Маркса, а именно  произвести работы;  

- выполнить ремонт штукатурного слоя и произвести окраску фасада (со стороны двора и со  стороны пр-кт К. Маркса) площадью 300 кв.м.;  

- восстановить целостность конструкции 2 подъездных козырьков, цементной стяжкой  устроить уклон на козырьках для отвода воды от стены, восстановить гидроизоляцию.  

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по договору № 05/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 59 по пр-кт К. Маркса, а именно  произвести работы:  

- выполнить ремонт штукатурного слоя и произвести окраску фасада (со стороны двора)  площадью 585,6 кв.м.  

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по договору № 07/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 61 по пр-кт К. Маркса, а именно  произвести работы:  

- выполнить ремонт штукатурного слоя и произвести окраску фасада (со стороны двора и  торцевой части фасада) площадью 750 кв.м.  

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по Договору № 08/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 81 по пр-кт К. Маркса, а именно  произвести работы:  

- восстановить целостность конструкции 4 балконов площадью 14,08 кв.м., устранить  отслоение штукатурного слоя, произвести окраску;  

- восстановить целостность конструкции подъездных козырьков, цементной стяжкой устроить  уклон на козырьках для отвода воды от стены, восстановить гидроизоляцию;  

- выполнить ремонт штукатурного слоя и произвести окраску фасада (со стороны двора и  торцевой части фасада, выходящей на МКД № 83 по пр-кт К. Маркса) площадью 292,8 кв.м.;  

- выполнить ремонт угла фасада (с торцевой части фасада, выходящей на МКД № 83 по пр-кт  К. Маркса).  

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по Договору № 09/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 87 по пр-кт К. Маркса, а именно  произвести работы:  

- выполнить ремонт штукатурного слоя и произвести окраску фасада (со стороны двора и  торцевой части фасада, выходящей на МКД № 85 по пр-кт К. Маркса) площадью 749,9 кв.м.;  

- восстановить целостность конструкции 4 балконов площадью 10,8 кв.м., устранить  отслоение штукатурного слоя, произвести окраску.  

Обязать управляющую компанию общество с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок, не позднее 15.07.2023 безвозмездно  устранить недостатки по гарантийным обязательствам по Договору № 10/2019-ГМ от  06.06.2019г. по капитальному ремонту фасада МКД № 89 по пр-кт К. Маркса, а именно  произвести работы:  

- выполнить ремонт штукатурного слоя и произвести окраску фасада (со стороны двора и  торцевой части фасада, выходящей на МКД № 87 по пр-кт К, Маркса) площадью 749,9 кв.м;  

- восстановить целостность конструкции 4 балконов площадью 10,8 кв.м., устранить  отслоение штукатурного слоя, произвести окраску;  

- восстановить целостность конструкции 4 подъездных козырьков, цементной стяжкой  устроить уклон на козырьках для отвода воды от стены, восстановить гидроизоляцию.  

Взыскать с управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «Дом- уют» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Московка-филиал Ленинский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  расходы на уплату государственной пошлины в размере 42 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может  быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Судья С.С. Пантелеева   Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.03.2022 7:16:00Кому выдана Пантелеева Светлана Станиславовна