АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А24-1543/2021

г. Петропавловск-Камчатский

12 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 мая 2021 года.

 

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Копыловой А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению 289 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации 

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 4» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях        

 

при участии:

от лиц, участвующих в деле:

не явились, 

 

установил:

289 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации (далее – заявитель, 289 отдел) обратился в арбитражный суд Камчатского края с заявлением о привлечении Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» (далее – Предприятие, ФГУП «ГВСУ № 4») к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Лица, участвующие в деле, при надлежащем извещении, участие в предварительном судебном заедании полномочных представителей не обеспечили, возражений относительно рассмотрения дела в судебном заседании в их отсутствие, в суд не направили.

К участию в предварительном судебном заседании в качестве специалиста допущен начальник отделения 289 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации ФИО2, который дал пояснения по делу.

Суд признал дело подготовленным к рассмотрению по существу и в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, перешел к рассмотрению дела в судебном заседании в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Заслушав пояснения специалиста, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, на основании приказа начальника 289 отдела от 19.02.2021 № 28-АХ в период с 25.02.2021 по 01.03.2021 в отношении ФГУП «ГВСУ № 4» проведена проверка, в ходе которой установлен факт неисполнения Предприятием ранее выданного ему предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства – «Основной пункт базирования ПЛА пр. 09851, пр. 09852 и        судна обеспечения пр. 20183 в б. ФИО3, Камчатский край».2-й этап. Сооружения причального фронта. Шифр – 628-1. Сооружение № 202.

Результаты проверки отражены в акте проверки от 03.03.2021 № 289-21-2021.

По данному факту 24.03.2021 начальником отделения 289 Отдела                             ГАСН МО РФ в отношении ФГУП «ГВСУ № 4» составлен протокол об административном правонарушении № 289/2021-12.

Согласно указанному протоколу Предприятием в нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), пунктов 9.4, 9.5, 8.2.1, 8.3.1 и приложения «В» СП 48.13330.2019 «Организация строительства», пунктов 3.5, 5.18.1 и приложения «Х» СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», пункта 10 РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», пункта 5.5 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации....», разделов №№ 4, 6, 8 СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления», пунктов 17, 18, листа 1, рабочей документации В628-1-2-202-КЖ1, не устранены следующие замечания:

1.                 В общем журнале работ № 1, в Разделе № 4 отсутствуют сведения об устранении выявленных техническим заказчиком недостатков в ходе строительства за 06.05.2020, 22.05.2020, 03.07.2020.

2.                 В представленном журнале бетонных работ отсутствуют сведения о показателях контроля прочности бетона монолитных конструкций нормируемым параметрам через 28 суток за 20.11.2019, 20.03.2020, 09.04.2020, 27.04.2020, 01.05.2020, 12.05.2020, 15.05.2020.

3.                 По выполненным работам по бетонированию железобетонных конструкций Сооружения № 202 не представлен комплект исполнительной документации:

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «6-9/А-Г» на отм. +3,500 (бетонные работы выполнялись 09.04.2020);

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «1-4/А-Г» на отм. +3,500 (бетонные работы выполнялись 12.05.2020);

-  бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия в осях «1-5/А-Г» на отм. +3,500 (бетонные работы выполнялись 20.03.2020);

-  бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия в осях «4-9/А-Г» на отм. +3,500 (бетонные работы выполнялись 06.03.2020);

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «3-7/А-Г» на отм. -2,000 (бетонные работы выполнялись 17.02.2020);

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «6-9/А-Г» на отм. -2,000 (бетонные работы выполнялись 26.01.2020);

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «1-4/А-Г» на отм. -2,000 (бетонные работы выполнялись 28.02.2020);

- бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия шахты «Ш2» (воздухозаборной) в осях «4/1/Г» на отм. +3,750 (бетонные работы выполнялись 03.09.2020);

- бетонирование монолитной железобетонной шахты «Ш2» в осях «4/1/Г» от отм. -0,200 до отм. +3,570 (бетонные работы выполнялись 19.08.2020);

- бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия в осях «1-5/А-Г» на отм. -0,200 (бетонные работы выполнялись 09.01.2020);

- бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия в осях «4/1-9/А-Г» на отм. -0,200 (бетонные работы выполнялись ЗОЛ 1.2019);

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «1-4/А-Г» на отм. -3,100 (бетонные работы выполнялись 22.11.2019);

- бетонирование монолитных железобетонных стен в осях «3-7/А-Г» на отм. -3,100 (бетонные работы выполнялись 08.11.2019);

-  армирование монолитных железобетонных стен в осях «1-5/А-Г» на отм. +10,700 (работы выполнялись с 20.07.2020 года по 04.08.2020);

-  устройство опалубки монолитных железобетонных стен в осях «3-7/А-Г» на отм. +10,700 (работы выполнялись с 23.07.2020 года по 30.07.2020);

-  бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия в осях «4-9/А-Г» на отм. +7,100 (бетонные работы выполнялись 15.05.2020).

При этом в нарушение пункта 17, лист 1 проекта В628-1-2-202-ЮК1 последующие бетонные работы по ярусам ведутся без подтверждения данных о наборе 70% прочности бетона.

4.                 Не представлены акты освидетельствования ответственных конструкций (фундаментной плиты, стен, плит перекрытий сооружения № 202).

5.                 По выполненным работам по устройству наружных сетей канализации «К1» (хозяйственно-бытовой) и «К2» (ливневой) не представлен акт разбивки осей на местности.

6.                 По выполненным работам по устройству колодцев, траншеи, основания, укладке труб и обратную засыпку наружной сети канализации «К1» и «К2» не представлен комплект исполнительной документации, в том числе исполнительные схемы, профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (состав, содержание и оформление в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 (ГОСТ Р 51872-2002) «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»).

7.                 По выполненным работам по устройству колодцев, траншеи, основания, укладка труб и обратную засыпку, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода «ВО» не представлена исполнительная документация (в том числе исполнительные схемы, профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (состав, содержание и оформление в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 (ГОСТ Р 51872-2002) «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»).

8.                 В общем журнале работ № 2 в Разделе № 4 отсутствуют сведения об устранении выявленных техническим заказчиком недостатков в ходе строительства за 06.11.2020, 18.11,2020, 08.12.2020.

9.                 При производстве бетонных работ по бетонированию сооружения в осях «А/1-9», «Б/1-9», «В/1-9» от отм. +10,700 нарушена технология укладки бетонной смеси, в результате чего после распалубки конструкций на поверхностях стен наблюдается участки не однородно уплотненного бетона. На момент проверки участки не однородно уплотненного бетона затерты раствором. При этом не представлены материалы, обосновывающие определение принципов ремонта бетонных   конструкций   и   выбор   методов   защиты   и   ремонта   бетонных конструкций по ГОСТ 32016-2012 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования» (не определено техническое состояние конструкции, включая оценку дефектов и их причин; не обоснован выбор метода ремонта способного обеспечивать эффективное и долговечное восстановление).

В соответствии с положениями главы 25 АПК РФ протокол об административном правонарушении вместе с другими материалами дела направлен в Арбитражный суд Камчатского края для решения вопроса о привлечении Предприятия к административной ответственности.

Согласно части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного контроля (надзора).

Субъектом административного правонарушения в данном случае выступает юридическое лицо, не выполнившее в установленный срок законное предписание.

Объективная сторона предусматривает невыполнение в установленный                       срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 10 статьи 1 ГрК РФ объектом капитального строительства считается здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Под строительством понимается создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) (пункт 13 статьи 1 ГрК РФ).

Как установлено частью 2 статьи 52 ГрК РФ, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется данным Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Частью 6 статьи 52 ГрК РФ предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 утвержден и введен в действие Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее – РД-11-05-2007).

Согласно пункту 10 РД-11-05-2007 специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, путем заполнения его граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр утвержден и введен в действие «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (далее – СП 48.13330.2019).

В соответствии с пунктом 8.2.1 СП 48.13330.2019 лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Согласно пункту 8.3.1 СП 48.13330.2019 по мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания и сооружения и если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает застройщика (технического заказчика) и представителей авторского надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия в виде оформления актов освидетельствования скрытых работ.

В соответствии с пунктом 8.3.2 СП 48.13330.2019 регламент актирования работ, качество которых не может быть проконтролировано после выполнения последующих работ, приведен в приложении «В».

Согласно пункту 9.4 СП 48.13330.2019 застройщик (технический заказчик) осуществляет контроль полноты строительного контроля, проводимого лицом, осуществляющим строительство.

В силу пункта 9.5 СП 48.13330.2019 застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля выполняет, в том числе, верификационный (выборочный) операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ, включая записи в соответствующем разделе общего журнала работ, а также контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25.12.2012 № 109/ГС утвержден              «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (далее – СП 70.13330.2012).

В соответствии с пунктом 3.5 СП 70.13330.2012 данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений , замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал бетонных работ, а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах. Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ.

В соответствии с пунктом 5.18.1 СП 70.13330.2012 строительный контроль законченных конструкций или частей зданий и сооружений следует производить, в том числе на соответствие качества поверхности внешнему виду монолитных конструкций (приложение «X»).

Пунктом 3.23 СП 70.13330.2012 предусмотрено, что производственный контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии с СП 48.13330.

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции; документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ; акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки ответственных конструкций; исполнительные геодезические схемы положения конструкций; журналы работ; документы о контроле качества сварных соединений; акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнительными правилами настоящего свода правил или рабочими чертежами); другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Согласно пункту 5.5.5 СП 70.13330.2012 контроль прочности бетона монолитных конструкций в промежуточном и проектном возрасте следует проводить статистическими методами по ГОСТ 18105, ГОСТ 31914 применяя неразрушающие методы определения прочности бетона по ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690 или разрушающий метод по ГОСТ 28570 при сплошном контроле прочности (каждой конструкции).

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 утверждены и введены в действие Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – РД-11-02-2006).

Согласно пункту 5.5 РД-11-02-2006 освидетельствование участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении № 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.12.2017 № 1647/пр утвержден и введен в действие «СП 349.1325800.2017. Свод правил. Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления», 4, 6, 8 разделами которого установлены: стратегия управления эксплуатацией конструкций в сооружениях, принципы ремонта и усиления несущих конструкций и реализующие их методы, а также контроль качества работ по ремонту и усилению.

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными названным Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Имеющиеся в материалах дела доказательства (протокол об административном правонарушении от 24.03.2021 № 289/2021-12, акт проверки от 24.12.2020 № 200/2020-2, предписание от 24.12.2020 № 200/2020-2, акт  проверки от 03.03.2021 № 289-21-2021 и другие документы) подтверждают в своей совокупности факт неисполнения ФГУП «ГВСУ № 4» в установленный срок в полном объеме выданного ему предписания от 24.12.2020 № 200/2020-2, что образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). 

Доказательства невозможности соблюдения требований законодательства                при строительстве объекта капитального строительства, невозможности своевременного и полного устранения выявленных в ходе осуществления строительного контроля нарушений Предприятием суду не представлены.

Поскольку ФГУП «ГВСУ № 4» не были приняты достаточные меры для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации правил, тов силу 2 статьи 2.1 КоАП РФ оно признается виновным в совершении вменяемого ему административного правонарушения.

Существенных процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении административным органом не допущено. Срок давности привлечения ФГУП «ГВСУ № 4» к административной ответственности на дату рассмотрения дела судом не истек. 

Обстоятельств, позволяющих признать совершенное Предприятием правонарушение малозначительным, судом не установлено.

Санкция части 6 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает административное наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, судом не установлено. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ обстоятельством, отягчающим административную ответственность, суд признает повторное совершение ФГУП «ГВСУ № 4» однородного административного правонарушения, что подтверждается вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Камчатского края по делам № А24-4805/2020, № А24-4806/2020, № А24-4807/2020, № А24-4809/2020, № А24-4810/2020.

При назначении административного наказания по данному делу арбитражный суд учитывает  характер совершенного правонарушения, наличие отягчающего административную ответственность обстоятельства и приходит к выводу о возможности назначить ФГУП «ГВСУ № 4» наказание в виде административного штрафа в размере 55 060 рублей.

Руководствуясь статьями  167–170, 176, 206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

решил:

привлечь федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 4» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 

<

...>)                       к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере                       55 060  рублей.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа:

УФК по Приморскому краю (ФКУ «УФО МО РФ по Приморскому краю»)

л/с 

<

***>

ИНН 

<

***>

КПП 253601001

Единый казначейский счет 40102810545370000012

Счет УФК по Приморскому краю 03100643000000012000

Дальневосточное ГУ Банка России по Приморскому краю / УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

БИК 010507002

ОКТМО 05701000

КБК 187 1 16 01191 01 0005 140

Подлинный документ об оплате штрафа представить в Арбитражный суд Камчатского края.

Разъясняется, что в случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения суда, арбитражным судом направляется копия настоящего решения на взыскание штрафа судебному приставу-исполнителю по месту жительства (нахождения) лица, привлекаемого к административной ответственности. Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, и принудительное исполнение производится непосредственно на основании такого решения.

Решение может быть обжаловано в  Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                                             А.А. Копылова