АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-1118/2023

г. Белгород

27 ноября 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУ  "УКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО  "ПРОЕКТПЛЮС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от  10.12.2021 г. № 13/1254 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:  «Капитальный ремонт МБОУ «Центр образования № 1» (Здание начальной школы)» за  период с 11.03.2022 по 09.03.2023 в размере 261 235 руб. 79 коп., штрафа за несоблюдение  графика выполнения работ в размере 1 000 руб., штрафа за нарушение обязательств, не  имеющих стоимостного выражения в размере 1 000 руб.,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 30.12.2022 г.;  от ответчика: не явился, уведомлен,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "ПРОЕКТПЛЮС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 10.12.2021 г. № 13/1254 на  выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ  «Центр образования № 1» (Здание начальной школы)» за период с 11.03.2022 по  09.03.2023 в размере 79 251 руб. 06 коп., штраф за несоблюдение графика выполнения  работ в размере 1 000 руб., штраф за нарушение обязательств, не имеющих стоимостного  выражения в размере 1 000 руб.  

Взыскать с ООО "ПРОЕКТПЛЮС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 2 551 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела  судом первой инстанции.  

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев