080/2023-266544(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-60219/2023

Дело № А40-286710/22

г. Москва

26 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Титовой И.А., судей: Новиковой Е.М., Порывкина И.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ООО "БРАЙТНЕТ" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.07.2023 по делу № А40-286710/22,  по иску ООО «НАСЛЕДИЕ» (ОГРН:1177746071458, ИНН:

<

***>)  

к ООО «БРАЙТНЕТ» (ОГРН:1077762608990, ИНН:

<

***>)  

о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 1 200 000 руб. по договору от  13.07.2022 № 13/07/22 БРАЙТНЕТ, стоимости давальческого материала в размере 699  223,93 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 75  318,54 руб. за период с 25.11.2022 по 05.06.2023 (ст. 49 АПК РФ),  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 17.03.2022, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 12.05.2021,  

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «НАСЛЕДИЕ» (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью «БРАЙТНЕТ» (далее – ответчик) о взыскании суммы  неотработанного аванса в размере 1 200 000 руб. по договору от 13.07.2022 № 13/07/22  БРАЙТНЕТ, стоимости давальческого материала в размере 699 223,93 руб., процентов  за пользование чужими денежными средствами в размере 75 318,54 руб. за период с  25.11.2022 по 05.06.2023 (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Решением от 05.07.2023 ходатайство ответчика о назначении по делу судебной  экспертизы в порядке ст.82 АПК РФ оставлено без удовлетворения. Взыскан с  общества с ограниченной ответственностью «БРАЙТНЕТ» (ИНН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «НАСЛЕДИЕ» (ИНН: 

<

***>)  

неотработанный аванс в размере 1 200 000 руб., стоимость давальческого материала в  размере 699 223,93 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в  размере 75 318,54 руб. за период с 25.11.2022 по 05.06.2023, госпошлину в размере 32  745 руб.  

ООО «БРАЙТНЕТ», не согласившись с принятым решением, обратилось с  апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По их мнению, при  вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены  нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела.  

В судебном заседании стороны поддержали свои правовые позиции по спору. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив  законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст. ст. 123, 156,  266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела,  заслушав, лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства,  проверив доводы апелляционных жалоб, находит решение Арбитражного суда города  Москвы не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой  инстанции,между ООО «Наследие» (Подрядчик) и ООО «БРАЙТНЕТ» (Субподрядчик)  13.07.2022 был заключен договор субподряда № 13/07/22 БРАЙТНЕТ, согласно  которому Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства  собственными силами выполнить «под ключ» монтажные и пуско-наладочные работы:  по разделу Электрика (ЭОМ, интерьерное освещение, АХО); по разделу Слабые токи  (АПС, АПЗ, СОУЭ, СКУД, СОТС); по разделу Механики (АОВ 1) на Объекте:  «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования  объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры  «Политехнический музей», расположенному по адресу: Новая площадь, д. 3/4,  Тверской р-он, Центральный административный округ г. Москвы» в соответствии с  Ведомостью единичных расценок, и в ориентировочных объемах работ, указанных в  Приложение № 2 к Договору.  

Согласно п. 4.1.12 Договора Субподрядчик несет ответственность за  предоставление рабочей силы в достаточном количестве и надлежащей квалификации,  а также за их доставку, размещение, оформление виз, разрешений на трудовую  деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест и т.п.  

Согласно п.5.1. Договора сдача-приемка работ, выполненных по настоящему  договору, осуществляется - ежемесячно, путем подписания сторонами Актов о приемке  выполненных работ по факту по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных  работ и затрат по форме КС-3.  

В ходе исполнения обязательств по договору Подрядчик передал Субподрядчику  для производства работ давальческий материал на сумму 699 223,93 руб.  

Согласно п.2.2. Договора Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику  авансовый платеж на основании счета.  

Платежным поручением № 4736 от 04.08.2022 на расчетный счет Субподрядчика  был перечислен авансовый платеж в размере 1 200 000 руб.  

Как указывает истец, с ноября 2022 года представители Субподрядчика на  Объекте не появлялись, работы не выполнялись. Указанные обстоятельства  свидетельствовали о ненадлежащем исполнении Субподрядчиком принятых на себя  обязательств по Договору и о невозможности выполнения работ в сроки,  предусмотренные договором.  

Истец 18.11.2022 направил Ответчику претензию с требованием вернуть  неотработанный аванс и стоимость давальческого материала, а также уведомил  Ответчика о расторжении договора на основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса  Российской Федерации. До момента расторжения договора акты выполненных работ  Ответчиком не представлены.  

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок  урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с  настоящим иском в суд.  

Возражая по исковым требованиям ответчик в своем отзыве ссылается на  следующие обстоятельства.  

В силу ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик  обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ.  

Согласно п. 1.1.2 Договора, Подрядчик обязуется создать Субподрядчику  необходимые условия для выполнения работ в пределах захватки, ограниченной осями  и высотным отметкам, а также фактическому объему работ, поручаемых Подрядчиком  по Настоящему Договору.  

31.08.2022 для выполнения работ Подрядчиком переданы места производства  работ на отметке +7.000 по осям 1-17/Ал-Мл и на отметке +15.000, +18.000 Север по  осям 1-17/Ал-Мл.  

Как указывает ответчик, иные участки работ так Субподрядчику и не  передавались. В нарушение п. 4.2.11 Договора Подрядчик не ознакомил Субподрядчика  с ПОС, ППР, технологическими картами и иной технической документацией в полном  объеме. Рабочая документация передавалась на ознакомление Субподрядчику частями  в период с августа 2022 вплоть до расторжения Договора, по мере внесения в нее  корректировок, не зависящих от Субподрядчика. Согласно Ведомости договорных  единичных расценок исполнение Договора выполняется с использованием  давальческих материалов, которые не были предоставлены Субподрядчику до начала  работ в достаточном объеме.  

Из содержания отзыва усматривается, что Субподрядчик своевременно  приступил к выполнению Работ и выполнял Работы с учетом предоставления  Подрядчиком строительной готовности мест производства работ, предоставления  давальческих материалов и технической документации. В ходе работ регулярно  оформлялась исполнительная документация с участием Подрядчика. Предоставленные  давальческие материалы были израсходованы на производство работ. Субподрядчик  неоднократно уведомлял Подрядчика о готовности части работ к приемке, однако в  нарушение п. 5.5 Договора, Подрядчиком до настоящего времени так и составлен ни  один Акт приемки выполненных работ.  

Также ответчик указывает, что в нарушение п. 5.4 и п. 5.5 Договора, Подрядчик  после получения уведомления не произвел приемку этапа работ и не составил  промежуточный Акт приемки выполненных работ на бумажном носителе в двух  экземплярах (один для Подрядчика, второй для Субподрядчика), который оформляется  в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления о готовности, на основании  которого, в соответствии с п. 5.6 Договора, Субподрядчик вправе сформировать и  предъявить Подрядчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Таким образом, причиной  отсутствия подписанных Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки  о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 явилось неправомерное  бездействие Истца.  

В части требований по возмещению давальческих материалов ответчик ссылается  на следующие обстоятельства.  

Все полученные Субподрядчиком материалы полностью были израсходованы в  ходы выполнения работ, что подтверждается видами и объемами выполненных работ,  указанных в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2.  

Субподрядчик своевременно приступил к выполнению Работ, что  подтверждается в частности письмом Истца в адрес АО «Политехстрой» о  предоставлении возможности ввоза инструментов Ответчика 28.07.2022 и выполнял  Работы с учетом предоставления Подрядчиком строительной готовности мест  

производства работ, предоставления давальческих материалов и технической  документации.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, оценив  представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в  полном объеме на основании нижеследующего.  

В соответствии с положениями статей 307, 702, 708, 711, 720, 740, 746 и 753  Гражданского кодекса Российской Федерации определено обязательственное  правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных  обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить  в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика  уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой,  согласно статье 328 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Статьями 307 – 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом,  односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

Абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации  определено, что подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и  конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Иное может быть  установлено законом, иными правовыми актами или предусмотрено договором.  

Из положений статей 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  и разъяснений, содержащихся в пункте 8 информационного письма Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор  практики разрешения споров по договору строительного подряда» следует, что  обязанность заказчика по оплате работ наступает после сдачи ему результата работ,  если иное не предусмотрено договором; надлежащим доказательством выполнения  работ, их стоимости по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется  актом, подписанным обеими сторонами. (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В силу пункта 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может  отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.  

Аналогичная норма содержится в пункте 2 статьи 715 Гражданского кодекса  Российской Федерации, согласно которому, если подрядчик не приступает  своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько  медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе  отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Согласно пункту 2 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации  прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в  случаях, предусмотренных законом или договором.  

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,  что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не  предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской  Федерации право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного  уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской  Федерации, иными правовыми актами или договором.  

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при  расторжении договора обязательства сторон прекращаются.  

Абзацем 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации  определено, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из  сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не  исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное  исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие  неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или  договором либо не вытекает из существа обязательства.  

31.08.2022 для выполнения работ Подрядчиком переданы места производства  работ на отметке +7.000 по осям 1-17/АЛ-Мл и на отметке +15.000, +18.000 Север по  осям 1-17/Ал-Мл. Иные участки работ Субподрядчику не передавались.  

Из пояснений истца усматривается, что даже на тех участках, которые были  переданы для производства работ, на момент расторжения Договора, работы не были  выполнены.  

Условиями Договора субподряда № 13/07/22 БРАЙТНЕТ от 13.07.2022  Субподрядчик обязан незамедлительно известить Подрядчика о выполнении работ по  этапам и в целом, немедленно после их завершения. Под этапом работ Стороны  подразумевают объем работ, выполненных в течение 1 календарного месяца.  

При завершении этапа работ Субподрядчик в течение 1 рабочего дня направляет  Подрядчику (ответственному представителю) по электронной почте уведомление о  готовности произвести сдачу-приемку выполненного этапа работ.  

За время действия договора Субподрядчик не направлял уведомления о  готовности произвести сдачу-приемку выполненного этапа работ.  

Согласно п.п. 1.2. ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации  Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него  указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые создают  невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика о  вышеуказанных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему или им к  заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.  

Субподрядчик не предупреждал о том, что ему не хватает материалов для  выполнения работ.  

Подрядчик предоставил Субподрядчику материалы в объеме, необходимом для  выполнения работ.  

Согласно п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик  обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо,  после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а  также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с  учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.  

Ответчик не предоставил отчет об израсходованном материале. 

Согласно п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик  обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при  обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных  недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

Условиями договора предусмотрен порядок сдачи результата работ. 

Согласно п. 10.1 Договора, результатом исполнения условий по настоящему  Договору со стороны Подрядчика является сдача выполненных работ, перечисленных в  п. 1.1. настоящего Договора Государственным надзорным органам и передача  совместно с Генеральным подрядчиком результата выполненных работ в  эксплуатацию.  

В рамках исполнения обязательств по Договору Подрядчик должен был  выполнить комплекс монтажных и пуско-наладочных работ систем АПС, АПЗ, СОУЭ,  СКУД1, СКУД2, СКУД3, СОТС1, СОТС2, СОТС3.  

Указанные системы не были смонтированы. 

Согласно п.1.4 Договора работы по Договору считаются выполненными при  условии сдачи полного комплекта исполнительной документации, согласованной и  подписанной с представителями строительного контроля, технического и авторского  надзора Государственного Заказчика по Контракту, Генподрядчика, Подрядчика.  

Согласно части 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации  качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям  договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям,  обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не  предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат  выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами,  указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и  в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором  использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного  использования результата работы такого рода.  

Ответчик не представил в материалы дела доказательств выполнения работ  согласно условиям и порядку, предусмотренному договором.  

Ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие факт выполнения  и сдачи работ надлежащим образом.  

Статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица  (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных  средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу  соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления  ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм  следует квалифицировать как неосновательное обогащение.  

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит  удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества  ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное  обогащение произошло за счет истца.  

Для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт  получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом,  иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер.  

Поскольку ответчиком не представлены доказательства возврата суммы  перечисленного аванса, равно как и выполнения работы по спорному договору, суд  приходит к выводу, что на его стороне образовалось неосновательное обогащение в  виде неотработанного аванса на сумму 1 200 000 руб.  

Требование о взыскании стоимости давальческого материала в размере 699  223,93 руб. также подлежит удовлетворению как обоснованное.  

Истцом также заявлены ко взысканию проценты за пользование чужими  денежными средствами в размере 75 318,54 руб. за период с 25.11.2022 по 05.06.2023.  

Пунктом 1 статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  определено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом,  пеней), под которой признается определенная договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на  сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за  пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель  

узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения  денежных средств.  

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование  чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения  от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или  сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к верному  выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.  

 Кроме того, доводы апелляционной жалобы отклоняются в связи со следующим.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта  выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное  письмо N 51).  

Процесс сдачи-приемки работ, которые должен был выполнить Ответчик,  сторонами согласован в разделе 5 Договора.  

Согласно п. 5.2 Договора Субподрядчик обязан незамедлительно известить  Подрядчика о выполнении работ по этапам и в целом, немедленно после их  завершения. Под этапом работ Стороны подразумевают объем работ, выполненных в  течение 1 (одного) календарного месяца.  

Согласно п. 1 ст. 753 ГК РФ Заказчик, получивший сообщение подрядчика о  готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ  либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан  немедленно приступить к его приемке.  

За время действия договора Субподрядчик ни разу не направлял уведомления о  готовности произвести сдачу-приемку выполненных работ.  

Согласно п. 1.6 Договора работы по Договору считаются выполненными при  условии сдачи полного комплекта исполнительной документации, согласованной и  подписанной с представителями строительного контроля, технического и авторского  надзора Государственного Заказчика по Контракту, Генподрядчика, Подрядчика  

Ни акты, ни исполнительная документация во время действия Договора в адрес  Ответчика не поступали. Исполнительная документация, представленная Ответчиком в  материалы дела, содержит только одну подпись - подпись Ответчика. Находясь на  объекте Ответчик имел возможность сдать работы не только подрядчику (если бы они  были выполнены), но и представителям государственного Заказчика и подписать  исполнительную документацию.  

Абзацем 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации  определено, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из  сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не  исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное  исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие  неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или  договором либо не вытекает из существа обязательства.  

Вопреки доводам Ответчика судом первой инстанции дана правовая оценка  документам, представленным в материалы дела.  

Согласно п. 2.4. Договора работы, не вошедшие в Ведомость договорных  единичных расценок (Приложение № 1) по настоящему Договору, но технологически  необходимые для производства Работ, выполняются Субподрядчиком за свой счет.  

Следовательно, документы, представленные Ответчиком в материалы дела, не  подтверждают выполнение работ Ответчиком в рамках исполнения обязательств по  Договору.  

Кроме того, в рамках исполнения обязательств по Договору Ответчик должен  был выполнить комплекс монтажных и пуско-наладочных работ систем АПС, АПЗ,  СОУЭ, СКУД1, СКУД2, СКУДЗ, СОТС1, СОТС2, СОТСЗ. Указанные системы не были  смонтированы.  

Согласно п. 5 ст. 753 ГК РФ в случаях, когда это предусмотрено законом или  договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по  договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные  испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном  результате предварительных испытаний.  

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором,  результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать  свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми  требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного  договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено,  для обычного использования результата работы такого рода. Ответчик не представил в  материалы дела доказательств выполнения работ согласно условиям и порядку,  предусмотренному договором. Ответчиком не представлены доказательства,  подтверждающие факт выполнения и сдачи работ надлежащим образом.  

Судом первой инстанции исследованы все доказательства, имеющие значение для  дела, и каждому из них дана должная правовая оценка.  

В ходе исполнения обязательств по Договору Истец передал Ответчику материал  для проведения работ. Данный факт подтверждается накладными, представленными в  материалы дела. Стоимость давальческого материала подтверждается накладными.  

Истец обращает внимание суда, что Ответчик не оспаривал сумму давальческого  материала в суде первой инстанции. Кроме того, Истцом в материалы дела были  представлены документы, подтверждающие стоимость давальческого материала. Факт  выдачи давальческого материала не подтверждает факта выполнения работ.  

Согласно п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик  обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо,  после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а  также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с  учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.  

Ответчик не предоставил отчет об израсходованном материале ни во время  действия Договора, ни в судебное заседание.  

Ввиду того, что отчет об израсходованном материале Ответчиком не представлен,  доказательства возврата материалов Истцу Ответчиком также отсутствуют,  следовательно, Ответчик в силу статьи 1102 ГК РФ должен компенсировать стоимость  давальческого материала.  

Таким образом, доводам заявителя апелляционной жалобы судом первой  инстанции дана соответствующая правовая оценка, оснований для переоценки, которой  у апелляционной коллегии не имеется.  

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены  судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся  в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц,  выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в  материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном  применении судом норм материального и процессуального права, у суда  апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК  РФ, для отмены либо изменения принятого по делу решения.  

руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2023 по делу № А40286710/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья: И.А. Титова  

Судьи: Е.М. Новикова   П.А. Порывкин  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.