АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-13981/2021

г. Ставрополь

02 июня 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола секретарем Проскуряковой А.О., рассмотрел в судебном заседании исковое  заявление управления жилищно-коммунального хозяйства Георгиевского городского округа  Ставропольского края, ИНН 2625801946, ОГРН 1132651033129, г. Георгиевск, к обществу с  ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, г.  Ставрополь, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Ступ», ИНН 2626009236,  г. Ессентуки, временного управляющего общества с ограниченной ответственностью  «Гермес-Строй» Ляхова А.П., об обязании ответчика безвозмездно устранить недостатки  выполненных работ в рамках гарантийных обязательств.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», ОГРН  1152651015440, ИНН 2635211022, г. Ставрополь, в течение одного месяца со дня вступления  решения в законную силу в рамках исполнения гарантийных обязательств по  муниципальному контракту № 0121200004719001575_305505/1 от 21.01.2020 произвести за  свой счет следующие работы в отношении 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по  ул. Вехова, 22а в г. Георгиевске:  

- на большой парковке по периметру пролома асфальтобетонного покрытия удалить  деформированную часть асфальтобетонного покрытия, придать месту выполнения работ в  покрытии прямоугольную форму с четкими вертикальными краями, произвести выемку  временно уложенной в промоину песчано-гравийной смеси, устроить подстилающие и  выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением, произвести  розлив вяжущих материалов, устроить покрытие толщиной 6 см из горячих  асфальтобетонных смесей;  

- на малой парковке по периметру пролома асфальтобетонного покрытия удалить  деформированную часть асфальтобетонного покрытия, придать месту выполнения работ в  покрытии прямоугольную форму с четкими вертикальными краями, произвести выемку  временно уложенной в промоину песчано-гравийной смеси, устроить подстилающие и  выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением, произвести  розлив вяжущих материалов, устроить покрытие толщиной 6 см из горячих  асфальтобетонных смесей;  

- устранить недостатки отмостки здания, в виде просадки, контр уклона, трещины в  местах стыка отмостки с МКД по всему периметру здания, а именно в местах просадки  отмостки - выполнить демонтаж отмостки, уплотнить грунт, восстановить отмостку с  уклоном 2 см. на 1 м., в местах отмостки, имеющих контр уклон, либо уклон менее 2 см. на 1  м. - устроить бетонную стяжку, обеспечивающую указанные параметры уклона, заполнить  трещины в местах стыка отмостки с цоколем МКД полиуретановым герметиком;  

- в кв. 40 закрепить самонарезающими шурупами с уплотнительной шайбой из ЭПДМ  и окрашенной головкой металлопрофиль отделки балкона;  

- произвести демонтажные работы деформированного помещения электрощитовой,  демонтировать отмостку под электрощитовой, уплотнить грунт, залить отмостку с  применением армирования на данном участке отмостки;  

- произвести монтажные работы помещения электрощитовой с применением анкерной  связки со стеной МКД;  

- провести монтажные работы кровли; - установить входную металлическую дверь. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», ОГРН  1152651015440, ИНН 2635211022, г. Ставрополь, в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», ОГРН  1152651015440, ИНН 2635211022, г. Ставрополь, в пользу автономной некоммерческой  организации «Независимая экспертно-консультационная служба», ОГРН 1172651008540,  ИНН 2634099794, г. Ставрополь, 90 000 руб. расходов за проведение судебной экспертизы.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова