ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-71510/2023

Дело № А40-224892/22

г. Москва

22 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления оглашена: 16 ноября 2023 года

Полный текст постановления изготовлен: 22 ноября 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семёновой А.Б.,

судей Тетюка В.И.,  Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтарОйл» на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2023 по делу № А40-224892/22

по иску (заявлению) общества с ограниченной ответственностью «СтарОйл» (140005, Московская обл., Люберцы г.о., Люберцы г., Люберцы г., ФИО2 ул., д. 20А, этаж/помещ 2/2, офис 239, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2018, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания "Экостройдом" (127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Огородный пр-д, д. 5, стр. 6, эт/ком 2/54, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.03.2022, ИНН: 

<

***>) о взыскании 4 100 000 руб.,

по встречному иску ООО ПСК "Экостройдом" к ООО «СтарОйл» о взыскании 433 207 руб. 60 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3, Крамаренко Олег Юрьевич

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО5 по доверенности от 01.08.2022,

от ответчика: ФИО6 по доверенности от 01.12.2022,

от третьих лиц: 1. не явился, извещен, 2. ФИО4 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «СтарОйл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО ПСК "Экостройдом" 4 100 000 руб., уплаченных по договору от 03.08.2022 № 5/22 поставки строительных материалов, 200 000 руб. судебных издержек.

ООО ПСК "Экостройдом" обратилось со встречным иском о взыскании с ООО «СтарОйл» 433 207 руб. задолженности по договору от 03.08.2022 № 5/22 поставки строительных материалов.

Решением от 02.10.2023 в удовлетворении исковых требований ООО «СтарОйл» отказано. Встречный иск удовлетворен.

Не согласившись с судебным актом, ООО «СтарОйл» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит суд отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2023 по делу № А40-2244892/2022 полностью и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании апелляционного суда ООО «СтарОйл» поддержало апелляционную жалобу. ООО ПСК "Экостройдом" по доводам апелляционной жалобы возражало, просило оставить решение без изменения.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор № 5/22 от 03.08.2022 на поставку строительных материалов, авансированных покупателем ООО «СтарОйл» на сумму 4 100 000 руб.

Согласно доводам ООО «СтарОйл», существенные условия договора поставки сторонами согласованы не были, фактически договор не исполнялся.

Согласно доводам ООО ПСК "Экостройдом" материалы на общую сумму 4 533 207 руб. 60 коп. в рамках спорного договора были изготовлены/поставлены и использованы для строительства фундаментов двух домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адево, КП «Дольче Вита», участок № 481.

Как установлено судом первой инстанции, 20.07.2022 между ФИО3 (заказчик) и ФИО4 (поставщик/подрядчик) заключен договор строительного подряда №Д 0001/2022, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по строительству двух жилых домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево, КП «Дольче Вита», а заказчик - по созданию необходимых условий для выполнения подрядчиком работ, своевременному принятию результата работ и их оплате. Содержание, объем и этапы работ были согласованы между ФИО3 и ФИО4 в графике производства и финансирования работ.

Поскольку для строительства двух жилых домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево, КП «Дольче Вита» заказчику необходимы были строительные материалы, со стороны подрядчика заказчику была предоставлена компания - поставщик материалов для строительства - ООО ПСК «Экостройдом».

Между ООО «СтарОйл» и ООО ПСК "Экостройдом" 03.08.2022 заключен договор поставки строительных материалов № 5/22 (далее - договор), необходимых для строительства двух жилых домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево, КП «Дольче Вита».

Согласно п. 1.1 договора поставки ООО ПСК "Экостройдом" обязуется поставлять в собственность ООО «Старойл» строительные материалы в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями договора, а покупатель обязался принимать и оплачивать их соответствии с условиями договора.

В соответствии с п. 5.1, п. 5.3 договора покупатель передает поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день. На основании полученной заявки поставщик не позднее следующего дня после ее получения, оформляет спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемых товаров и доводит информацию до покупателя. В случае отсутствия отказа от поставки товара на указанных в спецификации условиях в течение 3 дней с момента ее доведения, условия поставки товара считаются принятыми покупателем.

Сторонами в ходе электронной переписки были согласованы наименование, адрес поставки строительных материалов, их количество и цена. Руководствуясь п. 8.1, п. 8.2 договора, поставщик выставил в адрес покупателя счет на оплату № 3 от 03.08.2022 на перечисление авансового платежа за поставку строительных материалов на сумму 4 100 000 руб., который был оплачен ООО «СтарОйл» платежным поручением № 8 от 04.08.2022.

Исполняя обязательства по поставке, поставщик отгрузил строительные материалы по месту строительства двух домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево, КП «Дольче Вита», на общую сумму в размере 2 856 487 руб. 60 коп. Факт поставки строительных материалов на указанную сумму подтверждается электронной перепиской между сторонами и универсальными передаточными документами № 7-11 от 01.09.2022, которые до настоящего времени не подписаны со стороны покупателя.

Строительные материалы фактически отгружены и использованы для строительства фундамента двух домов по адресу: Московская область. Истринский район, д. Адуево, КП «Дольче Вита». Факт отгрузки и использования строительных материалов для строительства фундамента двух домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево. КП «Дольче Вита» подтверждается письмом компании ООО «Торговая компания «Бикра» (ИНН 

<

***>) № 30 от 30.11.2022 и приложенными к нему счетами-фактурами № 2287 от 10.08.2022 и № 2403 от 18.08.2022; письмом компании ООО «Трубкомплект» (ИНН 

<

***>) в соответствии с которым данная компания поставляла товар по вышеуказанному адресу; товарно-транспортными накладными от 02.09.2022 ООО «Гарант-Бетой» (ИНН 

<

***>) № 14586, № 14542, № 14547, № 14554, № 14555, № 14559, № 14543.

Из изложенного следует, что 70% полученного аванса было освоено по состоянию на 01.09.2022, о чем покупателю было сообщено в письме № 10/22 от 06.09.2022. 13.09.2022 поставщик в письме № 15/22 сообщил поставщику, что два комплекта блоков для строительства двух домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево, КП «Дольче Вита» из полистеролбетона изготовлены и готовы к отгрузке. Стоимость указанных блоков составила 1 676 720 руб.

Согласно п. 7.1 договора поставки покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения, а по качеству не позднее 2-х календарных даты получения.

Таким образом, общая стоимость произведенных ответчиком и отгруженных/ готовых к отгрузке строительных материалов для строительства двух домов по адресу: Московская область, Истринский район, д. Адуево. КП «Дольче Вита» составляет 453 3207 руб. 60 коп. (2856487 руб. 60 коп. + 1 676 720 руб.). Следовательно, с учетом перечисленного аванса, задолженность ООО «СтарОйл» перед ООО ПСК "Экостройдом" составляет 433 207 руб. 60 коп.

В условиях, когда обязательства по договору со стороны поставщика исполнены в полном объеме, у покупателя отсутствуют основания для отказа от исполнения договора со ссылкой на положения п. 3 ст. 487 ГК РФ.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что работы по строительству домов должны были выполняться до конца сентября 2022. Работы, а также заказанная продукция, заказчиком фактически принимались, поставщик готовился к последующей отгрузке. Указанные обстоятельства не позволяют квалифицировать полученные ООО ПСК "Экостройдом" денежные средства в качестве неосновательного обогащения.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела и конкретных обстоятельствах, доводы лиц, участвующих в деле правильно оценены, выводы сделаны при правильном применении норм действующего законодательства.

Все доводы и аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, обстоятельств дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу                                  части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2023 по делу № А40-224892/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                            А.Б. Семёнова

 

Судьи                                                                                                    В.И. Тетюк

 

Е.В. Бодрова