АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-19840/2024

г. Владивосток

17 июня 2025 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Шипуновой О.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "МПК "МЫСОВОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Акционерному обществу "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ИНН 

<

***>) в срок до 29.12.2025 осуществить выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору с обществом с ограниченной ответственностью "МПК "МЫСОВОЙ" (ИНН 

<

***>) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 23-830 от 22.05.2023, в том числе:  

- осуществить строительство двух ЛЭП 10 кВ отпайкой от существующей ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ № 2,15 ПС 110/10 кВ Подъяпольск до проектируемой ТП 10/0,4 кВ;  

- осуществить строительство двух воздушных ЛЭП 10 кВ кВ общей длинной не менее 3,5 км изолированным проводом с сечением не менее 50 мм2;  

- осуществить замену трансформаторов тока в ячейках № 2,15 ПС 110/10 Подъяпольск на трансформаторы ТЛО-10, 200/5, 0,5S;  

- осуществить реконструкцию двух ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ № 2,15 ПС 110/10 кВ Подъяпольск монтажом узлов подключения; - осуществить монтаж четырех разъединителей на концевых и отпаечных опорах ЛЭП 10 кВ фидера 10 кВ № 215 ПС 110/10 кВ Подъяпольск;  

- осуществить строительство ТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА на границе земельного участка заявителя (ООО «МПК «Мысовой»);  

- осуществить организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;  

- осуществить мероприятия по фактическому присоединению объекта («нефтебаза», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

...> м на восток от ул. Зеленая, 6, кадастровый помер земельного участка 25:24:000000:395) заявителя (ООО «МПК «Мысовой») к электрическим сетям.  

Взыскать с акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МПК "МЫСОВОЙ" (ИНН 

<

***>) 1 426 099 рублей 99 копеек неустойки, неустойку за просрочку исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 23-830 от 22.05.2023 из расчета 0, 1 % от общего размера платы за технологическое присоединение по договору в размере 22 282 812 рублей 28 копеек за каждый день просрочки, начиная с 18.06.2025 по день фактического исполнения обязательства, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 158 561 рубль.  

Взыскать с акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МПК "МЫСОВОЙ" (ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 1 500 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 30.12.2025 года и по день исполнения решения суда. В остальной части требований отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МПК "МЫСОВОЙ" из федерального бюджета 71 862 рубля государственной пошлины, оплаченной платежным поручением от 12.09.2024 № 170.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья О.В. Шипунова