АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-12618/2020  « 15 » декабря 2020 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном дело заседании по исковому заявлению  казенного предприятия Воронежской области «Специализированная  эксплуатационная служба управления делами Воронежской области»,  г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Много камня», г.Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 30.10.2020;  от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен;  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Много камня»,  г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30  (тридцати) календарных дней с момента вступления решения в законную  силу выполнить гарантийные обязательства по контракту № 382 от 03  сентября 2019, а именно в целях устранения недостатков выполнить работы в  соответствии с расчетов объемов работ:  

 №пп 

 № Наименование 

Ед. изм.  

Кол.по смете 

1 2 

3 

4 

1 

Устройство временных защитных ограждений: вертикальных  

 м2 

19 

Ткань баннерная световозвращающая 440 гр/м2  

м2 

21,85 

2 

Изоляция поверхностей пленкой полиэтиленовой  

 м2 

12,1 

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 

м2 

13,915 

3 

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300  

 мЗ 

1,2 

4 

Обеспыливание поверхности 

м2 

4,03 

5 

Огрунтовка бетонных поверхностей: первый слой  

 м2 

4,03 

Грунтовка «Бетоконтакт», КНА УФ 

кг 

1,0075  

6 

Демонтаж каркаса изоляции: из сетки  

м2 

4,03 

7 

Устройство на плоских и  криволинейных поверхностях каркаса  изоляции: из сетки  

м2 

4,03 

Сетка плетеная из проволоки диаметром  3 мм оцинкованная, 50x50 мм  

м2 

4,2315  

8 

Устройство стяжек: бетонных толщиной до 300 мм  

 м2 

4,03 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)  

 мЗ 

1,233 

9 

Демонтаж покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.  

 м2 

4,03 

10  

Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.  

 м2 

4,03 

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм  

 м2 

4,03 

Клей плиточный «Юнис Гранит» 

кг 

38,69 

Затирка «Старатели» (разной цветности)  

т 

0,0028  

11  

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.), первый слой  

 м2 

4,03 

12  

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.),  

 м2 

4,03 

последующий слой 

Покрытие Ager (мокрый камень/защита/антиграффити) 1л Тепах  

 шт. 

1 

13  

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300  

 мЗ 

0,3 

14  

Устройство бетонных ступеней с установкой опалубки и армированием  

 мЗ 

0,3 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)  

 мЗ 

0,306 

15  

Демонтаж каркаса изоляции: из сетки  

м2 

2,38 

16  

Ус1тройство на плоских и  криволинейных поверхностях каркаса  

м2 

2,38 

изоляции: из сетки 

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм  

 м2 

2,499 

17  

Огрунтовка бетонных поверхностей: первый слой  

 м2 

2,38 

Грунтовка «Бетоконтакт», КНА УФ 

кг 

0,595 

18  

Демонтаж облицовки ступеней гранитными плитами  

 м2 

2,38 

19  

Облицовка ступеней гранитными плитами  

м2 

2,38 

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм  

 м2 

2,4276  

Клей плиточный «Юнис Гранит» 

кг 

22,85 

Затирка «Старатели» (разной цветности) 

т 

0,0017  

20  

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.), первый слой  

 м2 

2,38 

21  

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.), последующий слой  

 м2 

2,38 

Покрытие Ager (мокрый камень/защита/антиграффити) 1л Тепах  

 шт. 

1 

22  

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  

 м2 

5 

23  

Демонтаж основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок  

 м2 

8,2 

24  

Уст2ройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок  

 м2 

8,2 

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм  

 м2 

8,856 

25  

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен  

м2 

8,2 

26  

Огрунтовка фасадов 

 2 

8,2 

Грунтовка глубокого проникновения фасадная  

л 

2,05 

27  

Демонтаж облицовки стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3  

 м2 

м8,2 

28  

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4  

 м2 

8,2 

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, 

 м2 

6,94 

накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм  

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм  

 м2 

1,24 

Клей плиточный «Юнис Гранит» 

кг 

78,72 

Затирка «Старатели» (разной цветности)  

т 

0,0057  

29  

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.), первый слой  

 м2 

8,2 

30  

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.), последующий слой  

 м2 

8,2 

Покрытие Ager (мокрый камень/защита/антиграффити) 1л Тепах  

 шт. 

1 

31  

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  

 м2 

1,5 

32  

Демонтаж основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок  

 м2 

1,5 

33  

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок  

 м2 

1,5 

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0мм, без покрытия, 50x50 мм  

 м2 7,

62 

34  

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен  

м2 

1,5 

35  

Огрунтовка фасадов 

м2 

1,5 

Грунтовка глубокого проникновения фасадная 

л 

0,375 

36  

Демонтаж облицовки стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3  

 м2 

1,5 

37  

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4  

 м2 

1,5 

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм  

 м2 

1,5 

Клей плиточный «Юнис Гранит» 

кг 

14,4 

Затирка «Старатели» (разной цветности)  

т 

0,0011  

38  

Нанесение защитных многокомпонентных  покрытий на поверхности: гладкие (гранит и  т.д.), первый слой  

м2 

1,5 

39  

Нанесение защитных многокомпонентных  покрытий на поверхности: гладкие (гранит и т.д.), последующий слой  

м2 

1,5 

Покрытие Ager (мокрый камень/защита/антиграффити) 1л Тепах  

 шт. 

1 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Много  камня», г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  казенного предприятия Воронежской области «Специализированная  эксплуатационная служба управления делами Воронежской области»,  г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по  оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Е.С. Завидовская